Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-100471/2019

25 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания до перерыва в судебном заседании - секретарем судебного заседания ФИО1, после перерыва - помощником судьи Кассиным В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ" (350911, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: закрытое акционерное общество "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (191036, Санкт-Петербург город, улица 6-я Советская, 21/2, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 01.10.2018

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 13.05.2019

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ" (далее – Корпорация) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к закрытому акционерное общество "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (далее – Трест) о взыскании 8 550 064,80 руб. задолженности по договору субподряда от 25.02.2016 № 00000000022150140002/14/423-10 (изменен на № 00000000000730171834/14/423-16; далее – Договор).

Представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве.

В судебном заседании объявлен перерыв. 

После перерыва судебное заседание продолжено. Представитель ответчика после перерыва в судебное заседание не явился.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Корпорацией (субподрядчиком) и Трестом (подрядчиком) заключен Договор, по условиям которого субподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема работ, подготовить предусмотренную Договором эксплуатационную документацию и исполнительную документацию, а подрядчик обязуется принять результат работ и уплатить договорную цену.

Согласно п. 14.2 Договора описание и объемы работ и требования к ним приведены в приложении № 1. Объем работ включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:

а) разработка и согласование подрядчиком (при необходимости также согласование и получение заключения в экспертных, государственных, и других надзорных органах) ППР (проект производства работ), соответствующего положениям «МДС 12-81.2007. методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

b) проверку и подтверждение качества рабочей документации, выполненной проектировщиком в соответствии с условиями Договора на проектирование;

c)  электромонтажные работы, включая, общестроительные, специальные и иные строительные работы, необходимые для выполнения субподрядчиком своих обязательств по Договору;

d) технический надзор за выполнением работ;

e) приобретение (самостоятельно и от своего имени) и передача в собственность подрядчику оборудования (включая запасные части), включая его погрузку, транспортировку, перевозку, хранение, разгрузку, сертификацию, монтаж;

f) приобретение (самостоятельно и от своего имени) материалов для включения в состав работ в порядке и на условиях, определенных Договором, в том числе их закупка, транспортировка, разгрузка, погрузка, хранение, сертификация и использование для выполнения работ;

g) обучение персонала заказчика;

h) обязательства, предусмотренные приложениями к Договору.

В соответствии с п. 14.3. Договора объем и виды работ, подлежащих выполнению, определяются Договором и приложениями к нему, технической документацией, а также обязательными техническими правилами и применимым правом. Субподрядчик обязан выполнить также сопутствующие работы. 

В силу п. 35.1. Договора оборудование переходит в собственность подрядчику в момент подписания подрядчиком товарной накладной ТОРГ-12 на объекте, подготовленной субподрядчиком.

Согласно п. 53.2. Договора до начала окончательной приемки, в срок не позднее 20 рабочих дней, субподрядчик должен представить подрядчику комплект эксплуатационной документации и оперативных схем на русском языке, провести инструктаж персонала и исполнительную документацию на выполненные работы в полном объеме.

До передачи субподрядчиком подрядчику комплекта эксплуатационной и исполнительной документации акт окончательной приемки не может быть подписан сторонами.

Непредставление, равно как и передача не в полном объеме или с любыми недостатками субподрядчиком подрядчику исполнительной или иной документации, предусмотренной Договором, если передача такой документации предусмотрена Договором, или применимым правом в качестве обязательства субподрядчика, дает право подрядчику не оплачивать работы до момента передачи такой документации надлежащего качества и в полном объеме, при этом, при задержке оплаты по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, ответственность, предусмотренная п. 78.1. Договора в отношении подрядчика не применяется.  

В дополнительном соглашении от 19.12.2017 стороны изменили редакцию п. 69.2. Договора, определив, что с 09.10.2017 платежи за фактически выполненные этапы работ будут осуществляться на основании выставленных счетов субподрядчика на 100% суммы выполненных этапов работ и фактически подтвержденных прочих работ затрат субподрядчика, предъявленных субподрядчиком к оплате по п. 69.2. Договора за минусом удержаний в размере 5% суммы счета субподрядчика и зачета аванса в размере 95% от суммы каждого счета, предъявленного к оплате субподрядчиком согласно п. 69.2. Договора до тех пор, пока сумма удержаний аванса не составит 100% суммы выплаченных авансовых платежей.

В силу п. 69.3. Договора (в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2017) для получения платежа, предусмотренного п. 69.2. Договора, субподрядчик до 20 числа отчетного месяца предоставляет на согласование подрядчику Общий журнал работ по форме КС-6. После согласования с подрядчиком Общего журнала работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца субподрядчик направляет следующие оформленные надлежащим образом документы:

- счета субподрядчика на 100% стоимости выполненных объемов работ с указанием, что оплате подлежит 95% суммы счета и 5% гарантийного удержания;

- акта приемки выполненных этапов работ по форме в Приложении № 2 к дополнению от 01.02.2017, исполнительную документацию;

- счета-фактуры на 100% стоимости выполненных работ;

– исполнительную документацию, указанную в статье 43 договора.

В случае представления материалов и оборудования подрядчиком субподрядчику, субподрядчик также представляет копии актов формы ОС-15 и отчет об использовании оборудования подрядчика за отчетный период. 

По пункту 69.15 договора (в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2017) субподрядчик оплачивает услуги подрядчика, связанные с представлением технической документации, координации работ, выполняемых подрядчиком, и другие услуги в размере 5% от стоимости работ, выполняемых субподрядчиком. Услуги подряда оформляются актом сдачи-приемки оказанных услуг за текущий месяц. Оплата подрядных услуг может быть произведена зачетом встречных однородных требований.

Стороны в дополнительном соглашении от 29.09.2017 № 7 согласовали ориентировочную стоимость работ на объекте в размере 64 276 604,55 руб. 

Трест перечислил по договору 50 000 000 руб. платежным поручением от 23.05.2017 № 2165.

Субподрядчик, ссылаясь на задолженность подрядчика по договору на сумму 8 550 064,81 руб., направил претензию от 15.04.2019 № 15/07 с требованием оплатить долг.

Отказ Треста удовлетворить данное требование послужил основанием для обращения Корпорации в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

В письме от 17.10.2018 Трест подтвердил получение 24.08.2018 от Корпорации актов формы КС-2 и справок формы КС-3 на общую сумму 64 249 105,04 руб., которые подрядчик подписал и возвратил субподрядчику.

В материалы дела представлены подписанные сторонами акты формы КС-2 от 31.08.2018 на сумму 360 352,64 руб. и от 24.08.2018 на сумму 9 290 911,90 руб., акт о технической приемке выполненных работ от 31.08.2018, отчет о расходовании давальческих материалов по объекту, акт сдачи-приемки генподрядных услуг от 24.08.2018 и 31.08.2018, реестры передачи Тресту исполнительной документации по объекту, а также акты о зачетах генподрядных услуг.

Корпорация выставила Тресту счета от 31.08.2018 на оплату 342 335,01 руб. и 8 826 366,30 руб. (за вычетом 5% генподрядных услуг)

Сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов, исходя из которого по состоянию на 31.12.2018 задолженность Корпорации перед Трестом по спорному договору составляет 10 165 607,92 руб.

Как следует из сертификатов от 29.01.2019 и 15.03.2019, представленных истцом в материалы дела, Служба государственного строительного надзора Республики Крым удостоверяет соответствие законченного строительством спорного объекта. 

Названные сертификаты выданы на основании актов готовности объекта к эксплуатации.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требование Корпорации об оплате работ в сумме 8 550 064,80 руб. подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

взыскать с ЗАО «ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ» 8 550 064,81 руб. задолженности 65 750 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.