﻿ 

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

(дополнительное) 

 

№ 17АП-3873/2019-ГК

г. Пермь

20 мая 2020 года

Дело № А50-13196/2017

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 20 мая 2020 года.

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Дружининой Л.В.,

судей                                           Гребенкиной Н.А., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моор О.А., 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании вопрос о принятии дополнительного постановления по апелляционной жалобе ответчика,

общества с ограниченной ответственностью  «Сомикс»,

на решение  Арбитражного суда Пермского края 

от 04 февраля 2019 года

по делу № А50-13196/2017,

принятое судьей Султановой Ю.Т.

по иску  муниципального образования Краснокамский муниципальный район в лице Администрации Краснокамского муниципального района Пермского района (ОГРН 1025901845661, ИНН 5916006578) 

к обществу с ограниченной ответственностью управляющая строительная компания «Сомикс» (ОГРН 1035900842064, ИНН 5905224800), 

третьи лица: государственное краевое автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Пермского края» (ОГРН 1025900912938, ИНН 5904103908),  муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Ледовый» (ОРГН 1155958012913, ИНН 5916029134),

об обязании устранить выявленные недостатки и строительные дефекты в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу, 

 

установил:

Муниципальное образование Краснокамский муниципальный район в лице администрации Краснокамского муниципального района Пермского района (далее – администрация, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью компания «Сомикс» (далее – ООО, общество «Сомикс», ответчик) об обязании в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить выявленные недостатки и строительные дефекты в рамках гарантийных обязательств по договору №150 на строительство крытого ледового катка с искусственным льдом от 03.03.2013, а именно: 

- восстановить герметичность кровли на объекте - крытый каток с искусственным льдом на 500 мест, назначение: нежилое, 1-2 - этажное, общая площадь 5 225,6 кв. м, адрес (месторасположение) объекта: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 56;

- восстановить работу системы охлаждения ледового поля на объекте - крытый каток с искусственным льдом на 500 мест, назначение: нежилое, 1-2 - этажное, общая площадь 5 225,6 кв. м, адрес (месторасположение) объекта: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 56;

- наладить и опробировать систему вентиляции раздевалок и сушилок на объекте - крытый каток с искусственным льдом на 500 мест, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 5 225,6 кв. м., адрес (месторасположение) объекта: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 56.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены государственное краевое автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Пермского края», Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Ледовый» (далее – третьи лица).

До принятия судом решения по настоящему делу истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) неоднократно уточнял исковые требования (в части перечня работ).

Решением суда от 04.02.2019 исковые требования удовлетворены. На общество «Сомикс» возложена обязанность в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить выявленные недостатки и строительные дефекты в рамках гарантийных обязательств по договору № 150 на строительство крытого ледового катка с искусственным льдом от 03.06.2013 на объекте: крытый каток с искусственным льдом на 500 мест, назначение: нежилое, 1 - 2-этажное, общая площадь 5 225,6 кв.м, адрес (месторасположение) объекта: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 56, на основании специально разработанного проекта, а именно: 

- восстановить герметичность кровли, выполнить швы кровельных сендвич-панелей в соответствии с проектом и утвержденных альбомом технических решений изготовителя ООО «Компания Металл Профиль» в осях здания 1-16/А-К - 4 964 метров погонных; 

- восстановить проектное ограждение крыши, узлы крепления усилить и обработать герметиком, выполнить косоуры в соответствии с проектом в осях здания 1-16/А-К - 180 метров погонных; 

- заменить водосточные желоба в осях здания 1-16/А-К - 5 метров погонных; 

- выполнить систему прогрева организованного водоотвода с кровли в осях здания 1-16/А-К - 240 метров погонных; 

- очистить покрытие от следов плесени и протечек, обработать антисептиком в осях здания 5-16/А-К - 700 метров квадратных; 

- на участках с отслоением огнезащитного покрытия с металлических конструкций очистить их от продуктов коррозии, обработать преобразователем коррозии, вновь зачистить и обработать огнезащитным составом в осях здания 5-16/А-К - 200 метров квадратных;

- выполнить монтаж и наладку недостающего вентиляционного оборудования для устранения несоответствий, указанных в приложении 4 технического отчета № 06-09-01/17Э по результатам обследования систем инженерного обеспечения (вентиляции) здания МАУ «Спортивный комплекс «Ледовый», находящегося по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Большевистская, 56 лит Е, а именно: 

- установить крышные КРОС 6-5,6 в количестве 6 штук;

- выполнить реконструкцию вентиляции зала ледовой арены с заменой оборудования для устранения несоответствий по воздухообмену данного помещениями в осях 5-16/А-К;

- привести тепловлажностный и вентиляционный режим в соответствие действующим нормам в осях здания 1-16/А-К; 

- привести отмостку в соответствие с действующими нормами в осях здания 1-16/А-К - 223 метров квадратных. 

На ответчика возложена обязанность по окончании работ по устранению выявленных недостатков и строительных дефектов передать муниципальному образованию Краснокамский муниципальный район в лице администрации Краснокамского муниципального района результаты выполненных работ по акту приема-передачи. 

Кроме того в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения в пользу муниципального образования Краснокамский муниципальный район в лице администрации Краснокамского муниципального района присуждена денежная компенсация в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый день неисполнения обществом «Сомикс» судебного акта со дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 1 просительной части искового заявления, до полного исполнения решения суда. 

Муниципальному образованию Краснокамский муниципальный район в лице администрации Краснокамского муниципального района предоставлено право осуществить соответствующие действия за счет общества «Сомикс» со взысканием с него необходимых расходов в случае, если общество «Сомикс» не исполнит решение суда в течение 30 календарных дней со дня вступления его в законную силу.

Дополнительным решением от 17.12.2018 с общества «Сомикс» в пользу истца взыскано  170 000 руб. расходов по оплате экспертизы.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2020  решение Арбитражного суда Пермского края от 04.02.2019 изменено, резолютивная часть судебного акта изложена в следующей редакции:

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сомикс» в течение 30 календарных дней с момента вступления  решения суда  в законную силу безвозмездно устранить  выявленные недостатки и строительные дефекты в рамках гарантийных обязательств по договору №150 на строительство крытого ледового  катка с искусственным льдом от 03.06.2013 на объекте: крытый каток с искусственным льдом на 500 мест, назначение: нежилое, 1-2- этажное, общая площадь 5225,6 кв.м., адрес объекта: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 56, на основании специально разработанного проекта, а именно:

- восстановить проектное ограждение крыши, узлы крепления усилить  и обработать герметиком, выполнить косоуры в соответствии с проектом в осях здания 1-16/А-К- 180 метров погонных;

- заменить водосточные желоба в осях здания 1-16/А-К-5 метров погонных;

- очистить покрытие  от следов  плесени и протечек, обработать  антисептиком в осях здания 5-16/А-К- 700 метров квадратных;

- на участках с отслоением огнезащитного покрытия с металлических конструкций очистить их от продуктов  коррозии, обработать  преобразователем  коррозии, вновь зачистить и обработать огнезащитным  составом в осях здания 5-16/А-К-200 метров квадратных;

- привести отмостку в соответствие с действующими нормами  в осях здания 1-16/А-К- 223 метров квадратных.

По окончании работ по устранению выявленных недостатков и строительных дефектов передать муниципальному образованию  Краснокамский  муниципальный район в лице администрации Краснокамского муниципального района результаты выполненных работ по акту приема- передачи.

В целях побуждения  к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание  соответствующего исполнения присудить в пользу  муниципального образования  Краснокамский муниципальный район в лице администрации Краснокамского муниципального района денежную компенсацию в размере 2000 руб. за каждый день неисполнения  обществом с ограниченной ответственностью «Сомикс» судебного акта со дня, следующего за днем истечения установленного срока.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сомикс»  в пользу муниципального образования  Краснокамский муниципальный район в лице Администрации Краснокамского муниципального района  Пермского края 170000 руб. судебных расходов по оплате экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сомикс» в пользу автономной некоммерческой организации «Экспертное бюро «Флагман» 5000 руб. в качестве оплаты за повторную судебную строительную экспертизу.

Взыскать с муниципального образования  Краснокамский муниципальный район в лице Администрации Краснокамского муниципального района  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сомикс» 3000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 178 АПК РФ суд вправе принять дополнительное решение  в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

Согласно просительной части уточненного искового заявления, принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ (т.8 л.д.74-75), истец просил предоставить муниципальному образованию Краснокамский муниципальный район в лице администрации Краснокамского муниципального района право осуществить соответствующие действия за счет общества с ограниченной ответственностью «Сомикс» со взысканием с него необходимых расходов в случае, если общество с ограниченной ответственностью «Сомикс» не исполнит решение суда в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу.   

Однако вышеуказанное требование истца при принятии постановления от 06.03.2020 судом апелляционной инстанции не разрешено, в связи с чем определением апелляционного суда от 12.03.2020  назначено судебное заседание для судебного разбирательства по вопросу о принятии  апелляционным судом дополнительного постановления на 06.04.2020.

Определением апелляционного суда от 13.04.2020 дата и время проведения судебного заседания по рассмотрению вопроса о принятии дополнительного постановления по делу №А50-13196/2017 перенесены на       с учетом Указов  Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

В судебное заседание апелляционного суда, открытое 14.05.2020, участвующие в деле лица не явились. 

Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам. 

Защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом, в частности, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре (ст.12 ГК РФ). Избрание способа защиты нарушенного права, формулирование предмета и основания иска, является исключительным полномочием истца (ст.4, 41, 44, 125 АПК РФ). 

Особенности изложения решения арбитражного суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, определены ст.174 АПК РФ, предусматривающей, в частности, что по соответствующего рода требованиям арбитражный суд может указать в решении, что истец вправе осуществить соответствующие действия за счет ответчика со взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока (часть 3). 

Однако применение части 3 ст.174 АПК РФ при вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, возможно при условии, что истец, заявляя соответствующее требование о взыскании денежных средств в случае неисполнения решения, обосновал величину соответствующих расходов. 

Соответствующий подход к применению ч.3 ст.174 АПК РФ  приведен в п.13 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения". 

В рассматриваемом случае истец, заявляя о праве осуществить соответствующие действия за счет ответчика со взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, доказательств, обосновывающих величину соответствующих расходов, арбитражному суду не представил, что исключает возможность удовлетворения соответствующего искового требования. 

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что поскольку исполнение судебного решения по настоящему делу зависит от воли должника, постольку истец в случае неисполнения ответчиком решения суда вправе обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения судебного акта в порядке ст.324 АПК РФ, в частности, о взыскании в его пользу денежных средств, необходимых для осуществления им мероприятий в целях исполнения принятого по делу судебного акта. 

Руководствуясь статьями 110, 178, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 04 февраля 2019 г. в части удовлетворения требований о предоставлении муниципальному образованию Краснокамский муниципальный район в лице администрации Краснокамского муниципального района права осуществить соответствующие действия за счет общества с ограниченной ответственностью «Сомикс» со взысканием с него необходимых расходов в случае, если общество с ограниченной ответственностью «Сомикс» не исполнит решение суда в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу, отменить.

В удовлетворении требований в указанной части отказать.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края. 

 

Председательствующий

 

Судьи 

 

Л.В. Дружинина

 

Н.А. Гребенкина 

 

И.О. Муталлиева