АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-247/2025

г. Владивосток

24 июня 2025 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Зайцевой Л.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Патрокл» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Мастерстрой-ДВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ 

третьи лица – акционерное общество «Технология Управления», общество с ограниченной ответственностью «Бикор»  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Мастерстрой-ДВ» (ИНН 

<

***>) устранить недостатки работ, выполненных по договору строительного подряда № Д-1-07-2018 от 05.07.2018 работ, а именно безвозмездно в течение 120 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу в выполнить ремонт строительных конструкций фасада здания и устранить недостатки Объекта - многоквартирного жилого дома № 35 по ул.Феодосийская в г.Владивостоке Приморского края в соответствии с утвержденным истцом (обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Патрокл») проектом по ремонту строительных конструкций фасада здания.  

В случае неисполнения решения суда по настоящему делу в части устранения недостатков в установленный судом срок взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастерстрой-ДВ» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Патрокл» (ИНН 

<

***>) судебную неустойку за неисполнение решения суда размере 4 000 рублей за каждый день неисполнения по день фактического исполнения судебного акта.  

Во взыскании судебной неустойки в остальной части отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастерстрой-ДВ» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Патрокл» (ИНН 

<

***>) 2 600 000 рублей расходов по экспертизе, 153 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

 Исполнительные листы выдаются после вступления решения суда по ходатайству взыскателя.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  

Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

 Судья Зайцева Л.В.