АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-49392/23-134-274

г. Москва

03 апреля 2024 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У. Г., 

рассмотрев в судебном заседании (с учетом перерыва с 27 марта 2024 года по 03 апреля  2024 года) дело по исковому заявлению:  

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (115569, 

<

...>, эт 1 пом 31, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 10.10.2003, ИНН: 

<

***>)  

ответчик: Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере  природопользования по г. Москве и Калужской Области (117105, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.10.2005,  ИНН: 

<

***>)  

о взыскании задолженности в размере 9 783 700 руб. 52 коп., неустойки в виде пени в  размере 2 058 490 руб. 59 коп., неустойки в виде пени с 09 сентября 2023 года по день  фактической оплаты исходя из расчета 1/300 за каждый день просрочки, с учетом  уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ;  

по встречному иску: 

Межрегионального Управления Федеральной Службы по надзору в сфере  Природопользования по г. Москве и Калужской Области (ИНН: 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (ИНН: 

<

***>) о  взыскании пени за просрочку исполнения обязательств в размере 1 854 023 руб. 59 коп.,  штрафа за неисполнение 105 позиций сметы в размере 525 000 руб., штрафа за каждый  факт неисполнения обязательств технического задания в размере 3 064 501 руб. 80 коп.,  штрафа за непредоставление банковской гарантии в размере 581 744 руб. 59 коп.  

при участии в судебном заседании: 

от истца по первоначальному иску: ФИО1, (паспорт, доверенность № 18 от 03  февраля 2024 года, диплом);  

от ответчика по первоначальному иску: ФИО2, (паспорт, доверенность №  102 от 14 августа 2023 года, диплом);  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в  сфере природопользования по г. Москве и Калужской Области (ИНН: 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (ИНН:  

<

***>) задолженность в размере 3 651 471 руб., а также расходы по оплате  государственной пошлины в размере 24 203 руб.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (ИНН:  

<

***>) в пользу Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору  в сфере природопользования по г. Москве и Калужской Области (ИНН: 

<

***>)  неустойку в размере 1 461 480 руб. 46 коп., штраф в размере 5 000 руб., штраф в  размере 510 750 руб. 30 коп.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  Произвести зачет встречных требований.  

С учетом зачета, Взыскать с Межрегионального Управления Федеральной  службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской Области  (ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Ремотделстрой» (ИНН: 

<

***>) 1 674 510 руб. 24 коп., а также расходы по оплате  государственной пошлины в размере 24 203 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (ИНН:  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  21137 руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья: Е.В. Титова