307/2017-64291(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-5928/2017

город Вологда

15 июня 2017 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести изменения в Государственный контракт от 10.02.2016 № А-1/16,  заключенный между публичным акционерным обществом междугородной и  международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 

<

***>) и  казенным учреждением Вологодской области «Центр обеспечения  региональной безопасности» (ОГРН 

<

***>), изложив Приложение № 3  к Контракту «График исполнения Государственного контракта» в следующей  редакции: График исполнения государственного контракта на создание  автоматизированной системы «Аппаратно-программный комплекс  «Безопасный город» для пилотных муниципальных образований Вологодской  области: города Вологды, города Череповца и Вытегорского муниципального  района.  

 №  

п/ п  

Наимено- 

вание  

Объем обязательств  

Срок исполнения  

этапа  

Исполнение обязательств Подрядчиком 

1 

- Техническое и рабочее проектирование: 

В течение 300  

разработка технорабочего проекта на 

календарных дней  

Этап № 1  

создание Системы в соответствие с 

с даты подписания  

требованиями ГОСТ 34.201-89  

Контракта 

2 

- Поставка передвижных фоторадарных и 

В течение 70 

мобильных комплексов автоматической  

календарных дней  

Этап № 2  

фиксации нарушений ПДД (пункты 2.3. и 

с даты подписания  

2.4. раздела 7.1. Технического задания)  

Контракта 

3 

- Поставка и монтаж вычислительного  

В течение 540  

Этап № 3  

оборудования подсистемы 

календарных дней  

автоматической фиксации нарушений  

ПДД, печати и конвертования (пункт 5  раздела 7.1. Технического задания);  

- Проведение пуско-наладочных работ  вычислительного оборудования  

подсистемы автоматической фиксации  нарушений ПДД, печати и  

конвертования; 

- Организация канала передачи данных,  стыковка с сетями УМВД (раздел 7.1.  Технического задания)  

с даты подписания  

Контракта 

4 

- Поставка и монтаж стационарных  

В течение 300  

комплексов автоматической фиксации  

календарных дней  

нарушений ПДД (пункт 2.1. и 2.2.  

с даты подписания  

раздела 7.1. Технического задания);  

Контракта 

Этап № 4  

- Проведение пуско-наладочных работ  

стационарных комплексов 

автоматической фиксации нарушений  

ПДД 

5 

- Поставка и монтаж оборудования,  

В течение 540  

устанавливаемого в рамках  

календарных дней  

модернизации сетей видеонаблюдения  

с даты подписания  

(пункты 4.1. и 4.2. раздела 6.4.2  

Контракта 

Технического задания); 

- Проведение пуско-наладочных работ с  

оборудованием подсистемы  

видеонаблюдения; 

- Поставка и монтаж оконечных  

устройств КМОС (раздел 6.4.4.  

Технического задания); 

- Проведение пуско-наладочных работ  

оконечных устройств КМОС; 

Этап № 5  

- Поставка и монтаж устройств систем  

комплексного информирования и  

оповещения населения для г. Вологды и  

Вытегорского муниципального района  

(раздел 6.4.3. Технического задания);  

- Проведение пуско-наладочных работ  

устройств систем комплексного  

информирования и оповещения  

населения для г. Вологды и  

Вытегорского муниципального района;  

- Поставка и монтаж вычислительного  

оборудования ПАК ЕЦОР (раздел 9.3.  

Технического задания); 

- Проведение пуско-наладочных работ 

вычислительного оборудования ПАК  ЕЦОР;  

- Создание программно-технических  средств ПАК ЕЦОР (разделы 4, 5, 6  

Технического задания) 

Исполнение обязательств Заказчиком 

1 

Производится Заказчиком Подрядчику в  

с 01.12.2016 г. по  

размере 25 % (Двадцать пять) процентов  

31.12.2016 г.  

1 платеж  

от цены настоящего Контракта,  

указанной в пункте 6.1. настоящего  

Контракта 

2 

Производится Заказчиком Подрядчику в  

с 01.12.2017 г. по  

размере 25 % (Двадцать пять) процентов  

31.12.2017 г.  

2 платеж  

от цены настоящего Контракта,  

указанной в пункте 6.1. настоящего  

Контракта 

3 

Производится Заказчиком Подрядчику в  

с 01.12.2018 г. по  

размере 25 % (Двадцать пять) процентов  

31.12.2018 г.  

3 платеж  

от цены настоящего Контракта,  

указанной в пункте 6.1. настоящего  

Контракта 

4 

Производится Заказчиком Подрядчику в  

с 01.12.2019 г. по  

размере 25 % (Двадцать пять) процентов  

31.12.2019 г.  

4 платеж  

от цены настоящего Контракта,  

указанной в пункте 6.1. настоящего  

Контракта 

Возвратить публичному акционерному обществу междугородной и  

международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 640 рублей  77 копеек, уплаченную платежным поручением от 22.12.2016 № 411810  (платежное поручение остается в материалах дела).  

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия судебного акта.  

Судья Н.Ю. Курпанова