АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-11420/2018

г. Оренбург

19 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена       10 сентября 2019 года

В полном объеме решение изготовлено        19 сентября 2019 года

Арбитражный суд  Оренбургской области в составе судьи Вишняковой А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бобковой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «ВоронежГеоРесурс», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Челябинск

к обществу с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Медногорск Оренбургской области

о взыскании 3 269 882 руб. 94 коп.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: ФИО1, доверенность от 09.10.2018, сроком на 1 г., паспорт.

от ответчика: ФИО2, доверенность от 12.04.2019, сроком по 20.04.2021, паспорт.

Общество с ограниченной ответственностью «ВоронежГеоРесурс» обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» с исковым заявлением о взыскании 3 269 882 руб. 94 коп., из которых 2 720 368 руб. 50 коп. компенсация издержек на демобилизацию по договору подряда № 1 на выполнение буровых работ с целью геологического изучения Еланского месторождения от 16.03.2016, договору подряда № 4 на выполнение буровых работ с целью геологического изучения Еланского месторождения от 16.03.2016, 549 514 руб. 44 коп. неустойка за период с 28.06.2018 по 05.08.2019 (с учетом уточнений т. 3 л.д. 1-8, т. 5 л.д. 13, 53).

Истец в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивал в полном объеме по следующим основаниям. Обстоятельство, что спорное буровое оборудование было задействовано  по  пяти  договорам (т. 3 л.д. 1),  а  компенсация издержек на демобилизацию указанного оборудования предусмотрена только спорными двумя договорами, не влияет на существо спора и размер  компенсации, поскольку   работы по всем договорам  проводились на одном объекте  и с  одним оборудованием.  Действия договоров  -  плавно переходящие  одни в другие или параллельное по датам действие договоров. Довод  ответчика о необходимости  демобилизации  истцом  оборудования  раннего по дате заключения  договора  и  повторный завоз оборудования с его  монтажом  по следующим договорам (не предусматривающим возмещение расходов по демобилизации оборудования), с учетом  иногороднего нахождения лиц,  территориальной удаленности, непрерывности процесса и действия указанных договоров, при этом, в  непрерывности производственного процесса был  заинтересован прежде всего сам ответчик, истец считает необоснованным. Напротив,  необоснованные и неоправданные  демонтаж и повторный монтаж одного и того же оборудования в рамках последовательного действия всех договоров нарушало бы права  обеих сторон и причинило бы  значительные убытки самому ответчику в отношении производства работ, поскольку демобилизационный процесс длится около 3 месяцев, как и монтаж соответственно. В связи с чем, доводы ответчика формальны и несостоятельны, противоречат  существу рассматриваемых обязательств и потребности самого ответчика.  Ответчиком не ставился вопрос о необходимости  демобилизации  оборудования после каждого договора. В  предъявляемой истцом сумме  компенсации  издержек на демобилизацию  речь идет только о том оборудовании, которое задействовано в   двух спорных, фигурируемых по исковому заявлению договорах (это же оборудование участвовало в иных договорах). Иного (лишнего) оборудования, которое бы не было задействовано именно по двум спорным договорам,  в иск не включено, что не оспаривается самим  ответчиком. Разницы  в стоимости  издержек  на демобилизацию  оборудования (цены услуг привлекаемых для демобилизации лиц)  в зависимости  от  того,  была бы она проведена по ранее заключенному договору или по  факту  завершения всех работ на объекте, как  по настоящему спору, нет, поскольку  общий (средний) период демобилизации  составляет до 3 месяцев (как осуществлено по факту) и что подтверждено   письменными ответами (коммерческими предложениями)  сторонних, не заинтересованных лиц, представленными истцом в дело. Каждая сумма  издержек по демобилизации  подтверждается первичным документом. Истцом не предъявлено ни  одной  неподтвержденной или необоснованной позиции.  Истец, добросовестно выполнив работы для ответчика,  понес фактические расходы на демобилизацию оборудования, возмещение которых  предусмотрено и согласованно самим  ответчиком в договорах.     

Ответчик в судебном заседании, отзывах на исковое заявление (том 2 л.д. 1-3, 51-52, том 4 л.д. 21-22, 79-80, 128-131, 139-141) против удовлетворения требований возражал по следующим основаниям:

 - в силу положений пункта 1.3 договоров подряда № 1 и № 4 для выполнения дополнительных видов или объемов работ, не предусмотренных договором, стороны должны были заключить дополнительное соглашение, чего произведено не было;

- согласно пункту 2.4.1 договора подрядчик вправе привлекать к выполнению отдельных видов работ специализированные сервисные организации по письменному согласованию с заказчиком, чего также сделано не было; 

- демобилизация произведена только в 2018 году, хотя работы по договору подряда № 1 выполнены 25.05.2016, следовательно, истец затянул срок демобилизации оборудования, увеличив тем самым ее стоимость;

Истец в судебном заседании, возражениях на отзыв ответчика и дополнительных пояснениях (том 2 л.д. 56-58, том 3 л.д. 1-8) против доводов ответчика возражал, пояснив, что приобретение билетов на физических лиц осуществлялось в рамках агентского договора, заключенного с ООО «Тревел Менеджмент Консалтинг» и указанные суммы отображены в отчетах агента, направленных ответчику; расходы на оплату заработной платы работников ООО «Сотрудничество» выставлены к возмещению в связи с заключением с указанным обществом договора на выполнение демонтажных работ, готовность возместить затраты по заработной плате выражена руководителем ответчика; услуги автокрана понадобились для загрузки бурового и вспомогательного оборудования, для чего был заключен договор с ООО «Аренда спецтехники»; транспортно-экспедиционные услуги, оказанные по договору ООО «УралТрансКом», по сути, есть не что иное, как непосредственно перевозка груза до производственной базы истца. Договоры со всеми указанными юридическими лицами и оплата по ним ранее ответчику не направлялись, поскольку не запрашивались обществом «Медногорский медно-серный комбинат». Между тем, сервисные сборы на приобретение и выписку железнодорожных билетов отражены в отчетах агента, направленных ответчику. В отношении довода ответчика о необходимости согласования с ним дополнительных видов работ и привлечения специализированных организаций, истцом отмечено, что указанное согласование требуется при выполнении работ, являющихся предметом договоров, а демобилизация не является предметом договоров подряда, следовательно на нее не распространяются указанные ограничения. Договоры не содержат указания на обязательность проведения работ по демобилизации исключительно силами ООО «ВоронежГеоРесурс». Проведение демобилизации не в 2016 году (после выполнения работ в рамках договора подряда № 1), а в 2018 году обусловлено тем, что оборудование истца использовалась для выполнения работ для ответчика в рамках нескольких договоров, последовательно по времени. Отображение НДС в перечне затрат от 03.05.2018 отдельной строкой обусловлено тем, что некоторые фирмы, оказывающие услуги ООО «ВоронежГеоРесурс», находятся на упрощенном режиме налогообложения и НДС не начисляют, однако сам истец находится на общем режиме налогообложения и при поступлении денежных средств от ответчика должен будет уплатить НДС со всей суммы.

Ходатайств о необходимости предоставления дополнительных доказательств сторонами не заявлено, в связи с чем, суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 АПК РФ.

При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ВоронежГеоРесурс» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Еланский горно-обогатительный комбинат» (заказчик) заключен договор подряда  № 1 на выполнение буровых работ с целью геологического изучения Еланского месторождения от 16.03.2016 (далее – договор подряда № 1) (том 1 л.д. 15-21), согласно которому подрядчик обязуется выполнить, а заказчик принять и оплатить буровые работы объемом бурения 19 350 погонных метров, количество скважин – 23 шт., с получением керна, промаркированного и уложенного в керновые ящики на Еланском месторождении сульфидных медно-никелевых руд, расположенном на территории Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее - участок) (п.1.1 договора).

01.04.2016 между  обществом ограниченной ответственностью «ВоронежГеоРесурс» и обществом ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» заключено соглашение к договору подряда № 1 от 16.03.2016 о замене стороны по договору, по условиям пункта 1 которого в связи с присоединением общества с ограниченной ответственностью  «Еланский ГОК» к обществу с ограниченной ответственностью «ММСК» в силу правопреемства, заменить в тексте договора наименование заказчика общество с ограниченной ответственностью «Еланский ГОК» на  общество с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат».

В силу п.3 соглашения, расчеты по договору с 01.04.2016 будут осуществлять правопреемник общества с ограниченной ответственностью  «Еланский ГОК» - общество с ограниченной ответственностью «ММСК», в установленный договором срок.

В случае необходимости выполнения дополнительных видов или объемов работ, не предусмотренных договором, стороны заключают дополнительное соглашение к договору, в котором оговаривают виды, стоимость и порядок оплаты таких работ и условия их выполнения (пункт 1.3 договора).

В соответствии с пунктом 2.4.1 подрядчик вправе привлекать к выполнению отдельных видов работ специализированные сервисные организации по письменному согласованию с заказчиком. При этом ответственность за выполнение работ субподрядчиком в полном объеме несет подрядчик.

В пункте 3.1 стороны договорились, что общая стоимость договора включает в себя: -стоимость работ.

-компенсацию издержек подрядчика на демобилизацию.

Согласно пункту 3.2 стоимость работ определяется, исходя из стоимости бурения одного погонного метра 9 493.09 (девять тысяч четыреста девяносто три руб. 09 коп), в т.ч. НДС 18% - 1 448.1 руб. (одна тысяча четыреста сорок восемь рублей 10 копеек) и фактически выполненного объема работ. Стоимость бурения скважин составит 183 691 291.5 (сто восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча двести девяносто один) рубль. 50 копеек в т.ч. НДС 18 % - 28 020 705, 48 (двадцать восемь миллионов двадцать тысяч семьсот пять) руб. 48 копеек

Пунктом 2.1.3 стороны согласовали обязанность заказчика оплатить подрядчику расходы на вывоз буровых установок, вспомогательного оборудования, автотранспорта и материалов с участка работ до производственной базы подрядчика, расположенной в Челябинской области (далее - демобилизация).

В обязанности подрядчика пунктом 2.3.15 вменена необходимость после окончания работ вывезти с месторождения буровую технику и оборудование, все лишние материалы, отходы.

Пунктом 3.3 предусмотрено, что компенсация издержек подрядчика на демобилизацию производится по фактическим затратам, подтвержденными первичными документами, но не более чем 6 182 860 (шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят руб., в т.ч. НДС 18 % - 943 148.14 (девятьсот сорок три тысячи сто сорок восемь рублей 14 копеек).

Согласно п.5.1 договора оплата выполненных работ производится заказчиком ежемесячно на основании соответствующего подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

Затраты на демобилизацию компенсируются заказчиком после завершения работ по договору (как после выполнения всего объема работ по договору, так и в случае досрочного прекращения работ, за исключением случаев, предусмотренных договором) в течение 10 рабочих дней с момента получения заказчиком документов, подтверждающих несение затрат подрядчиком и их суммы, а также счета на оплату (пункт 5.2 договора).

В соответствии с пунктом 6.1 срок начала выполнения работ – в течение 2 дней с даты подписания договора; срок окончания работ – не позднее 8 месяцев с даты подписания договора.

За просрочку платежей заказчику начисляется неустойка в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки и оплачивается в случае предъявления подрядчиком претензии (п. 7.2. договора).

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (пункт 11.1).

Подрядчиком обязательство по указанному договору исполнено в полном объеме, в подтверждение чего представлены акты сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 21.04.2016, № 2 от 25.05.2016 (том 2 л.д. 4-5), подписанные заказчиком без замечаний и возражений.

Общая стоимость выполненных работ по договору подряда № 1 составила 168 587 785 руб. 31 коп.

Оплата по договору подряда № 1 произведена ответчиком в полном объеме, в подтверждение чего в материалы дела представлены платежные поручения (том 2 л.д.6-16). При этом часть стоимости работ в сумме 59 087 785 руб. 30 коп. взыскана решением Арбитражного суда Оренбургской области от 28.10.2016 по делу № А47-7100/2016.

Также между обществом с ограниченной ответственностью «ВоронежГеоРесурс» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» (заказчик) заключен договор подряда  № 4 на выполнение буровых работ с целью геологического изучения Еланского месторождения от 16.03.2016 (далее – договор подряда № 4) (том 2 л.д. 122-128), согласно которому подрядчик обязуется выполнить, а заказчик принять и оплатить буровые работы объемом бурения 1 000 погонных метров, количество скважин – 2 шт., с получением керна, промаркированного и уложенного в керновые ящики (далее - работы) на Еланском месторождении сульфидных медно-никелевых руд, расположенном на территории Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее - участок) (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость буровых работ определяется исходя из стоимости бурения одного погонного метра -       10 340 руб., в том числе налог а добавленную стоимость 1 577 руб. 29 коп. и фактически выполненного объема работ. Стоимость бурения скважин составит 10 340 000 руб., в том числе налог а добавленную стоимость 1 577 288 руб. 13 коп.

В случае необходимости выполнения дополнительных видов или объемов работ, не предусмотренных договором, стороны заключают дополнительное соглашение к договору, в котором оговаривают виды, стоимость и порядок оплаты таких работ и условия их выполнения (пункт 1.3 договора).

В соответствии с пунктом 2.4.1 подрядчик вправе привлекать к выполнению отдельных видов работ специализированные сервисные организации по письменному согласованию с заказчиком. При этом ответственность за выполнение работ субподрядчиком в полном объеме несет подрядчик.

Согласно пункту 3.1 стоимость работ определяется, исходя из стоимости бурения одного погонного метра 10 340 (десять тысяч триста сорок рублей), в т.ч. НДС 18% - 1 577,29 руб. (одна тысяча пятьсот семьдесят семь рублей 29 копеек) и фактически выполненного объема работ. Стоимость бурения скважин составит 10 340 000 (десять миллионов триста сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 1 577 288,13 (один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь) руб. 13 копеек.

Пунктом 2.1.3 стороны согласовали обязанность заказчика оплатить подрядчику расходы на вывоз буровых установок, вспомогательного оборудования, автотранспорта и материалов с участка работ до производственной базы подрядчика, расположенной в Челябинской области (далее - демобилизация).

В обязанности подрядчика пунктом 2.3.15 вменена необходимость после окончания работ вывезти с месторождения буровую технику и оборудование, все лишние материалы, отходы.

Согласно пункту 5.1 договора, оплата выполненных работ производится заказчиком ежемесячно на основании соответствующего подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 календарных  дней с даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

Затраты на демобилизацию компенсируются заказчиком после завершения работ по договору (как после выполнения всего объема работ по договору, так и в случае досрочного прекращения работ, за исключением случаев, предусмотренных договором) в течение 10 рабочих дней с момента получения заказчиком документов, подтверждающих несение затрат подрядчиком и их суммы, а также счета на оплату (пункт 5.2 договора).

В соответствии с пунктом 6.1 срок начала выполнения работ – в течение 2 дней с даты подписания договора; срок окончания работ – не позднее 8 месяцев с даты подписания договора.

За просрочку платежей заказчику начисляется неустойка в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки и оплачивается в случае предъявления подрядчиком претензии (пункт 7.2. договора).

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (пункт 11.1).

Подрядчиком обязательство по указанному договору исполнено в полном объеме, в подтверждение чего представлен акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный заказчиком без замечаний и возражений.

Оплата по договору подряда № 4 произведена ответчиком в полном объеме после подачи в отношении него искового заявления о взыскании задолженности. Указанный факт подтверждается решением Арбитражного суда Оренбургской области от 20.02.2017 по делу № А47-11151/2016 (страница 3 решения суда).

Истцом для проведения демобилизации оборудования, используемого при исполнении обязательств по договорам подряда № 1 и № 4, привлечены иные организации, с которыми заключены договоры и оформлены первичные документы.

Между ООО «ВоронежГеоРесурс» (принципал) и ООО «Тревел Менеджмент Консалтинг» (агент) 01.02.2017 заключен агентский договор № 02/1403, в соответствии с пунктом 1.1 которого агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени и за счет принципала юридические и иные предусмотренные договором действия по заключению договоров на оказание туристских и иных услуг по организации деловых поездок сотрудников и/или клиентов и/или партнеров принципала (том 2 л.д. 59-73).

В соответствии с пунктом 1.4 договора агент в целях надлежащего оказания услуг вправе привлекать других агентов, оставаясь ответственным за действия последних перед принципалом.

Пунктом 1.3 приложения № 4 к договору (том 2 л.д. 66) стороны согласовали, что при приобретении и выписке железнодорожных билетов агент дополнительно к стоимости билета взимает сервисный сбор (вознаграждение агента) в размере 300 рублей, включая НДС 18%.

Пункт 1.1 приложения № 4 (в редакции дополнительного соглашения от 06.02.2017 – том 3 л.д. 74) устанавливает, что в случае надлежащего оформления и приобретения железнодорожных билетов принципал возмещает агенту их фактическую стоимость и сбор универсальной финансовой системы (УФС) за процедуру оформления электронного железнодорожного билета в размере 40 рублей, включая НДС 18 %.

В соответствии с пунктом 3.1 договора расходы агента на исполнение поручения по договору возмещаются по стоимости, указанной в счете, включает агентское вознаграждение. Порядок формирования стоимости услуг, указанной в счете, определяется в соответствии с Приложениями № 3-9, являющимися неотъемлемой частью договора.

Согласно пункту 3.3 принципал перечисляет агенту денежные средства на расчетный счет агента в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента выставления агентом соответствующего счета.

Для направления работников истца к месту проведения работ и обратно осуществлялось приобретение железнодорожных билетов. Приобретение билетов производилось обществом с ограниченной ответственностью «Комплексные технологии связи» (действуя в рамках пункта 1.4 агентского договора).

В последующем для оплаты услуг по приобретению билетов обществами «Тревел Менеджмент Консалтинг» и «Комплексные технологии связи» истцу выставлены товарные накладные и счета на оплату, которые оплачены в надлежащий срок в полном объеме (том 2 л.д. 75-84).

Между ООО «ВоронежГеоРесурс» (заказчик) и ООО «Сотрудничество» (подрядчик) 04.01.2018 заключен договор подряда № 5, в соответствии с пунктом 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить, а заказчик обязуется принять и оплатить комплекс демонтажных работ на Еланском месторождении сульфидных медно-никелевых руд, расположенном на территории Новохоперского муниципального района Воронежской области (том 2 л.д. 85-89).

В пункте 1.2 договора указан перечень работ:

- демонтаж буровых агрегатов;

- извлечение станка, миксеров, насосов, емкостей для реагентов из буровых зданий;

- демонтаж полов, стен, потолка, резка буровых зданий;

- резка саней, подгонка по габаритам;

- подготовка оборудования и материалов к погрузке;

- укладка, увязка грунта;

- погрузочные работы.

Стоимость работ по договору установлена в пункте 3.1 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 06.01.2018) и составляет 2 095 000 рублей, НДС не предусмотрен.

Оплата выполненных работ производится заказчиком ежемесячно на основании соответствующего подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (пункт 5.1 договора).

В соответствии с актом выполненных работ № 5 от 31.03.2018 истцом в адрес ООО «Сотрудничество» произведена оплата всей стоимости работ, в подтверждение чего представлены платежные поручения (том 3 л.д. 90-91).

Между ООО «ВоронежГеоРесурс» (заказчик) и ООО «Горногеологический центр» (исполнитель) 20.01.2018 заключен договор № 012 возмездного оказания услуг, в соответствии с пунктом  1.1 которого заказчик поручает, а исполнитель обязуется на основании заявок заказчика за плату оказывать услуги автокрана на Еланском рудопроявлении медно-никелевых руд в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области (том 2 л.д. 92-93).

Период оказания услуг по договору: с 20.01.2018 по 01.04.2018 (пункт 1.3).

Стоимость оказания услуг установлена в пункте 3.1 и составляет 3 000 рублей за один час работы, НДС не предусмотрен.

Согласно пункту 3.3 оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 15 рабочих дней с даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Акт по договору подписан сторонами 28.02.2018 (том 2 л.д. 94), стоимость услуг составила 60 000 руб. Оплата произведена истцом платежным поручением № 186 от 27.08.2018 (том 2 л.д. 95).

Кроме того, истцу фактически оказаны услуги (без подписания договоров) следующими контрагентами:

- ООО «Аренда спецтехники» - услуги крана, транспортные услуги на общую сумму  22 800 руб. Оказание услуг оформлено универсальными передаточными документами № 122 от 20.02.2018 (том 3 л.д. 108-109), № 172 от 07.03.2018 (том 3 л.д. 112-). Оплата произведена за истца третьим лицом (ООО «УралСервис») на основании писем (том 3 л.д. 110-111, 113-114);

- ООО «УралТрансКом» - транспортно-экспедиционные услуги г. Елань Колено – г. Еманжелинск на общую сумму 920 000 руб. Оказание услуг оформлено универсальными передаточными документами, товарно-транспортными накладными. Оплата произведена частично самим истцом, частично за него третьим лицом (ООО «ЧелябГеоСервис») на основании писем (том 3 л.д. 69-101);

- ООО «Негабарит-174» - транспортные услуги по маршруту с. Елань-Колено – г. Еманжелинск на общую сумму 170 000 руб. Оказание услуг оформлено универсальным передаточным документов от 27.03.2018, транспортной накладной (том 3 л.д. 102-105). Оплата произведена в полном объеме платежным поручением № 142 от 17.08.2018 (том 3 л.д. 107). 

С целью возмещения затрат на демобилизацию истцом составлены и 25.04.2018 направлены в адрес ответчика акт № 3 сдачи-приемки выполненных работ от 18.04.2018 (том 1 л.д. 24), счет на оплату № 2 от 18.04.2018 (том 1 л.д. 26), перечень затрат (том 1 л.д. 27) и кроме того, первичные документы (поименованы в описи почтового отправления от 25.04.2018), подтверждающие факт несения расходов истца (том 1 л.д. 28-31).

После получения указанных документов общество ответчика 24.05.2018 электронным письмом сообщило о необходимости исправить дату акта № 3 сдачи-приемки выполненных работ и направить дополнительные первичные документы (том 1 л.д. 32).

Устранив замечания ответчика (дата акта исправлена с 18.04.2018 на 03.05.2018), приложив запрашиваемые документы, ООО «ВоронежГеоРесурс» направило ООО «Медногорский медно-серный комбинат» электронное письмо с вложением указанных документов и почтовое отправление с аналогичным пакетом документации (том 1 л.д. 34-41).

Ответчик электронным письмом от 04.06.2018 (том 1 л.д. 42-43) запросил дополнительно иные документы в подтверждение расходов истца. 

Запрашиваемые документы направлены обществом истца электронным письмом и почтовым отправлением с опись вложения (том 1 л.д. 44-47). Согласно почтовому уведомлению ООО «Медногорский медно-серный комбинат» получило письмо 13.06.2018 (том 1 л.д. 48).

После 13.06.2018 ответчик не обращался к истцу с просьбой представить дополнительные документы или устранить какие-либо иные недостатки для дальнейшего возмещения затрат на демобилизацию.

Поскольку оплата затрат истца не демобилизация ответчиком не произведена, ООО «ВоронежГеоРесурс» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском о взыскании долга и пени.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

        Досудебный претензионный порядок разрешения споров служит целям добровольной реализации гражданско-правовых санкций без обращения за защитой в суд. Совершение спорящими сторонами обозначенных действий после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования возникшей конфликтной ситуации еще на стадии формирования спора, то есть стороны могут ликвидировать зарождающийся спор, согласовав между собой все спорные моменты, вследствие чего отпадает необходимость в его судебном разрешении.

         Целью установления претензионного порядка разрешения спора, среди прочего, является экономия средств и времени сторон, сохранение между сторонами партнерских отношений, уменьшение нагрузки судов. При этом претензионный порядок не должен являться препятствием защите лицом своих прав в судебном порядке.

         Суду необходимо учитывать цель претензионного порядка и перспективы досудебного урегулирования спора.

         При наличии доказательств свидетельствующих о невозможности досудебного урегулирования спора, иск подлежит рассмотрению в суде (п. 4 раздела II "Процессуальные вопросы" Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2015).

          Более того, исходя из сроков рассмотрения претензии, времени нахождения искового заявления в суде, учитывая осведомленность ответчика о наличии  в его адрес притязаний, отсутствие доказательств добровольного удовлетворения требований или попыток  урегулирования спора, иск подлежит рассмотрению по существу. 

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Статья 307 ГК РФ  предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности; обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.  Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Суд, оценив представленные в материалы дела договоры подряда № 1 и № 4, действия сторон по их исполнению, принимая во внимание отсутствие возражений сторон, приходит к выводу о  заключенности договоров (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», статьи 432, 434 ГК РФ, правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 18.05.2010 № 1404/10). Договоры подряда не признаны незаключенными или недействительными в установленном законом порядке. 

Заключенные между истцом и ответчиком договоры подряда подлежат регулированию положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статьям 421, 709 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Таким образом, исходя из правового анализа нормы статьи 421 и статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации следует то, что стороны свободны в заключении договора и, соответственно, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом. 

При этом условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

В договоре подряда указывается конкретная цена выполняемых работ или порядок ее определения. Кроме того, на одни виды работ может быть указана (согласована) в договоре конкретна цена, а на другие виды работ может быть согласован порядок определения цены данных работ. Соответственно, на одни виды работ в договоре может быть согласована сторонами твердая цена, а на другие виды работ может быть согласован сам порядок определения цены таких работ, а в частности, может быть согласовано, что соответствующие работы оплачиваются по фактическим затратам (затратам, включающим те или иные расходы подрядчика).

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если вышеуказанные правила не позволяют определить содержание договора, то должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Согласно пунктам 43, 45, 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 49 от 25.12.2018 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, другими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При толковании условий договора в силу абзаца 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. 

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). 

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

По смыслу абзаца 2 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон иным образом толкование условий договора осуществляется в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия. При толковании условий договора суд с учетом особенностей конкретного договора вправе применить как приемы толкования, прямо установленные статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным правовым актом, вытекающие из обычаев или деловой практики, так и иные подходы к толкованию. В решении суд указывает основания, по которым в связи с обстоятельствами рассматриваемого дела приоритет был отдан соответствующим приемам толкования условий договора.

Исходя из вышеуказанных норм прав и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, следует то, что при рассмотрении того или иного судебного спора суд осуществляет толкование как договора в целом, так и его отдельных условий. Толкование условий договора должно осуществляться системно - то есть условия договора должны толковаться и рассматриваться судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора. При толковании условий договора судом должны приниматься во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условий договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

Согласно пунктам 1.1 договоров подряда предметом договоров являются буровые работы с определенным объемом бурения с получением керна, промаркированного и уложенного в керновые ящики (далее - работы).

Пункты 1.3 договоров действительно предписывают, что в случае необходимости выполнения дополнительных видов или объемов работ, не предусмотренных договором, стороны заключают дополнительное соглашение к договору, в котором оговаривают виды, стоимость и порядок оплаты таких работ и условия их выполнения.

Пункты 2.4.1 указывают, что подрядчик вправе привлекать к выполнению отдельных видов работ специализированные сервисные организации по письменному согласованию с заказчиком.

При этом пункты 2.1.3 договоров подряда определяют демобилизацию как расходы подрядчика на вывоз буровых установок, вспомогательного оборудования, автотранспорта и материалов с участка работ до производственной базы подрядчика, расположенной в Челябинской области.

При этом, пунктом 3.1 договора подряда № 1 (т. 1 л.д. 17) согласована общая стоимость договора:

- стоимость работ;

-  компенсация издержек подрядчика на демобилизацию.

Пунктами 5.1, 5.2  договоров предусмотрена разбивка оплат:  непосредственно за работы, являющиеся предметом договоров;   и  затраты на демобилизацию. 

То есть, исходя из системного толкования договоров, суд приходит к выводу, что необходимость согласования дополнительных видов и объемов работ, равно как и согласование с заказчиком привлечения специализированных организаций установлена волей сторон только для работ по договору, коими в силу пунктов 1.1 являются буровые работы.  Понятие демобилизации договорами выведено в отдельное толкование, не является работами по договорам, и определено как расходы подрядчика.

Таким образом, суд отклоняет доводы ответчика о необходимости предварительного согласования истцом дополнительных видов и объемов работ по пункту 1.3, равно как и письменного согласования возможности привлечения специализированных сервисных организаций при выполнении работ по демобилизации оборудования.

Техническими заданиями   демобилизация не  включена  в  перечень работ.  Очевидно, что экономический интерес в демобилизации у заказчика отсутствует, а затраты подрядчика по демобилизации являются ни чем иным, как его издержками, и по общему правилу не подлежат возмещению (пункт 2 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации – цена  договора подряда должна включать в себя компенсацию издержек подрядчика). Иное может быть предусмотрено договором в силу диспозитивности положений статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

И договор подряда № 1, и договор подряда № 4 указывают на следующий порядок компенсации расходов на демобилизацию (пункты 5.2 договоров): затраты на демобилизацию компенсируются заказчиком после завершения работ по договору (как после выполнения всего объема работ по договору, так и в случае досрочного прекращения работ, за исключением случаев, предусмотренных договором) в течение 10 рабочих дней с момента получения заказчиком документов, подтверждающих несение -  затрат подрядчиком и их суммы, а также счета на оплату.

 То есть договоры подряда, подписанные сторонами, явно свидетельствуют о том, что затраты на демобилизацию являются расходами  подрядчика, следующими после завершения  непосредственно работ по договорам. 

И стоимость затрат на демобилизацию выведена в отдельную ценовую категорию, в отношении данных затрат стороны не установили твердую цену, а лишь установили способ ее определения – по первичным документам, подтверждающим несение затрат подрядчиком и их суммы. При этом договором подряда № 1 установлена максимальная стоимость таких затрат – не более чем 6 182 860 руб. (т. 1 л.д. 17), в договоре  подряда № 4  отсутствует установленный предел (лимит) расходов по демобилизации оборудования. 

 Следовательно, истец в настоящем деле должен доказать факт несения затрат на демобилизацию и их стоимость.

Общество «ВоронежГеоРесурс» представило в материалы дела документы, подтверждающие и сам факт несения затрат перед третьими лицами, и размер затраченных средств. Доказанность данных фактов усматривается судом из следующих документов: 

Наименование контрагента

Расшифровка затрат

Сумма затрат руб.

Подтверждающие документы

ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг"

ЖД билет №70384682015276 на ФИО3. Маршрут: г. Бердяуш-Новохоперск. 

Дата отправления: 15.01.18г

2 308.4

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05.07.19 г. 

ЖД билет №70384682615486 на ФИО4. Маршрут: Челябинск –Новохоперск.

Дата отравления: 15.01.18г

2 536.8

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05.07.19 г.

ЖД билет №70384682615490 на Минх

2 536.8

Письмо ООО "Комплексные

Виталия Романовича. Маршрут: Челябинск-Новохоперск.

Дата отправления: 15.01.18г

технологии связи" № 127 от 05.07.19 г

ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг"

ЖД билет № 70384682622044 на ФИО5. Маршрут: Москва-Лиски.

Дата отправления: 15.01.2018 г.

1 332.2

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05.07.19 

Сервисный сбор за оформление билета на ФИО3

340

Агентский договор № 02/1403 от 01.02.17 г. ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг" (Приложение №4)

Сервисный сбор за оформление билета на ФИО4

340

Агентский договор № 02/1403 от 01.02.17 г. ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг" (Приложение №4)

Сервисный сбор за оформление билета на ФИО6

340

Агентский договор № 02/1403 от 01.02.17 г. ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг" (Приложение №4)

Сервисный сбор за оформление билета на ФИО5

340

Агентский договор № 02/1403 от 01.02.17 г. ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг" (Приложение №4)

ЖД билет № 71230826433974 на ФИО4 Маршрут: Новохоперск-Челябинск.

 Дата отправления:18.02.18г.

2 536.8

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05.07.19 г.

Сервисный сбор за оформление билета на ФИО4

340

Агентский договор № 02/1403 от 01.02.17 г. ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг" (Приложение №4)

ЖД билет № 71380830896566 на ФИО5 Маршрут: Лиски-Москва.

Дата отправления: 23.02.18г

1 597.6

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от

05.07.19 г.

Сервисный сбор и оформление билета на ФИО5

340

Агентский договор № 02/1403 от 01.02.17 г. ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг" (Приложение №4)

ЖД билет № 71480832701240 на ФИО7 Маршрут: Челябинск –Новохоперск.

Дата отравления: 28.02.18г

2 536.8

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05.07.19 г.

Сервисный сбор та оформление билета на ФИО7

340

Агентский договор № 02/1403 от 01.02.17 г. ООО "Тревел Менеджмент Консалтинг" (Приложение №4)

ООО Комплексные Технологии Связи"

ЖД билет № 72081515880800, на ФИО8 Маршрут: Челябинск – Новохоперск. 

Дата отправления: 23.03.18 г

2 585.8

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" №127 от 05 07.19 г

Сервисный coбop за оформление билета на ФИО8

350

Письме ООО "Комплексные технологии связи" №127 от

05.07.19 г,

ЖД билет № 72081518013781 на ФИО9 Маршрут: Челябинск - Новохоперск 

Дата отправления: 24.03.18 г

2 585.8

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05 07.19 г.

Сервисный сбор за оформление билета на ФИО9

350

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05 07 19 г

ЖД билет № 72181518251416 на ФИО3 Маршрут: Новохоперск-Бердяш.

Дата отправления: 27.03.2018г.

2 308.4

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05 07.19 г.

ЖД билет № 72181518180020 на ФИО6. Маршрут: Новохоперск-Челябинск. 

Дата отправления: 27.03.18г

2 536.8

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05.07.19 г

Сервисный сбор за оформление билета на ФИО3

350

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05 07 19 г

Сервисный сбор за оформление билета на ФИО6

350

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05 07 19 г

ЖД билет № 2281323302521 на ФИО7 Маршрут: Новохоперск-Челябинск   Дата отравления:  31.03.18г.

2 536.8

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05 07 19 г

Сервисный сбор за оформление билета на Комаровских Налью Евгеньевну

350

Письмо ООО "Комплексные технологии связи" № 127 от 05.07.19 г

Оплата указанных услуг:

 Платежные поручения – том 2 л.д. 75-84

ООО "Сотрудничество"

Демонтажные работы по договору подряда № 5 от 04.01.18. 

Общая стоимость выполнения работ – 2 095 000 р. Стоимость работ была оплачена в полном объеме В рамках настоящего дела с ответчика взыскивается часть работ в сумме 1 515 499.5 руб.  

1 515 499.50

Письмо ООО "Сотрудничество" от 

08.07.19 г № 57

Оплата: платежные поручения – том 3 л.д. 90-91.

ООО Горногеологический Центр"

Автокран для погрузки тяжелого и крупногабаритного фута

60 000.00

Письмо ООО "Горногеологический Центр" от 05.07.19 г № 65

Оплата: платежное поручение № 186 от 27.08.2018 – том 2 л.д. 95

ООО «УралТрансКом»

Перевозка буровой установки и бурового здания из п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

120 000

Письмо ООО "УралТрансКом" от 28.06.19 (товарно-транспортная накладная №2  от 14.02.18)

Перевозка буровой установки и бурового здания из п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

120 000

Письмо ООО "УралТрансКом" от 28.06.19 (товарно-транспортная накладная №3 от 14.02.18)

Перевозка двух контейнеров с буровым оборудованием из п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

120 000

Письмо ООО "УралТрансКом" от 28.06.19 (товарно-транспортная № 12 от 04.03.18)

Перевозка мачты буровою станка, саней для бурового снаряда емкостей для буровых растворов, буровой трубы из п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

120 000

Письмо ООО "УралТрансКом" от 28.06.19 (товарно-транспортная накладная № 13 от 04.03.18)

Перевозка полозьев буровых саней, емкостей для буровых растворов, геомембраны, душевой кабины, бурового оборудования из п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

80 000

Письмо ООО "УралТрансКом" от 28 06.19 (товарно-транспортная накладная № 17 от 11.03.18)

Перевозка обсадной трубы из п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

120 000

Письмо ООО "УралТрансКом" от 28 06.19 (товарно-транспортная накладная № 18 от 11.03.18)

Перевозка полозьев буровых саней, мачты бурового станка, саней вспомогательных, емкости для буровых растворов,  прицепа из п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

120 000

Письмо ООО "УралТрансКом" от 28 06.19 (товарно-транспортная накладная № 19 от 11.03.18)

Перевозка обсадной трубы и буровой трубы из п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

120 000

Письмо ООО "УралТрансКом" от 28 06.19 (товарно-транспортная накладная № 20 от 15.03.18)

Оплата оказанных услуг:

 Самим истцом и третьим лицом (ООО «ЧелябГеоСервис») – платежные поручения том 3 л.д. 69-101

ООО "Негабарит 174"

Перевозка бульдозера п. Елань-Колено до г. Еманжелинск Челябинской области 

170 000

Коммерческое предложение ООО "Негабарит-174" от 28.06.19 (товарно-транспортная накладная № 20 от 15.03.2018)

Оплата оказанных услуг:

 Платежное поручение № 142 от 17.08.2018 – том 3 л.д. 107

ООО "Аренда Спецтехники"

услуги крана от 19 02 18 г.

6 400

Письмо ООО "Аренда спецтехники'

транспортные услуги

5 000

Письмо ООО "Аренда спецтехники"

услуги крана от 06.03.18 г.

6 400

Письмо ООО "Аренда спецтехники"

транспортные услуги

5 000

Письмо ООО "Аренда спецтехники"

Оплата оказанных услуг:

 Самим истцом и третьим лицом (ООО «УралСервис») – платежные поручения том 3 л.д. 110-111, 113-114

Итого:

2 720 358, 50

Таким образом, суд считает подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца общую сумму расходов на демобилизацию оборудования, что составляет 2 720 358 руб. 50 коп. В силу того обстоятельства, что  демобилизация оборудования производилась по завершении всех работ на объекте  и  после завершения действия всех договоров,  общая сумма расходов 2 720 358 руб. 50 коп.  не превышает установленную даже одним договором подряда № 1 максимальную  стоимость затрат. 

Судом принимаются доводы истца, что проведение демобилизации не в 2016 году (после выполнения работ в рамках спорных договоров подряда), а в 2018 году обусловлено тем, что оборудование истца использовалось для выполнения работ для ответчика в рамках нескольких договоров, последовательно по времени.

Обстоятельство, что спорное буровое оборудование было задействовано  по  пяти   договорам (т. 3 л.д. 1),  а  компенсация издержек на демобилизацию указанного оборудования предусмотрена только спорными двумя договорами, не влияет на существо спора и размер  компенсации, поскольку   работы по всем договорам  проводились на одном объекте  и с  одним оборудованием. 

 Действие договоров  -  последовательно по времени.

 Довод  ответчика о необходимости  демобилизации  истцом  оборудования  раннего по дате заключения  договора  и  повторный завоз оборудования с его  монтажом  по следующим договорам (не предусматривающим возмещение расходов по демобилизации оборудования), с учетом  иногороднего нахождения лиц,  территориальной удаленности, непрерывности процесса и действия указанных договоров, при этом, в  непрерывности производственного процесса был  заинтересован прежде всего сам ответчик, является необоснованным. 

  Напротив,  необоснованные и неоправданные  демонтаж и повторный монтаж одного и того же оборудования в рамках последовательного действия всех договоров нарушало бы права  обеих сторон и причинило бы  значительные убытки самому ответчику в отношении производства работ, поскольку демобилизационный процесс длится около 3 месяцев, как и монтаж соответственно, что подтверждено, кроме  самих первичных документов по делу, представленными истцом  письменными ответами (коммерческими предложениями) сторонних, не заинтересованных  лиц. 

В связи с чем, доводы ответчика формальны и несостоятельны, противоречат  существу рассматриваемых обязательств и потребности самого ответчика.  

        На основании статей 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации   никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Ответчиком не ставился вопрос о необходимости  демобилизации  оборудования после каждого договора. 

В  предъявляемой истцом сумме  компенсации  расходов на демобилизацию  речь идет только о том оборудовании, которое задействовано в   двух спорных, фигурируемых по исковому заявлению договорах (это же оборудование участвовало в иных договорах). 

Иного (не задействованного в спорных договорах) оборудования, в иск не включено, что не оспаривается самим  ответчиком. 

Разницы  в стоимости  издержек  на демобилизацию  оборудования (цены услуг привлекаемых для демобилизации лиц)  в зависимости  от  того,  была бы она проведена по ранее заключенному договору или по  факту  завершения всех работ на объекте, как  по настоящему спору, нет, поскольку  общий (средний) период демобилизации  составляет до 3 месяцев (как осуществлено по факту) и что подтверждено   письменными ответами (коммерческими предложениями)  сторонних, не заинтересованных лиц, представленными истцом в дело. В том числе, с учетом минимизации  расходов, напротив, в отсутствие  неоднократного демонтажа, демобилизации и повторного монтажа.

Каждая сумма  издержек по демобилизации  подтверждается первичным документом. Истцом не предъявлено ни  одной  неподтвержденной или необоснованной позиции. 

 Истец, добросовестно выполнив работы для ответчика,  понес фактические расходы на демобилизацию оборудования, возмещение которых  предусмотрено и согласованно самим  ответчиком в договорах.     

Исковые требования в части суммы  расходов на демобилизацию оборудования подлежит удовлетворению в полном объеме 2 720 358 руб. 50 коп.

Истцом также заявлена ко взысканию с ответчика неустойка, предусмотренная пунктами 7.2 договоров подряда.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. 

В  силу  пункта 60  Постановления  Пленума  Верховного  Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника  уплатить кредитору определенную  денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Частью 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно принятым обязательством. 

В силу пунктов 7.2 договоров подряда № 1 и № 4 за просрочку платежей заказчику начисляется неустойка в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки и оплачивается в случае предъявления подрядчиком претензии.

В соответствии с пунктами 5.2 договоров затраты на демобилизацию компенсируются заказчиком после завершения работ по договору (как после выполнения всего объема работ по договору, так и в случае досрочного прекращения работ, за исключением случаев, предусмотренных договором) в течение 10 рабочих дней с момента получения заказчиком документов, подтверждающих несение затрат подрядчиком и их суммы, а также счета на оплату.

Истцом составлены и 25.04.2018 направлены в адрес ответчика акт № 3 сдачи-приемки выполненных работ от 18.04.2018 (том 1 л.д. 24), счет на оплату № 2 от 18.04.2018 (том 1 л.д. 26), перечень затрат (том 1 л.д. 27) и кроме того, первичные документы (поименованы в описи почтового отправления от 25.04.2018), подтверждающие факт несения расходов истца (том 1 л.д. 28-31).

После получения указанных документов общество ответчика 24.05.2018 электронным письмом сообщило о необходимости исправить дату акта № 3 сдачи-приемки выполненных работ и направить дополнительные первичные документы (том 1 л.д. 32).

Устранив замечания ответчика (дата акта исправлена с 18.04.2018 на 03.05.2018), приложив запрашиваемые документы, ООО «ВоронежГеоРесурс» направило ООО «Медногорский медно-серный комбинат» электронное письмо с вложением указанных документов и почтовое отправление с аналогичным пакетом документации (том 1 л.д. 34-41).

Ответчик электронным письмом от 04.06.2018 (том 1 л.д. 42-43) запросил дополнительно иные документы в подтверждение расходов истца. 

Запрашиваемые документы направлены обществом истца электронным письмом и почтовым отправлением с опись вложения (том 1 л.д. 44-47). Согласно почтовому уведомлению ООО «Медногорский медно-серный комбинат» получило письмо 13.06.2018 (том 1 л.д. 48).

Таким образом, истец начинает исчисление добровольного 10-дневного рабочего срока для возмещения затрат с 14.06.2018 и производит начисление неустойки с 28.06.2018 в сумме 549 514 руб. 44 коп. по состоянию на 05.08.2019.

Ответчик возражает в удовлетворении исковых требований в части пени. 

Судом учтены следующие обстоятельства.

Пунктами 5.2 договоров подряда установлено, что затраты на демобилизацию компенсируются заказчиком после завершения работ по договору (как после выполнения всего объема работ по договору, так и в случае досрочного прекращения работ, за исключением случаев, предусмотренных договором) в течение 10 рабочих дней с момента получения заказчиком -    документов, подтверждающих несение затрат подрядчиком и их суммы, а также счета на оплату.

Указанными положениями договоров на истца возложена обязанность  по  представлению   документов, подтверждающих несение затрат и их суммы. 

Данная обязанность стороны (в настоящем споре - истца) по общим правилам  материального и процессуального права  не   обусловлена   определением   ответчиком  за истца доказательной базы.

В связи с чем, довод  истца, что ответчиком не  запрашивались конкретные документы, в связи с чем, договоры с  третьими лицами и платежные  поручения об оплате  услуг по демобилизации  оборудования, представлены истцом только при  рассмотрении настоящего арбитражного дела,   окончательно при уточнении итоговой суммы долга,   судом отклоняются, поскольку бремя доказывания и подтверждения расходов по демобилизации   лежит  - на истце. Указанная обязанность корреспондируется договорами подряда.

Согласно  общим положениям  гражданского законодательства   бездействие или молчание  не свидетельствуют  о согласии (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 - по аналогии).

 То обстоятельство, что  ответчик не ответил на последнее письмо  истца о направлении  дополнительных первичных документов в обоснование  расходов по демобилизации  или не оспорил таковые,  не может  свидетельствовать о согласии  ответчика с суммой долга  и не возможности запроса  ответчиком дополнительных документов, при том, что обязанность   предоставления исчерпывающего объема документов возложена на самого истца, не лишает ответчика права оспаривания тех или иных документов. 

 Кроме того,  электронным письмом от 04.06.2018 (том 1 л.д. 42-43)   ответчик  запросил дополнительно иные документы в подтверждение расходов истца. 

Исчерпывающий объем  документов истцом  представлен в процессе рассмотрения настоящего спора, часть требований скорректировано, чем обусловлено  последнее уточнение истцом суммы долга  13.06.2019 -   2 720 368 руб. 50 коп.  (т. 5 л.д. 13, л.д. 51 на обороте).

При предоставлении истцом ответчику дополнительных первичных документов в суде ранее июня 2019, тем не менее,  само уточнение требований датировано 13.06.2019  (т. 5 л.д. 13, л.д. 51 на обороте).

Согласно пункту 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

        Таким образом, суд усматривает наличие вины обеих сторон в не своевременной оплате затрат на демобилизацию оборудования. 

        Истец не предпринял достаточных мер с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота,  для надлежащего исполнения обязательства по предоставлению исчерпывающего объема документов в подтверждение затрат на демобилизацию оборудования (данная обязанность исполнена лишь в ходе рассмотрения арбитражного дела), что повлекло  просрочку  ответчиком обязанности по оплате расходов на демобилизацию оборудования.

На основании изложенного, суд снижает размер неустойки на основании ст. 404 ГК РФ  и рассчитывает ее за период с 14.06.2019 (после окончательного уточнения истцом суммы долга, с учетом раннего получения  ответчиком всех первичных документов, в том числе, в суде) по 05.08.2019 (дата, заявленная истцом, суд не выходит за пределы исковых требований). 

Сумма неустойки после перерасчета суда составляет 72 089 руб. 77 коп. и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. В удовлетворении требования о взыскании неустойки в остальной части судом отказано.

 Согласно пунктам 71, 73, 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ). При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Оснований для уменьшения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ у суда не имеется с учетом отсутствия соответствующего мотивированного заявления ответчика.

Установленный судом размер ответственности суд считает соответствующим критерию разумности, справедливости, соразмерности последствиям нарушения обязательства, с учетом баланса прав и  интересов обеих сторон, в том числе, при сохраняющемся праве истца в отношении ответственности за последующий период.

При таких обстоятельствах, требования истца подлежат удовлетворению в частично в сумме 2 792 458 руб. 27 коп.,  из   которых 2 720 368 руб. 50 коп.  компенсация издержек на демобилизацию по договору подряда № 1 на выполнение буровых работ с целью геологического изучения Еланского месторождения от 16.03.2016, договору подряда № 4 на выполнение буровых работ с целью геологического изучения Еланского месторождения от 16.03.2016, 72 089 руб. 77 коп. пени за период с 14.06.2019 по 05.08.2019. В удовлетворении исковых требований в оставшейся части судом отказано.

В соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  при частичном удовлетворении исковых требований судебные расходы  относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. С ответчика подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины  в пользу истца в размере 31 241 руб. за минусом  суммы, подлежащей отнесению на истца, в доход федерального бюджета в размере 2 363 руб.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ВоронежГеоРесурс» удовлетворить частично.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВоронежГеоРесурс» 2 792 458 руб. 27 коп.,  из   которых 2 720 368 руб. 50 коп.  долг, 72 089 руб. 77 коп. пени, и кроме того расходы по оплате государственной пошлины в сумме 31 241 руб.

В удовлетворении исковых требований в оставшейся части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 363 руб. 

Исполнительные листы выдать истцу и налоговому органу в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области. 

Судья                                     А.А. Вишнякова