Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-100487/24-107-669

02 апреля 2025 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 25 марта 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 02 апреля 2025 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Маховых Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-100487/24-107-669 по иску АО "РОССЕТИ ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ООО "ТРАНССТРОЙ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки по договору № 515 от 05.07.20219 в размере 11 218 631,72 р., при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 26.09.2024, паспорт, представителей ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

АО "РОССЕТИ ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС" (далее – Истец, Генеральный подрядчик) обратился в суд с требованиями о взыскании с ООО "ТРАНССТРОЙ" (далее – Ответчик, Субподрядчик) неустойки по договору № 515 от 05.07.20219 в размере 11 218 631,72 р.

Ответчик на судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом, мотивированный отзыв не представил, суд на основании статьи 156 АПК РФ рассмотрел дело в его отсутствие.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор №515 от 05.07.20219 на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС (далее – Договор), согласно которому в сроки и порядке, предусмотренные Договором, Техническим Заданием и Графиком Выполнения Работ Субподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема Работ в пределах Зон ответственности Субподрядчика вместе со всей предусмотренной Договором документацией, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работ и уплатить Договорную Цену.

По условиям Договора субподряда (п. 12.3) Подрядчик принял па себя обязательство выполнить работы по монтажу Субобъекта Кабельная линия, в том числе прокладка и расключение магистрального кабеля 35 кВ и оптического кабеля в траншеи и по конструкциям по 1 очереди (Приложения №3 к ДС№1 от 25.09.2020 к Договору №515 от 05.07.2019).

Стоимость этапа работ по прокладке и расключению магистрального кабеля 35 кВ и оптического кабеля в траншеи и по конструкциям по 1 очереди составляет - 50 993 780,53 рублей, в том числе НДС (20%).

25.10.2023 письмом № 347-11/694 заказчик АО «ВетроОГК» направил Акт о выявленных дефектах оборудования в котором указано, что причиной повреждения оболочки кабеля послужило несоответствие работ по подготовке кабельной трассы, а именно выявлено наличие камней в песчаной подсыпке, что стало причиной продавливания оболочки кабеля с последующим повреждением.

22.11.2023 в адрес ООО «Трансстрой» было направлено письмо №ЭСС1/6/447 с требованием в срок до 27.11.2023 обеспечить надлежащее устранение выявленных дефектов на Адыгейской ВЭС в рамках исполнения гарантийных обязательств по Договору №515 от 05.07.2019, а именно: выполнить ремонт кабельной линии с заменой песчаной подсыпки в кабельные траншеи.

До настоящего момента ответа от ООО «Трансстрой» не поступало, представители субподрядчика не устранили выявленный дефект.

27.02.2024 письмом №ЭСС 1/6/55 Генеральный подрядчик повторно уведомил ООО «Трансстрой» о необходимости выезда на Адыгейскую ВЭС для устранения выявленного дефекта.

В соответствии с пунктом 64.1. Договора Гарантийный срок в отношении работ составляет 5 лет с даты финального завершения работ.

В соответствии с пунктом 67.7 Договора, за нарушение сроков устранения Дефектов, установленных Генеральным подрядчиком, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, пени в размере 0,5% от стоимости Этапа Работ в котором обнаружены Дефекты, за каждый лень просрочки, начиная с первого дня просрочки и до момента устранения Дефектов в полном объеме.

Все дефекты выявлены на этапе «Прокладки и расключения магистрального кабеля 35 кВ и оптического кабеля в траншеи и по конструкциям по 1 очереди» (Приложения №3 к ДС№1 от 25.09.2020 к Договору №515 от 05.07.2019) стоимость работ по данному этапу составляет 50 993 780,53 руб.

Работы по указанному этапу были выполнены Субподрядчиком в требуемом Генеральному подрядчику объеме, приняты им и оплачены.

Отсутствие исправления недостатков, выявленных в гарантийный период послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

На основании п. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 и 3 статьи 720 ГК РФ заказчик работ обязан в сроки и в порядке предусмотренном договором осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием подрядчика, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При принятии работы без проверки или при отсутствии возражений против качества работы заказчик не вправе ссылаться на ее недостатки.

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГКРФ).

В силу статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Материалами дела, в том числе представленными письмами, установлено нарушение срока исправления недостатков в гарантийный период, доказательств обратно в материалы дела не представлено.

Ответчик в рамках досудебного урегулирования спора с Истцом признал недостатки (дефекты) гарантийным письмом, обязался устранить их в разумный срок, однако, действий, направленных на устранение недостатков, не предпринял.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу об обоснованности требований о взыскании неустойки за нарушение срока исправления недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, согласно расчету неустойки, в размере 2 965 611,90 р. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом, подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 329, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ТРАНССТРОЙ" в пользу АО "РОССЕТИ ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС" сумму неустойки по договору № 515 от 05.07.20219 в размере 11 218 631,72 р., государственную пошлину в размере 79 093 р.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.   

 СУДЬЯ

М.В. Ларин