221/2018-302685(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 29 ноября 2018 года 

по делу А33-23585/2018 Красноярск 

29 ноября 2018 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СтройПартнёр» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в тридцатидневный срок с даты вступления в законную  силу решения по настоящему делу безвозмездно устранить недостатки работ по договору  подряда № 06 от 06.11.2016 на объекте по адресу: г. Ачинск, мкр. 1, д. 30, а именно:  

- водосточную систему выполнить с соблюдением проектно-сметной документации; 

- покрытие крыши (ковер), примыкания к фановым трубам выполнить в соответствии с  технологией производства работ, при проклеивании коврового покрытия использовать  Праймер, исключить прожоги коврового покрытия;  

- восстановить 4 фановых трубы над первым подъездом многоквартирного дома (ось А- Б);  

- ограждение по всему периметру крыши окрасить краской в соответствии с проектом  работ;  

- колпаки над фановыми трубами по всей крыши установить в соответствии с проектно- сметной документации, частично окрасить стройки и крепления;  

- оштукатурить выходы на крышу, произвести их окраску, восстановить дверные проемы  в количестве 2 штук;  

- произвести вывоз строительного мусора с крыши. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройПартнёр» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Каскад» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Ачинск) 6 000  рублей расходов по оплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева