Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-75026/2019

06 ноября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :Индивидуальный предприниматель Широков Антон Николаевич (адрес:  Россия 191014, г Санкт-Петербург, переулок Сапёрный 6/А/38-Н, ОГРН:  );

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРО ГРУПП" (адрес:  Россия 192029, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ д. 103 / корп. 3 ЛИТЕР В / пом. 311 ОФИС 2, ОГРН:  1107847189999);

при участии

- от истца: ФИО3 (доверенность от 21.03.2019); 

- от ответчика: не явился, извещен 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – Предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «МИРО ГРУПП» (далее – Общество) о взыскании 4 081 562,28 руб. долга и 546 301,41 руб. пеней по Договору № Б/Н-1 от 07.05.2018, а также 550 030,47 руб. долга и 73 619,46 руб. пеней по Договору № 07/18/1 от 07.05.2018.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. Отзыв с возражениями по заявленным требованиям ответчик не представил.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, Общество (заказчик) и Предприниматель (подрядчик) заключили договор № Б/Н-1 от 07.05.2018, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к Договору согласованной сторонами Ведомости объемов работ (Приложение №1), составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора,

По пункту 2.1 договора срок начала выполнения работ: с момента заключения настоящего Договора.

Согласно пункту 2.2 договора № Б/Н-1 срок окончания выполнения работ:

- I этап работ, включающий в себя работы по капитальному ремонту металлической кровли, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, в осях (А+ИУ(7+9), а также работы по капитальному ремонту фасада, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, в осях (А+М/9, (7+9)/А, (B+A)/7, (1+4)/А, (А+Г/1)/4: не позднее 20.07.2018.

- II этап работ, включающий в себя работы по капитальному ремонту металлической кровли, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, в осях (И+М)/(7+9), (А+Г/1)/(1+4), работы но капитальному ремонту кровли из наплавляемых материалов в Соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а также работы по капитальному ремонту фасада, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, в осях (М+В)/7, (1-т-4)/(Г/1), (1-7)/(В-М): не позднее 20.09.2018.

Под окончанием выполнения работ Стороны понимают подписание Итогового Акта.

В силу пункта 2.3 договора № Б/Н-1 промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

По пункту 2.4 договора № Б/Н-1 окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

Согласно пункту 2.5 договора № Б/Н-1 надлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Договору признается выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

В силу пункта 3.1 договора № Б/Н-1 стоимость работ по настоящему Договору составляет: 

– 2031,37 руб. за 1 кв.м площади крыши;

– 1877 руб. за 1 кв.м вертикальной проекции площади фасада без вычета площади проемов.

Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется путем умножения стоимости за 1 м2 крыши на общую площадь крыши равную 1454,74 м2 и умножения стоимости за 1 м2 фасада на общую площадь фасада равную 3400 м2, на которых Подрядчиком должен быть выполнен полный состав работ согласно Ведомости объемов работ (Приложение №1) и составляет 9 336 915,19 руб.

По пункту 3.2 договора № Б/Н-1 расчёт за фактически выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта сдачи-приемка работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета.

Согласно пункту 3.3 договора № Б/Н-1 заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1 настоящего Договора не позднее 13.08.2018.

В силу пункта 3.4 договора № Б/Н-1 Заказчик вправе выплатить Подрядчику дополнительный аванс в размере 10 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, после завершения Подрядчиком работ по I этапу.

По пункту 5.2 договора № Б/Н-1 после завершения выполнения работ на объекте по виду работ по многоквартирному дому Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами по форме № М-29, а также исполнительную документацию в составе:

– исполнительные схемы, согласованные с автором проекта либо листы авторского надзора;

– акт(-ы) освидетельствования скрытых работ (в случае выполнения таких работ),

– общий журнал работ (РД 11-05-2007) по каждому объекту отдельно;

–  Журнал сварочных работ (в случае проведения сварочных работ);

– Журнал бетонных работ (в случае проведения бетонных работ);

– Журнал или листы входного контроля материалов и оборудования;

– иную документацию, касающуюся эксплуатации объект.

Согласно пункту 5.3 договора № Б/Н-1 Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. После подписания акта, либо в случае отсутствия в установленный срок мотивированного отказа, работа считается принятой. 

В силу пункта 5.4 договора № Б/Н-1 в случае мотивированного отказа Заказчика сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения, выполняемых Подрядчиком за свой счет.

По пункту 5.6 договора № Б/Н-1 после завершения всех видов работ на объекте культурного наследия осуществляется приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия при участия Комитета по культуре Ленинградской области, выдавшего разрешение на проведение указанных работ, в целях подтверждения соответствия выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия отчетной документации о выполнении работ по сохранению объект культурного наследия и требованиям статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно пункту 5.8 договора № Б/Н-1 Итоговый акт сдачи-приемки работ по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору, подписывается сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи Комитетом по культуре Ленинградской области акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия.

В силу пункта 6.9 договора № Б/Н-1 за нарушение Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в п. 2 настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере одной тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирован Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Стороны подписали договор № 07/18/1 от 07.05.2018, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс общестроительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу 

<

...>. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к Договору согласованной Сметной документации (Приложение №1), составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора,

По пункту 2.1 договора № 07/18/1 срок начала выполнения работ: с момента заключения настоящего Договора.

В силу пункта 2.2 договора № 07/18/1 срок окончания выполнения работ: 20.07.2018. Под окончанием выполнения работ Стороны понимают подписание Итогового Акта.

По пункту 2.4 договора № 07/18/1 окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

Согласно пункту 3.1 договора № 07/18/1 стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании согласованной Сторонами сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет 1 827 230,26 руб.

По пункту 3.2 договора № 07/18/1 расчёт за фактически выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта сдачи-приемки работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

Согласно пункту 3.3 договора № 07/18/1 заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

Согласно пункту 5.8 договора № 07/18/1 Итоговый акт сдачи-приемки работ по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору, подписывается сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи Комитетом по культуре Ленинградской области акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия.

Заказчик оплатил аванс по договору № Б\Н-1 в размере 3 661 490,68 руб. платежными поручениями № 936 от 26.05.2018, № 1198 от 08.06.2018 с учетом уточнений платежей по письмам № 781 от 25.10.2018 и № 782 от 25.10.2018.

Предприниматель направил Обществу акты формы КС-2 и справки формы КС-3 от 22.09.2018.

Согласно акту формы КС-2 № 1 от 12.09.2018 стоимость выполненных работ по Договору № Б\Н-1 составила 7 743 052,96 руб.

Согласно акту формы КС-2 № 1 от 12.09.2018 стоимость выполненных работ по Договору № 07/18/1 составила 550 030,47 руб. 

Мотивированные отказы подписать названные акты заказчик не направил.

Поскольку Общество не оплатило стоимость предъявленных работ, Предприниматель обратился в суд с настоящим иском.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ).

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные сторонами в материалы дела доказательства оцениваются арбитражным судом полно, всесторонне и объективно, в их совокупности и взаимной связи.

Как следует из материалов дела, Общество оплатило по договору по договору № Б\Н-1 в размере 3 661 490,68 руб.

Предприниматель выполнил работы и направил заказчику акт формы К-2 № 1 от 12.09.2018 по Договору № Б\Н-1 на сумму 7 743 052,96 руб. и акт формы КС-2 № 1 от 12.09.2018 по Договору № 07/18/1 на сумму 550 030,47 руб. 

Таким образом, подрядчик частично выполнил работы по спорным договорам (цена договора № Б/Н-1 составляет 9 336 915,19 руб., цена договора № 07/18/1 – 1 827 230,26 руб.)

Между тем спорными договорами предусмотрено, что заказчик перечисляет соответствующие суммы авансов (пункт 3.2 договоров), а расчёт за фактически выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта сдачи-приемки работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры (пункт 3.2 договоров).

Под окончанием выполнения работ Стороны понимают подписание Итогового Акта (пункт 2.3 договоров).

Таким образом, исходя из условий договоров заказчик перечисляет аванс и оплату работ после выполнения их в полном объеме и подписания Итогового акта. Поэтапная оплата работ не предусмотрена.

При этом форма Итогового акта разработана сторонами в приложении № 2 к договорам.

Согласно пункту 5.8 договоров Итоговый акт сдачи-приемки работ подписывается сторонами в течение 5 рабочих дней с даты выдачи Комитетом по культуре Ленинградской области акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия.

В пункте 2.4 договоров предусмотрено, что окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

Поскольку работы в полном объеме не выполнены, однако спорные договоры сторонами не расторгнуты, Итоговый акт сторонами не подписывался, суд приходит к выводу о том, что основания для окончательного расчета по договорам не наступили, в связи с чем требования о взыскании долга и пеней являются преждевременными.

При подаче иска истцу была представлена отсрочка по оплате государственной пошлины, которая подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

в иске отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 49 258 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.