АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-21907/23

09 октября 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   15 августа 2023 г.

Полный текст решения изготовлен            09 октября 2023 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Украинцевой Ю.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Теплоресурс» (ОГРН1146193002482, ИНН 

<

***>)

о взыскании,

 

без вызова сторон,

 

установил, что ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации обратилось в суд с иском к ООО «Теплоресурс» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контрактам в общем размере 21 848,15 руб.

Определением суда от 29.06.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Данным определением сторонам установлен срок для представления истцом дополнительных доказательств, и ответчиком отзыва на исковое заявление и обосновывающих отзыв письменных доказательств, а также срок для представления в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направления друг другу дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции.  

Поступившие в арбитражный суд заявление, доказательства и иные документы размещены на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, в том числе публично путем размещения соответствующей информации на официальном сайте суда.

Ответчик отзыв на исковое заявление в материалы дела не направил.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в соответствии с правилами главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и 15.08.2023 по делу принято решение путем подписания резолютивной части решения.

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16.08.2023 г. 12:17:31 МСК.

21.09.2023 от истца поступила апелляционная жалоба в связи с чем суд принимает решение по данному делу по правилам, установленным главой 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и составляет мотивированное решение по настоящему делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (далее - Заказчик) и ООО «Теплоресурс» заключен контракт № 0358400000821000165-0358400000821000165-1060-981 на оказание услуг по метрологической поверке узлов учета тепловой энергии для нужд ЖКС № 1 (г. Ростов-на-Дону) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО (Далее – Контракт).

Согласно пункту 2 Контракта Исполнитель обязуется, в установленный Контрактом срок, оказать Услуги в объеме, соответствующие качеству и иным требованиям в объеме, установленным Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги, соответствующие требованиям, установленным Контрактом.

Согласно пункту 4.1. Цена Контракта составляет 953 013 рублей 08 копеек, НДС не облагается.

Согласно пункту 6.15. Контракта датой оказания Услуг является дата подписания Получателем Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту.

Согласно пункту 12.2 Контракта услуги должны быть оказаны не позднее 01.10.2022.

Сторонами 24.01.2023 заключено Соглашение о расторжении Контракта, обязательства по оказанию комплекса услуг по поверке прибора учета тепловой энергии – тепловычислителя ЭСКО МТР-06 (зав. № 6482) на объекте ЖКС № 1 (г. Ростов-на-Дону).

Как указывает истец, услуги оказаны в полном объеме на сумму 943547,86 руб., однако, с нарушением срока на сумму 705 697,49 руб., что подтверждается актами сдачи-приема оказанных услуг от 15.11.2022 № 1072, 1077, 1080, 1081, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093 (подписаны 18.11.2022), № 1079 от 25.11.2022, № 1085,1092,1095,1097 от 01.12.2022, № 1069,1070 от 05.12.2022, № 1076 подписан 09.12.2022, № 1249 от 16.12.2022.

Согласно пункту 8.2. в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Истцом произведен расчет, согласно которому неустойка за нарушение срока оказания услуг по Контракту составила 9 148,34 руб.

Также, между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (заказчик) и ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» ( исполнитель) 30.09.2022 заключен контракт № 11/РСО на оказание комплекса услуг по ремонту корректора объема газа для нужд ЖКС № 2 (г. Новочеркасск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в 2022 году (далее – Контракт).

Цена Контракта составляет 32 260 рублей.

Согласно п. 12.2 Услуги должны быть оказаны не позднее 25.10.2022.

Услуги оказаны с нарушением срока на сумму 32 260 рублей, что подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг от 24.11.2022 № 1282, подписанным 24.11.2022.

В соответствии с п. 9.2 Контракта в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Истцом произведен расчет, согласно которому неустойка за нарушение срока оказания услуг по Контракту составила 241,95 руб.

Также, между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» 01.12.2021 заключен контракт № 0358400000821000207-0358400000821000207-1060-1011 на оказание комплекса услуг по поверке приборов учета газа для нужд ЖКС № 2 (г. Новочеркасск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в 2022 году (далее – Контракт).

Цена Контракта составляет 66 272, 55 рублей.

Согласно п. 12.2 Услуги должны быть оказаны в период с 25.08. 2022 по 25.10. 2022.

Датой оказания Услуг является дата подписания Получателем Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту (п. 6.15 Контракта).

Услуги оказаны с нарушением срока на сумму 66 272,55 рублей, что подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг от 15.11.2022 № 1263, подписанным 18.11.2022.

В соответствии с п. 8.2 Контракта в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Истцом произведен расчет, согласно которому неустойка за нарушение срока оказания услуг по Контракту составила 397,64 руб.

Также, между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» 01.11.2021 заключен контракт № 0358400000821000176-0358400000821000176-1060-988 на оказание комплекса услуг по поверке приборов учета тепловой энергии для нужд ЖКС № 2 (г. Новочеркасск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО (далее – Контракт). Документ подписан электронной подписью.

Цена Контракта составляет 1 041 331 рубль 87 копеек.

Сторонами 24.01.2023 заключено Соглашение о расторжении Контракта, обязательства по оказанию комплекса услуг по поверке прибора учета тепловой энергии - тепловычислителя ВКТ-7 М252118 на объекте ЖКС № 1 (г. Ростов-на-Дону), расположенного по адресу: Ростовская область, в/г №9 

<

...> на сумму 17 182 рубля 50 копеек прекращены.

Согласно п. 12.2 Услуги должны быть оказаны в период с 01.01.2022 по 25.10.2022. Датой оказания Услуг является дата подписания Получателем Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту (п. 6.15 Контракта).

Как указывает истец, услуги оказаны с нарушением срока на сумму 1 041 331 рублей 87 копеек, что подтверждается актами сдачи-приемки оказанных услуг № 1268, 1269, 1280 от 30.11.2022, №1265, 1267, 1270, 1271, 1272, 1273, 1276, 1277, 1278, 1279 от 09.12.2022, «1266, 1274, 1275 от 12.12.2022.

В соответствии с п. 8.2 Контракта в случае просрочки исполнения просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Истцом произведен расчет, согласно которому неустойка за нарушение срока оказания услуг по Контракту составила 9 887,46 руб.

Также, между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» 19.09.2022 заключен контракт № 03584000008220001220001 на оказание комплекса услуг по поверке приборов учета тепловой энергии для нужд ЖКС № 2 (г. Новочеркасск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО (далее – Контракт).

Цена Контракта составляет 59 652 рубля 34 копейки.

Согласно п. 12.2 Услуги должны быть оказаны не позднее 25.10.2022. Датой оказания Услуг является дата подписания Получателем Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту (п. 6.15 Контракта).

Услуги оказаны с нарушением срока на сумму 59 652 рублей 34 копеек, что подтверждается актами сдачи-приемки оказанных услуг № 1281 от 09.12.2022.

В соответствии с п. 8.2 Контракта в случае просрочки исполнения просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Истцом произведен расчет, согласно которому неустойка за нарушение срока оказания услуг по Контракту составила 671,09 руб.

Также, Между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» 14.04.2022 заключен контракт № 03584000008220000200001 на оказание комплекса услуг по поверке приборов учета тепловой энергии для нужд ЖКС № 2 (г. Новочеркасск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в 2022 году (далее – Контракт).

Цена Контракта составляет 120 133 рубля 50 копеек. Согласно п. 12.2 Услуги должны быть оказаны в период с 01.09.2022 по 25.10.2022. Датой оказания Услуг является дата подписания Получателем Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту (п. 6.15 Контракта).

Как указывает истец, услуги оказаны с нарушением срока на сумму 120 133 рубля 50 копеек, что подтверждается актами сдачи-приемки оказанных услуг № 1100 от 14.12.2022 В соответствии с п. 8.2 Контракта в случае просрочки исполнения просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Истцом произведен расчет, согласно которому неустойка за нарушение срока оказания услуг по Контракту составила 1 501,67 руб.

В адрес исполнителя направлены претензии с требованиями об оплате начисленной неустойки.

Требования претензии оставлены без ответа и финансового удовлетворения.

Изложенное послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, о том, что требования истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

Правоотношения сторон регулируются нормами, закрепленными в 39 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с ч. 8 ст. 3 Закона № 44-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени РФ, субъекта РФ (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств (пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пунктов № 8.2 Контрактов от 29.10.2021 № № 0358400000821000165-0358400000821000165-1060-981, от 01.12.2021 № 0358400000821000207-0358400000821000207-1060-1011, от 01.11.2022 № 0358400000821000176-0358400000821000176-1060-988, от 19.09.2022 № 03584000008220001220001, от 14.04.2022 № 03584000008220000200001, № 9.2 Контракта от 30.09.2022 № 11/РСО, в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Основанием для обращения в суд исковыми требованиями является нарушение срока оказания услуг по контрактам в связи с чем ответчику начислена неустойка. Расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Факт оказания услуг со стороны ответчика подтвержден материалами дела и не оспаривается сторонами.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований.

Факт нарушения срока оказания услуг по Контрактам судом установлен, ответчиком не оспорен.

Между тем, суд отмечает, что согласно части 42.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 (далее - Правила N 783).

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 340 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 года N 783" из названия, преамбулы и текста Правил исключены слова "в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах".

Таким образом, на момент рассмотрения спора правила N 783 распространяют свое действие на списание неустоек независимо от года неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно пункту 2 правил N 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (пп. "в" в ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2022 N 439).

Подпунктом "а" пункта 3 правил N 783 определено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" данного пункта.

Подпунктом "а" пункта 5 правил N 783 установлено, что при наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) основанием для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 3 данных Правил, - исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному (муниципальному) контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2018 N 305-ЭС17-23242).

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного законодательства.

В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 14.08.2018 N 305-ЭС18-5712 по делу N А40-179525/2017, указанный порядок списания начисленных сумм неустоек направлен на установление действительного размера задолженности и урегулирование споров между сторонами

Из материалов дела следует, что ответчиком контракты исполнены в полном объеме. Факт исполнения контракта ответчиком в полном объеме сторонами не оспаривается, а также подтверждается представленными в материалы дела актами сдачи-приемки оказанных услуг, подписанными сторонами без возражений.

Размер штрафных санкций, подлежавших уплате с учетом вышеуказанных обстоятельств, не превышает 5% цены контрактов.

Следовательно, в данном случае заказчик должен был самостоятельно произвести списание спорной неустойки.

На основании изложенного, заявленные исковые требования подлежат отклонению.

С учетом освобождения истца от уплаты государственной пошлины, согласно требованиям статьи 110 АПК РФ государственная пошлина взысканию в доход федерального бюджета не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и  вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                                                               Ю.В. Украинцева