РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-52923/2022-83-264

г. Москва

09 июня 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 02 июня 2022 года 

Решение в полном объеме изготовлено 09 июня 2022 года

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-264), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ВС ГРУПП" (ИНН 

<

***>) к ГБУ "ЖИЛИЩНИК ВЫХИНО РАЙОНА "ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО" (ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 13.933.930 руб. 68 коп.

при участии:

от истца –  ФИО2 на основании доверенности № 11/21 от 18.11.2021.

от ответчика – ФИО3 на основании доверенности от 16.05.2022

УСТАНОВИЛ:

ООО "ВС ГРУПП" обратилось в суд с требованиями о взыскании с ГБУ "ЖИЛИЩНИК ВЫХИНО РАЙОНА "ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО"  задолженности в сумме 13 933 930 руб. 68 коп.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик поддержал позицию, изложенную в отзыве.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из материалов дела усматривается, что 07 мая 2021г. между ГБУ «Жилищник Выхино района «Выхино-Жулебино» (Заказчик) и ООО «ВС групп» (Подрядчик) заключен договор №145-44-21 на выполнение работ по обустройству территорий района Выхино-Жулебино ЮВАО города Москвы.

В соответствии с п. 1.1 Контракта, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обустройству территорий района Выхино-Жулебино ЮВАО города Москвы (далее -работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

В рамках Контракта Подрядчиком выполнены обязательства по выполнению работ на общую сумму 131 701 819 рублей 79 копеек, что подтверждается подписанными сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ №№1-36.

В соответствии с подписанными сторонами Актами выполненных работ, Заказчиком Подрядчику начислена неустойка - назначен штраф в соответствии с п. 7.4 Контракта, а именно:

№ п/п

Наименование      акта      сдачи-приемки выполненных работ

Стоимость

выполненных    работ,

руб.

Сумма    начисленной неустойки, руб.

1.

Акт№1 от 27.07.2021г.

1 115 301,59

111 530,16

2.

Акт №2 от 27.07.2021г.

773 113,34

77 311,33

3.

Акт№3 от 31.08.2021г.

7 824 286,81

782 428,68

4.

Акт №4 от 31.08.2021г.

7 531 342,58

753 134,26

5.

Акт №5 от 28.10.2021г.

1 690 855,49

169 085,55

6.

Акт №6 от 28.10.2021г.

1 412 371,06

141 237,11

7.

Акт №7 от 28.10.2021г.

2 046 398,95

204 639,90

8.

Акт №8 от 28.10.2021г.

1 473 877,63

147 387,76

9.

Акт №9 от 28.10.2021г.

1 786 635,92

178 663,59

10.

Акт №10 от 28.10.2021г.

2 037 488,17

203 748,82

11.

Акт №11 от 28.10.2021г.

6 539 053,68

653 905,37

12.

Акт №12 от 28.10.2021г.

11 111 196,58

1111 119,66

13.

Акт №13 от 28.10.2021г.

465 977,12

46 597,71

14.

Акт №14 от 28.10.2021г.

517 889,37

51 788,94

15.

Акт №15 от 28.10.2021г.

2 776 974,62

277 697,46

16.

Акт №16 от 28.10.2021г.

1 424 795,00

142 479,50

17.

Акт №17 от 28.10.2021г.

2 184 359,04

218 435,90

18.

Акт №18 от 28.10.2021г.

680 913,19

68 091,32

19.

Акт №19 от 28.10.2021г.

1 320 013,29

132 001,33

20.

Акт №20 от 28.10.2021г.

4 094 523,34

409 452,33

21.

Акт №21 от 28.10.2021г.

1 551 782,37

155 178,24

22.

Акт №22 от 28.10.2021г.

1 573 321,88

157 332,19

23.

Акт №23 от 28.10.2021г.

6 002 484,81

600 248,48

24.

Акт №24 от 28.10.2021г.

6 666 077,11

666 607,71

25.

Акт №25 от 28.10.2021г.

3 054 553,64

305 455,36

26.

Акт №26 от 28.10.2021г.

685 023,01

68 502,30

27.

Акт №27 от 28.10.2021г.

1 908 256,37

190 825,64

28.

Акт №28 от 28.10.2021г.

2 699 052,13

269 905,21

29.

Акт №29 от 28.10.2021г.

3 346 534,92

334 653,49

30.

Акт №30 от 28.10.2021г.

11 732 656,34

1 173 265,63

31.

Акт №31 от 28.10.2021г.

500 161,96

50 016,20

32.

Акт №32 от 28.10.2021г.

5 894 265,65

589 426,57

33.

Акт №33 от 28.10.2021г.

2 281 516,95

228 151,70

34.

Акт №34 от 28.10.2021г.

7 918 040,15

791 804,02

35.

Акт №35 от 28.10.2021г.

5 417 178,93

541 717,89

36.

Акт №36 от 28.10.2021г.

11 663 546,80

1 930 103,37

 

Итого:

131 701 819,79

13 933 930,68

 

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Оплата работ, выполненных в рамках Контракта, произведена Заказчиком частично - в сумме 117 767 889 руб. 11 коп. Оплата произведена с удержанием суммы начисленной неустойки в размере 13 933 930 руб. 68 коп.

Истец считает, что начисление и удержание из суммы оплаты указанной выше неустойки противоречит условиям Контракта и действующему законодательству, ссылаясь на то, что в нарушение указанных положений Контракта, при составлении Актов, Заказчиком не указаны основания применения и порядок расчета неустойки, что размер неустойки начисленной Заказчиком  не соотносим с положениями пункта 7.4 Контракта и противоречит ему, в этой связи в каждом из подписанных между Истцом и Ответчиком актов в пункте «Дополнительные сведения» Подрядчиком была внесена запись о несогласии Подрядчика с начислением неустойки.

В связи с чем, истец считает, что сумма удержанной Заказчиком неустойки в размере 13 933 930  руб. 68 коп. является неосновательным обогащением Заказчика и подлежит оплате Подрядчику.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить денежные средства, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

В представленном в материалы дела отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал, ссылаясь на то, что удержание неустойки произведено в соответствии с условиями договора.

Суд пришел к следующим выводам.

Согласно п. 2.7.3 Контракта, оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В соответствии с Приложением №2 к Контракту, которым утверждена форма акта сдачи-приемки выполненных работ, в случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в соответствии с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, по спорным актам подтвержден материалами дела, ввиду чего ответчик имел право на удержание неустойки в порядке п. 7.4 Контракта. 

Между тем, согласно п. 7.4 Контракта За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов Цены контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа)составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 0,5 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа)составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа)составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 0,3 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа)составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа)составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 0,2 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа)составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа)превышает 10 млрд. рублей.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. 

Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при толковании договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Ввиду чего, исходя из буквального толкования п.7.4 договора по актам Акт№1 от 27.07.2021г., Акт №2 от 27.07.2021г., Акт №5 от 28.10.2021г., Акт №6 от 28.10.2021г., Акт №7 от 28.10.2021г., Акт №8 от 28.10.2021г., Акт №9 от 28.10.2021г., Акт №10 от 28.10.2021г., Акт №13 от 28.10.2021г., Акт №14 от 28.10.2021г., Акт №15 от 28.10.2021г., Акт №16 от 28.10.2021г., Акт №17 от 28.10.2021г., Акт №18 от 28.10.2021г., Акт №19 от 28.10.2021г., Акт №21 от 28.10.2021г., Акт №22 от 28.10.2021г., Акт №26 от 28.10.2021г., Акт №27 от 28.10.2021г., Акт №28 от 28.10.2021г., Акт №31 от 28.10.2021г., Акт №33 от 28.10.2021г. удержание 10 процентов Цены Этапа произведено правомерно, поскольку Цена Этапа не превышает 3 млн. рублей.

Между тем, по актам №3 от 31.08.2021г. (7 824 286,81), №4 от 31.08.2021г. (7 531 342,58),   №11 от 28.10.2021г. (6 539 053,68),  №12 от 28.10.2021г. (11 111 196,58), №20 от 28.10.2021г. (4 094 523,34), №23 от 28.10.2021г. (6 002 484,81), №24 от 28.10.2021г. (6 666 077,11), №25 от 28.10.2021г. (3 054 553,64),  №29 от 28.10.2021г. (3 346 534,92), №30 от 28.10.2021г. (11 732 656,34),  №32 от 28.10.2021г. (5 894 265,65), №34 от 28.10.2021г. (7 918 040,15), №35 от 28.10.2021г. (5 417 178,93), №36 от 28.10.2021г. (11 663 546,80) удержание правомерно только в размере 5 процентов от цены Этапа.

Ввиду чего судом произведен перерасчет неустойки по указанным актам, подлежащей удержанию, исходя из размере 5 процентов от цены Этапа.

Таким образом, неправомерно удержанной ответчиком неустойкой является сумма в размере 5 321 661 руб. 45 коп., которая подлежит взысканию с ответчика в качестве задолженности по оплате выполненных работ.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу о том, что работы  истцом выполнены, замечания в отношении объема и качества выполненных работ не представлены, оплата работ ответчиком добровольно не произведена, поэтому требования  истца о взыскании задолженности в судебном порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению в части в размере 5 321 661 руб. 45 коп.

Расходы по госпошлине распределены на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании статей 307-309, 330, 702, 711, 740, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ГБУ "ЖИЛИЩНИК ВЫХИНО РАЙОНА "ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО" (ИНН 7721818162) в пользу ООО "ВС ГРУПП" (ИНН 7720709763) денежные средства в размере 5 321 661 руб. 45 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 49 608 руб. 31 коп.

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

               Судья                                                                                         В.П. Сорокин