1219/2023-16761(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-8193/2022

г. Оренбург

26 января 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  

Лебедянцевой Анны Александровны, при ведении протокола секретарем  

судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

муниципального унитарного предприятия «Коммунально-эксплуатационное предприятие» городского округа закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области, ОГРН:  

1025602138781, ИНН: 

<

***>, Оренбургская область, п. Комаровский,  

к обществу с ограниченной ответственностью «АСК Стройкапитал»,  

ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Оренбургская область, г. Орск, 

об обязании устранить недостатки работ Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «ЛСК СтройКапитал» устранить в пределах гарантийного  срока выявленные недостатки (дефекты) по выполненным работам по  КОНТРАКТУ № 0553600002820000032_331441 от 12.05.2020, по  КОНТРАКТУ № 0553600002820000033_331441 от 12.05.2020 в срок до  15.05.2023:  

1. Снять существенный слой рулонного ковра в месте трещин и протечек;  

2. Удалить существующую стяжку в месте протечки, поправить и  загерметизировать стык-нахлест оцинкованного слива по карнизу, чтобы  исключить затекание в него атмосферной влаги;  

3. Уложить новую цементно-песчаную стяжку на участке удаленной;  

4. Минимум через неделю (7 дней) загрунтовать поверхность новой  стяжки битумно-резиновым праймером;  

5. Через 2 (два) дня наклеить 1 (первый) слой рулонного материала без  посыпки с нахлестом за пределы участка на 10... 15 см ремонтируемого;  

6. Наклеить 2(второй) слой рулонного материала с посыпкой с нахлестом  за пределы 1 (первого) наклеенного слоя на 10 ... 15 см.;  

7. Установить дополнительные металлические связи между  оцинкованным зонтом и его металлическим каркасом, при необходимости  заменить оцинкованный зонт над вентиляционной шахтой.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АСК  Стройкапитал» в пользу муниципального унитарного предприятия  «Коммунально-эксплуатационное предприятие» городского округа закрытое  административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской  области расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст.ст. 319, 320 АПК  РФ.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Оренбургской области.  

Судья А.А. Лебедянцева 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 27.12.2021 6:12:44

 Кому выдана Лебедянцева Анна Александровна