Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-26882/2021

02 июля 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  16 июня 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  02 июля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.,

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССПЕЦПРОЕКТ "ПЕРИМЕТР" (адрес:  Россия 127238, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД. 3-Й НИЖНЕЛИХОБОРСКИЙ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 1, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИОВОЛНА" (адрес:  Россия 199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ЛИНИЯ КОЖЕВЕННАЯ, ДОМ1-3, ЛИТЕР П, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии: 

- от истца: ФИО2 по доверенности от 14.06.2021, ФИО3 по доверенности от 14.06.2021,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССПЕЦПРОЕКТ "ПЕРИМЕТР" обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточенным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, к Обществу с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИОВОЛНА" о взыскании задолженности по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. в размере 218 222 руб. 46 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 980 руб. 00 коп. за период с 12.09.2020 по 26.03.2021, задолженности по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. в размере 3 002 463 руб. 50 коп., неустойки в размере 516 423 руб. 00 коп. с последующим начислением неустойки с 27.03.2021 по дату фактической оплаты долга, задолженности по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. в размере 3 467 368 руб. 50 коп., неустойки в размере 551 311 руб. 00 коп. с последующим начислением неустойки с 27.03.2021 по дату фактической оплаты долгаю

В порядке ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, суд установил следующее. 

Между сторонами заключены следующие договоры подряда:

№ 78.72-10 от 24 октября 2019г.;

№ 78.82-05 от 06 мая 2020г.;

№ 78.83-05 от 06 мая 2020г.

1.  Договор подряда Л"в 78.72-10 от 24 октября 2019г.

В соответствии с пунктом 2.1. договора подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. Истец обязался по заданию Ответчика в сроки, предусмотренные договором выполнить устройство 2 (двух) оснований опорной конструкции РПУ в соответствии с протоколом согласования фиксированной цены (приложение 1 к договору), а Ответчик обязался принять работу и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

В пункте 3.1. договора подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. стороны определили, что стоимость работ, выполняемых в рамках указанного выше договора, составляет 4 283 000 (четыре миллиона двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 713 833 (семьсот тринадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 34 копейки.

Истец исполнил свои обязательства по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. в полном объеме с надлежащим качеством, что подтверждается

- Актом приемки выполненных работ от 05 февраля 2020г. по 1 этапу договора подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. на сумму 3 846 555 (три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 08 копеек, в том числе НДС 20% - 641 092 рубля 51 копейка;

- Актом приемки выполненных работ от 17 августа 2020г. по 2 этапу договора подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. на сумму 436 444 (четыреста тридцать шесть тысяч четыреста сорок четыре) рубля 92 копейки, в том числе НДС 20% - 72 740 рублей 82 копейки.

В свою очередь, Ответчик исполнил свои обязательства перед Истцом по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019 года частично, перечислив на расчетный счет Истца, в соответствии с пунктом 3.2. указанного выше договора, предоплату в размере 50% от общей стоимости работ в размере 2 141 500 (два миллиона сто сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, а также 14 февраля 2020г. Ответчик оплатил работу Истца по указанному выше договору в размере 1 923 277 (один миллион девятьсот двадцать три тысячи двести семьдесят семь) рублей 54 копейки.

Таким образом, по состоянию на 26 марта 2021 года у Ответчика перед Истцом имеется задолженность по оплате выполненных Истцом в полном объеме и принятых Ответчиком в полном объеме работ по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. в размере 218 222 (двести восемнадцать тысяч двести двадцать два) рубля 46 копеек.

В пункте 3.2. договора подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. стороны установили следующий порядок оплаты работ:

- предоплата в размере 50% от стоимости работ по договору оплачивается Ответчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписания договора;

- остаток выплачивается в течение 25 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Соответственно, окончательный расчет по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. Ответчику необходимо было осуществить не позднее 11 сентября 2020г. (17 августа 2020г. был подписан акт выполненных работ по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. (по второму этапу) + 25 календарных дней отсрочка оплаты).

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Однако Ответчик до настоящего времени не исполнил в полном объеме свои обязательства по оплате выполненных Истцом и принятых Ответчиком работ по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г.

Пунктом 10.1. договора подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. определено, что споры и разногласия по данному договору разрешаются путем предъявления претензии, которая должна быть рассмотрена стороной-адресатом в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой оплатить задолженность по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. в размере 218 222 (двести восемнадцать тысяч двести двадцать два) рубля 46 копеек, что подтверждается письмами

- исходящий № 139/09-20 от 29.09.2020г.;

- исходящий № 155/10-20 от 14.10.2020г.,

а также претензионным письмом исходящий № 19/02-21г. от 11.02.2021г., которое было, в соответствии с пунктом 9.3. договора подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г., направлено на электронную   почту   Ответчика   mail u: nporadiovolna.ru   12.02.2021г.,   что  подтверждается фотографией из почтового ящика Истца и почтовым отправлением почтой России, по юридическому адресу Ответчика, указанному в договоре: 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 1 -3, литер П, помещение 1Н, а также по почтовому адресу Ответчика, известному Истцу: 199106, 

<

...>, что подтверждается описями вложения, а также кассовыми чеками РПО № 10881256009989 от 12.02.2021г., РПО № 10881256010022. Данное претензионное письмо было получено Ответчиком (по почтовому адресу) 15 марта 2021г., что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 10881256010022.

Претензионное письмо исходящий № 19/02-21г. от 11.02.2021г., направленное по юридическому адресу Ответчика не было получено им и возвращено отправителю из-за истечения срока хранения, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 10881256009989.

Ответчик проигнорировал указанные выше требования Истца об оплате задолженности по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г.

По состоянию на 26 марта 2021г. задолженность Ответчика перед Истцом но договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. составляет 218 222 (двести восемнадцать тысяч двести двадцать два) рубля 46 копеек.

Указанная выше задолженность признана Ответчиком в полном объеме, что подтверждается подписанными Ответчиком Актом приемки выполненных работ от 17 августа 2020г. по договору от 24 октября 2019г. № 78.72-10, Актом сверки взаимных расчетов по договору подряда от 24 октября 2019г. № 78.72-10 за период с 01.01.2020г. по 29.09.2020г.

В соответствии с пунктом 7.1. договора подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Статьей 395 ГК РФ определено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Соответственно, на сумму неправомерно удерживаемых Ответчиком денежных средств Истца по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г. подлежат уплате проценты.

Расчет процентов за неправомерное удержание Ответчиком денежных средств Истца (в соответствии с п. 1. Ст. 395 ГК РФ):

Количество дней просрочки -196 (с 12 сентября 2020г. по 26 марта 2021г.). Сумма задолженности - 218 222 рубля 46 копеек. Размер ключевой ставки - 4,25%

218 222,46 руб. (сумма долга) * 4,25 % (размер ключевой ставки) / 365 (количество дней в году) * 196 (количество дней просрочки: с 12.09.2020г. по 26.03.2021г. включительно) = 4 980 рублей 00 копеек (размер процентов за неправомерное удержание денежных средств).

Таким образом, за неправомерное удержание Ответчиком денежных средств Истца подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 4 980 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Договор подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г.

В соответствии с пунктом 1.1. договора подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. Истец обязался по заданию Ответчика в сроки, предусмотренные договором выполнить разработку рабочих проектов (том АС, том КЖ), устройство 2 (двух) оснований опорной конструкции РПУ, монтаж кабельной трассы в соответствии с протоколом согласования фиксированной центы (приложение № 1 к договору), а Ответчик обязался принять работу и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

В пункте 2.1. договора подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. стороны определили, что стоимость работ, выполняемых в рамках указанного выше договора, составляет 6 004 927 (шесть миллионов четыре тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 1 000 821 (один миллион восемьсот двадцать один) рубль 16 копеек.

Истец исполнил свои обязательства по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. в полном объеме с надлежащим качеством, что подтверждается

-Актом приемки выполненных работ от 30 сентября 2020г. по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. на сумму 6 004 927 (шесть миллионов четыре тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 1 000 821 (один миллион восемьсот двадцать один) рубль 16 копеек.

В свою очередь, Ответчик исполнил свои обязательства перед Истцом по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020 года частично, перечислив на расчетный счет Истца, в соответствии с пунктом 2.2. указанного выше договора, предоплату в размере 50% от общей стоимости работ в размере 3 002 463 (три миллиона две тысячи четыреста шестьдесят три) рубля 50 копеек.

Таким образом, по состоянию на 26 марта 2021 года у Ответчика перед Истцом имеется задолженность по оплате выполненных Истцом в полном объеме и принятых Ответчиком в полном объеме работ по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. в размере 3 002 463 (три миллиона две тысячи четыреста шестьдесят три) рубля 50 копеек.

В пункте 2.2. договора подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. стороны установили следующий порядок оплаты работ:

предоплата в размере 50% от стоимости работ по договору оплачивается Ответчиком в течение 3 трех) рабочих дней с момента подписания договора;

остаток выплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Соответственно, окончательный расчет по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. Ответчику необходимо было осуществить не позднее 05 октября 2020г. (30 сентября 2020г. был подписан акт выполненных работ по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. + 5 календарных дней отсрочка оплаты).

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Однако Ответчик до настоящего времени не исполнил в полном объеме свои обязательства по оплате выполненных Истцом и принятых Ответчиком работ по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г.

Пунктом 9.1. договора подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. определено, что споры и разногласия по данному договору разрешаются путем предъявления претензии, которая должна быть рассмотрена стороной-адресатом в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой оплатить задолженность по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. в размере 3 002 463 (три миллиона две тысячи четыреста    шестьдесят    три)    рубля    50    копеек,    что    подтверждается    письмами

-исходящий № 154/10-20 от 14.10.2020г.;

а также претензионным письмом исходящий Л'Ь 18/02-21г. от 11.02.2021г., которое было, в соответствии с пунктом 8.3. договора подряда 78.82-05 от Об мая 2020г., направлено на электронную почту Ответчика mail@nporadiovolna.ru 12.02.2021г., что подтверждается фотографией из почтового ящика Истца и почтовым отправлением почтой России, по юридическому адресу Ответчика, указанному в договоре: 199106, 

<

...>, литер П, помещение Ш, а также по почтовому адресу Ответчика, известному Истцу: 199106, 

<

...>, что подтверждается описями вложения, а также кассовыми чеками РПО № 10881256010060 от 12.02.2021г., РПО № 10881256009941. Данное претензионное письмо было получено Ответчиком (по почтовому адресу) 15 марта 2021г., что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 10881256010060.

Претензионное письмо исходящий № 18/02-21г. от 11.02.2021г., направленное по юридическому адресу Ответчика не было получено им и возвращено отправителю из-за истечения срока хранения, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 10881256009941.

Ответчик проигнорировал указанные выше требования Истца об оплате задолженности по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г.

По состоянию на 26 марта 2021г. задолженность Ответчика перед Истцом по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. составляет 3 002 463 (три миллиона две тысячи четыреста шестьдесят три) рубля 50 копеек.

Указанная выше задолженность признана Ответчиком в полном объеме, что подтверждается подписанными Ответчиком Актом приемки выполненных работ от 30 сентября 2020г. по договору подряда от 06 мая 2020г. № 78.82-05, Актом сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2020г.

В соответствии с пунктом 6.2. договора подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. за нарушение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором и приложением к нему, виновная сторона уплачивает второй стороне неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременно выполненного обязательства за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

Соответственно, за неисполнение Ответчиком своих обязательств по оплате окончательного расчета по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. в сумме 3 002 463 (три миллиона две тысячи четыреста шестьдесят три) рубля 50 копеек он обязан уплатить Истцу неустойку в соответствии с пунктом 6.2. указанного выше договора подряда.

Расчет неустойки за неисполнение Ответчиком своих обязательств по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. (в соответствии с п. 6.2. договора подряда 78.82-05 от 06 мая 2020г.):

Количество дней просрочки -172 (с 06 октября 2020г. по 26 марта 2021г.). Сумма задолженности - 3 002 463 рубля 50 копеек.

Размер неустойки - 0,1% от суммы несвоевременно исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.

3 002 463, 50 руб. (сумма долга) * 0,1% (размер договорной неустойки) * 172 (количество дней просрочки: с 06.10.2020г. по 26.03.2021г. включительно) = 516 423 рубля 00 копеек (размер неустойки за неправомерное удержание денежных средств).

Таким образом, за неисполнение Ответчиком своего обязательства по оплате работ по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020г. он обязан уплатить Истцу, в соответствии с пунктом 6.2. указанного выше договора подряда, неустойку в размере 516 423 (пятьсот шестнадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 00 копеек.

3.  Договор подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г.

В соответствии с пунктом 1.1. договора подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. Истец обязался по заданию Ответчика в сроки, предусмотренные договором выполнить разработку рабочих проектов (том АС, том КЖ), устройство 2 (двух) оснований опорной конструкции РПУ, монтаж кабельной трассы в соответствии с протоколом согласования фиксированной центы (приложение № 1 к договору), а Ответчик обязался принять работу и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

В пункте 2.1. договора подряда 78.83-05 от 06 мая 2020г. стороны определили, что стоимость работ, выполняемых в рамках указанного выше договора, составляет 6 934 737 (шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 1 155 789 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек.

Истец исполнил свои обязательства по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. в полном объеме с надлежащим качеством, что подтверждается

-Актом приемки выполненных работ от 13 октября 2020г. по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. на сумму 6 934 737 (шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 1 155 789 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек.

В свою очередь, Ответчик исполнил свои обязательства перед Истцом по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020 года частично, перечислив 10.06.2020 г. на расчетный счет Истца, в соответствии с пунктом 2.2. указанного выше договора, предоплату в размере 50% от общей стоимости работ в размере 3 467 368 (три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

Таким образом, по состоянию на 26 марта 2021 года у Ответчика перед Истцом имеется задолженность по оплате выполненных Истцом в полном объеме и принятых Ответчиком в полном объеме работ по договору подряда № 78,83-05 от 06 мая 2020г. в размере 3 467 368 (три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

В пункте 2.2. договора подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. стороны установили следующий порядок оплаты работ:

предоплата в размере 50% от стоимости работ по договору оплачивается Ответчиком в течение 3 трех) рабочих дней с момента подписания договора;

остаток выплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Соответственно, окончательный расчет по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. Ответчику необходимо было осуществить не позднее 18 октября 2020г. (13 октября 2020г. был подписан акт выполненных работ по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. + 5 календарных дней отсрочка оплаты).

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Однако Ответчик до настоящего времени не исполнил в полном объеме свои обязательства по оплате выполненных Истцом и принятых Ответчиком работ по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г.

Пунктом 9.1. договора подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. определено, что споры и разногласия по данному договору разрешаются путем предъявления претензии, которая должна быть рассмотрена стороной-адресатом в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой оплатить задолженность по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. в размере 3 467 368 (три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 50 копеек, что подтверждается претензионным письмом исходящий № 20/02-21г. от 11.02.2021г., которое было, в соответствии с пунктом 8.3. договора подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г., направлено на электронную почту Ответчика mail@nporadiovolna.ru 12.02.2021г., что подтверждается фотографией из почтового ящика Истца и почтовым отправлением почтой России, по юридическому адресу Ответчика, указанному в договоре: 199106, 

<

...>, литер П, помещение 1Н, а также по почтовому адресу Ответчика, известному Истцу: 199106, 

<

...>, что подтверждается описями вложения, а также кассовыми чеками РПО № 10881256009903 от 12.02.2021г., РПО № 10881256010107.

Данное претензионное письмо было получено Ответчиком (по почтовому адресу) 15 марта 2021г., что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 10881256010107.

Претензионное письмо исходящий № 20/02-21г. от 11.02.2021г., направленное по юридическому адресу Ответчика не было получено им и возвращено отправителю из-за истечения срока хранения, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 10881256009903.

Ответчик проигнорировал указанные выше требования Истца об оплате задолженности по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г.

По состоянию на 26 марта 2021г. задолженность Ответчика перед Истцом по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. составляет 3 467 368 (три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

Указанная выше задолженность признана Ответчиком в полном объеме, что подтверждается подписанными Ответчиком Актом приемки выполненных работ от 13 октября 2020г. по договору подряда от 06 мая 2020г. № 78.83-05, Актом сверки взаимных расчетов по договору под № 78.83-05 от 06 мая 2020г. за период 9 месяцев 2020г.

В соответствии с пунктом 6.2. договора подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. за нарушение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором и приложением к нему, виновная сторона уплачивает второй стороне неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременно выполненного обязательства за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

Соответственно, за неисполнение Ответчиком своих обязательств по оплате окончательного расчета по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. в сумме 3 467 368 (три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 50 копеек он обязан уплатить Истцу неустойку в соответствии с пунктом 6.2. указанного выше договора подряда.

Расчет неустойки за неисполнение Ответчиком своих обязательств по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. (в соответствии с п. 6.2. договора подряда 78.83-05 от 06 мая 2020г.):

Количество дней просрочки -159 (с 19 октября 2020г. по 26 марта 2021г.). Сумма задолженности - 3 467 368 рубля 50 копеек.

Размер неустойки - 0,1% от суммы несвоевременно исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.

3 467 368, 50 руб. (сумма долга) * 0,1% (размер договорной неустойки) * 159 (количество дней просрочки: с 19.10.2020г. по 26.03.2021г. включительно) = 551 311 рублей 00 копеек (размер неустойки за неправомерное удержание денежных средств).

Таким образом, за неисполнение Ответчиком своего обязательства по оплате работ по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020г. он обязан уплатить Истцу, в соответствии с пунктом 6.2. указанного выше договора подряда, неустойку в размере 551 311 (пятьсот пятьдесят одна тысяча триста одиннадцать) рублей 00 копеек.

По трем договорам подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019г.; № 78.82-05 от 06 мая 2020г.; № 78.83-05 от 06 мая 2020г., заключенным между Истцом и Ответчиком, общая задолженность Ответчика перед Истцом составляет 6 688 054 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 46 копеек, что также подтверждается подписанным Ответчиком актом сверки взаимных расчетов № 78.72-10 от 24 октября 2019г.; № 78.82-05 от 06 мая 2020г.; № 78.83-05 от 06 мая 2020г. за период 2020г.

Истцом направлена в адрес ответчика претензия о погашении образовавшейся задолженности.

Оставление данной претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ установлено, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Доказательств направления в адрес истца претензий по объему, качеству или срокам выполнения работ, материалы дела не содержат.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Материалами дела подтверждается надлежащее исполнение истцом обязательств по договору, в связи с чем у ответчика возникла обязанность по оплате.

Материалами дела, подтверждается наличие задолженности, доказательств погашения предъявленной к взысканию суммы задолженности у суда не имеется.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с частью 1 статьи 395 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ), в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Материалами дела подтверждается обоснованность начисления неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.

На основании изложенного требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИОВОЛНА" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ТРАНССПЕЦПРОЕКТ "ПЕРИМЕТР":

- задолженность по договору подряда № 78.72-10 от 24 октября 2019 года в размере 218 222 руб. 46 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 980 руб. 00 коп. за период с 12.09.2020 по 26.03.2021;

- задолженность по договору подряда № 78.82-05 от 06 мая 2020 года в размере 3 002 463 руб. 50 коп. и неустойку в размере 516 423 руб. 00 коп. с последующим начислением неустойки начиная с 27.03.2021 по день оплаты долга и исходя из ставки 0,1% от неоплаченной суммы долга за каждый день  просрочки;

- задолженность по договору подряда № 78.83-05 от 06 мая 2020 года в размере 3 467 368 руб. 50 коп. и неустойку в размере 551 311 руб. 00 коп. с последующим начислением неустойки начиная с 27.03.2021 по день оплаты долга и исходя из ставки 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;

- 61 804 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.