АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-33345/2021

г. Уфа

17 июня 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.06.2022

Полный текст решения изготовлен 17.06.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной с ответственностью Научно-производственный центр «УралЭнергоРесурс» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании задолженности по контрактам № 01/01-07/19 от 01.07.2019, № 01/02-11/20 от 02.11.2021 в общей сумме 3 717 397 руб. 32 коп., неустойки в размере 185 869 руб. 87 коп., судебных расходов в сумме 89 635 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, паспорт, по доверенности от 05.02.2022г. (в режиме веб-конференции),

от ответчика – ФИО3, паспорт, по доверенности от 07.03.2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной с ответственностью Научно-производственный центр «УралЭнергоРесурс» о взыскании задолженности по контрактам № 01/01-07/19 от 01.07.2019, № 01/02-11/20 от 02.11.2021 в общей сумме 3 717 397 руб. 32 коп., неустойки в размере 185 869 руб. 87 коп., судебных расходов в сумме 89 635 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.01.2022 исковое заявление было принято к производству.

От истца через канцелярию суда посредством Сервиса подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать задолженность по контрактам № 01/01-07/19 от 01.07.2019, № 01/02-11/20 от 02.11.2021 в общей сумме 3 717 397 руб. 32 коп., неустойку в размере 185 869 руб. 87 коп., судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме 48 000 руб.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

Представитель истца в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования, просил удовлетворить. 

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве на исковое заявление, указав, что согласно пункту 29.15 спорных контрактов сумма пени ограничивается 5% от суммы просроченного платежа. Ответчик произвел расчет пени в размере 246 776, 75 рублей по контракту №01/01-07/19. 5% от суммы задолженности в размере 2 239 507,27 рублей составляет 111 975, 36 рублей. 5% от суммы задолженности в размере 1 989 507,27 рублей составляет 99 475,36 рублей. Таким образом, сумма пени по контракту №01/01-07/19 не может превышать 99 475,36 рублей. Ответчик произвел расчет пени в размере 161 214,51 рублей по контракту №01/02-11/20. 5% от суммы задолженности в размере 1 727 890, 05 рублей составляет 86 394,50 рублей. Таким образом сумма пени по контракту №01/02-11/20 не может превышать 86 394, 50 рублей. Кроме того в материалах дела отсутствуют документы, позволяющие определить срок наступления обязательства, т.е. дату получения ответчиком счета и счета-фактуры. Просит отказать в удовлетворении исковых требований.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 01.07.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (субсубподрядчик) и обществом с ограниченной с ответственностью Научно-производственный центр «УралЭнергоРесурс» (субподрядчик) заключен контракт № 01/01-07/19 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объектам АО «Транснефть-Западная Сибирь: 08-ТПР-002-011213 «РВС-10000 №№ 7,8,13,14. Омское РНУ. ЛПДС «Омск». Строительство» 08-ТПР-004-011281  «Технологический трубопровод  ЛПДС  «Омск». Омское РНУ. Дооснащение пробозаборными устройствами на приемке от АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Техническое перевооружение», по которому Субсубподрядчик в установленные Контрактом сроки и в счет Контрактной цены выполнит за свой риск, своими силами и силами согласованных Субподрядчиком Субсубподрядных организации, все Работы и услуги в объеме, определенном настоящим Контрактом и Рабочей документацией, предоставит обеспечение исполнения обязательств по Контракту в виде безусловных и безотзывных Банковских гарантий и/или обеспечительного платежа в соответствии со Статьей 26 Контракта (если иной способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту не согласован Сторонами, в том числе путем заключения Дополнительных соглашении в соответствии с условиями Контракта) и выполнит все иные требования, установленные Контрактом.

Согласно п. 3.2 контракта в рамках выполнения Работ и услуг по Контракту в рамках строительства Объектов «РВС-10000 №№7, 8, 13, 14. Омское РНУ. ЛЛДС “Омск". Строительство. Технологический трубопровод ЛПДС “Омск". Омское РНУ. Дооснащение пробозаборными устройствами на приемке от АО "Газпромнефть-ОНПЗ”. Техническое перевооружение, Субподрядчик поручает, а Субсубподрядчик в счет Контрактной цены в соответствии с требованиями Контракта. Рабочей документацией и Регламентов Заказчика (в том числе с учетом их изменений и период Срока действия Контракта) обязуется осуществить следующее в объеме предусмотренном и необходимой для выполнения работ, предусмотренных приложениями №№ 1,2. а также рабочей документацией (включая, но не ограничиваясь):

- получение всех необходимых разрешении и допусков к производству Работ в соответствии с условиями Контракта, требованиями Регламентов Заказчика и нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений: 

- поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ и услуг по Контракту (за исключением Материалов и Оборудования входящих в поставку Субподрядчика/Подрядчика/Заказчика и указанных в Приложении 6);

- приемку, вывоз до мест складирования Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика/Подрядчика/Заказчика согласно проекту организации строительства, хранение Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика/Подрядчика/Заказчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования, вывоз на Объект Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика/Подрядчика/Заказчика; 

- проведение работ по вскрытию пересечении коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и при необходимости, выполнение работ по результатам заключения (в соответствии с ТУ на пересечения владельца коммуникаций); 

- проведение испытаний и участие (совместно с Субподрядчиком) в пропуске диагностических приборов;

- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно Рабочей документации: участие (совместно с Субподрядчиком) в комплексном опробовании систем и оборудования;

- формирование и предоставление Субподрядчику исполнительной документации;

- устранение Дефектов/Недостатков, допущенных Субсубподрядчиком в ходе производства Работ,

- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных Субподрядчиком участков с оформлением по установленной форме документов (справок), подтверждающих проведение рекультивации в соответствии с Рабочей документацией;

- передачу Субсубподрядчиком рекультивированных на всей площади проведения Работ участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с оформлением Акта приема-передачи в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;

- сдачу работ Субподрядчику либо Заказчику совместно с Субподрядчиком; 

- выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;

- охрану и содержание строительной площадки производства Работ, в том числе площадок Временных зданий и сооружений; 

- проведение испытаний строительной лаборатории, электротехнической лаборатории, лабораторией не разрушающего контроля (контроль сварных соединений физическими методами) в соответствии с Рабочей документацией;

- выполнение иных Работ неразрывно связанных со строящимся (реконструируемым, ремонтируемым) Объектом. 

К договору сторонами подписаны дополнительные соглашения № 1 от 01.09.2019г., № 2 от 25.10.2019г., № 3 от 09.10.2020г.

Согласно дополнительного соглашения к контракту № 01/01-07/19 от 01.07.2019 года от 09.10.2019г. стороны согласовали, что в связи с изменением объемов работ, а так же в целях надлежащего исполнения Контракта, Стороны решили внести изменения и дополнения в Контракт, а именно: 

1.1. Изменить п.4.1 Статьи 4 «Контрактная цена» и изложить в следующей редакции: «4.1. Контрактная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет 18 388 403,89 рублей, в том числе НДС 20% в размере 3 064 733,98 рублей» 

1.2. По настоящему дополнительному соглашению: - увеличение контрактной цены на 1 080 086,6 рублей, в том числе НДС 20%. 

1.3. Аннулировать Приложение № 1.1, 2.1 к Контракту и ввести в действие с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения Приложение № 1.2, 2.2 в виде Приложения к Контракту, все ссылки на Приложение № 1.1, 2.1 по тексту Контракта считать ссылками на Приложение № 1.2, 2.2 соответственно. 

2. Изменение контрактного графика выполнения работ (приложение № 2.2) не освобождает Субсубподрядчика от ответственности за допущенные нарушения сроков, в отношении которых Субподрядчиком были ранее направлены требования и претензии об оплате, предусмотренных контрактом, штрафов (неустоек). Субподрядчик не утрачивает право на предъявление Субсубподрядчику требований и претензий, связанных с исполнением контракта, основание на предъявление которых возникло до момента подписания Сторонами настоящего Соглашения. 

3. Изменения и дополнения к Контракту, внесенные настоящим Дополнительным соглашением, вступают в силу с даты подписания Сторонами настоящего соглашения. 

Порядок и условия платежей согласованы сторонами в статье 6 контракта.

02.11.2020 года между обществом с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (субсубподрядчик) и обществом с ограниченной с ответственностью Научно-производственный центр «УралЭнергоРесурс» (субподрядчик) заключен контракт № 01/02-11/20 на выполнение строительно-монтажных  работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объектам АО «Транснефть-Западная Сибирь: 08-КРПО-312-001057 «Здание испытательной лаборатории. Новосибирское РНУ. ЛПДС «Сокур». Строительство» 0001-204-К-Y02-01478-2020 «47-ТЗС/КРПО/312-01.2020 Работы по строительству зданий и сооружений», по которому субсубподрядчик в установленные Контрактом сроки и в счет Контрактной цены выполнит за свой риск своими силами и силами согласованных Субподрядчиком Субсубподрядных организаций, все Работы и услуги в объеме, определенном настоящим Контрактом и Рабочей документацией, предоставит обеспечение исполнения обязательств по Контракту в виде безусловных и безотзывных Банковских гарантий и/или обеспечительного платежа в соответствии со Статьей 26 Контракта .если иной способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту не согласован Сторонами, в том числе путем заключения Дополнительных соглашений в соответствии с условиями Контракта и выполнит все иные требования, установленные Контрактом.

Согласно п. 3.2 контракта в рамках выполнения Работ и услуг по Контракту в рамках строительства Объектов «Здание испытательной лаборатории. Новосибирское РНУ. ЛПДС "Сокур". Строительство», 47- ТЗС/КРПО/312-01.2020 Работы по строительству зданий и сооружений», Субподрядчик поручает, а Субсубподрядчик в счет Контрактной цены в соответствии с требованиями Контракта, Рабочей документацией и Регламентов Заказчика (в том числе с учетом их изменений в период Срока действия Контракта) обязуется осуществить следующее в объеме предусмотренном и необходимой для выполнения работ, предусмотренных приложениями № № 1,2, а также рабочей документацией включая, но не ограничиваясь:

- получение всех необходимых разрешений, и допусков к производству Работ в соответствии с условиями Контракта, требованиями Регламентов Заказчика и нормативно­правовых актов Российской Федерации;

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений;

- поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ и услуг по Контракту (за исключением Материалов и Оборудования, входящих в поставку Субподрядчика/Подрядчика/Заказчика и указанных в Приложении 6);

- приемку, вывоз до мест складирования Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика/Подрядчика/Заказчика согласно проекту организации строительства, хранение Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика/Подрядчика/Заказчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования, вывоз на Объект Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика/Подрядчика/Заказчика; 

- проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения (в соответствии с ТУ на пересечения владельца коммуникаций); 

- проведение испытаний и участие (совместно с Субподрядчиком) в пропуске диагностических приборов;

- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно Рабочей документации;

- участие (совместно с Субподрядчиком) в комплексном опробовании систем и оборудования;

- формирование и предоставление Субподрядчику исполнительной документации;

- устранение Дефектов/Недостатков, допущенных Субсубподрядчиком в ходе производства Работ;

- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных Субподрядчиком участков с оформлением по установленной форме документов (справок), подтверждающих проведение рекультивации в соответствии с Рабочей документацией; 

- передачу Субсубподрядчиком рекультивированных на всей площади проведения Работ участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с оформлением Акта приема-передачи в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;

- сдачу работ Субподрядчику либо Заказчику совместно с Субподрядчиком: выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;

- охрану и содержание строительной площадки производства Работ, в том числе площадок Временных зданий и сооружений;

- проведение испытаний строительной лаборатории, электротехнической лаборатории, лабораторией неразрушающего контроля (контроль сварных соединений физическими методами) в соответствии с Рабочей документацией;

- выполнение иных Работ неразрывно связанных со строящимся реконструируемым, ремонтируемым Объектом.

В соответствии с п. 4.1 контракта контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате Субсубподрядчику, определена в Приложении № 1 к Контракту и составляет 2 222 479,78 руб. (Два миллиона двести двадцать две тысячи четыреста семьдесят девять рублей 78 коп.), в том числе НДС 20 % в сумме 370 413,30 руб. (Триста семьдесят тысяч четыреста тринадцать рублей 30 коп.).

Контрактная цена сформирована с учетом Сроков выполнения Работ, определенных Контрактом (п. 4.2).

Согласно п. 5.1 контракта работы, предусмотренные Контрактом по Объекту, должны быть выполнены Субсубподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ».

Порядок и условия платежей согласованы сторонами в статье 6 контракта.

Факт выполнения работ по контрактам подтверждается актами о приемке выполненных работ: 

- КС-2 от 31.08.2019 на сумму 516196,19 руб.

- КС-3 от 31.08.2019 на сумму 516196,19 руб. 

- КС-2 от 31.08.2019 на сумму 104275,66 руб. 

- КС-3 от 31.08.2019 на сумму 104275,66 руб.

- КС-2 от 30.09.2019 на сумму 1051814,63 руб.

- КС-3 от 30.09.2019 на сумму 1051814,63 руб.

- КС-2 от 25.10.2019 на сумму 1079982,76 руб. 

- КС-3 от 25.10.2019 на сумму 1079982,76 руб.

- КС-2 от 25.11.2019 на сумму 887378,81 руб. 

- КС-3 от 25.11.2019 на сумму 887378,81 руб.

- КС-2 от 20.12.2019 на сумму 600043,84 руб.

- КС-3 от 20.12.2019 на сумму 600043,84 руб.

- КС-2 от 25.01.2020 на сумму 71068,44 руб.

- КС-3 от 25.01.2020 на сумму 71068,44 руб.

- КС-2 от 29.02.2020 на сумму 1792840,13 руб.

- КС-3 от 29.02.2020 на сумму 1792840,13 руб.

- КС-2 от 25.03.2020 на сумму 1756706,40 руб.

- КС-3 от 25.03.2020 на сумму 1756706,40 руб. 

- КС-2 от 25.04.2020 на сумму 835727,20 руб. 

- КС-3 от 25.04.2020 на сумму 835727,20 руб.

- КС-2 от 31.05.2020 на сумму 1291110,85 руб.

- КС-3 от 31.05.2020 на сумму 1291110,85 руб.

- КС-2 от 30.06.2020 на сумму 1527827,92 руб. 

- КС-3 от 30.06.2020 на сумму 1527827,92 руб.

- КС-2 от 31.07.2020 на сумму 911950,73 руб. 

- КС-3 от 31.07.2020 на сумму 911950,73 руб.

- КС-2 от 31.08.2020 на сумму 979915,24 руб.

- КС-3 от 31.08.2020 на сумму 979915,24 руб.

- КС-2 от 13.09.2020 на сумму 521468,96 руб.

- КС-3 от 13.09.2020 на сумму 521468,96 руб.

- КС-2 от 30.09.2020 на сумму 1519838,72 руб.

- КС-3 от 30.09.2020 на сумму 1519838,72 руб.

- КС-2 от 07.10.2020 на сумму 343374,65  руб.

- КС-3 от 07.10.2020 на сумму 343374,65 руб.

- КС-2 от 09.10.2020 на сумму 712617,49 руб.

- КС-3 от 09.10.2020 на сумму 712617,49 руб.

- КС-2 от 23.12.2020 на сумму 1779743,05 руб.

- КС-3 от 23.12.2030 на сумму 1779743,05 руб.

Кроме того между ООО «Спецмонтаж» и ООО НПЦ «УралЭнергоРесурс» производились взаимозачеты, данные операции подтверждаются актами:

- Акт взаимозачета № 181 от 26.11.2019г на сумму 53856,00 руб.

- Акт взаимозачета № 39 от 25.03.2020г на сумму 15576,00 руб.

- Акт взаимозачета № 340 от 31.12.2020 на сумму 65809,95 руб.

Остаток в размере 3 717 397 руб. 32 коп. не оплачен.

Поскольку спор в досудебном порядке урегулировать не удалось, претензия истца от 12.07.2021г. была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленных контрактов № 01/01-07/19 от 01.07.2019 года и № 01/02-11/20 от 02.11.2020 года, суд приходит к выводу, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Контракты № 01/01-07/19 от 01.07.2019 года и № 01/02-11/20 от 02.11.2020 года содержат все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения работ по контрактам подтверждается актами о приемке выполненных работ: 

- КС-2 от 31.08.2019 на сумму 516196,19 руб.

- КС-3 от 31.08.2019 на сумму 516196,19 руб. 

- КС-2 от 31.08.2019 на сумму 104275,66 руб. 

- КС-3 от 31.08.2019 на сумму 104275,66 руб.

- КС-2 от 30.09.2019 на сумму 1051814,63 руб.

- КС-3 от 30.09.2019 на сумму 1051814,63 руб.

- КС-2 от 25.10.2019 на сумму 1079982,76 руб. 

- КС-3 от 25.10.2019 на сумму 1079982,76 руб.

- КС-2 от 25.11.2019 на сумму 887378,81 руб. 

- КС-3 от 25.11.2019 на сумму 887378,81 руб.

- КС-2 от 20.12.2019 на сумму 600043,84 руб.

- КС-3 от 20.12.2019 на сумму 600043,84 руб.

- КС-2 от 25.01.2020 на сумму 71068,44 руб.

- КС-3 от 25.01.2020 на сумму 71068,44 руб.

- КС-2 от 29.02.2020 на сумму 1792840,13 руб.

- КС-3 от 29.02.2020 на сумму 1792840,13 руб.

- КС-2 от 25.03.2020 на сумму 1756706,40 руб.

- КС-3 от 25.03.2020 на сумму 1756706,40 руб. 

- КС-2 от 25.04.2020 на сумму 835727,20 руб. 

- КС-3 от 25.04.2020 на сумму 835727,20 руб.

- КС-2 от 31.05.2020 на сумму 1291110,85 руб.

- КС-3 от 31.05.2020 на сумму 1291110,85 руб.

- КС-2 от 30.06.2020 на сумму 1527827,92 руб. 

- КС-3 от 30.06.2020 на сумму 1527827,92 руб.

- КС-2 от 31.07.2020 на сумму 911950,73 руб. 

- КС-3 от 31.07.2020 на сумму 911950,73 руб.

- КС-2 от 31.08.2020 на сумму 979915,24 руб.

- КС-3 от 31.08.2020 на сумму 979915,24 руб.

- КС-2 от 13.09.2020 на сумму 521468,96 руб.

- КС-3 от 13.09.2020 на сумму 521468,96 руб.

- КС-2 от 30.09.2020 на сумму 1519838,72 руб.

- КС-3 от 30.09.2020 на сумму 1519838,72 руб.

- КС-2 от 07.10.2020 на сумму 343374,65  руб.

- КС-3 от 07.10.2020 на сумму 343374,65 руб.

- КС-2 от 09.10.2020 на сумму 712617,49 руб.

- КС-3 от 09.10.2020 на сумму 712617,49 руб.

- КС-2 от 23.12.2020 на сумму 1779743,05 руб.

- КС-3 от 23.12.2030 на сумму 1779743,05 руб.

Документы содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости.

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ субподрядчиком (истцом), принятии их результата подрядчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться.

Кроме того между ООО «Спецмонтаж» и ООО НПЦ «УралЭнергоРесурс» производились взаимозачеты, данные операции подтверждаются актами:

- Акт взаимозачета № 181 от 26.11.2019г на сумму 53856,00 руб.

- Акт взаимозачета № 39 от 25.03.2020г на сумму 15576,00 руб.

- Акт взаимозачета № 340 от 31.12.2020 на сумму 65809,95 руб.

Остаток в размере 3 717 397 руб. 32 коп. не оплачен.

Между сторонами был составлен акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021г. по 08.11.2021г. согласно которому на 08.11.2021г. задолженность составляет 3 967 397,32 руб.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Принимая во внимание положения ст. 9 АПК РФ, которой установлено осуществление судопроизводства в арбитражном суде на основе состязательности, заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие, по общему правилу, с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств, учитывая обстоятельства дела. Гарантируя каждому лицу, участвующему в деле, право представлять арбитражному суду доказательства ч. 2 ст. 9 АПК РФ одновременно возлагает на названных лиц риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком не опровергнуты.

Учитывая вышеизложенное, требование истца о взыскании долга по контрактам № 01/01-07/19 от 01.07.2019 года и № 01/02-11/20 от 02.11.2020 года в размере 3 717 397 руб. 32 коп. подлежит удовлетворению с учетом уточнений исковых требований.

Истец также заявил требование о взыскании пени в размере 185 869 руб. 87 коп.

Согласно п. 29.15 контрактов в случае, если Субподрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 6 Контракта, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Субсубподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % пяти процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Расчет неустойки, представленный истцом, проверен судом, признан арифметически верным, контррасчет ответчиком не представлен, сумма финансовой санкции документарно не оспорена (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пунктам 69, 71, 73, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Оснований для снижения суммы пени в порядке статьи 333 ГК РФ суд не усмотрел с учетом отсутствия в материалах дела как заявления ответчика о ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства, так и доказательств такой несоразмерности (пункты 71, 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании пени в размере 185 869 руб. 87 коп. обоснованы и подлежат удовлетворению. 

Истцом также заявлено требование о взыскании расходов по оплате услуг представителя в размере 48 000 руб.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Поскольку исковые требования истца удовлетворены, истец является лицом, в пользу которого принят судебный акт, что дает ему право на возмещение судебных расходов за счет ответчика. 

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее – Постановление Пленума ВС РФ №1) разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. 

Как указывает заявитель, понесенные им в связи с рассмотрением настоящего спора расходы на оплату услуг представителя составляют 48 000 руб. 

В материалы дела представлен договор об оказании юридических услуг №1/21 от 23.11.2021 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (исполнитель), по которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать юридические услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью данного договора. 

Сроки (этапы) выполнения работ (оказания услуг) определяются в Техническом задании (п. 1.2).

Согласно п. 4.1 договора стоимость и форма оплаты за выполненные работы определяются Сторонами в Протоколе согласования стоимости работ (Приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего договора. 

Согласно технического задания № 1 

Цель работы по данному Техническому заданию: 

1.1 Судебная и иная юридическая защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов Заказчика по гражданскому (судебному) делу по иску о взыскании денежных средств к ООО «НПЦ «УралЭнергоРесурс». 

1.2 Представительство Заказчика в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

В соответствии с протоколом №1 согласования стоимости работ заказчик оплачивает стоимость работ по Договору в виде двух платежей. Стоимость работ по Техническому заданию №1 составляет сумму 48000(сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек(в том числе НДС 20% 8000,00 руб). Размер первого платежа составляет 24000 руб., (в т.ч. НДС 20% 4000,00 руб.) в срок до 28.11.2021г., второго платежа составляет 24000 руб., (в т.ч. НДС 20% 4000,00 руб.) в срок до 18.12.2021г.

Результатом работы считается вынесенное решение Арбитражного суда Республики Башкортостан первой инстанции о взыскании денежных средств с ООО «НПЦ «УралЭнергоРесурс» в пользу ООО «Спецмонтаж».

Форма оплаты: оплата производится безналичным путем Исполнителю.

Сроки оплаты: в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Факт несения расходов на оплату услуг представителя в сумме 48 000 руб. подтверждается платежными поручениями № 73 от 23.11.2021г. на сумму 24 000 руб. и № 18 от 05.02.2022г. на сумму 24 000 руб.

Представленные заявителем документы соответствуют требованиям статей 67, 68 АПК РФ и подтверждают как факт несения расходов, так и их размер. 

Согласно пункту 11 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ). 

Вместе с тем в целях реализации задач судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. Указанная правовая позиция отражена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О и в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.05.2008 № 18118/07. 

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

Суд принимает во внимание, что данный объем оказанных представителем ответчика услуг не требовал узкоспециальных познаний, существенных временных затрат, длительной и сложной подготовки к процессу, изучения практики и большого количества первичных документов, выводы суда сделаны на основании исследования и оценки совокупности доказательств, практически в полном объеме представленных в материалы дела истцом.

Оснований полагать, что представителем оказаны услуги, значительно превышающие обычный объем представительства, не имеется. 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела в подтверждение факта несения и размера судебных расходов доказательства, принимая во внимание характер спора, в процессе разрешения которого обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» оказаны соответствующие услуги, существо заявленных требований, характер оказанных услуг, объем совершенных представителем действий, суд приходит к выводу о том, что разумными и соразмерными в данном случае могут быть признаны представительские расходы в сумме 25 000 руб.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования ООО "Спецмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с ООО НПЦ "УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "Спецмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по контрактам № 01/01-07/19 от 01.07.2019, № 01/02-11/20 от 02.11.2021 в общей сумме 3 717 397 руб. 32 коп., неустойку в размере 185 869 руб. 87 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 754 руб. 80 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 25 000 руб.

Возвратить ООО "Спецмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 29 761 руб. 20 коп., уплаченную  по платежному поручению № 74 от 20.11.2021.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья З.Р. Хазиахметова