АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

13 августа 2025 года

Дело № А33-13142/2025

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 30.07.2025.

В полном объёме решение изготовлено 13.08.2025.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Винокуровой М.Ю., рассмотрев в предварительном и судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО 20/40» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

об обязании осуществить действия, взыскании неустойки,

при участии:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности № 01/2025 от 01.01.2025, представлен диплом, личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности № 24/66 от 23.04.2025, представлен диплом, личность удостоверена паспортом (посредством онлайн трансляции),

при ведении протокола предварительного и судебного заседания секретарем судебного заседания Немцевой И.С.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ДЕПО 20/40» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь»  (далее – ответчик) с требованиями:

1) обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024г., осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта «Земельный участок с нежилыми зданиями»:

- нежилое здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 48 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>;

- нежилое здание (гараж для легковых автомобилей с бытовыми помещениями и комнатами отдыха для водителей), общей площадью 1236,8 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500254:220, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, путем выполнения следующих действий:

Организационные мероприятия:

Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную Документацию в соответствии с Положением о составе разделе проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с Действующим законодательством.

Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ Березовская (КЭС) с установкой 3 (третьего) силового трансформатора (ЗТ) 110/35/6 кВ номиналом не менее 40 МВА. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом.

1-я точка присоединения (основная, существующая):

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

2-я точка присоединения (резервная, проектируемая):

Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки 16 резерв РУ-6 кВ РП-76, до границы, установленной правоустанавливающими Документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

2) взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ООО «ДЕПО 20/40» судебную неустойку в размере 10000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Определением от 20.05.2025 исковое заявление принято к производству суда, назначены предварительное и судебное заседания на 30.07.2025.

Суд исследовал материалы дела.

Заявлений об отводе составу суда, секретарю судебного заседания от лиц, участвующих в деле, в материалы дела не поступило.

06.06.2025 в электронном виде от ответчика поступил отзыв с приложенными документами.

На дату предварительного судебного заседания от участвующих в деле лиц иных документов не поступило.

Представитель истца поддерживает исковые требования, дала пояснения по делу, ответила на вопросы суда, ходатайствовала о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дополнительные доказательства приобщены судом к материалам дела.

Представитель ответчика дала пояснения по делу, ответила на вопросы суда.

Учитывая, что возражений против завершения предварительного судебного заседания не представлено, руководствуясь статьей 137 АПК РФ, суд завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании, состав суда прежний, участвуют те же представители стороны истца и ответчика

Представитель истца поддерживает исковые требования.

Представитель ответчика поддержала ранее высказанную позицию по делу.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей  8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Из материалов дела следует, что основанием для обращения в суд послужило неисполнение ПАО «Россети Сибирь» обязательств по технологическому присоединению в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024 (в редакции протокола согласования разногласий), а именно: объекта «Земельный участок с нежилыми зданиями» - нежилое здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 48 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>; нежилое здание (гараж для легковых автомобилей с бытовыми помещениями и комнатами отдыха для водителей), общей площадью 1236,8 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500254:220, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2.

Следовательно, отношения сторон регулируются ГК РФ, Федеральным законом № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила № 861).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003  «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил № 861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу пункта 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).

Пунктом 7 Правил № 861 предусмотрена процедура технологического присоединения, включающая в себя подачу заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие существенные условия:

- срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

В пункте 14 Правил № 861 содержатся требования к оформлению заявки на технологическое присоединение, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с пунктом 15 Правил № 861 в адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13, 14 Правил, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, а также уведомляет о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII настоящих Правил.

Из материалов дела следует, что между ООО «ДЕПО 20/40» (заявитель) и ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024 (в редакции протокола согласования разногласий), согласно пункту 1 которого по договору Cетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) объекта «Земельный участок с нежилыми зданиями», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 330 кВт, общая мощность с учетом существующей 450 кВт;

- категория надежности вторая;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6,00 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 120 кВт по третьей категории надежности.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Земельный участок с нежилыми зданиями» - нежилое здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 48 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>; нежилое здание (гараж для легковых автомобилей с бытовыми помещениями и комнатами отдыха для водителей), общей площадью 1236,8 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500254:220, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2.

Согласно пункту 3 договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Согласно пункту 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Согласно пункту 6 сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно пункту 8 заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно пункту 10 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.07.2023 №17-э и составляет 4 887 213,20 руб. (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч двести тринадцать рублей 20 копеек), в том числе НДС 20% в сумме 814 535,53 руб. (Восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять рублей 53 копейки).

Согласно пункту 11 внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 488 721 руб. (Четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать один рубль 32 копейки), в том числе НДС 20 % в сумме 81 453,55 руб. (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три рубля 55 копеек) вносятся в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 1 466 163,96 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят три рубля 96 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 244 360,66 руб. (Двести сорок четыре тысячи триста шестьдесят рублей 66 копеек) вносятся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 977 442,64 руб. (Девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста сорок два рубля 64 копейки), в том числе НДС 20 % в сумме 162 907,11 руб. (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот семь рублей 11 копеек) вносятся в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 1 466 163,96 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят три рубля 96 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 244 360,66 руб. (Двести сорок четыре тысячи триста шестьдесят рублей 66 копеек) вносятся в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 488 721,32 руб. (Четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать один рубль 32 копейки), в том числе НДС 20 % в сумме 8 453,55 руб. (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три рубля 55 копеек) вносятся в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно пункту 12 датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

Согласно пункту 17 сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Согласно пункту 18 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Техническим условиям № 8000550678, указано следующее:

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки объекта «Земельный участок с нежилыми зданиями».

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: объект «Земельный участок с нежилыми зданиями» - нежилое здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 48 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>; нежилое здание (гараж для легковых автомобилей с бытовыми помещениями и комнатами отдыха для водителей), общей площадью 1236,8 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500254:220, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 450 кВт:

1 точка присоединения (существующая): 330 кВт, общая мощность с учетом существующей 450 кВт;

2 точка присоединения (проектируемая): 45 кВт.

3.а Ранее присоединенная мощность по объекту:

1 точка присоединения (существующая): 120 кВт по третьей категории надежности;

4. Категория надежности: Вторая.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6, 00 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г.

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность  энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения (основная, существующая): максимальная мощность 450 кВт.

Опора линии (3/6/10)  Опора № 24

Линия (3/6/10) ВЛ 6 кВ ф.40-2

Ячейка ПС яч.2 присоединение ЛЭП ф.40-2

ПС ПС 35 кВ Базаиха

II присоединения (резервная, проектируемая): максимальная мощность 450 кВт.

Линия (3/6/10) Проектируемая

РП РУ-6 кВ яч.16 резерв РП-76

Линия (3/6/10) КВЛ 6 кВ РП 170 – РП 76 (ф.39-12)

РП РП-170

Линия (3/6/10) КВЛ 6 кВ ф.39-12 – РП 170

Ячейка ПС яч. 12 присоединение ф. 39-12

ПС ПС 35 кВ Шумково

7.а. Одномоментное использование мощности по всем точкам присоединения не должно превышать максимальной мощности в размере 450 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 35 кВ Базаиха.

9. Резервный источник питания: ПС 35 кВ Шумково.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Организационные мероприятия:

10.1.1.  Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.

10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя.

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

10.2.1. Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ Березовская (КЭС) с установкой 3 (третьего) силового трансформатора (ЗТ) 110/35/6 кВ номиналом не менее 40 МВА. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом.

1-я точка присоединения (основная, существующая):

10.2.2. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442).

2-я точка присоединения (резервная, проектируемая):

10.2.3. Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки 16 резерв РУ-6 кВ РП-76, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

10.2.4. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442).

11. Заявитель осуществляет:

11.а. На границе балансовой принадлежности электрических сетей обеспечить поддержание качества электрической энергии в соответствии с действующим НТД РФ;

11.б. Установку приборов измерения и регистрации качества электрической энергии, фильтрокомпенсирующих устройств, средств обеспечения нечувствительности систем управления непрерывным технологическим процессом в соответствии с действующей НТД РФ в случае если в ходе проектирования энергопринимающих устройств заявителя установлено их влияние на ухудшение соответствующих параметров качества электрической энергии в точках технологического присоединения.

1-я точка присоединения (основная, существующая):

11.в. Проверить существующее электрооборудование на пропускную способность и соответствие требованиям НТД с учетом увеличения нагрузки и в случае необходимости выполнить их замену. Определить проектом необходимость выполнения дополнительных мероприятий;

2-я точка присоединения (резервная, проектируемая):

11.г. От РУ 6 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии запроектировать и построить ЛЭП 6 кВ до объекта заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

11.д. Определить проектом необходимость выполнения дополнительных мероприятий для обеспечения заявленной категории надежности.

11.1. Требования по проектированию внешней схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО «Россети Сибирь»: разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

11.2. Требования по проектированию и установке устройств:

11.2.1. Защиты и автоматики: оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в п.1. настоящих технических условий, необходимыми устройствами защиты и автоматики в соответствии с действующей НТД РФ;

11.2.2. Противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления: определить проектом.

11.2.3. Регулирования реактивной мощности: определить проектом необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для поддержания в точках присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» не выше 0,4.

11.2.4. Телемеханике, связи: определить проектом.

11.2.5. Учета электрической энергии: не требуется.

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.

11.4. Требования к оформлению проекта электроснабжения: проект электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

11.5. Требования по согласованию проектной документации с сетевой организацией и органом федерального государственного энергетического надзора: согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11. 6. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию: соответствующую документацию предоставить в филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго».

Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» без предварительного согласования;

- Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.

- Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно платежным поручениям от 30.01.2024 №15, от 11.03.2024 №1, от 08.07.2024 №107 истец осуществил в пользу ответчика перевод денежных средств на сумму 2 932 327,92 руб. 

Как указывает истец, на дату подачи настоящего искового заявления ответчиком не осуществлены мероприятия по осуществлению технологического присоединения, что явилось основанием для обращения истца в суд.

19.05.2025 в материалы дела от ответчика поступили возражения, согласно которым ответчик указывает, что действует в рамках имеющихся у него прав и обязанностей, не допуская при этом ущемления прав иных лиц, не отказывается от исполнения обязательств по договору, заключенному с истцом. Однако, осуществить строительство объектов электросетевого хозяйства в установленные сроки не представляется возможным.

Осуществление технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям в срок менее чем 12 месяцев не представляется возможным.

Выполнить все мероприятия не представилось возможным в определенные договором сроки ввиду убыточности компании по итогам 2024 года, что подтверждается бухгалтерским балансом компании, который размещен на официальном сайте ПАО «Россети Сибирь» и носит открытый характер.

По итогам 2024 года финансовый результат ПАО «Россети Сибирь» отрицательный, убыток по предприятию составил (-) 696 млн руб.

План ТП формируется согласно доведенного источника для выполнения мероприятий с капитальными затратами. Так, на 2024 год по договорам льготного технологического присоединения определен источник 1 055 млн руб. с НДС, при необходимом объеме финансирования 7 041 млн руб.

Учитывая сложившуюся финансово-экономическую ситуацию в стране, проблемы с импортом оборудования из-за санкций недружественных государств, а также наличие большого количества обязательных платежей у ПАО «Россети Сибирь» и отсутствие бездействия при исполнении договора, возложение дополнительных излишних расходов на сетевую организацию существенным образом и негативно повлияет на предпринимательскую деятельность и интересы неограниченного круга лиц.

Во исполнение федерального законодательства об электроэнергетике, ПАО «Россети Сибирь» за период с 2022 по 2024 год включительно принято на обслуживание и перешло в собственность (на основании решений судов) большое количество бесхозяйных объектов, которые участвуют/могут быть задействованы в схеме энергоснабжения на тех или иных участках, а соответственно, ускорить исполнение ряда договоров ТП. В этой связи, ответчику приходится направлять значительный объем финансов на приведение таких сетей в удовлетворительное состояние, что в том числе обременяет финансовое положение общества.

Материалами дела и пояснениями сторон подтверждается факт невыполнения ответчиком в установленный срок мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024 (в редакции протокола согласования разногласий), что нарушает права истца, как стороны, не получившей исполнение по данному договору. 

При этом ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие принятие необходимых и достаточных мер по соблюдению законодательства, либо свидетельствующие о наличии препятствий по исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024 (в редакции протокола согласования разногласий) и Правил № 861. 

Поскольку договор №20.2400.6719.23 от 09.01.2024 (в редакции протокола согласования разногласий) заключен в предусмотренном законом порядке и ответчиком на этапе проверки документов и заявления истца отсутствие технической возможности для технологического присоединения установлено не было, равно как за период действия договора – более двух лет, не была инициирована процедура расторжения договора или его изменения ввиду невозможности исполнения.  

Указанные ответчиком причины не могут считаться уважительными для невыполнения мероприятий, возложенных на сетевую организацию по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024 (в редакции протокола согласования разногласий) и указанных в технических условиях, и не являются основанием для освобождения от выполнения взятых на себя обязательств, с учетом даты заключения указанного договора.

Необходимость выполнения требуемых мероприятий, их сроки и стоимость должны учитываться ответчиком при осуществлении своей деятельности как профессиональным участником рынка оказания услуг по осуществлению технологического присоединения. 

Срок выполнения мероприятий составляет 1 год со дня заключения договора №20.2400.6719.23 от 09.01.2024 (в редакции протокола согласования разногласий) (пункт 5); данный срок соответствует закону, сторонами не продлевался. Каких-либо препятствий по выполнению технических условий и договора истцом не осуществлялось; доказательства обратного не представлены.

Технические условия действовали с момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024 (в редакции протокола согласования разногласий), а также действуют в настоящее время, поэтому должны исполняться сторонами. 

При таких обстоятельствах обоснованным является требование истца об обязании ответчику в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024,

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта «Земельный участок с нежилыми зданиями»:

- нежилое здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 48 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>;

- нежилое здание (гараж для легковых автомобилей с бытовыми помещениями и комнатами отдыха для водителей), общей площадью 1236,8 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500254:220, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, путем выполнения следующих действий:

Организационные мероприятия:

Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную Документацию в соответствии с Положением о составе разделе проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с Действующим законодательством.

Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ Березовская (КЭС) с установкой 3 (третьего) силового трансформатора (ЗТ) 110/35/6 кВ номиналом не менее 40 МВА. Объем  необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом.

1-я точка присоединения (основная, существующая):

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

2-я точка присоединения (резервная, проектируемая): Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки 16 резерв РУ-6 кВ РП-76, до границы, установленной правоустанавливающими Документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

В данной части исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика судебной неустойки в размере по 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

При этом оплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Исходя из пункта 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

По смыслу статей 308.3, 330 ГК РФ, судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

В пунктах 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. 

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. 

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.). 

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

При рассмотрении настоящего дела ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера судебной неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела, суд считает обоснованным присуждение судебной неустойки в размере 1 500 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В рамках настоящего спора заявлено неимущественное требование, размер государственной пошлины за разрешение которого составляет 50 000 руб.

При подаче искового заявления истцом уплачено 50 000 руб. государственной пошлины, что подтверждается платежным поручением от 07.05.2025 №81.

С учётом результатов рассмотрения спора, расходы по уплате госпошлины в сумме 50 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.6719.23 от 09.01.2024,

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта «Земельный участок с нежилыми зданиями»:

- нежилое здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 48 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>;

- нежилое здание (гараж для легковых автомобилей с бытовыми помещениями и комнатами отдыха для водителей), общей площадью 1236,8 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500254:220, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, путем выполнения следующих действий:

Организационные мероприятия:

Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную Документацию в соответствии с Положением о составе разделе проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с Действующим законодательством.

Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ Березовская (КЭС) с установкой 3 (третьего) силового трансформатора (ЗТ) 110/35/6 кВ номиналом не менее 40 МВА. Объем  необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом.

1-я точка присоединения (основная, существующая):

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

2-я точка присоединения (резервная, проектируемая): Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки 16 резерв РУ-6 кВ РП-76, до границы, установленной правоустанавливающими Документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО 20/40» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В случае неисполнения решения суда взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО 20/40» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 500 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

М.Ю. Винокурова