Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

17 декабря 2018 годаДело № А56-110076/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «СОЮЗ» (192212, Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, лит. А, пом. 16Н, ОГРН: 1027807970453)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКСТРОЙ» (191025, Санкт-Петербург, ул. Колокольная, д. 8, лит. А, пом.21-Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 62 000 руб. аванса, 7068 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.05.2018 по 15.08.2018 на основании договора подряда от 09.04.2018 № 56,

судом установлено, что при расчете неустойки истец допустил арифметическую ошибку, за период с 01.05.2018 по 15.08.2018 количество дней просрочки составляет 107 дней, при таком положении размер неустойки за данный период составляет 6634 руб.,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕКСТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «СОЮЗ» 62000 руб. аванса и 6634 руб. неустойки, всего: 68634 руб., а также 2745 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В остальной части иска отказать.

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Рагузина П.Н.