155/2019-10322(2) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-10758/2018

г. Петрозаводск

18 февраля 2019 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить полностью. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "СЛАВЯНЕ ПРО"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение месяца с момента  вступления в законную силу решения суда, исполнить невыполненные  обязательства по комплексному освоению в целях жилищного строительства  осуществив строительство в соответствии с видами разрешенного  использования земельного участка, предусмотренные аукционной  документацией, проектной документацией (шифр проекта 10-ПК/08 ПЗ,  выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» в  2009 году, шифр проекта 10-ПК/08 ПОС, выполненной обществом с  ограниченной ответственностью «Стройсервис» в 2009 году, шифр проекта  10-ПК/08 АР, выполненной обществом с ограниченной ответственностью  «Стройсервис» в 2010 году, шифр проекта 10-ПК/08 ГП, выполненной  обществом с ограниченной ответственностью ПК «Проект» в 2008 году), а  именно:  

1. Установить дорожные знаки 2.4 «Уступите дорогу» в количестве 7 штук;  2. Установить дорожные знаки 2.1 «Главная дорога» в количестве 8 штук;  

3. Установить дорожные знаки 2.2 «Конец главной дороги» в количестве 2  

штук; 

4. Установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» в количестве 2 штук;  

5. Установить дорожные знаки 5.22 «Конец жилой зоны» в количестве 2  

штук; 

6. Установить дорожные знаки 6.4 «Место стоянки» в количестве 4 штук;  

7. Установить дорожные знаки 8.13 «Направление главной дороги» в  

количестве 3 штук; 

8. Установить металлические стойки под один знак в количестве 14 штук;  9. Установить металлические стойки под два знака в количестве 7 штук;  

10. Выполнить проезды, площадки в границах землеотвода из  

асфальтобетона площадью покрытия – 5277,0 кв.м. Ширина  

тротуара=1,5м., ширина проезжей части =6м., количество полос  движения проезжей части – 4 штуки, ширина газона между тротуарами и  проезжей частью=3м.;  

11. Выполнить тротуары в границах землеотвода из асфальтобетона  площадью покрытия – 875,0 кв.м.;  

12. Выполнить отмостки в границах землеотвода площадью покрытия –  715,0 кв.м.,  

13. Выполнить устройство бортового бетонного камня Бр. 100.30.15 – 1905, 0  п.м. в границах землеотвода;  

14. Выполнить устройство бортового бетонного камня Бр. 100.20.8 – 834, 0  п.м. в границах землеотвода;  

15. Выполнить проезды, площадки в границах участка благоустройства из  асфальтобетона площадью покрытия – 1395,0 кв.м.;  

16. Выполнить тротуары в границах участка благоустройства из  асфальтобетона площадью покрытия – 136,0 кв.м.;  

17. Выполнить устройство бортового бетонного камня Бр. 100.30.15 – 541, 0  п.м. в границах участка благоустройства;  

18. Выполнить устройство бортового бетонного камня Бр. 100.20.8 – 173, 0  п.м. в границах участка благоустройства;  

19. Выполнить устройство водоотводных лотков длиною – 110, 0 м.; 

20. Выполнить газон с посевом многолетних трав в границах землеотвода  растительным слоем h=0,15 м. на площади – 2565,0 кв.м.;  

21. Выполнить газон с посевом многолетних трав в границах землеотвода  растительным слоем h=0,15 м. на площади – 310,0 кв.м.;  

22. Выполнить расстановку осветительных приборов в количестве – 27 штук  (8 из которых на один осветительных прибор, 19 на два осветительных  прибора);  

23. Выполнить устройство комплектной трансформаторной подстанции  КТП-3-1 в количестве 1 штуки, передать в муниципальную собственность  муниципального образования «Костомукшский городской округ»;  

24. Выполнить строительство сети хозяйственно-питьевого водопровода  (подземным способом), по окончании строительства передать в  муниципальную собственность муниципального образования  «Костомукшский городской округ»;  

25. Выполнить строительство бытовой канализации (подземным способом),  по окончании строительства передать в муниципальную собственность  муниципального образования «Костомукшский городской округ»;  

26. Выполнить строительство ливневой канализации (подземным способом),  по окончании строительства передать в муниципальную собственность  муниципального образования «Костомукшский городской округ»;  

27. Выполнить строительство кабеля наружного освещения (подземным  способом), по окончании строительства передать в муниципальную  собственность муниципального образования «Костомукшский городской  округ»;  

28. Выполнить строительство электрического кабеля 0,4 кВ подземным  способом, по окончании строительства передать в муниципальную  собственность муниципального образования «Костомукшский городской  округ»;  

29. Выполнить строительство электрического кабеля 10 кВ подземным  

способом, по окончании строительства передать в муниципальную  

собственность муниципального образования «Костомукшский городской  

округ». 

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЛАВЯНЕ ПРО"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  6000 руб. госпошлины.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Погорелов В.А.