АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-7610/22

г. Уфа

25 июля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 20.07.2022

Полный текст решения изготовлен 25.07.2022

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

         Акционерного общества "Транснефть-Урал" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

         к Обществу с ограниченной ответственностью "Самарская тепловая компания"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

         о взыскании неустойки  в размере 6 695 355 08 коп.

 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности № 21-03-19-532 от 30.12.2021 г., доверенность, диплом;

от ответчика  – не явились, уведомлены надлежащим образом

 

Акционерное общество "Транснефть-Урал" /далее - истец, АО "Транснефть-Урал"/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Самарская тепловая компания"   /далее – ответчик, ООО "Самарская тепловая компания" / о взыскании неустойки в размере 6 432 792 руб. 13 коп. за нарушение сроков выполнения работ по контракту №ТУР-21-46-20-276 от 21.02.2020 за период с 13.07.2021 г. по 30.08.2021 г., согласно уточнению от 19.07.2022 г, принятого судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчиком представлен отзыв, в котором он не согласился с исковыми требованиями, просит снизить размер неустойки согласно ст. 333 ГК РФ, ссылается на подписание акта по формы КС-11 более поздней датой, чем фактическое выполнение работ.

Истец возразил на доводы ответчика, считает размер неустойки соразмерным, ссылается на свободу договора, не видит оснований для снижения размера неустойки, доводы о подписании акта более поздней датой необоснованными. 

Представители ответчика в судебное заседание не явились,  надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания по последнему известному суду адресу,  в силу ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте, дело рассмотрено в отсутствие ответчика в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Транснефть-Урал» (далее  Заказчик) 21.02.2020 заключило с ООО «СТК» (далее - Подрядчик) контракт № ТУР-21-46-20-276 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объекту ТПР Программы ТПР и КР АО «Транснефть - Урал» 2020-2021 гг.: 09-ТПР-006-009520 «Котельная и тепловые сети НПС «Канаши». Челябинское НУ. Строительство» (приложение к иску).

В соответствии с п. 3.1 контракта №ТУР-21-46-20-276 от 21.02.2020  Подрядчик принял обязательства за свой риск, своими силами и силами согласованных Заказчиком субподрядных организаций, все работы и услуги в объеме, определенном настоящим Контрактом и Рабочей документацией, и выполнить все иные требования, установленные Контрактом.

Согласно п. 5.1 контракта  №ТУР-21-46-20-276 от 21.02.2020 работы должны быть полностью завершены не позднее 10 июля 2021 года.

Суд считает, что в рассматриваемом случае отношения между истцом и ответчиком возникли из договора, правовому регулированию которого посвящены нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

30.08.2021 сторонами подписан Акт № 14-2021 приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (форма КС-11)(приложение к иску)

В материалах дела представлена претензия  от 08.02.2021 г. № ТУР-21-03-15/52033 с требованием об оплате неустойки (приложение к иску), направленная в адрес ответчика. 

Указанные претензии ответчиком не удовлетворены, в связи с чем истец обратился в суд с рассматриваемым иском.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При оценке представленных в деле доказательств, суд руководствуется также положениями ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными процессуальными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе в части непредставления доказательств в обоснование своей правовой позиции.

Согласно п. 2 ст. 708 ГК РФ указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (абзац 1 статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 29.1.4 контракта №ТУР-21-46-20-276 от 21.02.2020 в случае задержки подрядчиком срока завершения работ по объекту в целом, указанного в пункте 5.1 контракта, заказчик вправе предъявить подрядчику неустойку в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от контрактной цены объекта за каждый день просрочки. кроме уплаты неустойки подрядчик обязан компенсировать заказчику затраты на дополнительное ведение авторского надзора и строительного контроля и дополнительные затраты, связанные с владением, пользованием строительной площадкой.

В силу п 4.1. контракта №ТУР-21-46-20-276 от 21.02.2020  контрактная цена работ услуг, подлежащая оплате подрядчику- 50 754 652 руб. 

В связи с нарушением ответчиком своих обязательств по выполнению работ в срок  истцом было заявлено требование о взыскании неустойки. 

В соответствии  с прилагаемым расчетом общая сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту №ТУР-21-46-20-276 от 21.02.2020 за период с 13.07.2021 г. по 30.08.2021 г. составила  6 432 792 руб. 13 коп.

Как следует из материалов дела, ответчиком допущено нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, подлежат отклонению ввиду следующего.

В соответствии с п. 21.12. контракта № ТУР-21-46-20-276 от 21.02.2020 приемка законченного строительством Объекта производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами, нормативными документами Ростехнадзора, Регламентами Заказчика.

Приказом АО «Транснефть-Урал» № 1625 от 06.08.2021 назначена рабочая комиссия по приемке объекта 09-ТПР-006-009520 «Котельная и тепловые сети НПС «Канаши». Челябинское НУ. Строительство» (далее - Объект) с участием представителя ответчика.

В соответствии с п. 6.2.11. отраслевого регламента 0Р-91.010.30-КТН-0228-20 Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 подписывается членами рабочей комиссии только после устранения подрядчиком всех замечаний и недоделок, выявленных в процессе работы рабочей комиссии и указанных в ведомости недоделок.

Так, 06.08.2021, по результатам работы рабочей комиссии по приемке объекта сформирована ведомость недоделок, подписанная в том числе представителем ответчика, из 371 замечания со сроками исполнения 10.08.2021. Недоделки, отмеченные в указанной ведомости, устранены ответчиком лишь 29.08.2021, что подтверждается подписанной членами рабочей комиссии, в том числе руководителем проекта ответчика ФИО3, справкой об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией. Помимо изложенного, записи об устранении замечаний по ведомости недоделок велись в журнале общих работ самим же ответчиком.

Таким образом, учитывая, что недоделки по объекту устранены 29.08.2021, акт № 14-2021 приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией подписан 30.08.2021, довод ответчика не обоснован и не находит своего подтверждения.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума от 24.03.2016 N 7), подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из разъяснений пункта 71 постановления Пленума от 24.03.2016 N 7 следует, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заявление ответчика о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (пункт 72 постановления Пленума от 24.03.2016 N 7).

Согласно пункту 77 постановления Пленума от 24.03.2016 N 7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1, 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 73 постановления Пленума от 24.03.2016 N 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Вместе с тем, в силу пункта 75 постановления Пленума от 24.03.2016 N 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 26.05.2011 N 683-О-О, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия.

Применение такой меры как взыскание договорной неустойки носит компенсационно-превентивный характер и позволяет не только возместить лицу убытки, возникшие в результате просрочки исполнения обязательства, но и удержать контрагента от неисполнения (просрочки исполнения) обязательства в будущем.

Рассматривая заявление ответчика о снижении суммы договорной неустойки, суд должен установить как определить, какие отрицательные последствия ненадлежащего исполнения обязательства ответчиком наступили для истца, при этом, заявленная к взысканию неустойка превышает размер возможных убытков кредитора в связи с ненадлежащим исполнением обязательства.

В рассматриваемом случае, неустойка начислена за просрочку исполнения неденежного обязательства, что с учетом абзаца второго пункта 76 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7, допускает возможность ее снижения ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств и доводов ответчика относительно оснований для снижения размера неустойки, учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих причинение истцу убытков в результате нарушения ответчиком сроков выполнения работ, соотнеся  цену договора и  размер начисленной неустойки, суд счел, что заявленный истцом размер неустойки несоразмерен последствиям нарушения ответчиком обязательств.

Руководствуясь принципами добросовестности, разумности и справедливости и необходимости соблюдения баланса интересов сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для снижения размера неустойки до 500 000 руб., признав указанную сумму достаточной для обеспечения восстановления нарушенных прав истца.

Суд считает, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению в размере 500 000 руб.

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика в полном объеме в связи  с применением ст. 333 Гражданского кодекса РФ в соответствии  с пунктом 21 Постановления Пленума Верховного суда РФ №1  по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования  Акционерного общества "Транснефть-Урал" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить частично.

         Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Самарская тепловая компания"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу Акционерного общества "Транснефть-Урал" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку  в размере 500 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 55 164 руб., в остальной части отказать.

                   Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

         Возвратить Акционерному обществу "Транснефть-Урал" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 1 313 руб. по платежному поручению № 042967  от 10.03.2022 г.

                   Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                 И.Р. Юсеева