СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-7858/2017-ГК

г. Пермь

19.07.2017                                                                                Дело № А60-5081/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 18.07.2017.

Постановление в полном объеме изготовлено 19.07.2017.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Сусловой О.В.,

судей Гребенкиной Н.А., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Можеговой Е.Х.,

рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, АО "Невьянский цементник",

на решение Арбитражного суда Свердловской области 

от 06 апреля 2017 года,	

вынесенное судьей Абдрахмановой Е.Ю., 

по делу № А60-5081/2017

по иску АО "Ремма Интернейшнл" (ОГРН 1037739004753, ИНН 7709294699, Московская область, г. Видное)

к АО "Невьянский цементник" (ОГРН 1026601326982, ИНН 6621003100, Свердловская область, пос. Цементный)

о взыскании задолженности, неустойки по договору поставки и подряда,

при участии

от истца: не явились,

от ответчика: не явились, 

установил:

акционерное общество  "Ремма Интернейшнл" (далее – истец, общество "Ремма Интернейшнл") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к акционерному обществу "Невьянский цементник" (далее – ответчик, общество "Невьянский цементник") о взыскании 6 330 266 руб. 80 коп. долга по

договору поставки и подряда от 05.05.2016 № 115-16, 255 045 руб. 22 коп. неустойки за период с 08.06.2016 по 05.04.2017 (с учетом изменения иска, принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.04.2017 иск удовлетворен. 

Ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой он просит отменить решение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Между обществом "Ремма Интернейшнл" (исполнитель) и обществом "Невьянский цементник" (заказчик) заключен договор от 05.05.2016 № 115-16 (далее – договор), согласно которому исполнитель обязался выполнить работы по реконструкции оборудования подачи сырьевых материалов, поставить (передать в собственность) заказчику оборудование и материалы в соответствии со спецификациями № 1, № 2, № 3 (приложения № 1, № 2, № 3 к договору), а заказчик обязался принять результат работ, поставленный товар и оплатить их (включая стоимость осуществляемых исполнителем шеф-монтажных работ) (пункты 1.1, 1.2.1 договора).

В соответствии с пунктом 1.2.1.1. договора наименование, ассортимент, количество, срок поставки, цена и общая стоимость товара согласованы заказчиком и исполнителем в спецификациях № 1, № 2, № 3 (приложения № 1, № 2, № 3 к договору).

Общая сумма договора является твердой, договорной, складывается из

стоимости товара, стоимости работ и составляет: 45 702, 69 евро (в т.ч. НДС 6 971, 59 евро) - стоимость оборудования импортного производства согласно спецификации № 1; 7 224, 88 евро (в т.ч. НДС 1 102,10 евро) – стоимость материалов импортного производства согласно спецификации № 2; 7 721 046 руб. 80 коп. (в т.ч. НДС 1 177 786 руб. 80 коп.) - стоимость оборудования отечественного производства согласно спецификации № 3; 1 509 220 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 230 220 руб. 00 коп.) - стоимость работ по стыковке конвейерных лент согласно спецификации № 4  (пункты 2.1.1-2.1.4 договора).

Согласно спецификациям № 1 и № 2 к договору срок поставки 4-6 недель после получения предоплаты. В соответствии со спецификацией № 3 срок поставки определен до 31.05.2016.

В соответствии с пунктом 3.1. договора исполнитель обязался качественно и своевременно исполнить принятые на себя обязательства по поставке оборудования и материалов, выполнению работ по стыковке конвейерных лент.

Во исполнение условий договора общество "Ремма Интернейшнл" поставило оборудование, согласованное в спецификациях № 1 и № 2, что подтверждается: товарными накладными № 75/1 от 17.05.2016, № 75/2 от 17.05.2016, № 90/13 от 08.06.2016, № 83/9 от 30.05.2016; товарно-транспортными накладными № 75/1 от 17.05.2016, № 75/2 от 17.05.2016; актами о приемке товарно-материальных ценностей от 25.05.2016, от 30.05.2016. Общество "Ремма Интернейшнл", а также выполнило работы, согласованные в спецификации № 4 к договору, что подтверждается актом сдачи-приемки оказанных работ (услуг) от 23.05.2016.

В соответствии с пунктом 2.2 договора стоимость товара, указанная в пунктах 2.1.1. - 2.1.3. договора, оплачивается заказчиком авансовым платежом в течение 5 рабочих дней с даты фактического заключения настоящего договора, на основании счета исполнителя. На сумму уплаченного аванса исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента получения суммы аванса обязан предоставить заказчику счет-фактуру.

Стоимость работ по стыковке конвейерных лент, указанная в пункте 2.1.4. настоящего договора, уплачивается заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета – фактуры исполнителя (пункт 2.3 договора).

Согласно п. 6.3 договора, за нарушение заказчиком сроков оплаты, установленных договором исполнитель вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,01% от суммы просроченного к оплате долга заказчика за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

Товар и работы обществом "Невьянский цементник" приняты в полном объеме, однако обязательства по оплате товара исполнены ответчиком частично, в том числе по спецификациям № 1 и № 2 на общую сумму 3 754 353 руб. 66 коп. (платежное поручение от 03.10.2016№ 2649), по спецификации № 3 на общую сумму 900 000 руб. 00 коп. (платежные поручения от 10.11.2016 № 3084, от 11.11.2016 № 3096, от 14.11.2016 № 3132 и от 28.12.2016 № 3594), в связи с чем у общества "Невьянский цементник" образовалась задолженность перед обществом "Ремма Интернейшнл", общий размер которой составляет 8 330 266 руб. 80 коп.

Поэтому общество "Ремма Интернейшнл" в порядке пункта 7.1 договора направило обществу "Невьянский цементник" претензию от 12.12.2016 № 02-01/583 с требованием об оплате задолженности.

Обществом "Ремма Интернейшнл" начислена неустойка в общем размере 255 045 руб. 22 коп. за период с 08.06.2016 по 05.04.2017, в том числе 211 730 руб. 61 коп. неустойки, начисленной за период с 08.06.2016 по 05.04.2017 в связи с нарушением сроков оплаты поставленного товара, 43 314 руб. 61 коп. неустойки, начисленной за период с 23.06.2016 по 05.04.2017, в связи с нарушением срока оплаты выполненных работ.

Ссылаясь на то, что заказчиком не погашена задолженность по договору, а также не произведена уплата неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты, заказчик обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции руководствовался статьями 309, 310, 330, 421, 454, 486, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что ответчиком товарные накладные, акты о приемке товарно-материальных ценностей, а также акт сдачи-приемки оказанных работ (услуг), подписаны без замечаний. Претензий со стороны заказчика относительно сроков, качества выполненных работ предъявлено не было. Наличие задолженности ответчиком не оспорено. Доказательств оплаты долга или наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера долга, а также контррасчет в материалы дела не представлены.

В связи с тем, что в апелляционной жалобе не приведены мотивы несогласия с решением суда первой инстанции (что являлось основанием для оставления апелляционной жалобы без движения), ответчиком представлено дополнение, в котором указано, что судом при вынесении решения не учтен контррасчет общества "Невьянский цементник".

Судом апелляционной инстанции данный довод заявителя отклоняется, поскольку наличие указанного контррасчета в материалах дела не установлено. При разбирательстве дела в суде первой инстанции общество "Невьянский цементник" каких-либо документов, опровергающих доводы истца, не представило. Доводы ответчика сводились к несогласию с размером задолженности, сумма которой была уменьшена истцом при уточнении исковых требований, и данные уточнения приняты судом. 

Поскольку материалами дела подтверждается выполнение истцом своих обязательств по поставке товара, работы по договору выполнены и приняты ответчиком без замечаний, требования общества "Ремма Интернейшнл" о взыскании задолженности по договору и неустойки правомерно удовлетворены судом первой инстанции. 

Доказательств, опровергающих выводы суда первой инстанции, ответчиком в материалы дела не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены или изменения судебного акта.

Решение арбитражного суда от 06.04.2017 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины в сумме 3 000 руб., понесенные при подаче апелляционной жалобы, относятся на ее заявителя. 

Руководствуясь статьями 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 06.04.2017 по делу № А60-5081/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационногопроизводства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

 

Председательствующий

О.В. Суслова

 

Судьи

Н.А. Гребенкина

И.О. Муталлиева