АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Новосибирск                                                                Дело №А45-13655/2024

               Резолютивная часть решения объявлена 27 мая 2024 года

               Решение изготовлено в полном объеме 27 мая 2024 года

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи               Остроумова Б.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шевчуком С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Первая Высотная» «(ОГРН: 

<

***>, 630009, 

<

...>, площадка 1), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью «Тэксвязьинжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, 123290, 

<

...> Магистральный туп, д. 5а, блок/этаж с/4 офис 402), г. Москва

о взыскании задолженности в размере 35 763 182 руб. 59 коп.

при участии в судебном заседании представителей:  

истца: ФИО1 - доверенность б/н от 18.01.2023, паспорт, диплом, онлайн

ответчика: представитель отсутствует, извещен,

                                           установил:

общество с ограниченной ответственностью «Первая Высотная»  (далее-истец, Поставщик, ООО «Первая Высотная») обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Тэксвязьинжиниринг»  (далее-ответчик, Покупатель, ООО «Тэксвязьинжиниринг») задолженности за поставленный товар  по договорам поставки в размере 30 666 144 рублей 92 копеек, суммы неустойки 0,1% в день от суммы задолженности но не более 10% от суммы долга за период с 13.01.2023 по 28.12.2023 в размере 5 097 037 рублей 67 копеек, расходов на юридические услуги по составлению искового заявления 10 000 рублей.

В судебном заседании представитель истца доводы искового заявления и заявленные исковые требования поддержал.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного разбирательства по правилам статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее-АПК РФ), явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыва на исковое заявление и возражений не представил, ходатайств об отложении судебного разбирательства либо о рассмотрении дела в его отсутствие не заявлял. 

Суд, учитывая мнение представителя истца, руководствуясь п.3 ст. 156, ст. 123 АПК РФ определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Арбитражный суд, выслушав представителя истца, изучив доводы искового заявления, исследовав представленные доказательства, которые стороны посчитали достаточным для рассмотрения дела по существу в соответствие со ст. 71 АПК РФ приходит к следующему.

В силу п.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ), по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как следует из представленных доказательств, 27 мая 2022 г. между ООО «Первая Высотная» (поставщик) и ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ»    (покупатель) заключен договор поставки №П 03-05.22,

согласно п. 1.1. Договора ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и передать в собственность ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» продукцию надлежащего качества, а именно: оттяжки и мех. Детали мачт связи, а ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» обязуется принять продукцию и оплатить в порядке и сроки, согласованные сторонами в договоре.

Согласно п. 1.2. Договора поставка продукции осуществляется для целей строительства объекта «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - граница ТТГ. Система 5.6.»

Согласно п. 1.3. Договора наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена, способ доставки, сроки изготовления и поставки продукции, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в спецификациях (Приложение №1 к договору).

Согласно п. 5.1. Договора цена на поставляемую продукцию и порядок ее оплаты по настоящему договору указывается в спецификациях.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №1 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 10 132 458 руб. 73 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №2 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 4 675 773 руб. 93 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №3 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 7 251 096 руб. 57 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №4 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 7 246 761 руб. 01 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №5 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 7 246 761 руб. 01 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №6 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 13 764 306 руб. 33 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №7 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 7 285 347 руб. 49 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №8 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 4 675 773 руб. 93 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №9 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 7 270 606 руб. 59 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №10 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 2 845 306 руб. 88 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №11 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 10 175 380 руб. 77 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №12 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 2 823 087 руб. 14 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №13 от 27.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию по приведенному перечню общей стоимостью на 4 675 773 руб. 93коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

 

30 мая 2022 г. между ООО «Первая Высотная» (поставщик) и ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ»    (покупатель) заключен договор поставки №П 04-05.22,

согласно п. 1.1. Договора ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и передать в собственность ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» продукцию надлежащего качества, а именно: металлоконструкции мачт связи, а ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» обязуется принять продукцию и оплатить в порядке и сроки, согласованные сторонами в договоре.

Согласно п. 1.2. Договора поставка продукции осуществляется для целей строительства объекта «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - граница ТТГ. Система 5.6.»

Согласно п. 1.3. Договора наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена, способ доставки, сроки изготовления и поставки продукции, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в спецификациях (Приложение №2 к договору).

Согласно п. 5.1. Договора цена на поставляемую продукцию определена сторонами в протоколе согласования договорной цены, порядок оплаты продукции указывается в спецификациях.

В протоколе согласования договорной цены от 30 мая 2022г. указаны характеристики поставляемой продукции, количество, вес, стоимость.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №1 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=99.4 м Площадка ПРС-36а общей стоимостью 7 066 471 руб. 79 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №2 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=60.4 м Площадка ПРС-37а общей стоимостью 4 283 269 руб. 23 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №3 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=81.4 м Площадка ПРС-38а общей стоимостью 5 888 624 руб. 21 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №4 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=81.4 м Площадка ПРС-39а общей стоимостью 5 862 064 руб. 06 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №5 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=81.4 м. Площадка ПРС-40а общей стоимостью  5 899 750 руб. 77 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №6 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=126.4 м Площадка ПРС-44а общей стоимостью 8 765 063 руб. 99 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №7 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=81.4 м Площадка ПРС-46а общей стоимостью 5 840 528 руб. 80 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №8 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=60.4 м Площадка ПРС-47а общей стоимостью 4 283 987 руб. 07 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №9 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=81.4 м Площадка ПРС-48а общей стоимостью 5 857 756 руб. 92 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №10 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=42.4 м Площадка ПРС-49а общей стоимостью 3 433 451 руб. 34 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №11 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=99.4 м Площадка ПРС-50а общей стоимостью 6 990 380 руб. 54 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №12 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=42.4 м Площадка Узел связи общей стоимостью 3 259 374 руб. 65 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №13 от 30.05.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию мачта высотой Н=60.4 м УРС-45а общей стоимостью 4 283 269 руб. 23 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №14 от 30.05.2022г.», с учетом дополнительного соглашения №1 от 03.10.2022г. ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию площадка ПРС-41а и площадка ПРС-43а, площадка УРС-42а, общей стоимостью 2 508 414 руб. 52 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №15 от 30.05.2022г.», с учетом дополнительного соглашения №2 от 15.01.2023г. ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию турбостойки и крепления антенн по проекту общей стоимостью 2 360 785 руб.452 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

 

30 сентября 2022 г. между ООО «Первая Высотная» (поставщик) и ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ»    (покупатель) заключен договор поставки №П 07-09.22,

согласно п. 1.1. Договора ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и передать в собственность ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» продукцию надлежащего качества, а именно: дополнительные металлоконструкции мачт связи, а ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» обязуется принять продукцию и оплатить в порядке и сроки, согласованные сторонами в договоре.

Согласно п. 1.2. Договора поставка продукции осуществляется для целей строительства объекта «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - граница ТТГ. Система 5.6.»

Согласно п. 1.3. Договора наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена, способ доставки, сроки изготовления и поставки продукции, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в спецификациях (Приложение №1 к договору).

Согласно п. 5.1. Договора цена на поставляемую продукцию и порядок ее оплаты по настоящему договору указывается в спецификациях.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №1 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 10 415 224 руб. 73 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №2 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 7 823 844 руб. 65 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №3 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 10 031 302 руб. 56 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №4 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 11 179 841 руб. 77 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №5 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 11 202 742 руб. 71 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №6 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 5 840 070 руб. 50 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №7 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 3 632 139 руб. 64 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №8 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 3 901 512 руб. 38 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №9 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 4 993 264 руб. 01 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №10 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 3 615 511 руб. 45 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №11 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 3 764 996 руб. 65 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №12 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 5 787 475 руб. 43 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №13 от 30.09.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 1 701 974 руб. 47 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

 

30 ноября 2022 г. между ООО «Первая Высотная» (поставщик) и ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ»    (покупатель) заключен договор поставки №П 10-11.22,

согласно п. 1.1. Договора ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и передать в собственность ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» продукцию надлежащего качества, а именно: металлоконструкции молниеотводов и прожекторных мачт, а ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» обязуется принять продукцию и оплатить в порядке и сроки, согласованные сторонами в договоре.

Согласно п. 1.2. Договора поставка продукции осуществляется для целей строительства объекта «ПС 220 кВ Ковыкта».

Согласно п. 1.3. Договора наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена, способ доставки, сроки изготовления и поставки продукции, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в спецификациях (Приложение №2 к договору).

Согласно п. 5.1. Договора цена на поставляемую продукцию и порядок ее оплаты по настоящему договору указывается в протоколе согласования договорной цены.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №1 от 30.11.2022г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 26 240 405 руб. 86 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

 

30 января 2023 г. между ООО «Первая Высотная» (поставщик) и ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ»    (покупатель) заключен договор поставки №П 01-01.23,

согласно п. 1.1. Договора ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и передать в собственность ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» продукцию надлежащего качества, а именно: сваи металлические, оголовки металлические, заглушки свай, а ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» обязуется принять продукцию и оплатить в порядке и сроки, согласованные сторонами в договоре.

Согласно п. 1.2. Договора поставка продукции осуществляется для целей строительства объекта «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - Граница ТТГ. Система 5.6. Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - граница ТТГ. Система 5.6.3 пусковой комплекс».

Согласно п. 1.3. Договора наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена, способ доставки, сроки изготовления и поставки продукции, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в спецификациях.

Согласно п. 5.1. Договора цена на поставляемую продукцию и порядок ее оплаты по настоящему договору указывается в протоколе согласования договорной цены.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №1 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 1 134 104 руб. 47 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №2 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 1 134 104 руб. 47 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №3 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 9 616 985 руб. 32 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №4 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 1 134 104 руб. 47 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №5 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 1 134 104 руб. 47 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №6 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 937 732 руб. 58 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №7 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 2 579 825 руб. 47 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №8 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 2 755 141 руб. 88 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №9 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 2 365 211 руб. 42 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №10 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 561 993 руб. 84 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №11 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 2 463 983 руб. 55 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №12 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 8 995 890 руб. 50 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

Согласно Приложению к Договору «Спецификация №13 от 30.01.2023г.», ООО «Первая Высотная» обязуется изготовить и поставить продукцию согласно приведенному перечню, общей стоимостью 3 187 118 руб. 23 коп. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, 30 % в течение 7 банковских дней с даты получения уведомления о готовности продукции, 20 % в течение 7 банковских дней с даты поставки продукции.

 

ООО «Первая Высотная» произвел поставку всей заказанной продукции, что подтверждается подписанием УПД со стороны ответчика, а также актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023г. по 05.10.2023г., актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023г. по 14.12.2023г. ( с учетом произведенных корректировок за октябрь) согласно данным документам задолженность ООО «ТЭКСВЯЗЬИНЖИНИРИНГ» в пользу ООО «Первая Высотная» составляет 30 666 144,92 руб.

В соответствии с п.1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

По смыслу п.1 ст. 516 ГК РФ, ст. 65 АПК РФ, при установлении факта передачи товара, обязанность представить доказательства о его оплате возлагаются на ответчика. 

 Доказательства оплаты ответчиком товара в срок, установленный договором, в материалы дела не представлены.

В силу положений ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Исходя из изложенного, с учетом положений норм статей 307, 309, 310 ГК РФ в отсутствие доказательств оплаты, правовых оснований для отказа во взыскании в пользу истца задолженности в судебном порядке не имеется, в связи с чем, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 6.4. Договоров в случае нарушения сроков оплаты продукции, поставщик вправе потребовать от Покупателя оплату неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до полной оплаты соответствующей партии, но не более 10 % от несвоевременно оплаченной суммы.

Согласно расчета представленного истцом, сумма неустойки 0,1% в день от суммы задолженности (но не более 10% от суммы долга) за период с 13.01.2023 по 28.12.2023 составляет 5 097 037 рублей 67 копеек.

Расчет неустойки судом проверен и является математически верным, в связи с чем сумма неустойки подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно пункту 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле в разумных пределах.

Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей) относятся к судебным издержкам и входят в состав судебных расходов, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (ст.ст. 101, 106 АПК РФ).

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.   

Согласно платежных поручений, истец произвел оплату юридических услуг ФИО1 за составление искового заявления. Факт выполненных работ подтвержден выданной на представителя доверенностью (сделкой), содержащей виды и характер оказываемых юридических услуг, фактом подписания и подачи искового заявления представителем.

Таким образом в судебном заседании установлен факт оказания юридических услуг и факт несения судебных издержек ответчиком.

расходы обладают признаками чрезмерности.

Согласно «Методических рекомендаций по размерам оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам» утвержденных решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 31 мая 2022 года (п. 10 «б»), за составление искового заявления, требующее изучения документов берется оплата не менее 10 000 рублей, размер вознаграждения за работу в суде составляет не менее 18 500 рублей за день занятости.

Расходы предъявленные к возмещению являются разумными,  не превышают расценок в указанных Методических рекомендациях и подлежат взысканию с ответчика.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, в связи с чем оплаченная истцом при подаче искового заявления государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тэксвязьинжиниринг» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Первая Высотная»  сумму задолженности в размере 30 666 144 рублей 92 копеек, сумму неустойки в размере 5 097 037 рублей 67 копеек, сумму государственной пошлины в размере 200 000 рублей, расходы на юридические услуги по составлению искового заявления 10 000 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия. 

Решение, не вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

Судья                                                                                                Б.Б. Остроумов