АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-7706/2024

24 июня 2024 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 июня 2024 года

В полном объеме решение изготовлено 24 июня 2024 года

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шмакова Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ребрий Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Омскгоргаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 3 953 272 руб. 52 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Шабаш С.Г. директор (паспорт);

от ответчика: ФИО1 по доверенности от 13.05.2024 (паспорт, диплом); 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания» (далее – ООО «СТСК», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Омскгоргаз» (далее – АО «Омскгоргаз», ответчик) о взыскании 958 841 руб. 04 коп. задолженности, 53 518 руб. 83 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда от 05.04.2023 № 06п/14-1 с дальнейшим начислением до момента фактического исполнения обязательства, 783 911 руб. 39 коп. задолженности, 33 241 руб. 27 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда от 05.04.2023 № 06п/14-7 с дальнейшим начислением до момента фактического исполнения обязательства, 1 957 591 руб. 42 коп. задолженности, 166 168 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда от 05.04.2023 № 06п/14-2 с дальнейшим начислением до момента фактического исполнения обязательства.

Определением суда от 20.05.2024 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, пояснил, что неисполнение обязательств вызвано введением конкурсного производства, просил снизить размер процентов за пользование чужими денежными средствами.

Учитывая явку представителей сторон, отсутствие ходатайств и заявлений об отложении судебного разбирательства или предоставления дополнительных доказательств, проведения экспертизы, суд, руководствуясь частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), завершив предварительное судебное заседание и открыв судебное заседание, счел возможным рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Между ООО «СТСК» (подрядчик) и АО «Омскгоргаз» (заказчик) заключены договоры подряда от 05.04.2023 №№ 06п/14-1 (далее – договор 1), 06п/14-7 (далее – договор 2), от 05.04.2023 № 06п/14-2 (далее – договор 3).

В соответствии с пунктом 1.1 договора 1 подрядчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется выполнить по поручению заказчика в счёт, оговоренной в настоящем договоре, стоимости в сроки, определённые настоящим договором, за свой риск собственными силами и средствами: строительно-монтажные работы и исполнительную съемку, согласно проектной документации по объекту: «Сеть газораспределения к нежилому зданию, расположенному: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Суворова, д.136» (далее по тексту - объект), в т.ч., работы по восстановлению элементов благоустройства, асфальтобетонного покрытия, а заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Стоимость работ по настоящему договору (отраженных в пункте 1.1), определяется сторонами на основании приложений № 1-2 и составляет 1 791 050,55 руб. (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча пятьдесят рублей 55 копеек), в т.ч. НДС 20% 298 508,43 руб. (Двести девяносто восемь тысяч пятьсот восемь рублей 43 копейки).

Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

Аванс в размере 700 000 руб. (Семьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 116 666,67 руб. (Сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек)- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, с момента подписания договора на основании счета на оплату, выставленного подрядчиком.

Аванс в размере 600 000 руб. (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 100 000 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек) с момента поступления счет фактуры от завода производителя на исполнение ГРПШ.

Оставшаяся часть денежных средств в счёт стоимости работ по настоящему договору в размере 491 050,55 руб. (Четыреста девяносто одна тысяча пятьдесят рублей 55 копеек), в т.ч. НДС 20% 81 841,76 руб. (Восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок один рубль 76 копеек) - в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента приемки заказчиком результатов работ, на основании счета, выставленного подрядчиком (пункты 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3).

В силу пунктов 4.1, 4.2 договора 1 начало выполнения работ по договору – 05.04.2023 года.

Окончание выполнения работ по договору - 30 июля 2023 г.

Согласно пункту 1.1 договора 2 подрядчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется выполнить по поручению заказчика в счёт, оговоренной в настоящем договоре, стоимости, в сроки, определённые настоящим договором, за свой риск собственными силами и средствами: строительно-монтажные работы и исполнительную съемку, согласно проектной документации по объекту: «Сеть газораспределения к нежилым зданиям, расположенным: 

<

...> (далее по тексту - объект), в т.ч., работы по восстановлению элементов благоустройства, асфальтобетонного покрытия, а заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Стоимость работ по настоящему договору (отраженных в пункте 1.1.), определяется сторонами на основании приложений № 1-2 и составляет 2 529 126,53 руб. (Два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч сто двадцать шесть рублей 53 копейки), в т.ч. НДС 20% 421 521,09 руб. (Четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать один рубль 09 копеек).

Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

Аванс в размере 1 770 388,57 руб. (Один миллион семьсот семьдесят тысяч триста восемьдесят восемь рублей 57 копеек), в т.ч. НДС 20% 295 064,76 руб. (Двести девяносто пять тысяч шестьдесят четыре рубля 76 копеек) - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, с момента подписания договора, на основании счета на оплату, выставленного подрядчиком.

Оставшаяся часть денежных средств в счёт стоимости работ по настоящему договору в размере 758 737,96 руб. (Семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать семь рублей 96 копеек), в т.ч. НДС 20% 126 456,33 руб. (Сто двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 33 копейки) - в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента приемки заказчиком результатов работ, на основании счета, выставленного подрядчиком (пункты 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3).

В силу пунктов 4.1, 4.2 договора 2 начало выполнения работ по договору – 05.05.2023 года.

Окончание выполнения работ по договору - 29 сентября 2023 г.

Согласно пункту 1.1 договора 3 подрядчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется выполнить по поручению заказчика в счёт, оговоренной в настоящем договоре, стоимости, в сроки, определённые настоящим договором, за свой риск собственными силами и средствами: строительно-монтажные работы и исполнительную съемку, согласно проектной документации по объекту: «Сеть газораспределения для перевода на природный газ объектов многоэтажной жилой застройки в Советском административном округе г. Омска в границах улиц: Заозерная-Красноярский тракт-пр. Менделеева-Малиновского (2-й этап)» (далее по тексту - объект), в т.ч., работы по восстановлению элементов благоустройства, асфальтобетонного покрытия, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Стоимость работ по настоящему договору (отраженных в пункте 1.1), определяется сторонами на основании приложений № 1-3 и составляет 9 121 915,40 руб. (Девять миллионов сто двадцать одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 40 копеек), в т.ч. НДС 20% 1520 319,23 руб. (Один миллион пятьсот двадцать тысяч триста девятнадцать рублей 23 копейки).

Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

-  до «16» апреля 2023г. аванс в размере 491 077.80 руб. (Четыреста девяносто одна тысяча семьдесят семь рублей 80 копеек), в т.ч. НДС 20% 81 846.30 руб. (Восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть рублей 30 копеек);

- до «05» мая 2023г. аванс в размере 3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 500 000 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек);

-  до «05» июня 2023г. аванс в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 166 666.61 руб. (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек);

-  до «03» июля 2023г. аванс в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 166 666.67 руб. (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек);

-  до «07» августа 2023г. оставшаяся часть в размере 3 630 837.60 руб. (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать семь рублей 60 копеек), в т.ч. НДС 20% 605 139.59 руб. (Шестьсот пять тысяч сто тридцать девять рублей 59 копеек) (пункты 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3).

В силу пунктов 4.1, 4.2 договора 3 начало выполнения работ по договору – 13.04.2023 года.

Окончание выполнения работ по договору - 30 октября 2023 г.

Как указывает истец, работы по спорным договорам приняты ответчиком и частично оплачены: на сумму 829 209 руб. 51 коп - по договору 1, на сумму 1 745 215 руб. 14 коп. – по договору 2, на сумму 7 078 689 руб. 58 коп.

Претензия с требованием об оплате долга в оставшейся части оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Оценив представленную совокупность доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, суд усматривает основания для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

По смыслу статей 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданско-правовые обязательства могут возникать также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Отклоняя доводы ответчика об отсутствии возможности для оплаты, суд заключает, что приведенные им обстоятельства в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ не являются основанием для освобождения от обязанности по оплате.

Поскольку ответчиком расчет задолженности не оспорен, а доказательства ее погашения не представлены, исковые требования подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Расчет процентов судом проверен, признан арифметически верным.

Доводы ответчика о возможности снижения размера процентов судом отклоняются, поскольку в силу пункта 6 статьи 395 ГК РФ снижение допускается не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Соответственно, требование подлежит удовлетворению.

По правилам статьи 110 АПК, учитывая удовлетворение исковых требований, судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению истцу ответчиком.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания» удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Омскгоргаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>):3 700 343 руб. 85 коп. основного долга; 351 604 руб. 51 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 17.06.2024; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга (3 700 343 руб.85 коп.) начиная с 18.06.2024 по день фактической оплаты задолженности; 42 766 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня изготовления решения в полном объеме и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

Решение в полном объеме изготавливается в течение десяти дней, выполняется в соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в форме электронного документа путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 

Судья                                                                                                         Г.В. Шмаков