АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-382/2020

г. Тюмень

25 мая 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 18 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 25 мая 2020 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Мингалевой Е.А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Туз П.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖ.СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 25.09.2002) к Обществу с ограниченной ответственностью «ФАРМА ГРУПП» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 06.04.2007) о взыскании задолженности по договору на выполнение проектных работ от 10.05.2018 № 10/05/18, по договору строительного подряда от 18.09.2018 № 1/П14/С9 в общем размере 18 811 420 рублей 46 копеек, 

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца: представитель ФИО1 по доверенности от 17.02.2020, паспорт; представитель ФИО2 по доверенности от 17.02.2020, паспорт,

от ответчика: представитель не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖ.СЕРВИС» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ФАРМА ГРУПП» (далее - ответчик) о взыскании задолженности в общем размере 18 811 420 рублей 46 копеек, из них: 325 000 рублей основного долга по договору на выполнение проектных работ от 10.05.2018 № 10/05/18, 18 486 420 рублей 46 копеек по договору строительного подряда от 18.09.2018 № 1/П14/С9.

Исковые требования со ссылкой на статьи 309, 310, 702, 711, 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ в рамках договора на выполнение проектных работ от 10.05.2018 № 10/05/18 и договора строительного подряда от 18.09.2018 № 1/П14/С9.

В судебном заседании представитель истца на исковых требованиях настаивает в полном объеме, по основаниям изложенным в исковом заявлении, письменных уточнениях, представил на обозрение суда оригиналы документов: договор строительного подряда от 18.09.2018 № 1/П14/С9, акты выполненных работ в рамках указанного договора, договор на выполнение проектных работ 10.05.2018 № 10/05/18, акты выполненных работ в рамках указанного договора, подписанные между сторонами, скрепленными печатями, а также доказательства частичной оплаты в рамках спорных договоров. 

Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, суд не явился, отзыв на исковое заявление в установленном законом порядке не представил, исковые требования не оспорил в соответствии с положениями части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, непредставление отзыва на исковое заявление не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

На основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассматривается в отсутствие не явившегося представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу в совокупности с доводами сторон, заслушав пояснения представителя истца, суд считает, что рассматриваемые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, по следующим основаниям.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНЖ.СЕРВИС» и Обществом с ограниченной ответственностью «ФАРМА ГРУПП» был заключен ряд договоров.

Так, 10.05.2018 между ООО «ИНЖ.СЕРВИС» (далее - исполнитель) и ООО «ФАРМА ГРУПП» (далее - заказчик) заключен договор на выполнение проектных работ № 10/05/18, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации стадии «Рабочая документация» (далее - Рабочая документация, Документация) по следующим системам: Автоматическая установка водяного пожаротушения (спринклер и ВПВ), Автоматическая установка газового пожаротушения, Автоматическая установка дымоудаления, Автоматическая установка пожарной сигнализации, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), Пожарная автоматика - автоматизация мероприятий по обеспечению ПБ: часть 1 (ПА 1) - автоматизация раздела ПТ, часть2 (ПА2) - автоматизация раздела ДУ, Решения по противопожарным мероприятиям электрооборудования и электроосвещения. в объеме «под ключ» (далее по тексту - Работы) для объекта: Многофункциональный госпиталь «Мать и Дитя», расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район д. Ожогина (далее - Объект), передаче результата выполненных по настоящему Договору Работ Заказчику, а Заказчик при отсутствии претензий к срокам, качеству, объему выполненных Исполнителем Работ, обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем по настоящему Договору Работы (п. 1.1. договора). Стороны договорились, что результатом работ по настоящему договору является разработанная исполнителем согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Договора, Приложения № 1 к Договору (Техническое задание) и Приложения № 2 к Договору (Смета) проектная документация стадии «Рабочая документация» по системам, указанным в пункте 1.1. настоящего Договора, не содержащая в себе ошибок, опечаток, иных дефектов и пригодная для использования согласно ее назначению (далее - результат работ, результат выполненных по настоящему Договору Работ). Объем разработанной Документации передаваемый Заказчику Исполнителем указан в разделе 6 настоящего Договора (п. 1.2. договора). Исполнитель обязуется выполнить собственными или привлеченными силами Работы по настоящему Договору в соответствии с требованиями к проектированию, согласно действующему законодательству РФ, согласно условиям настоящего Договора, условиям изложенных в Приложении № 1 к Договору (Техническое задание), Приложении № 2 к Договору (Смета) и в соответствии с Исходными данными предоставленными Заказчиком Исполнителю. Стороны договорились, что в случае если Исполнителем в целях выполнения Работ по настоящему Договору привлекаются третьи лица, то ответственность за действия третьих лиц, s том числе за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих обязательств, несет Исполнитель (п. 1.3. договора). «Исходные данные» означают документацию, направленную до заключения настоящего Договора Заказчиком Исполнителю по электронной почте и состоящую из следующих файлов (п. 1.4. договора): Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) (п. 1.4.1. договора). Архитектурные и технологические решения планировки всех этажей Объекта (п. 1.4.2. договора). Раздел 9 проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», разработанный Заказчиком (п. 1.4.3. договора). Смета на производство Работ по настоящему Договору (п. 1.4.4. договора). Настоящим, Исполнитель подтверждает, что до заключения настоящего Договора получил и внимательно изучил предоставленные Заказчиком Исходные данные и Техническое задание, и свидетельствует о достаточности Исходных данных для выполнения всех своих обязательств по Договору, что не снимает с Исполнителя обязанности предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Договора (п. 1.5. договора). В разделе 2 договора сторонами определена стоимость работ и порядок расчетов: стоимость Работ по настоящему Договору согласована Сторонами в размере 650 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 99 152  рубля 54 копейки (п. 2.1. договора). Платежи по Договору производятся Заказчиком в следующем порядке: Аванс в размере 325 000 руб. 00 копеек, в том числе НДС 18% - 49 576 руб. 27 коп., что составляет 50% от цены работ по настоящему Договору, уплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней с даты подписания настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату (п. 2.2.1.). Окончательный расчет в размере 325 000 руб. 00 коп.., в том числе НДС 18% - 49 576 руб. 27 коп., что составляет 50% от цены Работ по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных по настоящему Договору Работ при условии получения Заказчиком положительного заключения экспертной организации о соответствии разработанной по настоящему Договору Документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Договору, в том числе Приложению № 1 (Техническое задание) и Приложению № 2 к настоящему Договору (Смета), (если применимо), передаче Заказчику результата выполненных по настоящему Договору Работ и при условии выставления счета на оплату выполненных Исполнителем по настоящему Договору Работ (п. 2.2.2.). Одновременно с передачей Заказчику подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Договору, Исполнитель передает Заказчику счет-фактуру на выполненные Работы (п. 2.2.3.). Стороны договорились, что на уплачиваемые Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору платежи, Исполнитель обязуется передать Заказчику счета-фактуры. Указанные в настоящем пункте счета-фактуры передаются Исполнителем Заказчику в течение 5 банковских дней с даты поступления осуществляемого платежа на корреспондентский счет банка Исполнителя. Исполнитель обязан оформлять счета-фактуры, которые он передает Заказчику согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь требованиям Налогового кодекса, Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137, с учетом изменений и дополнений, действующих на дату выставления счета-фактуры. В случае обнаружения ошибок в счете-фактуре Заказчик сообщает об этом Исполнителю по электронной почте, указанной в разделе 15 настоящего Договора. В этом случае Исполнитель обязан исправить ошибки в счете-фактуре и передать Заказчику исправленный счет-фактуру в течение 5 банковских дней с даты получения сообщения от Заказчика (п. 2.2.4.). Стоимость Работ по настоящему Договору  является твердой на весь срок действия настоящего Договора (кроме случаев, когда стоимость Работ по настоящему Договору будет изменена по обоюдному решению Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения) (п. 2.3. договора). Все расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в безналичном порядке в рублях РФ, по реквизитам указанным в разделе 15 настоящего Договора (п. 2.4. договора). Право собственности на Документацию (результат работ) переходит к Заказчику от Исполнителя после подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных по настоящему Договору Работ, при этом с Исполнителя не снимается обязанность по устранению дефектов в выполненных Работах, при обнаружении таких дефектов Заказчиком, и/или обнаружении дефектов в выполненных Исполнителем Работах в ходе проведения экспертизы, и/или на этапе производства работ по строительству (монтажу, эксплуатации) с использованием результата выполненных по настоящему Договору Работ (если применимо) (п. 2.5. договора). Изменение стоимости (объема) Работ может производиться дополнительным соглашением к настоящему Договору на основании: изменения объема Работ по настоящему Договору. При этом Стороны договорились, что изменение объема выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется только на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору, определяющего вид, сроки и иные характеристики дополнительно выполняемого Исполнителем объема Работ. Выполненные без согласования с Заказчиком Исполнителем дополнительные работы, оплате Заказчиком не подлежат (п. 2.6.1.). Внесение изменений в Исходные данные указанные в пунктах 1.4.-1.4.4. настоящего Договора, при изменении назначений помещений (если применимо), внесение изменений в передаваемые, переданные дополнительные исходные данные, а равно передача дополнительных исходных данных в целях производства Работ по настоящему Договору (п. 2.6.2.). Любое дополнительное соглашение к настоящему Договору оформляется и подписывается в томже порядке, что и настоящий Договор и будет являться его неотъемлемой частью (п. 2.7. договора). При обнаружении дефектов выполненных по настоящему Договору Работ, Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до устранения Исполнителем обнаруженных дефектов (п. 2.8. договора). Моментом оплаты по настоящему Договору считается дата, поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя (п. 2.9. договора). Пунктом 3.1. договора определено, что исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в течение 45 календарных дней с даты направления заказчиком в адрес исполнителя письма, о начале производства работ по настоящему договору.

Во исполнение договора между сторонами согласовано Техническое задание на проектирование рабочей документации от 10.05.2018 и смета, что является приложением № 2 к договору (т.1л.д.21-28,29).

В дополнительном соглашении от 11.01.2019 № 1 в связи с изменениями объема работ согласно техническому заданию ТЗ-ПБ, стороны уточнили, а именно: изменения архитектурно-строительных решений, связанных с исключением/добавлением фальшпотолка/пола; изменение перечня помещений, подлежащих защите автоматическими установками газового пожаротушения. Новый перечень помещений: 0014 тех. помещение лечебных газов, 0017 электрощитовая, 0018.1 помещение ИБП, 0055.1 картотека, 0055.2 картотека, 0078 электрощитовая, 0110 кроссовая, 1108 кроссовая, 2086 серверная, 3084 кроссовая, 4041 кроссовая, 5014 кроссовая, 6017 кроссовая, 1056 тех. комната КТ, 1063.1 тех. помещение МРТ, 2139 тех. помещение рент-й. Изменение количества клапанов ДУ для автоматизации; добавление объема работ по электроснабжению вентиляторов систем ПД, ДУ; добавление объема работ по электроснабжению лифтового оборудования. Также изложен п. 3.1 Договора в новой редакции: «Исполнитель обязуется выполнить Работы, указанные в п.1.1 настоящего Договор - до 15.02.2019 г.» (т.1л.дл.30). Актом сдачи-приемки выполненных работ от 23.04.2019 стороны установили, что выполненная работа удовлетворяет условиям договора и в надлежащем виде оформлена. Краткое описание выполненных работ: разработка проектной документации стадии «Рабочая документация». Цена работ по договору составляет 650 000 рублей в том числе НДС 20% - 108 333 рубля 33 копейки. Стоимость выполненных работ составляет 650 000 рублей в том числе НДС 20% - 108 333 рубля 33 копейки. Изменение стоимости в процессе работ: нет. Заказчик по объему, качестве и срокам выполнения работ претензия к подрядчику не имеет (т.1л.д.31).

По утверждению истца, истец во исполнение принятых на себя обязательств выполнил работы в рамках  указанного договора в полном объеме на общую сумму 650 000 рублей, что подтверждается актом выполненных работ от 23.04.2019 № 59, которые ответчик принял без каких-либо претензий и замечаний, в свою очередь оплату задолженности произвел не в полном объеме в сумме 325 000 рублей, в связи с чем у него образовалась задолженность, которая согласно расчету истца составила 325 000 рублей. До настоящего времени задолженность не погашена. 

Также, 18.09.2018 между ООО «ИНЖ.СЕРВИС» (далее - подрядчик) и ООО «ФАРМА ГРУПП» (далее - заказчик) заключен договор строительного подряда № 1/П14/С9, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить на свой страх и риск, собственными силами и/или силами привлеченных в соответствии с положениями настоящего Договора Субподрядчиков, комплекс Работ на Объекте и передать их результат в гарантийную эксплуатацию Заказчику, участвовать совместно с Заказчиком в сдаче законченного строительством Объекта в эксплуатацию Инвестору, а также участвовать при проведении комплексных испытаний систем в рамках своих обязательств (работ) по договору, а Заказчик, при отсутствии претензий к срокам, объему и качеству результата выполненных работ по договору, обязуется принять и оплатить их в порядке и в сроки, установленные договором. Результатом Работ является законченные строительством и готовые к эксплуатации система газового пожаротушения, автоматизация системы газового пожаротушения, автоматизация системы водяного пожаротушения, автоматизация системы дымоудаления, система автоматической  пожарной сигнализации, а так же системы оповещения и управления эвакуацией людьми Объекта, прошедшие комплексные испытания, что должно быть подтверждено соответствующих актом уполномоченного государственного органа. Результат Работ должен соответствовать Смете (Приложение № 2 к Договору), а также Рабочей документации, разработанной Подрядчиком и принятой Заказчиком по Договору на выполнение проектных работ № 10/05/18 от 10 мая 2018 года (п. 2.1. договора). Все Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Приложениями к нему, Рабочей документацией, СНиПами, ТУ, ГОСТами и иными нормами и правилами действующего законодательства РФ (п. 2.2. договора). Настоящим Подрядчик подтверждает, что до заключения Договора внимательно изучил место производства Работ. Настоящим Подрядчик подтверждает, что на дату подписания настоящего Договора, он получил полный комплект Рабочей документация в объеме, необходимом и достаточном для выполнения всех своих обязательств по Договору (п. 2.3. договора). Если иное не предусмотрено все документы Договора принимаются как взаимопоясняющие. В случае обнаружения в документах любых неясностей или противоречий Представитель Подрядчика обязан сделать соответствующий письменный запрос Заказчику, а Заказчик обязан дать Подрядчику соответствующие письменные указания, являющиеся обязательными для Подрядчика (п. 2.4. договора). В разделе 3 договора сторонами определена цена работ по договору: общая стоимость всех Работ по Договору, необходимая для выполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору (далее по тексту Цена Договора), согласована Сторонами в Смете (Приложение №2 к Договору), и составляет 25 423 728 руб. 81 коп., коме того НДС (18%)- 4 576 271 руб. 19 коп. (п. 3.1. договора). Указанная цена Договора включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе перечисленные ниже расходы: командировочные расходы сотрудников; страхование деятельности и персонала Подрядчика; оплата труда (заработная плата), питание, проживание и медицинское обслуживание сотрудников Подрядчика и т.п.; подготовительные работы; уборка и складирование мусора Подрядчика; приобретение, поставка, погрузка и разгрузка, перемещение по Строительной площадке Оборудования/Материалов и пр.; все необходимые Испытания на месте  производства работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил; а также все необходимые сопутствующие работы и материалы, и иные затраты, издержки, таможенные и прочие расходы и любого рода платежи Подрядчика, включая накладные расходы, прибыль, все налоги, сборы и пошлины и т.п., понесенные Подрядчиком в связи с выполнением всех Работ по Договору прямо не упомянутые в тексте Договора, но необходимые для окончания всего комплекса Работ по Договору (п. 3.2. договора). Цена Договора, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, является твердой, достаточной для выполнения всех Работ по Договору и подлежит пересмотру только по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором (п. 3.3. договора). Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ (отдельных видов Работ) по Договору, не подтвержденные дополнительным соглашением к настоящему Договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет. Увеличение цен на Оборудование/Материалы в ходе реализации настоящего Договора не будет компенсироваться Заказчиком (п. 3.4. договора). Стоимость дополнительных работ, выполненных по письменному указанию или с письменного согласия Заказчика, определяется по расценкам для аналогичных работ по настоящему Договору. При отсутствии аналогичных работ в настоящем Договоре, стоимость дополнительных работ определяется Сторонами путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору. Если стоимость дополнительных работ не может быть согласована Сторонами, Заказчик привлекает для выполнения таких работ третьих лиц (п. 3.5. договора). В случае уменьшения затрат Подрядчика на Оборудование/материалы в ходе реализации настоящего договора за счет их замены по согласованию с Заказчиком на более дешевые аналоги, стороны в отдельном  дополнительном  соглашении  к  настоящему договору предусматривают распределение полученной Подрядчиком экономии в пользу Заказчика путем соответствующего уменьшения цены Работ, по которому получена экономия. Расчет экономии является обязанностью Подрядчика (п. 3.6. договора). В пункте 4.1. договора сторонами определено, что заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в следующем порядке: в течение 5 банковских дней с даты заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет Подрядчику первый авансовый платеж в размере 847 457 руб. 63 коп., кроме того НДС (18%). В течение 5 банковских дней с даты предоставления Заказчику Подрядчиком независимой (банковской) гарантии на возврат суммы первого и второго авансового платежа с учетом НДС (18%), выданной сроком на 4 (четыре) месяца, перечисляет Подрядчику второй авансовый платеж в размере 6 779 661 руб. 02 коп., кроме того НДС (18%). Если за месяц до истечение срока, на который выпущена банковская гарантия, станет очевидно, что Подрядчик не отработает сумму Аванса до истечения срока банковской гарантии, то Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию на сумму неотработанного Аванса на новый срок, согласованный Сторонами, но не менее двух месяцев. В случае непредставления Подрядчиком Заказчику новой банковской гарантии согласно условиям настоящего пункта Договора, Заказчик вправе воспользоваться первоначально предоставленной банковской гарантией на первый аванс. Пунктом 5.1. сторонами согласованы следующие сроки работ по договору: дата начала Работ по Договору: 25 сентября 2018 года, при условии подписания настоящего Договора обеими сторонами, перечисления Заказчиком первого авансового платежа п предоставления фронта работ (наличия строительной готовности Объекта). Дата окончательного завершения работ: 28 февраля 2019 года. Промежуточные сроки выполнения работ согласованы Сторонами в Графике производства Работ (Приложение №1 к Договору). В приложении № 1 к договору стороны согласовали график производства работ (т.1л.д.51). В приложении № 2 к договору сторонами согласована смета (т.1л.д.52-60). Дополнительным соглашением от 01.02.2019 № 1 сторонами определено, что заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению дополнительных Работ, перечень и объем которых согласованы Сторонами в Приложении № 2 «Смета № 2» к настоящему Дополнительному соглашению. Стоимость дополнительных Работ по настоящему Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Приложении № 2 «Смета № 2» к настоящему Дополнительному соглашению и составляет 6 723 271 руб. 67 коп., кроме того НДС (20%) - 1 344 654 руб. 33 коп.». Стороны пришли к соглашению о том, Заказчик уплачивает Подрядчику следующие дополнительные авансовые платежи: В срок до 07 февраля 2019 г. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж по Договору в размере 2 708 333 руб. 33 коп., кроме того НДС (20%). В срок до 25 февраля 2019 г. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж по настоящему Дополнительному соглашению в размере 2 000 000 руб., кроме того НДС (20%). 4. Стороны, подписанием настоящего Дополнительного соглашения, согласовали следующие сроки Работ по Договору и Дополнительному соглашению: Дата начала Работ по Договору: 25 сентября 2018 года, при условии подписания настоящего Договора обеими сторонами, перечисления Заказчиком первого авансового платежа и предоставления фронта работ (наличия строительной готовности Объекта). Дата окончательного завершения Работ по Договору и Дополнительному соглашению: 20 апреля 2019 года. Промежуточные   сроки   выполнения  Работ согласованы Сторонами в Приложение  № 1 «График производства Работ» к настоящему Дополнительному соглашению. Стороны пришли к соглашению о том, что к Работам по Договору, принятым Заказчиком в 2018 году, применяется ставка налога на добавленную стоимость -  18 процентов,  а к Работам по Договору, выполненным и принятым Заказчиком после 31 декабря 2018 года, применяется действующая в 2019 году ставка налога на добавленную стоимость - 20% (т.1л.д.63). Дополнительным соглашением от 11.03.2019 № 2 сторонами определено, что заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению дополнительных Работ, перечень и объем которых согласованы Сторонами в Приложении № 1 «Смета № 3» к настоящему Дополнительному соглашению. Стоимость дополнительных Работ по настоящему Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Приложении № 1 «Смета № 3» к настоящему Дополнительному соглашению и составляет 699 200 руб., в том числе НДС (20%) -116 533 руб. 33 коп. Оплата Работ по настоящему Дополнительному соглашению осуществляется на основании подписанных Сторонами  Актов о  приемке  выполненных  работ по форме КС-2  и  Справки  КС-3,  составленных Подрядчиком на основании объемов Работ, завизированных Уполномоченным представителем Заказчика на Строительной площадке, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами соответствующих Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, при условии передачи Заказчику счета на оплату и счета-фактуры на стоимость выполненных работ. Аванс по настоящему Дополнительному соглашению не предусмотрен. Стороны, подписанием настоящего Дополнительного соглашения, согласовали следующие сроки Работ по Договору и Дополнительному соглашению. Дата начала Работ по Договору: 12 марта 2019 года. Дата окончательного завершения Работ по Договору и Дополнительному соглашению: 30 апреля 2019 (т.1л.д.69). Дополнительным соглашением от 01.04.2019 № 3 определено, что заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению дополнительных Работ, перечень и объем которых согласованы Сторонами в Приложении № 1 «Смета» к настоящему Дополнительному соглашению. Стоимость дополнительных Работ по настоящему Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Приложении № 1 «Смета № 3» к настоящему Дополнительному соглашению и составляет 151 200 руб., в том числе НДС (20%) - 25 200 руб. Оплата Работ по настоящему Дополнительному соглашению осуществляется на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки КС-3, составленных Подрядчиком на основании объемов Работ, завизированных Уполномоченным представителем Заказчика на Строительной площадке, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами соответствующих Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, при условии передачи Заказчику счета на оплату и счета-фактуры на стоимость выполненных работ. Аванс по настоящему Дополнительному соглашению не предусмотрен. Стороны, подписанием настоящего Дополнительного соглашения, согласовали следующие сроки Работ по Договору и Дополнительному соглашению: Дата начала Работ по Договору; 01 апреля 2019 года. Дата окончательного завершения Работ по Договору и Дополнительному соглашению: 30 апреля 2019 года (т.1л.д.71). Дополнительным соглашением от 01.04.2019 № 4 определено, что заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению дополнительных Работ, перечень и объем которых согласованы Сторонами в Приложении № 1 «Смета» к настоящему Дополнительному соглашению. Стоимость дополнительных Работ по настоящему Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Приложении № 1 «Смета» к настоящему Дополнительному соглашению и составляет 800 000 руб., в том числе НДС (20%) -133 333 руб. 33 коп. Оплата   Работ   по   настоящему   Дополнительному   соглашению   осуществляется   на   основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки КС-3, составленных Подрядчиком на основании объемов Работ, завизированных Уполномоченным представителем Заказчика на Строительной площадке, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами соответствующих Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, при условии передачи Заказчику счета на оплату и счета-фактуры на стоимость выполненных работ. Аванс по настоящему Дополнительному соглашению не предусмотрен. Стороны, подписанием настоящего Дополнительного соглашения, согласовали следующие сроки Работ по Договору и Дополнительному соглашению: Дата начала Работ по Договору: 01 апреля 2019 года. Дата окончательного завершения Работ по Договору и Дополнительному соглашению: 31 мая 2019 года (т.1л.д.73). Дополнительным соглашением от 21.05.2019 № 5 определено, что Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению дополнительных Работ, перечень и объем которых согласованы Сторонами в Приложении № 5 «Смета» к настоящему Дополнительному соглашению. Стоимость дополнительных Работ по настоящему Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Приложении № 1 «Смета» к настоящему Дополнительному соглашению и составляет 964 603 руб. 34 коп. в том числе НДС (20%) – 160 767 руб. 22 коп. Оплата Работ по настоящему Дополнительному соглашению осуществляется на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки КС-3, составленных Подрядчиком на основании объемов Работ, завизированных Уполномоченным представителем Заказчика на Строительной площадке, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами соответствующих Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, при условии передачи Заказчику счета на оплату и счета фактуры на стоимость выполненных работ. Аванс по настоящему Дополнительному соглашению не предусмотрен. Стороны, подписанием настоящего Дополнительного соглашения, согласовали следующие сроки Работ по Договору и Дополнительному соглашению: Дата начала Работ по Договору: 28 мая 2019 года. Дата окончательного завершения Работ по Договору и Дополнительному соглашению: 30 июня 2019 года (т.1л.д.75).

По утверждению истца, истец во исполнение условий в рамках договора строительного подряда от 18.09.2018 № 1/П14/С9 выполнил работы, предусмотренные договором на общую сумму 40 126 180 рублей 87 копеек, которые ответчик принял без каких-либо претензий и замечаний, что подтверждается печатью и подписью уполномоченного лица в представленных в материалы дела актах от 30.11.2018 № 1 на сумму 938 095 руб. 28 коп., от 20.12.2018 № 2 на сумму 3 051 665 руб. 13 коп., от 15.02.2019 № 3 на сумму 5 126 068 руб. 66 коп., от 15.02.2019 № 1 на сумму 3 228 290 руб. 04 коп., от 12.03.2019 № 4 на сумму 10 496 682 руб. 84 коп., от 12.03.2019 № 2 на сумму 344 777 руб. 90 коп., от 22.04.2019 № 5 на сумму 7 500 000 руб., от 22.04.2019 № 3 на сумму 3 500 000 руб., от 22.04.2019 № 1 на сумму 501 600 руб., от 30.06.2019 № 6 на сумму 1 664 000 руб., от 30.06.2019 № 4 на сумму 994 858 руб. 06 коп., от 30.06.2019 № 1 на сумму 151 200 руб., от 30.06.2019 № 1 на сумму 964 603 руб. 34 коп., от 31.07.2019 № 7 на сумму 1 664 339 руб. 62 коп. (т.1л.д.77,79-80,82-88,89-92,94-95,97,99-101,103-104,106,108-109,111,113,115,117), а также справках о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2018 № 1 на сумму с учетом НДС – 938 095 руб. 28 коп., от  20.12.2018 № 2 на сумму с учетом НДС – 3 051 665 руб. 13 коп., от 15.02.2019 № 3 на сумму с учетом НДС – 5 126 068 руб. 66 коп., от 15.02.2019 № 1 на сумму с учетом НДС – 3 228 290 руб. 04 коп., от 12.03.2019 № 4 на сумму с учетом НДС – 10 496 682 руб. 84 коп., от 12.03.2019 № 2 на сумму с учетом НДС – 344 777 руб. 90 коп., от 22.04.2019 № 5 на сумму с учетом НДС – 7 500 000 руб., от 22.04.2019 № 3 на сумму с учетом НДС – 3 500 000 руб., от 22.04.2019 № 1 на сумму с учетом НДС – 501 600 руб., от 30.06.2019 № 6 на сумму с учетом НДС – 1 664 000 руб., от 30.06.2019 № 4 на сумму с учетом НДС – 994 858 руб. 06 коп., от 30.06.2019 № 1 на сумму с учетом НДС – 151 200 руб., от 30.06.2019 № 1 на сумму с учетом НДС – 964 603 руб. 34 коп., от 31.07.2019 № 7 на сумму с учетом НДС – 1 664 339 руб. 62 коп. (т.1л.д.78,81,88, 93, 96, 98, 102, 105, 107,110, 112, 114, 116, 118), в свою очередь ответчиком произведена частичная оплата на сумму 21 639 760 рублей 41 копейка, что подтверждается платежными поручениями (т.1л.д.119-127), в связи с чем, у последнего образовалась задолженность, которая согласно расчету истца составила 18 486 420 рублей 46 копеек. До настоящего времени задолженность ответчиком перед истцом не погашена.

Из представленной в материалы дела переписки следует, что письмом от 25.09.2018 № 427 истец направил в адрес ответчика документацию по монтажу системы газового пожаротушения, автоматизации системы газового пожаротушения, автоматизации системы водяного пожаротушения, автоматизации системы дымоудаления, системы автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людьми (т.1л.д.129); письмом от 20.12.2018 № 598 истец в адрес ответчика направил документацию по монтажу противопожарных систем по договору от 18.09.2018 № 1/П14/С9 (с исправлениями) (т.1л.д.130); письмом от 23.04.2019 № 249 истец уведомил ответчика о наличии задолженности (т.1л.д.131).

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 26.08.2019 № 611 с требованием в добровольном порядке произвести оплату задолженности в срок до 01.09.2019 (т.1л.д.134-135). Оставление ответчиком претензии без удовлетворения явилось основанием обращения истца в суд с настоящим иском.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно пункту 1 статьи 711, пункту 2 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 51 от 24.01.2000 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

При этом подрядчик в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен представить документы, подтверждающие факт выполнения и сдачи заказчику результата работ на спорную сумму в соответствии с требованиями статей 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Судом установлено, материалами дела подтверждается, что во исполнение принятых на себя обязательств в рамках договора на выполнение проектных работ от 10.05.2018 № 10/05/18 и договора строительного подряда от 18.09.2018 № 1/П14/С9 истец выполнил работы в полном объеме, что подтверждается подписанными между сторонами актами о приемке выполненных работ от 23.04.2019 на сумму 650 000 рублей (т.л.д.31),  актами о приемке выполненных работ от 30.11.2018 № 1 на сумму 938 095 руб. 28 коп., от 20.12.2018 № 2 на сумму 3 051 665 руб. 13 коп., от 15.02.2019 № 3 на сумму 5 126 068 руб. 66 коп., от 15.02.2019 № 1 на сумму 3 228 290 руб. 04 коп., от 12.03.2019 № 4 на сумму 10 496 682 руб. 84 коп., от 12.03.2019 № 2 на сумму 344 777 руб. 90 коп., от 22.04.2019 № 5 на сумму 7 500 000 руб., от 22.04.2019 № 3 на сумму 3 500 000 руб., от 22.04.2019 № 1 на сумму 501 600 руб., от 30.06.2019 № 6 на сумму 1 664 000 руб., от 30.06.2019 № 4 на сумму 994 858 руб. 06 коп., от 30.06.2019 № 1 на сумму 151 200 руб., от 30.06.2019 № 1 на сумму 964 603 руб. 34 коп., от 31.07.2019 № 7 на сумму 1 664 339 руб. 62 коп. (т.1л.д.77,79-80,82-88,89-92,94-95,97,99-101,103-104,106,108-109,111,113,115,117), а также справками о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2018 № 1 на сумму с учетом НДС – 938 095 руб. 28 коп., от  20.12.2018 № 2 на сумму с учетом НДС – 3 051 665 руб. 13 коп., от 15.02.2019 № 3 на сумму с учетом НДС – 5 126 068 руб. 66 коп., от 15.02.2019 № 1 на сумму с учетом НДС – 3 228 290 руб. 04 коп., от 12.03.2019 № 4 на сумму с учетом НДС – 10 496 682 руб. 84 коп., от 12.03.2019 № 2 на сумму с учетом НДС – 344 777 руб. 90 коп., от 22.04.2019 № 5 на сумму с учетом НДС – 7 500 000 руб., от 22.04.2019 № 3 на сумму с учетом НДС – 3 500 000 руб., от 22.04.2019 № 1 на сумму с учетом НДС – 501 600 руб., от 30.06.2019 № 6 на сумму с учетом НДС – 1 664 000 руб., от 30.06.2019 № 4 на сумму с учетом НДС – 994 858 руб. 06 коп., от 30.06.2019 № 1 на сумму с учетом НДС – 151 200 руб., от 30.06.2019 № 1 на сумму с учетом НДС – 964 603 руб. 34 коп., от 31.07.2019 № 7 на сумму с учетом НДС – 1 664 339 руб. 62 коп. (т.1л.д.78,81,88, 93, 96, 98, 102, 105, 107,110, 112, 114, 116, 118), которые ответчик принял без каких-либо претензий и замечаний по объему и качеству, в свою очередь ответчик оплату за выполненные работы в общем размере 18 811 420 рублей 46 копеек не произвел (18 486 420 руб. 46 коп. + 325 000 руб.). Данный факт ответчиком не оспорен, доказательств обратного в материалы дела не представлено (ст. 9, 65 АПК РФ).

Пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих погашение задолженности в заявленном размере, а также непредставление ответчиком возражений по существу спора, размеру требований, суд приходит к выводу о том, что требование истца к ответчику о взыскании задолженности по оплате выполненных работ подлежит удовлетворению в полном объеме в общей сумме 18 811 420 рублей 46 копеек.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ в связи с удовлетворением иска, расходы по оплате государственной пошлины в размере 117 057 рублей относятся на ответчика.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФАРМА ГРУПП» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 06.04.2007) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖ.СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 25.09.2002) 18 811 420 руб. 46 коп. основного долга, а также 117 057 рублей государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области. 

Судья

Мингалева Е.А.