АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: 

<

***>

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Барнаул                  Дело № А03-9546/2025                          23.09.2025

Резолютивная часть решения оглашена 10.09.2025. Решение в полном объеме изготовлено 23.09.2025.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Рыбиной А.С., рассмотрев  в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Запсибспецстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд-крио Алтай» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 2822262 руб. 97 коп. задолженности по договору от 31.03.2023 и по договору № 7 от 06.07.2023, 191913 руб. 82 коп. неустойки за период с 24.03.2025 по 30.05.2025, при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 по доверенности от 23.05.2025, от ответчика – не явились,

У С Т А Н О В И Л:

Общество  с ограниченной ответственностью «Запсибспецстрой» (далее – ООО «Запсибспецстрой», истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с вышеуказанным исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд-крио Алтай» (далее – ООО обществу с ограниченной ответственностью «Гранд-крио Алтай», ответчик) о взыскании долга и неустойки по договору подряда.

Исковые требования обоснованы статьями 309, 310, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате работ, выполненных по договорам подряда, что привело к возникновению задолженности и начислению неустойки.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Копия определения арбитражного суда о принятии искового заявления к производству от 03.07.2025, направленная ответчику заказным письмом с уведомлением по месту регистрации, согласно вернувшемуся уведомлению вручена адресату 16.07.2025 (л.д. 8 - уведомление). 

Таким образом, ответчик определение суда получил.

В ходе судебного разбирательства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец уменьшил размер исковых требований, просил взыскать с ответчика 2343829 руб. 24 коп. задолженности по договору от 31.03.2023 и по договору № 7 от 06.07.2023, 356262 руб. 04 коп. неустойки за период с 24.03.2025 по 22.08.2025(т.5 л.д. 126-128-уточненное исковое заявление, т. 5 л.д. 143-протокол).

Суд принял уменьшение размера исковых требований.

Ответчик явку своего представителя не обеспечил.

На основании статьи 123, статьи 156 АПК РФ спор по существу рассмотрен в отсутствие ответчика.

В судебном заседании представитель истца на уточненных исковых требованиях настаивал.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу об  обоснованности исковых требований.

Отношения сторон регулируются следующими нормами материального права. 

Между сторонами возникли вытекающие из договора подряда обязательственные правоотношения, регулируемые главой 37 ГК РФ.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Согласно статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке (ст. 711, 746 ГК РФ). Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

По делу установлены следующие фактические обстоятельства.

Между ООО «Запсибспецстрой» (подрядчик) и ООО «Гранд-крио Алтай» (заказчик) заключен договор подряда от 31.03.2023, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить по проектной документации заказчика строительно-монтажные работы на объекте заказчика - здание гостиницы, находящиеся по адресу - 

<

...> (далее - работы) и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную договором стоимость работ (т. 1 л.д. 18-25- договор).

В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость работ согласовывается сторонами отдельными приложениями к договору по объекту заказчика на основании согласованных смет. Сметы готовятся подрядчиком по проектам заказчика в программе Гранд смета в ФЕР 2020 с изм. 1-9 по всем видам работ, которые необходимы для завершения строительства объектов заказчика и ввода их в эксплуатацию до начала производства работ. Смета составляется подрядчиком с учетом использования для производства работ машин и механизмов (по видам), материалов (в т.ч. давальческих), проверяется заказчиком, и становится частью договора с момента ее подписания сторонами. Работы по договору оплачиваются за счет средств заказчика.

Согласно пункту 2.3 договора заказчик в течении 5 рабочих дней после подписания договора оплачивает подрядчику аванс в размере 2000000 руб., который будет зачтен в качестве аванса по первым подписанным сторонами приложениям, в которых стороны согласовали по объектам (объекту) заказчика условия по видам работ, график работы, сметную стоимость. В случае если размере вышеуказанного аванса окажется меньше 20% предусмотренных подпунктом 2.3.1, то заказчик производит доплату подрядчику недостающей суммы не позднее 3 рабочих дней с момента подписания сторонами первых приложений к договору.

Пунктом 2.3.1 договора стороны установили, что дальнейшая оплата работ будет производится по каждой смете отдельно, с учетом условий зачета аванса, предусмотренных подпунктом 2.3.1 договора, в следующем порядке, который определен по согласованию сторон:

- заказчик на основании счета подрядчика уплачивает аванс в размере 20 % в течении 3 рабочих дней с момента подписания сторонами приложений к договору (приложения должны содержать дату их подписания), в которых стороны согласовали по объектам (объекту ) заказчика условия по видам работ, график работы, сметную стоимость. Зачет выплаченного аванса производится пропорционально выполненных работ по договору.

- оплата за выполненные работы производится ежемесячно в размере 70 % от объема выполненных работ на основании подписанных за месяц актов сдачи-приемки выполненных работ(форма Кс-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии предоставления подрядчиком отчета об использовании давальческих материалов и исполнительной и иной технической документации. В состав исполнительной документации входят: акты на скрытые работы, сертификаты на материалы (если материалы были предоставлены подрядчиком), исполнительные схемы работ).

- окончательный расчет за выполненные работы производится в течении 5 рабочих дней с даты подписания последнего акта сдачи-приемки выполненных работ (форма Кс-2), последней справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при предоставлении подрядчиком всей исполнительной и иной технической документации . В состав исполнительной документации входят: общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы (если материалы были предоставлены подрядчиком), исполнительные схемы работ.

Размер окончательного платежа рассчитывается как разница между стоимостью всех фактически произведенных подрядчиком и принятых заказчиком работ, рассчитанной на основании всех принятых заказчиком отчетных документов (по формам КС-2 и КС-3), за вычетом суммы авансовых платежей и стоимости невозвращенных заказчику давальческих материалов.

Согласно пункту 7.4 договора за просрочку исполнения обязательств по договору виновная сторона оплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки (от суммы просроченной оплаты, от стоимости невыполненных в срок работ).

Дополнительным соглашением № 1 от 01.04.2023 стороны исключили пункт 7.4 договора, внесли изменение в  пункт 7.2 договора: в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). За нарушение заказчиком сроков оплаты, в том числе авансового платежа и промежуточных (ежемесячных) этапов оплаты, указанных в пункте 2.3 договора, подрядчик имеет право потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более стоимости каждого этапа.

Между ООО «Запсибспецстрой» (подрядчик) и ООО «Гранд-крио Алтай» (заказчик) заключен договор подряда № 7 от 06.07.2023, согласно которому подрядчик обязуется выполнить по проектной документации заказчика - кедровый СПА, находящийся на земельном участке по адресу - 

<

...> (далее - работы) и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную договором стоимость работ (т. 1 л.д. 27-33- договор).

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ согласовывается сторонами отдельными приложениями к договору по объекту заказчика на основании согласованных смет. Сметы готовятся подрядчиком по проектам заказчика в программе Гранд смета в ФЕР 2020 с изм. 1-9 по всем видам работ, которые необходимы для завершения строительства объектов заказчика и ввода их в эксплуатацию до начала производства работ. Смета составляется подрядчиком с учетом использования для производства работ машин и механизмов (по видам), материалов (в т.ч. давальческих), проверяется заказчиком, и становится частью договора с момента ее подписания сторонами. Работы по договору оплачиваются за счет средств заказчика.

Согласно пункту 2.3 договора заказчик в течении 5 рабочих дней после подписания договора оплачивает подрядчику аванс в размере 2000000 руб., который будет зачтен в качестве аванса по первым подписанным сторонами приложениям, в которых стороны согласовали по объектам (объекту) заказчика условия по видам работ, график работы, сметную стоимость. В случае если размере вышеуказанного аванса окажется меньше 20% предусмотренных подпунктом 2.3.1, то заказчик производит доплату подрядчику недостающей суммы не позднее 3 рабочих дней с момента подписания сторонами первых приложений к договору.

Пунктом 2.3.1 договора стороны установили, что заказчик на основании счета подрядчика уплачивает аванс в размере 20 % в течении 3 рабочих дней с момента подписания сторонами приложений к договору (приложения должны содержать дату их подписания), в которых стороны согласовали по объектам (объекту ) заказчика условия по видам работ, график работы, сметную стоимость. Зачет выплаченного аванса производится пропорционально выполненным работ по каждой смете.

- оплата за выполненные работы производится ежемесячно в размере 70 % от объема выполненных работ на основании подписанных за месяц актов сдачи-приемки выполненных работ(форма Кс-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии предоставления подрядчиком отчета об использовании давальческих материалов и исполнительной и иной технической документации. В состав исполнительной документации входят: акты на скрытые работы, сертификаты на материалы (если материалы были предоставлены подрядчиком), исполнительные схемы работ).

- окончательный расчет за выполненные работы производится в течении 5 рабочих дней с даты подписания последнего акта сдачи-приемки выполненных работ (форма Кс-2), последней справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при предоставлении подрядчиком всей исполнительной и иной технической документации . В состав исполнительной документации входят: общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы (если материалы были предоставлены подрядчиком), исполнительные схемы работ.

Размер окончательного платежа рассчитывается как разница между стоимостью всех фактически произведенных подрядчиком и принятых заказчиком работ, рассчитанной на основании всех принятых заказчиком отчетных документов (по формам КС-2 и КС-3), за вычетом суммы авансовых платежей и стоимости невозвращенных заказчику давальческих материалов.

Пунктом 7.2 договора стороны установили, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). За нарушение заказчиком сроков оплаты, подрядчик имеет право потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более стоимости каждого этапа.

Истец выполнил работы по договору подряда от  31.03.2023  в период с 06.07.2023 по июль 2024 года на общую сумму 31427103 руб. 31 коп., что подтверждается подписанными сторонами актами по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (т. 1 л.д. 127-150, т.2-т. 4, т. 5л.д. 1-105–акты по форме КС-2, справки по форме КС-3).

Замечаний по качеству и объему выполненных работ подрядчиком не заявлено.

Ответчик обязанность по оплате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, работы оплачены частично. 

Задолженность ответчика по договору подряда от  31.03.2023  на момент предъявления искового заявления составила 2285440 руб. 18 коп.

По второму договору подряда № 7 от 06.07.2023 истец выполнил работы за период с 06.07.2023 по июль 2024 на общую сумму 3356524 руб. 86 коп. (т. 1 л.д. 44-126 - акты по форме КС-2, справки по форме КС-3). Ответчик обязанность по оплате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, работы оплачены частично.  Задолженность ответчика по договору подряда № 7 от 06.07.2023 на момент предъявления искового заявления составила 58389 руб. 06 коп.

В адрес ответчика истец направил претензию от 12.02.2025 с требованием оплатить задолженность (т. 1 л.д. 40-41 – претензия). Неисполнение требований претензии в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Часть 3.1 статьи 70 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Давая правовую оценку установленным обстоятельствам по делу, суд приходит к следующим выводам.

Представленные истцом письменные доказательства свидетельствуют о надлежащем исполнении им условий заключенного договора.

Ответчик обязанность по оплате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, доказательств полной оплаты выполненных работ в суд не представил. 

Задолженность ответчика перед истцом по договорам подряда подтверждается материалами дела: подписанными сторонами актами выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, претензией, расчетом.

В материалы дела истцом представлен акт сверки, подписанный со стороны ответчика, в котором также указано на наличие задолженности перед истцом  в заявленном размере ( т.5 л.д. 140-141-акт сверки).

Таким образом, исковые требования о взыскании 2285440 руб. 18 коп. задолженности по договору от  31.03.2023 и 58389 руб. 06 коп. задолженности по договору подряда № 7 от 06.07.2023 подлежат удовлетворению в полном объеме.

За ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате выполненных работ истец начислил неустойку на сумму долга за период с 24.03.2025 по 22.08.2025 в размере 356262 руб. 04 коп.(т. 5 л.д. 130 - расчет).

Расчет неустойки проверен судом и признан верным. 

Расчет суда приобщен к материалам дела (т. 5 л.д.138-расчет).

Ответчик допустил просрочку в оплате выполненных работ, в связи с чем, истец правомерно начислил неустойку.

Ответчик не заявил возражений относительно требований о взыскании неустойки, размера и периода ее начислений.

Основания для применения статьи 333 ГК РФ также отсутствуют.

Также истцом заявлено о начислении неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Согласно пункту 65 Постановления от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи  330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает на то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательств.

Начисление неустойки истцом произведено обоснованно. 

Таким образом, оценив совокупность представленных в материалы дела доказательств, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявленные истцом по делу исковые требования о взыскании неустойки также подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика. 

С учетом уменьшения размера исковых требований, истцу подлежит возврату из федерального бюджета денежные средства за оплату государственной пошлины в размере 9592 руб.

Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью «Гранд-крио Алтай» (ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Запсибспецстрой» (ОГРН 

<

***>)  2343829 руб.  24 коп. задолженности, 356262 руб. 04 руб. неустойки за период, начиная с 24.03.2025 по 22.08.2025 и далее, начиная с 23.08.2025 по день фактической уплаты долга начислять неустойку из расчета 0,1% от суммы неоплаченного долга за каждый день просрочки. 

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Запсибспецстрой» (ОГРН 

<

***>)  из Федерального бюджета Российской Федерации 9592 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья                                                                                  М.А. Кулик