﻿

 

Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-455/2018

г. Петрозаводск

25 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 ноября 2021 года.  

Полный текст решения изготовлен   25 ноября 2021 года.

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Михайлова А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания , 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Индивидуального предпринимателя Черемисина Николая Юрьевича 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой»

о взыскании 5841901 руб. 68 коп.  

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой»

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1"

о взыскании 5090677 руб. 28 коп.,

третьи лица: 1. Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия»,

2. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная строительная компания»,

3. Конкурсный управляющий ООО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1" Блинов Александр Юрьевич,

в отсутствие представителей сторон и третьих лиц, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» о взыскании 5890764 руб. 68 коп. задолженности по договору субподряда от 30.05.2016 года № 3005/2016.

Определением суда от 09.04.2018 года к рассмотрению совместно с первоначальным принято встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» о взыскании 5090677 руб. 28 коп. неосновательного обогащения (уточнение суммы иска принято протокольным определением от 21.09.2021 года).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная строительная компания», конкурсный управляющий ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» Блинов Александр Юрьевич.

Отзывы третьих лиц по существу требований приобщены судом к материалам дела.

Определением от 28.05.2021 года суд произвел процессуальную замену первоначального истца - Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» на правопреемника - Индивидуального предпринимателя Черемисина Николая Юрьевича.

Определением от 10.09.2021 года суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял к рассмотрению уточненные требования Предпринимателя Черемисина Н.Ю. в размере 5841901 руб. 68 коп. 

В обоснование первоначального иска Индивидуальный предприниматель Черемисин Н.Ю. ссылается на положения главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, на условия договора субподряда от 30.05.2016 года № 3005/2016, на подписанные сторонами без возражений и разногласий акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, на акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года, на результаты судебном экспертизы, проведенной ООО «КРОНОС-Карелия». По мнению первоначального истца, цена договора является твердой; непредвиденные затраты согласованы сторонами и включены в цену договора. 

В отзыве на иск и в дополнительных письменных пояснениях ответчик требования не признал, пояснив, что указанные в подписанных сторонами актах по форме КС-2 и справках по форме КС-3 объемы и стоимость выполненных работ завышены, не соответствуют объемам и стоимости фактически выполненных работ, не подтверждены исполнительной документацией; часть работ выполнена некачественно; цена договора не является твердой; не подлежат оплате сумме непредвиденных затрат в размере 3% от стоимости работ, включенные в акты по форме КС-2 №№ 27 – 33. 

В обоснование встречного иска ООО «Инвестстрой» со ссылками на положения главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации указало, что неосновательное обогащение ответчика (5090677 руб. 28 коп.) составляет разницу между полученной ответчиком от истца суммой оплаты в размере 142231787 руб. 28 коп. и стоимостью фактически выполненных работ в размере 136907803 руб. 80 коп., уменьшенной на сумму снижения услуг генподряда в размере 233306 руб. 20 коп.  

Индивидуальный предприниматель Черемисин Николай Юрьевич считает встречный иск не подлежащим удовлетворению, ввиду отсутствия на стороне ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» неосновательного обогащения при наличии задолженности со стороны ООО «Инвестстрой» по спорному договору.

Стороны и третьи лица надлежащим образом уведомлены о начавшемся судебном процессе, о дате, времени и месте рассмотрения дела, в том числе путем своевременного размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети Интернет, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

До начала судебного заседания от истца по первоначальному иску поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя по причине невозможности обеспечить явку. 

Суд проводит судебное заседание в отсутствие представителей сторон и третьих лиц по правилам части 2, части 3, части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства, принимая во внимание позиции сторон по существу спора, суд считает установленными следующие обстоятельства. 

Из материалов дела следует, что в целях исполнения государственного контракта от 18.05.2016 года № 100/2016 на выполнение работ по строительству объектов инженерно-технического обеспечения Промышленного парка в пгт. Надвоицы Сегежского района Республики Карелия, заключенного между ООО «Инвестстрой» и КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия», между ООО «Инвестстрой» и ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» заключен договор субподряда № 3005/2016 от 30.05.2016 года (далее - договор субподряда № 3005/2016).

По условиям договора субподряда № 3005/2016 субподрядчик («ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1») обязуется выполнить по заданию подрядчика (ООО «Инвестстрой») строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство объектов инженерно-технического обеспечения Промышленного парка в пгт. Надвоицы Сегежского района Республики Карелия», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский муниципальный район, пгт. Надвоицы, сдать результат подрядчику, а подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его в предусмотренном договором порядке.

Виды и объемы работ определяются в расчете договорной цены (приложение № 1) (пункт 1.2 договора субподряда № 3005/2016). 

Срок и очередность выполнения работ определены графиком производства работ (приложение № 2); все работы, предусмотренные договором должны быть выполнены субподрядчиком надлежащим образом до 10.12.2016 года; начало выполнения работ – с даты подписания сторонами договора (пункты 1.8, 4.1 договора субподряда № 3005/2016).

Цена работ по договору составляет 150000000 руб., в том числе НДС 18% - 22881355 руб. 93 коп.; на момент заключения договора цена является предварительной, будет определена в расчете договорной цены (приложение № 1); цена договора включает в себя: стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования, предусмотренного проектной документацией, стоимость проведения необходимых лабораторных измерений и испытаний в пределах объемов выполненных работ; стоимость пусконаладочных работ; лимитированные затраты; резерв средств на непредвиденные работы, затраты; все налоги на день подписания договора; затраты на организацию производства, инфляцию; затраты на осуществление работ вахтовым методом, прочие затраты субподрядчика и является твердой в пределах оговоренного в договоре срока выполнения работ (пункты 2.1, 2.2 договора субподряда № 3005/2016).

Приложение № 1 к договору сторонами не подписано.

Пунктом 3.1 договора субподряда № 3005/2016 предусмотрено авансирование в размере 30% от стоимости выполнения работ; зачет авансовых сумм производится в течение срока выполнения работ ежемесячно, пропорционально объему выполненных работ (пункт 3.1 договора субподряда № 3005/2016).

Оплата фактически выполненных работ производится подрядчиком согласно расчету договорной цены на основании подписанных сторонами актов и справок по форме КС-2, по форме КС-3 за вычетом начисленной неустойки (штрафа, пени), при условии ее начисления, в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами актов и справок и предъявления субподрядчиков счета и счета-фактуры на оплату; окончательный расчет производится после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и передачи исполнительной документации с письменным подтверждением о соответствии фактически выполненным работам с зачетом всех ранее произведенных платежей и уплаты неустоек (пени, штрафа), определенных статей 15 договора, в течение 15 рабочих дней после получения подрядчиком счета, счета-фактуры (пункты 3.2, 3.8 договора субподряда № 3005/2016).

Сроки выполнения работ оговорены в статье 4 договора субподряда № 3005/2016. Все работы, предусмотренные договором, должны быть выполнены субподрядчиком надлежащим образом до 10.12.2016 года в соответствии с графиком выполнения работ; начало выполнения работ – с даты подписания сторонами договора.

Статья 8 договора субподряда № 3005/2016 определяет порядок сдачи и приемки работ.

Пунктом 18.5 договора субподряда № 3005/2016 стороны предусмотрели возможность расторжения договора по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором.

Пунктом 18.14 установлено, что подрядчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения договора, направляет письменное уведомление субподрядчику за 10 дней до даты расторжения договора, после чего подрядчик вступает во владение результатом работ и вправе привлечь к выполнению незавершенных работ другого субподрядчика. 

По актам формы КС-2 №№ 27 – 33 от 09.12.2016 года ООО «Инвестстрой» приняло у ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» в рамках договора субподряда № 3005/2016 работы на общую сумму 148573092 руб. 97 коп. 

Акты выполненных работ подписаны сторонами без возражений и разногласий по объемам, видам и стоимости работ.

 ООО «Инвестстрой» произвело оплату по договору субподряда № 3005/2016 на сумму 142231787 руб. 28 коп., в том числе, 139250000 руб. путем перечисления денежных средств платежными поручениями и 2981787 руб. 28 коп. в порядке зачета взаимных требований. 

Сторонами без возражений  и разногласий подписан акт сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2017 года, в котором отражено, что задолженность ООО «Инвестстрой» в пользу ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» составляет 6341305 руб. 68 коп.

Уведомлением от 16.03.2017 года ООО «Инвестстрой» отказалось от исполнения договора субподряда № 3005/2016 с 31.03.2017 года со ссылкой на статью 717 Гражданского кодекса Российской Федерации. В отзыве на иск первоначальный ответчик указал, что отказ от договора субподряда № 3005/2016 вызван приостановлением финансирования по государственному контракту от 18.05.2016 года № 100/2016.

После расторжения договора комиссионный осмотр места проведения работ сторонами договора субподряда и заказчиком по госконтракту не осуществлялся, консервация объекта не производилась.

После возобновления финансирования на объекте ООО «ВолГеоКом» проведены геодезические изыскания.

Комиссионный осмотр объекта с участием представителей заказчика - КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия», ООО «Инвестстрой», Главы Администрации Надвоицкого сельского поселения произведен 01.08.2017 года. Руководитель ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» уведомлялся об осмотре объекта посредствам телефонной связи.

По результатам проведенных обследований составлены акты выявленных дефектов №№ 1 – 8 от 01.08.2017 года, подписанные представителем ООО «Инвестстрой» и Главой Администрации Надвоицкого сельского поселения.

Между сторонами велась переписка относительно выявленных недостатков и необходимости их устранения, которая не привела к разрешению возникшей ситуации.   

Начиная с августа 2017 года, работы на объекте продолжал выполнять иной подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная строительная компания».

В отзыве третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная строительная компания» указало, что между ООО «ЗСК» и ООО «Инвестстрой» заключен договор субподряда № 36-СП/17 от 15.08.2017 года на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту: «Строительство объектов инженерно-технического обеспечения Промышленного парка в пгт Надвоицы Сегежского района Республики Карелия», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский муниципальный район, пгт. Надвоицы.

ООО «СЗСК» приняло строительную площадку от ООО «Инвестстрой» по акту приема-передачи строительной площадки 16.08.2017 года.  

ООО «СЗСК» выполнило работы по смете № 01-01-01 «Подготовка территории» в объеме, указанном в акте о приемке выполненных работ № 3/1 от 25.10.2017, по смете № 06-01-01 «Наружные сети водоснабжения, бытовой и ливневой канализации» в объеме, указанном в актах о приемке выполненных работ № 3 от 19.09.2017, № 4/1 от 19.09.2017, № 6 от 01.12.2017, № 6/1 от 01.12.2017, № 10 от 01.12.2017. По работам, указанным в акте о приемке выполненных работ № 4/1 от 19.09.2017, ООО «СЗСК» выполнило работы по устранению недостатков работ, выполненных первоначальным подрядчиком.  Дефекты работ указаны в акте приема-передачи строительной площадки от 16.08.2017, Акте приема-передачи ливневой канализации К2 по объекту, Дефектной ведомости № 2 от 16.08.2017, подписанной представителями сторон.

ООО «СЗСК» выполнило работы по смете № 07-01-01 «Благоустройство территории в границах землеотвода» в объеме, указанном в актах о приемке выполненных работ № 4 от 19.09.2017, № 5 от 19.09.2017, № 5/1 от 19.09.2017, 5/2 от 19.09.2017, № 12 от 01.12.2017.   

По работам, указанным в акте о приемке выполненных работ № 5/1 от 19.09.2017, третье лицо пояснило, что выполнило часть работ по устранению недостатков работ, выполненных первоначальным подрядчиком, так как результаты работ не соответствовали проектной документации. 

Для устройства дождеприемных колодцев ООО «СЗСК» демонтировало щебеночное основание, геотекстиль дорожный, песчаную призму дорожного полотна на площади 1784,5 кв. м и выполнило работы по уплотнению песчаного основания, устройству прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) (геотекстиля) и устройству щебеночного основания в соответствии с проектной документацией;

- по разделу «Ограждение территории» ООО «СЗСК» выполнило работы в объеме, указанном в акте о приемке выполненных работ, т.е. по установке столбов в количестве 95 шт. и устройству заграждений из панелей в количестве 95 шт. Всего по проекту нужно было установить 504 столба и 504 панели. ООО «СЗСК» установило 412 столбов и 412 панелей, что подтверждается также актами о приемке выполненных работ № 4 от 19.09.2017, № 5 от 19.09.2017, а также выполнило работы по демонтажу 22 некачественно установленных столбов и панелей и монтажу новых.   

По работам, указанным в акте о приемке выполненных работ № 5/2 от 19.09.2017, ООО «СЗСК» выполнило работы, в объеме, указанном в акте о приемке выполненных работ, т.е. по установке люков чугунных в количестве 3 шт., отсутствовавших на объекте на дату передачи строительной площадки.  

Полагая, что у ответчика имеется задолженность по договору субподряда № 3005/2016 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» с соблюдением претензионного порядка обратилось в арбитражный суд с первоначальным иском.

Впоследствии определением суда от 28.05.2021 года произведена процессуальная замена первоначального истца – ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» на правопреемника - Индивидуального предпринимателя Черемисина Николая Юрьевича, который в рамках рассмотрения дела уточнил сумму первоначального иска до 5841901 руб. 68 коп. 

ООО «Инвестстрой», полагая, что на стороне ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» имеется неосновательное обогащение в размере 5090677 руб. 28 коп. обратилось со встречным иском.

Поскольку между сторонами возник спор об объёмах, видах, качестве и стоимости выполненных работ по ходатайству сторон суд определением от 05.06.2018 года назначил по делу судебную строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручил экспертам Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «КРОНОС-Карелия» Цумаровой Ирине Анатольевне и Кузнецовой Валентине Александровне. 

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы: 1. Соответствуют ли виды и объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ, фактическим видам и объемам выполненных субподрядчиком - ООО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1" работ по договору субподряда № 3005/2016 от 30.05.2016 года?

2. Определить виды и фактические объемы работ, выполненных субподрядчиком - ООО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1", по договору субподряда № 3005/2016 от 30.05.2016 года.

3. Определить стоимость работ, фактически выполненных субподрядчиком - ООО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1" по договору субподряда № 3005/2016 от 30.05.2016 года, исходя из расценок, согласованных сторонами в договоре. 

Срок экспертизы продлевался судом по ходатайству экспертной организации. Экспертное заключение поступило в суд 09.08.2018 года. 

Согласно экспертному заключению № 1073-15-06/18 виды и объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ, в основном соответствуют фактическим видам и объемам выполненных субподрядчиком работ. Отклонения от объемов работ выявлены в актах по форме КС-2 № 27 (п. п. 15, 22), № 29 (п. п. 7, 8), № 30 (п. п. 67, 68), № 31 (п. п. 2, 16, 17, 22, 23, 24, 37, 38), № 32 (п. 11), № 33 (п. п. 40, 41, 66, 69).

Эксперты пришли к выводу, что сумма работ, не подтвержденных исполнительной документацией, составляет 450541 руб.; сумма выполненных работ, подтвержденных исполнительной документацией, составляет 148122551 руб. 96 коп.

Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем в материалы дела представлена собственноручная подписка экспертов.

Впоследствии эксперты представили дополнительные письменные пояснения от 11.12.2018 года, в которых уточнили расчетные величины, указав, что стоимость работ, не подтвержденных исполнительной документацией, составила 726668 руб. (наименование работ, стоимость с привязкой к спорным актам выполненных работ приведена в таблице). Эксперты пришли к выводу, что стоимость работ, подтвержденных исполнительной документацией, составляет 147846424 руб. 96 коп.    

По ходатайству сторон эксперты, проводившие судебную экспертизу, вызваны в судебное заседание для дачи пояснений. В судебном заседании 12.12.2018 года эксперт Цумарова И.А. дала пояснения по экспертному заключению, ответила на вопросы представителя ООО "Инвестстрой".

По ходатайству сторон определением от 25.01.2019 года суд назначил по делу повторную комиссионную судебную строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручил комиссии экспертов, состоящей из экспертов Автономной некоммерческой организации «Центр судебных экспертиз и исследований» - Найденкова Сергея Леонидовича, Кузнецовой Натальи Юрьевны, Алашеевой Анастасии Олеговны и экспертов Экспертно-правовой компании «Эксперт-Сервис» Анискиной Татьяны Александровны и Индивидуального предпринимателя Малахова Сергея Николаевича 

На разрешение экспертов судом поставлены вопросы в той же редакции, что и при проведении первоначальной экспертизы. Производство по делу приостанавливалось. 

По ходатайству экспертов сроки проведения экспертизы неоднократно продлевались.

Заключение судебной экспертизы поступило в суд 20.08.2019 года. В заключении имеются собственноручные подписки экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

По результатам проведенной судебной экспертизы эксперты пришли к следующим выводам: виды и объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ, в основном соответствуют фактически видам и объемам, выполненных субподрядчиком работ; стоимость невыполненных субподрядчиком работ составляет 1293131 руб.; стоимость выполненных работ – 147279961 руб. 96 коп.

По ходатайству сторон эксперты, проводившие судебную экспертизу, неоднократно вызывались в судебное заседание для дачи пояснений. 

Эксперты Малахов С.Н. и Анискина Т.А. давали пояснения по экспертному заключению, однако многочисленные замечания по расчетам, приведенным в экспертном заключении, не были опровергнуты. Эксперт Найденков С.Л. явку в суд для дачи пояснений не обеспечил. 

С учетом указанного, суд критически оценивает названное экспертное заключение. 

Не согласившись с результатами проведенных по делу судебных экспертиз, ООО «Инвестстрой» заявило ходатайство о проведении повторной строительно-технической экспертизы, а также ходатайство о проведении дополнительной судебной экспертизы.

Определением суда от 15.06.2020 года суд назначил по делу повторную и дополнительную судебную экспертизу, проведение которой поручил эксперту ООО «Экспертный центр» Пурышеву Сергею Александровичу.

На разрешение эксперта в целях проведения повторной судебной экспертизы поставлены следующие вопросы: 1. Соответствуют ли виды и объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ, фактическим видам и объемам выполненных субподрядчиком - ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» работ по договору субподряда № 3005/2016 от 30.05.2016, в том числе: определить, какой объем спорных работ подтверждается исполнительной документацией, какой объем спорных работ не подтверждается исполнительной документацией? Какой объем спорных работ, подтвержденный и не подтвержденный исполнительной документацией, не соответствует объему работ, указанному в проектной документации по объекту? 

2. Определить виды и фактические объемы работ, выполненных субподрядчиком - ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» по договору субподряда № 3005/2016 от 30.05.2016. 

3. Определить стоимость работ, фактически выполненных субподрядчиком - ООО «Энергостройремонт-1» по договору субподряда № 3005/2016 от 30.05.2016, исходя из расценок, согласованных сторонами в договоре.

На разрешение эксперта в целях проведения дополнительной судебной экспертизы поставлены следующие вопросы:

1. В какой последовательности согласно разделам проектной документации 02-333-1-ПЗУ, 02-333-1-ИОС312 по объекту «Объекты инженерно-технического обеспечения Промышленного парка в пгт. Надвоицы Сегежского района Республики Карелия» и требованиям нормативных актов необходимо выполнять работы по устройству дождеприемных колодцев и строению дорожной одежды на одном участке? Возможно ли устройство дождеприемных колодцев в теле дороги после выполнения субподрядчиком работ, включенных в Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 33 от 09.12.2016 (смета № 07-01-01) под №№ 7-12, без разборки дорожной одежды (демонтажа щебеночного основания, геотекстиля дорожного, песчаной призмы дорожного полотна)? 

2. Какая исполнительная документация должна быть оформлена при выполнении работ по устройству дорожных покрытий, подтверждающая проведение уплотнения дорожного покрытия? Каким способом может быть подтверждено наличие дефектов дорожного полотна? 

3. Определить объем и стоимость работ, выполненных с ненадлежащим качеством, включенных в Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 33 от 09.12.2016 (смета № 07-01-01) под №№ 2- 6, 7 – 12.

Заключение судебной экспертизы поступило в суд 26.04.2021 года. В заключении имеется собственноручная подписка эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт пришел в числе прочего к следующим выводам: виды работ, указанные в актах о приемке выполненных работ, соответствуют видам фактически выполненных субподрядчиком работ; объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ большей частью не соответствуют фактическим объемам выполненных работ; стоимость фактически выполненных субподрядчиком работ составляет 1692727 руб. 54 коп.; стоимость невыполненных работ составила 990725 руб. 46 коп. (дополнительное мнение эксперта); стоимость работ, выполненных с ненадлежащим качеством, включенных в акт КС-2 № 33, составляет 92339 руб.62 коп.  

Эксперт указал, что стоимость определена в базовых ценах.

Между тем, суд, определяя вопросы, указал на необходимость определения стоймостных показателей исходя из расценок, согласованных сторонами в договоре.  

Эксперт Пурышев С.А. по ходатайству сторон вызывался в суд и давал пояснения по экспертному заключению. Письменные ответы эксперта приобщены к материалам дела. 

В ходе рассмотрения дела первоначальный истец ходатайствовал о назначении повторной экспертизы. Первоначальный ответчик возражал. 

Вопрос назначения повторной экспертизы относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу; назначение повторной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела суд придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Рассмотрев ходатайство о назначении повторной экспертизы, суд отказал в его удовлетворении, поскольку отсутствуют объективные основания к тому.

Сторонами в материалы дела представлены расчеты в ценах договора применительно к последнему экспертному заключению.

ООО «Инвестрой» считает первоначальную экспертизу и повторную комиссионную экспертизу ненадлежащими доказательствами по делу, ввиду наличия счетных и методологических ошибок. Ответчик настаивает на легитимности экспертного заключения Пурышева С.А. (ООО «Экспертный центр»).

Индивидуальный предприниматель Черемисин Н.Ю. возражает относительно выводов, сделанных при производстве повторной комиссионной экспертизы и экспертного заключения Пурышева С.А. (ООО «Экспертный центр»). Расчеты первоначального истца базируются на результатах первоначальной экспертизы с учетом дополнительных пояснений эксперта.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Как установлено пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В силу положений статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе получить оплату пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, при наличии потребительской ценности у результата незавершенной работы. 

Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2017 года № 10-RU10513OOO-83/1-2017.

Поскольку выполненная субподрядчиком работа имеет овеществленный результат и потребительскую ценность первоначальный истец вправе претендовать на оплату фактически выполненных работ.

Оценив по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора субподряда № 3005/2016, суд приходит к выводу, что стороны предусмотрели в договоре условие о том, что цена договора включает в себя резерв средств на непредвиденные работы.

Целью включения в стоимость договора резерва средств на непредвидимые работы и затраты является покрытие рисков субподрядной организации, связанных с возможным увеличением в период строительства стоимости материалов и конструкций, услуг третьих лиц ростом оплаты труда и т.п.

Согласно пункту 6 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для того расходов.

Согласно пункту 8.3 договора субподряда № 3005/2016 подрядчик проверяет формы КС-2 и иные документы, указанные в пункте 8.1 договора, на правильность и достоверность их заполнения, и только убедившись в их правильном оформлении и достоверности, подписывает акты о приемке выполненных работ (пункт 8.6 договора субподряда № 3005/2016). 

Учитывая, что спорные акты о приемке выполненных работ от 09.12.2016г. на сумму 148573092 руб. 96 коп., в которую в том числе включен резерв средств на непредвиденные работы затраты, подписаны со стороны ООО «Инвестстрой» без замечаний.

Спорные акты выполненных работ не отозваны первоначальным ответчиком.

Поскольку сумма резерва согласована сторонами в рамках спорного договора, указывалась в актах формы КС-2, КС-3 отдельной строкой, при этом, подрядчик производил оплаты данных сумм, оснований для признания указанных перечисленных субподрядчику денежных средств неосновательным обогащением ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» у суда не имеется. 

Резерв средств на непредвиденные работы правомерно включен сторонами в спорные акты КС-2.

Какие-либо претензии в период действия договора относительно объема, качества, стоимости работ первоначальным ответчиком не заявлялось.

Кроме того, сторонами подписан акт сверки расчетов по состоянию на сентябрь 2017 года (спустя шесть месяцев после отказа подрядчика от исполнения договора субподряда № 3005/2016), согласно которому ООО «Инвестстрой» признало наличие дебиторской задолженности перед ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1».

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности первоначального иска.

Сравнивая различные по результатам исследования заключения экспертов, суд принимает во внимание следующее.

Признавая право эксперта на самостоятельное определение необходимого количества инструментальных измерений при обследовании объекта, с учётом знаний и опыта эксперта, суд, тем не менее, учитывает, что степень достоверности результатов исследования обеспечивается его методологией, а также репрезентативностью эмпирического материала, положенного в основу выводов. 

Выводы всех экспертов основывались на анализе проектно-сметной, исполнительной документации в совокупности с результатами проведенных натурных исследований. 

Проанализировав экспертные заключения, выполненные по результатам судебных экспертиз, суд критически оценивает второе экспертное заключение (повторная комиссионная экспертиза), поскольку экспертами не опровергнуты обоснованные замечания по расчетам, приведенным в экспертном заключении, а также результаты третьей судебной экспертизы с учетом, в том числе, тех документов, на которые опирался эксперт при производстве экспертизы. В частности экспертом применена топографическая съемка ООО «ВолГеоКом» (июль 2017 года), выполненная по истечении семи месяцев после завершения субподрядчиком работ на объекте, акты выявленных дефектов №№ 1 – 8 от 01.08.2017 года, подписанные представителем ООО «Инвестстрой» и Главой Администрации Надвоицкого сельского поселения. 

Суд признает допустимым доказательством судебную экспертизу, выполненную экспертами ООО «КРОНОС-Карелия». Эксперты предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. По составленному заключению в последующем даны дополнительное пояснения, восполняющие недостатки заключения, приведены уточняющие расчеты, объясняющие примененные методики и логику экспертов при формировании выводов. Явных противоречий, достаточных для вывода о недостоверности в полном объёме экспертного заключения, судом не выявлено. Суд считает более точными выводы экспертов ООО «КРОНОС-Карелия», учитывая, в том числе, что указанная экспертиза и осмотр объекта экспертизы проводились ретроспективно в максимально приближенный временной промежуток к моменту выполнения работ по договору субподряда № 3005/2016.  

С учетом собранных по делу доказательств, в том числе результатов судебной экспертизы, расчетов, представленных сторонами, суд приходит к выводу об обоснованности расчета первоначального истца, в связи с чем, удовлетворяет первоначальный иск в полном объеме в размере 5841901 руб. 68 коп., составляющих задолженность по договору субподряда № 3005/2016.

С учетом результатов рассмотрения первоначального иска, отсутствуют основания полагать, что на стороне ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1» возникло неосновательное обогащение, в связи с чем, в удовлетворении встречного иска суд отказывает.

С учетом результатов рассмотрения дела, предоставленной истцу по первоначальному иску отсрочки по уплате госпошлины, положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с первоначального ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 52210 руб.

Судебные расходы по оплате экспертных услуг с учетом положений части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ООО «Инвестстрой».

С учетом уменьшения требований по встречному иску излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату ООО «Инвестстрой» из федерального бюджета.    

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Иск Индивидуального предпринимателя Черемисина Николая Юрьевича удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" (ОГРН: 1033500055302, ИНН: 3525126062) в пользу Индивидуального предпринимателя Черемисина Николая Юрьевича (ОГРНИП: 312100124900070, ИНН: 780606422804) 5841901 руб. 68 коп. задолженности.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" (ОГРН: 1033500055302, ИНН: 3525126062) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 52210 руб.

3. В удовлетворении встречного иска Общества с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" отказать.

4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" (ОГРН: 1033500055302, ИНН: 3525126062) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ-1" (ОГРН: 1147847275784, ИНН: 7802867513) 155000 руб. судебных расходов по оплате судебных экспертиз.

5. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" (ОГРН: 1033500055302, ИНН: 3525126062) из федерального бюджета 11663 руб. госпошлины, уплаченной по платежному поручению от 28.03.2018 года № 7117.

6. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 65, лит. А);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 4) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Михайлова А.В.