﻿

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-6449/21

г. Уфа

23 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 22.11.2021

Полный текст решения изготовлен 23.11.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного помощником судьи Рычковой Н. К.., рассмотрев дело по иску

	Общества с ограниченной ответственностью "Башнефть - Полюс" (ИНН: 2983998001, ОГРН: 1108383000549) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Главэнергомонтаж" (ИНН: 7840324934, ОГРН: 1057812482903)

о взыскании неустойки в размере 250 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца – Чернобровин Сергей Валерьевич, Доверенность ДОВ/БП/061/21 от 10.12.2020

от ответчика - не явились, извещены.

	Общество с ограниченной ответственностью "Башнефть - Полюс" /ООО "Башнефть - Полюс", далее – истец/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Главэнергомонтаж» /ООО «Главэнергомонтаж», далее – ответчик/ о взыскании неустойки по договору подряда №БП/У/875/19/УКС от 20.12.2019 г. в размере 250 000 руб.

	Ответчик, извещенный надлежащим образом по правилам статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возражений на иск не представил, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

	В соответствии с частью 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. В случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом ответчик, исходя из положений статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несет риск не совершения им соответствующих процессуальных действий.

	Представитель истца исковые требования поддержал.

	Представители ответчика в судебное заседание не явились,  надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания по последнему известному суду адресу,  в силу ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте, дело рассмотрено в отсутствие ответчика в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

	Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд

УСТАНОВИЛ:

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда №БП/У/875/19/УКС от 20.12.2019 г.  на выполнение строительно-монтажных работ (приложение к иску), по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта - «Обустройство кустовых площадок К-8, К-11, К-14, К-23 на нефтяном месторождении им. Р. Требса: Газопровод ВД от т.9 до т.39» в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект. 

На основании п. 10.10 и п. 29 договора №БП/У/875/19/УКС от 20.12.2019 г.  и приложения № 8 к договору «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании» (далее – Требования) подрядчик также принял на себя обязательство по выполнению требований законодательства Российской Федерации и заказчика в области промышленной и пожарной безопасности охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС). Соблюдение данных Требований стороны признали существенным условием договора.

В силу п. 29 договора №БП/У/875/19/УКС от 20.12.2019 г.  ответственность подрядчика за нарушение требований в области ПБОТОС установлена приложением №8.2 к договору. 

Так, в п. 30 приложения № 8.2 к договору №БП/У/875/19/УКС от 20.12.2019 г.  стороны согласовали, что в случае несоблюдение подрядной организацией экологических, санитарноэпидемиологических и иных требований при сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов, подлежит уплате штраф в размере 250 000,00 руб.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Суд считает, что в рассматриваемом случае отношения между истцом и ответчиком возникли из договора, правовому регулированию которого посвящены нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Поскольку исследуемый договор содержит все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию договора подряда, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В процессе исполнения договора было установлено нарушение подрядчиком требований в области ПБОТОС, что выразилось в следующем. 	28.07.2020 в ходе проверки соблюдения требований в области ПБОТОС было выявлено, что прилегающая тундровая территория к водоводу ВН от т.39 до 2 ВАР захламлена/загрязнена отходами (строительным мусором, отходы теплоизоляционных материалов). Отходы раскиданы хаотично. При этом, отходы складируются вне мест, согласованных с заказчиком, места накопления не оборудованы. 

По данному факту был составлен акт проверки соблюдения охраны окружающей среды от 28.07.2020 (приложение  к иску), который подписан представителем подрядчика без возражений. 

Своими действиями по захламлению/загрязнению отходами, подрядчик допустил нарушения условий п. 4.4.2 и 4.4.4 приложения № 8 к договору №БП/У/875/19/УКС от 20.12.2019 г., а также требования законодательства в области охраны окружающей среды, в частности ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также п. 1 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Таким образом, размер штрафа за указанное в Акте нарушение составляет 250 000,00 руб.

В связи с допущенными нарушениями истец направил в адрес ответчика претензию от 06.08.2020 № 01-04/06146 об уплате штрафа в сумме 250 000 руб., а также письмо от 04.12.2020 № 01-04/09297 с требованием об оплате суммы штрафа. (приложение к иску). 

Неисполнение ответчиком обязанности по оплате неустойки повлекло обращение истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

Ответчиком возражений, отзыва не представлено, факт нарушения не оспорен, доказательств добровольной уплаты неустойки не представлено.

Исследовав материалы дела, суд на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу пунктов 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации банковская гарантия и неустойка являются способами обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (п. 2 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Договорная неустойка может быть установлена по взаимному соглашению сторон в несоответствии с их волей (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Стороны свободны при установлении ее размера, порядка исчисления, соотношения с убытками и других условий применения в случае, если это не будет противоречить закону. 

При подписании настоящего договора и принятии на себя взаимных обязательств у сторон не возникало споров по поводу чрезмерности согласованного размера неустойки. Доказательств иного, в том числе наличия преддоговорных споров по этому условию, в материалах дела не содержится. 

Таким образом, учитывая, что условие о договорной неустойке определено по свободному усмотрению сторон, ответчик, осуществляя в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательскую деятельность на свой риск, должен был и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых по договору обязательств. 

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Оценив по правилам, предусмотренным в статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что при исполнении ответчиком обязательства были допущены нарушения, данный факт подтвержден материалами дела. 

Доказательств того, что ответчик действовал при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, принял все меры для надлежащего исполнения обязательства (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации), в деле также не имеется. 

Поскольку наличие нарушение послужившее начислению неустойки, подтверждено представленными в дело доказательствами, в силу положений ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации начисление неустойки является правомерным. 

Расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Таким образом, исковые требования законны, обоснованы, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Башнефть - Полюс" (ИНН: 2983998001, ОГРН: 1108383000549)  удовлетворить.

	Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Главэнергомонтаж" (ИНН: 7840324934, ОГРН: 1057812482903)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Башнефть - Полюс" (ИНН: 2983998001, ОГРН: 1108383000549)  неустойку в размере 250 000 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 000 руб.

		Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

		Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья 							И.Р. Юсеева