АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

03 октября 2025 года Дело № А33-22494/2025 

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 03.10.2025. В полном объёме решение изготовлено 03.10.2025. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в  

судебном заседании дело по иску Министерства природных ресурсов и лесного комплекса  

Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "БТБ-Трейд" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании устранить нарушения, 

при участии в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  

относительно предмета спора - КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» (ИНН 

<

***>); в отсутствии лиц, участвующих в деле;  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лалетиной  

А.О., 

установил:

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Краснояского края (далее –  

истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с  

ограниченной ответственностью "БТБ-Трейд" (далее – ответчик) об обязании в течение 1  

месяца со дня вступления решения суда в законную силу выполнить предусмотренные  

проектом освоения лесов по договору аренды лесного участка от 27.09.2013 № 668-3 за 2024  

год следующие противопожарные мероприятия: 

- строительство лесных дорог для охраны лесов от пожаров - 1 км.; - реконструкция дорог противопожарного назначения - 1 км.;  

- эксплуатация дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров - 2 км.; 

- устройство противопожарных минерализованных полос - 23,4 км.; - прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 23,4 км.;  

- прокладка просек - 0,8 км.; - прочистка и обновление просек - 0,8 км.; - содержание стендов - 1 шт.; - содержание зон отдыха -1 шт.; - содержание посадочных площадок - 1 шт.; - содержание пожарных водоемов - 1 шт.; - содержание и эксплуатация шлагбаумов - 1 шт. 

Определением от 13.08.2025 исковое заявление принято к производству, возбуждено  

производство по делу. 

Определением от 13.08.2025 суд привлек к участию в деле, в качестве третьих лиц, не  

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - КГБУ «Тунгусско- 

Чунское лесничество» (ИНН 

<

***>). 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.  

Между агентством лесной отрасли Красноярского края и обществом с ограниченной ответственностью «БТБ-Трейд» (далее - Арендатор, Лесопользователь) заключен договор аренды лесного участка от 27.09.2013 № 668-3 (далее - договор аренды лесного участка), согласно которому арендатору передан во временное пользование лесной участок лесного фонда общей площадью 25114 га, расположенный на территории Красноярского края, Эвенкийского района, Тунгусско - Чунского лесничества, для выполнения работ по заготовке древесины.  

В соответствии с подпунктом «е» пункта 13 договора аренды лесных участков Арендатор обязан осуществлять меры противопожарного обустройства лесов на основании проекта лесов.  

В соответствии с таблицей (13) проекта освоения лесов, разработанного к договору аренды лесных участков установлены ежегодные виды и объемы мероприятий по противопожарному обустройству лесов.  

КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» представлен отчет о выполнении ООО «БТБ- Трейд» работ по противопожарному обустройству лесов за 2024 год.  

В соответствии с отчетом Арендатором по договору аренды лесного участка за 2024 год не выполнены следующие мероприятия:  

- строительство лесных дорог для охраны лесов от пожаров - 1 км.; - реконструкция дорог противопожарного назначения - 1 км.;  

- эксплуатация дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров - 2 км.; 

- устройство противопожарных минерализованных полос - 23,4 км.; - прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 23,4 км.;  

- прокладка просек - 0,8 км.; - прочистка и обновление просек - 0,8 км.; - содержание стендов - 1 шт.; - содержание зон отдыха -1 шт.; - содержание посадочных площадок - 1 шт.; - содержание пожарных водоемов - 1 шт.; - содержание и эксплуатация шлагбаумов - 1 шт. Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим иском. 

Ответчик представил отзыв, просил предоставить срок 5 месяцев для исполнения решения.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе, гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, вследствие неосновательного обогащения.  

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.  

Согласно части 2 статьи 4 Лесного кодекса РФ, от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного  

самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.  

Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.07.2016 № 560-р образовано министерство лесного хозяйства Красноярского края (далее - министерство), действующее на основании Положения о министерстве лесного хозяйства Красноярского края утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2016 № 374-п.  

Министерство является органом исполнительной власти Красноярского края (далее - край), который на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края осуществляет надзор (контроль) в области лесных отношений.  

Соответственно, органом исполнительной власти Красноярского края, уполномоченным в области лесных отношений в настоящее время, является Министерство лесного хозяйства Красноярского края.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ) природный объект определяется как естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; естественная экологическая система - это объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией.  

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью.  

В силу статьи 4 Закона 7-ФЗ объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы.  

В соответствии со статьей 11 Закона № 7-ФЗ каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.  

Согласно статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации, лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты основываются на следующих принципах: устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала; сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; обеспечение охраны и защиты лесов.  

Статьей 5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.  

Согласно статье 6 Лесного кодекса Российской Федерации леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.  

В соответствии со ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.  

В силу требований статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации леса подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.  

Согласно статье 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.  

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя в том числе: 

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;  

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;  

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;  

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;  

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;  

6) проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;  

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;  

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 

Указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.  

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.  

В соответствии с п. 3 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:  

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);  

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; - разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; - иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах создает угрозу уничтожения лесных насаждений и населенных пунктов в случае возникновения лесных пожаров.  

Невыполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, затрудняет процесс ликвидации уже возникшего пожара и увеличивает вероятность повышения класса опасности пожарной обстановки.  

В соответствии с подпунктом «е» пункта 13 договора аренды лесных участков Арендатор обязан осуществлять меры противопожарного обустройства лесов на основании проекта лесов. 

В соответствии с таблицей (13) проекта освоения лесов, разработанного к договору аренды лесных участков установлены ежегодные виды и объемы мероприятий по противопожарному обустройству лесов.  

КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» представлен отчет о выполнении ООО «БТБ-Трейд» работ по противопожарному обустройству лесов за 2024 год.  

В соответствии с отчетом Арендатором по договору аренды лесного участка за 2024 год не выполнены следующие мероприятия:  

- строительство лесных дорог для охраны лесов от пожаров - 1 км.; - реконструкция дорог противопожарного назначения - 1 км.;  

- эксплуатация дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров - 2 км.; 

- устройство противопожарных минерализованных полос - 23,4 км.; - прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 23,4 км.;  

- прокладка просек - 0,8 км.; - прочистка и обновление просек - 0,8 км.; - содержание стендов - 1 шт.; - содержание зон отдыха -1 шт.; - содержание посадочных площадок - 1 шт.; - содержание пожарных водоемов - 1 шт.; - содержание и эксплуатация шлагбаумов - 1 шт. 

Фактов, препятствующих соблюдению требований лесного законодательства, не установлено.  

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Согласно пункту 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Факт невыполнения подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и не оспаривается ответчиком.  

Учитывая, что ответчиком работы не выполнены, доказательств обратного материалы дела не содержат, указанным бездействием нарушило лесное законодательство в области защиты леса.  

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности требований истца, удовлетворяет заявленные исковые требования в полном объеме.  

В соответствии с частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.  

Суд, с учетом установленных обстоятельств, объема работ и доводов ответчика, полагает возможным установить срок на выполнение мероприятий – 5 месяцев.  

При этом суд разъясняет, что в случае наличия обстоятельств, объективно препятствующих исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре в установленный судом срок (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), ответчик вправе подать заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта (статья 324 АПК РФ) (пункт 34 Постановления № 7).  

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.  

В соответствии со статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом,  

рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрения дела по существу, или в определении.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Поскольку истец освобожден от оплаты государственной пошлины на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «БТБ-Трейд» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу  

выполнить предусмотренные проектом освоения лесов по договору аренды лесного участка  

от 27.09.2013 № 668-3 за 2024 год следующие противопожарные мероприятия: 

- строительство лесных дорог для охраны лесов от пожаров - 1 км.; - реконструкция дорог противопожарного назначения - 1 км.;  

- эксплуатация дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров - 2 км.; 

- устройство противопожарных минерализованных полос - 23,4 км.; - прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 23,4 км.;  

- прокладка просек - 0,8 км.; - прочистка и обновление просек - 0,8 км.; - содержание стендов - 1 шт.; - содержание зон отдыха -1 шт.; - содержание посадочных площадок - 1 шт.; - содержание пожарных водоемов - 1 шт.; - содержание и эксплуатация шлагбаумов - 1 шт. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БТБ-Трейд» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной  

пошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева