23/2024-41550(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-39591/2023

город Новосибирск

12 февраля 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску заявлением муниципального казенного  учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью СУ «Сибстрой» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

об обязании устранить недостатки. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью СУ «Сибстрой» (ОГРН  

<

***>) в весенний период с 01.05.2024 по 31.05.2024, при наступлении  климатических условий (в сухую погоду, при температуре окружающего воздуха не  ниже 5°С), устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по  муниципальному контракту от 01.07.2021 № 33/21 на объекте ул. «Учительская»:  

1. выкрашивание а/б покрытия по полосам наката - 50 м2 (по правой полосе  движения на повороте с ул. Учительская на ул. Александра Невского) - нарушено  требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СУ «Сибстрой» (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6000 рублей  государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  

суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина