1211/2023-66592(2) 

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А81-10977/2022

31 октября 2023 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2023 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 31 октября 2023 года.  

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Веревкина А.В., судей Бацман Н.В., Халявина Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП- 10059/2023) акционерного общества «Россети Тюмень» на решение от 27.07.2023  Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу № А81-10977/2022 (судья  Никитина О.Н.), по иску общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис  Тюмень» к акционерному обществу «Россети Тюмень» о расторжении договора и взыскании  1 629 666 руб. 69 коп., по встречному иску акционерного общества «Россети Тюмень» к  обществу с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис Тюмень» о взыскании  14 548 619 руб. 41 коп.,  

при участии в судебном заседании представителя акционерного общества «Россети Тюмень»  ФИО2 по доверенности № 81547 от 19.07.2022 сроком действия по 16.09.2024,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис Тюмень» (далее – ООО «ЭСТ»)  обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с иском к  акционерному обществу «Россети Тюмень» (далее – АО «Россети Тюмень») о расторжении  договора № 08/3-20 от 23.09.2020, взыскании стоимости переданной опоры в размере 814 802  руб., стоимости фактически выполненных работ в размере 694 148 руб. 64 коп., неустойки за  период с 14.06.2022 по 01.09.2022 в размере 120 716 руб. 05 коп., с последующим  начислением до фактической уплаты долга.  

Воспользовавшись правом, предоставленным статьей 132 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) АО «Россети Тюмень»  предъявило встречный иск к ООО «ЭСТ», уточненный в порядке статьи 49 АПК РФ к ООО  «ЭСТ» о взыскании неустойки по договору подряда № 08/3-20 от 23.09.2020 в размере  14 653 285 руб. 73 коп.  

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.07.2023 по  делу № А81-10977/2022 первоначальные исковые требования ООО «ЭСТ» удовлетворены  частично. Встречные исковые требования АО «Россети Тюмень» оставлены без  удовлетворения.  

Не согласившись с принятым судебным актом, АО «Россети Тюмень» обратилось с  апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение суда первой инстанции.  

Определением от 15.09.2023 Восьмого арбитражного апелляционного суда  апелляционная жалоба АО «Россети Тюмень» принята к производству и назначена к  рассмотрению в судебном заседании на 30.10.2023. Информация о рассмотрении дела в суде  апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 121 АПК РФ, размещена на  сайте суда в сети Интернет.  

От сторон поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения. 

ООО «ЭСТ», надлежащим образом извещенное в соответствии со статьей 123 АПК  РФ о месте и времени рассмотрения дела, явку своего представителя в заседание суда  апелляционной инстанции 30.10.2023 не обеспечило.  

В заседании апелляционного суда представитель АО «Россети Тюмень» поддержал  ходатайство об утверждении мирового соглашения  

Рассмотрев ходатайства сторон об утверждении мирового соглашения, текст мирового  соглашения, суд апелляционной инстанции полагает, что они подлежат удовлетворению в  силу следующего.  

В соответствии с частью 2 статьи 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор,  заключив мировое соглашение или, использовав другие примирительные процедуры, если  это не противоречит федеральному закону.  

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено  сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.  

В силу статьи 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в  производстве которого находится дело.  

В соответствии со статьей 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено  сторонами на любой стадии арбитражного процесса, если оно не нарушает права и законные  интересы других лиц и не противоречит закону.  

На основании части 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать  согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения  обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении  могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств  ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании  долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие  федеральному закону.  

Рассмотрев и оценив условия мирового соглашения, заключенного сторонами  29.09.2023, апелляционный суд считает возможным его утвердить на изложенных в нём  условиях, как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц, подписанное  уполномоченным представителями сторон.  

Исходя из смысла и содержания норм, регулирующих примирительные процедуры  (глава 15 АПК РФ), а также задач арбитражного судопроизводства (часть 6 статьи 2 АПК РФ)  утвержденное судом мировое соглашение является таким процессуальным способом  урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых  условиях и влечет за собой ликвидацию спора в полном объеме.  

На основании части 2 статьи 150, пункта 3 статьи 269 АПК РФ в связи с  утверждением мирового соглашения решение суда по делу подлежит отмене, производство по  делу и апелляционной жалобе – прекращению.  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской  Федерации, при заключении мирового соглашения на стадии рассмотрения дела судом  апелляционной инстанции возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им  государственной пошлины.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 265, 266,  пунктом 3 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

мировое соглашение по делу № А81-10977/2022, заключенное 29.09.2023 обществом с  ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис Тюмень» и акционерным обществом  «Россети Тюмень», утвердить на следующих условиях.  

 Акционерное общество «Россети Тюмень» (далее – АО «Россети Тюмень»),  в лице директора филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети ФИО3  

Дмитрии Васильевича, действующего на основании доверенности от 18.07.2022 № 81199, с  одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис Тюмень» (далее – ООО  «ЭСТ»), в лице директора ФИО4, действующего на основании  Устава, с другой стороны,  

а вместе именуемые «Стороны», 

в целях урегулирования спора ею делу № А81-10977/2022, которое находится на  рассмотрении в Восьмом арбитражном апелляционном суде по апелляционной жалобе АО  «Россети Тюмень» на решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от  27.07.2023 по:  

1) исковому заявлению ООО «ЭСТ» к АО «Россети Тюмень» о расторжении  договора подряда от 23.09.2020 № 08/3-20 (далее – Договор); о взыскании стоимости  переданной опоры № 272а в размере 814 802 (восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот  два) рубля 00 копеек с НДС 20%, стоимости фактически выполненных работ в размере  694 148 (шестьсот девяносто четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 64 копейки с НДС 20%  согласно справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25.05.2022 № 6 (далее –  Справка КС-3 № 6), акту о приемке выполненных работ КС-2 от 25.05.2022 (далее – Акт КС-2   № 20), счет-фактуре от 25.05.2022 № 40 (далее – Счет-фактура № 40), неустойки за период с  14.06.2022 по 01.09.2022 в размере 120 716 (сто двадцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей  05 копеек, с последующим начислением неустойки начиная с 02.09.2022, исходя из суммы  основного долга 1 508 950 (один миллион пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей  64 копейки в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до  фактического исполнения, государственной пошлины в размере 29 297 (двадцать девять  тысяч двести девяносто семь) рублей 00 копеек;  

2) встречному исковому заявлению АО «Россети Тюмень» к ООО «ЭСТ» о  взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по Договору в размере  14 653 285 (четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи двести восемьдесят  пять) рублей 73 копейки, начисленную за период с 01.12.2022 по 03.05.2023, с последующим  начислением пени в размере 0,1% от цены договора, за каждый день просрочки, начиная с  04.05.2023 до момента фактического исполнения обязательств; государственной пошлины в  сумме 96 266 (девяносто шесть тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, а также  проценты, исчисленные в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) по фактического исполнения обязательств по возврату понесенных расходов  по государственной пошлины;  

руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ), заключили настоящее мировое соглашение по делу № А8110977/2022 (далее – Соглашение) о нижеследующем:  

1. Не вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого  автономного округа от 27.07.2023 по делу № А81-10977/2022:  

1.1. исковое заявление ООО «ЭСТ» удовлетворено частично: с АО «Россели Тюмень»  взысканы стоимость опоры в сумме 814 802 (восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот два)  рубля 00 копеек с НДС 20%, стоимость фактически выполненных работ в сумме 346 297  (Триста сорок шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 20 копеек с НДС 20%, неустойка в  сумме 34 629 (Тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать девать) рублей 72 копейки;  

1.2. не приняты к рассмотрению уточненные встречные требования АО «Россети  Тюмень» в части взыскания:  

- неустойки за нарушение срока предоставления банковской гарантии в размере  732 664 (семьсот тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 29 копеек,  начисленную за период с 16.02.2023 по 03.05.2023, с последующим начислением пени в  размере 0,01% от цены договора, за каждый день просрочки, начиная с 04.05.2023 до момента  фактического исполнения обязательств;  

- неустойки за непредставление дополнительного соглашения о продлении сроков  страхования к договору комбинированного страхования строительно-монтажных рисков от  23.09.2020 № 2015018XWE287, в размере 1 065 693 (один миллион шестьдесят пять тысяч  шестьсот девяноста три) рубля 51 копейка, начисленную за период с 12.01.2023 по  03.05.2023, с последующим начислением пени в размере 0,01% от цены договора та каждый  день просрочки начиная с 04.05.2023 до момента фактического исполнения обязательств;  

- государственной пошлины в сумме 31 507 (тридцать одна тысяча пятьсот семь)  рублей 00 копеек;  

1.3. в части, принятой к рассмотрению, встречное исковое заявление АО «Россети  Тюмень» оставлено без удовлетворения.  

2. По исковому заявлению ООО «ЭСТ»: 

2.1. ООО «ЭСТ» отказывается от исковых требований к АО «Россети Тюмень» о  взыскании неустойки в размере 120 716 (сто двадцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей 05  копеек, с последующим начислением неустойки, начиная с 02.09.2022, исходя из суммы  основного долга 1 508 450 (один миллион пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей  64 копейки, в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до  фактического исполнения и признает отсутствие со стороны АО «Россети Тюмень» фактов  просрочки оплаты выполненных работ по Договору в целом.  

2.2. АО «Россети Тюмень» признает стоимость выполненных работ по Договору в  размере 557 425 (пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 20 копеек с  НДС 20%, согласованную Сторонами и результате укачанных в пункте 5 настоящего  Соглашения договоренностей, и стоимость переданной опоры № 272а в размере 814 802  (восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот два) рубля 00 копеек с НДС 20%.  

В связи с чем, «Россети Тюмень» обязуется перечислить на расчетный счет ООО  «ЭСТ» сумму в размере 1 372 227 (один миллион триста семьдесят две тысячи двести  двадцать семь) рублей 20 копеек в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента  утверждения Восьмым арбитражным апелляционным судом настоящего Соглашения, по  следующим банковским реквизитам: р/с 

<

***> в филиале Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с: 30101810465777100812.  

2.3. Стороны пришли к взаимному согласию расторгнуть Договор с 29.092023,  обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными, за исключением гарантийных  обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также обязательств  по уплате соответствующих штрафных санкций.  

3. По принятому встречному исковому заявлению АО «Россети Тюмень»: 

3.1. АО «Россети Тюмень» откатывается от исковых требований к ООО «ЭСТ» о  взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по Договору в размере  14 653 285 (четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи двести восемьдесят  пять) рублей 73 копейки, начисленную за период с 01.12.2022 по 03.05.2023, с последующим  начислением пени в размере 0,1% от цены договора, за каждый день просрочки, начиная с  04.05.2023 до момента фактического исполнения обязательств.  

4. В части не принятых к рассмотрению судом встречных исковых требований АО  «Россети Тюмень» (подпункт 1.2 пункта 1 настоящего Соглашения):  

4.1. АО «Россети Тюмень» отказывается от исковых требований к ООО «ЭСТ» о  взыскании неустойки за нарушение срока предоставления банковской гарантии с заявленной  суммы 732 664 (семьсот тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 29 копеек,  начисленную за период с 16.02.2023 по 03.05.2023, с последующим начислением пени в  размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочка начиная с 04.05.2023 до момента  фактического исполнения обязательств.  

4.2. АО «Россети Тюмень» отказывается от исковых требований к ООО «ЭСТ» о  взыскании неустойки за непредставление дополнительного соглашения о продлении сроков  страхования к договору комбинированного страхования строительно-монтажных рисков от  23.09.2020 № 2015018XWF287, с заявленной суммы в размере 1 065 693 (один миллион  

шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 51 копейка, начисленную за период с  12.01.2023 по 03.05.2023, с последующим начислением пени в размере 0,01% от цены  договора, за каждый день просрочки, начиная с 04.05.2023 до момента фактического  исполнения обязательств.  

5. Стороны пришли к соглашению об изменении объемов и стоимости выполненных  работ по Справке КС-3 № 6, Акту КС-2 № 20, об аннулировании Счет-фактуры № 40:  

5.1. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в объемы и  стоимость выполненных работ по Справке КС-3 № 6:  

1) исключить выполнение работ, указанных в пунктах 2 «Прочие работы и затраты» и  2.1. «Компенсация затрат но аренде имущества», на сумму 289 876 (двести восемьдесят  девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) 20 копеек без НДС;  

2) изменить стоимость выполненных работ за отчетный период (месяц) по установке и  заземлению опор (п. 1.2. «Установка и заземление работ») с суммы 288 581 (двести  восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек без НДС на сумму  464 521 (четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать один) рубль 00 копеек без  НДС.  

На основании чего, Сторонами подписывается Справка КС-3 № 6 с датой подписания  – 29.09.2023, согласно которой итоговая стоимость выполненных работ за отчетный период  (месяц) составляет 464 521 (четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать один)  рубль 00 копеек без НДС, а с учетом НДС 20% – 557 425 (пятьсот пятьдесят семь тысяч  четыреста двадцать пять) рублей 20 копеек.  

5.2. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в объемы и  стоимость выполненных работ по Акту КС-2 № 20: включить выполнение работ по  демонтажу временных опор ПРХ-110-1А (5 (пять) штук) в объеме 7,675 тонн на сумму  175 940 (сто семьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек без НДС, то есть  дополнить Акт КС-2 № 20 соответствующим Разделом I. «Демонтаж временных опор ПРХ- 110-1А» (5 шт.).  

На основании чего, Сторонами подписывается Акт КС-2 № 20 с датой подписания –  29.09.2023, согласно которому итоговая стоимость выполненных работ отставляет 464 521  (четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать один) рубль 00 копеек без НДС  учетом НДС, а с учетом НДС 20% – 557 125 (пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста  двадцать пять) рублей 20 копеек.  

5.3. На основании внесенных изменений согласно пунктов 5.1 и 5.2. Стороны пришли  к соглашению о том, что ООО «ЭСТ» выставляет АО «Россети Тюмень» новую счет-фактуру  от 29.09.2023 № 80 за выполненные работы с итоговой стоимостью 464 521 (четыреста  шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать один) рубль 00 копеек без НДС, а с учетом НДС  20% – 557 425 (пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 20 копеек,  выставленная ООО «ЭСТ» Счет-фактура № 40 аннулируется Сторонами и не подлежит  отражению ими в бухгалтерском учете и отчетности (либо сторнируется Сторонами).  

5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что документы, указанные в письмах ООО  «ЭСТ» от 29.08.2023 № 308/02-03 и от 20.09.2023 № 354/02-03, а именно: справка о  стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 6 от 29.08.2023 на сумму 224 026 (двести  двадцать четыре тысячи двадцать шесть) рублей 80 копеек с учетом НДС; реестр № 7  выполненных работ за август 2023 г.; акт о приемке выполненных работ КС-2 № 21 от  29.08.2023; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.05.2022 на сумму 346 297  (триста сорок шесть тысяч цвести девяносто семь) рублей 20 копеек с учетом НДС; реестр №  7 выполненных работ за май 2022 г.; акт о приемке выполненных работ КС-2 № 20 от  25.05.2022; журнал учета выполненных работ (КС-6); счет-фактура № 40 от 25.05.2022 г. на  сумму 346 297 (триста сорок шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 20 копеек с учетом  НДС; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 7 от 29.08.2023 на сумму  211 128 (двести одиннадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС;  реестр № 7 выполненных работ за август 2023 г.; акт о приемке выполненных работ КС-2  

 № 21 от 29.08.2023, счет-фактура № 80 от 29.08.2023 г. на сумму 211 128 (двести одиннадцать  тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС, выставлены ООО «ЭСТ»  неправомерно, аннулируются Сторонами и не подлежат отражению ими в бухгалтерском  учете и отчетности (либо сторнируются Сторонами).  

5.5. Стороны пришли к соглашению о том, что письмо АО «Россети Тюмень» от  04.10.2022 № РТ5/10/2120 считается отозванным.  

6. Относительно обязательств ООО «ЭСТ» по предоставлению независимой гарантии  и продлению сроков страхования:  

6.1. ООО «ЭСТ» обязуется в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента  утверждения Восьмым арбитражным апелляционным судом настоящего Соглашения,  предоставить:  

1) независимую гарантию на исполнение гарантийных обязательств в соответствии с  приложением 1 к настоящему Соглашению;  

2) дополнительное соглашение о продлении сроков страхования к договору  комбинированного страхования строительно-монтажных рисков от 23.09.2020 №  2015018XWE287 в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.  

6.2. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения ООО «ОСТ»  обязательств, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, ООО «ЭСТ» уплачивает АО  «Россети Тюмень» пеню в размере 0,01% от всей стоимости работ по Договору (67 001 156  (шестьдесят семь миллионов одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 13 копеек (с НДС), за  каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств.  

6.3. АО «Россети Тюмень» обязуется перечислить на расчетный счет ООО «ЭСТ»  сумму в размере 3 281 446 (три миллиона двести восемьдесят одна тысяча четыреста сорок  шесть) рублей 45 копеек, удержанную в соответствии с п. 5.2 Договора, в течение 60  (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами актов приема-передачи  документов, указанных в п. 6.1 настоящего Соглашения, по следующим банковским  реквизитам: р/с: 

<

***> в филиале Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК  Открытие», БИК: 047162812, к/с: 30101810465777100812.  

7. Судебные издержки (расходы) по судебному делу № А81-10977/2022  распределяются следующим образом:  

7.1. Судебные издержки, расходы на оплату услуг представителей и любые иные  расходы Сторон, в том числе, убытки (реальный ущерб и упущенная выгода), связанные  прямо и/или косвенно с судебным делом № А81-10977/2022, Сторонами друг другу не  возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла, за исключением  расходов, указанных в пункте 6.2 настоящего Соглашения.  

7.2. На основании п.3 ч.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации,  расходы по оплате государственной пошлины возмещаются следующим образом:  

7.2.1. По исковому заявлению ООО «ЭСТ»: 

- 50% от суммы, уплаченной ООО «ЭСТ» государственной пошлины при подаче  искового заявления – 14 648 (четырнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 50 копеек –  возмещаются ООО «ЭСТ» посредством возврата из федерального бюджета;  

- 50% от суммы, уплаченной ООО «ЭСТ» государственной пошлины при подаче  искового заявления – 14 648 (четырнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 50 копеек  несет та сторона по судебному делу, которая их понесла, т.е. не подлежат возврату и  возлагаются на ООО «ЭСТ».  

7.2.2. По встречному исковому заявлению АО «Россети Тюмень»: 

- 50% от суммы, уплаченной АО «Россети Тюмень» государственной пошлины при  подаче встречного искового заявления – 48 133 (сорок восемь тысяч сто тридцать три) рубля  00 копеек возмещаются АО «Россети Тюмень» посредством возврата из федерального  бюджета;  

- 50% от суммы, АО «Россети Тюмень» государственной пошлины при подаче  встречного искового заявления – 48 133 (сорок восемь тысяч сто тридцать три) рубля 00  

копеек несет та сторона по судебному делу, которая их понесла, т.е. не подлежат возврату и  возлагаются на АО «Россети Тюмень»;  

- 50% от суммы, уплаченной АО «Россети Тюмень» государственной пошлины при  подаче апелляционной жалобы – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек возмещаются  АО «Россети Тюмень» посредством возврата из федерального бюджета;  

- 50% от суммы, АО «Россети Тюмень» государственной пошлины при подаче  апелляционной жалобы – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек – несет та сторона по  судебному делу, которая их понесла, т.е. не подлежат возврату и возлагаются на АО «Россети  Тюмень».  

7.3. В связи с обстоятельствами, указанными в пункте 1.2 настоящего Соглашения, на  основании пп. 2 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная  пошлина в размере 31 507 (тридцать одна тысяча пятьсот семь) рублей 00 копеек  возмещается АО «Россети Тюмень» посредством возврата из федерального бюджета.  

8. Приложения к Соглашению: 

8.1. Условия предоставления независимой гарантии на исполнение гарантийных  обязательств (приложение 1 к настоящему Соглашению).  

8.2. Условия предоставления дополнительного соглашения о продлении сроков  страхования к договору комбинированного страхования строительно-монтажных рисков от  23.09.2020 № 2015018XWE287 (приложение 2 к настоящему Соглашению).  

8.3. Указанные в настоящем Соглашении приложения являются его неотъемлемой  частью.  

9. Обязательства АО «Россети Тюмень», указанные в пунктах 2.2 и 6.3 настоящего  Соглашения, считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств со  счета АО «Россети Тюмень».  

10. Стороны подтверждают, что им известны и понятны последствия утверждения  судом настоящего Соглашения, отмены решения Арбитражного суда Ямало-Ненецкого  автономного округа от 27.07.2023 по делу № А81-10977/2022, последствия прекращения  производства по делу, а также последствия добровольного неисполнения условий настоящего  Соглашения, предусмотренные статьями 141, 142, 150, 151 АПК РФ.  

11. Стороны подтверждают, что не находятся в стадии ликвидации, у сторон  отсутствуют признаки неплатежеспособности.  

12. Соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не  противоречит закону.  

13. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего Соглашения и  один экземпляр для приобщения к материалам дела № А81-19077/2022.  

14. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон,  возникшие с 29.09.2023, вступает в силу с момента его утверждения Восьмым арбитражным  апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

15. На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 139-141, ч. 2 ст. 150  АПК РФ, Стороны ходатайствуют перед Восьмым арбитражным апелляционным судом об  утверждении настоящего Соглашения, отмене решения Арбитражного суда Ямало-Ненецкого  автономного округа от 27.07.2023 по делу № А81-10977/2022 и прекращения производства по  делу № А81-10977/2022.  

В связи с утверждением мирового соглашения решение от 27.07.2023 Арбитражного  суда Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу № А81-10977/2022  отменить, производство по делу и апелляционной жалобе прекратить.  

Возвратить из федерального бюджета обществу с ограниченной ответственностью  «Энерго-Сервис Тюмень» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 14 648 руб. 50 коп.  государственной пошлины по иску, уплаченной по платежному поручению от 07.09.2022  

 № 2111. 

Возвратить из федерального бюджета акционерному обществу «Россети Тюмень»  (ИНН 8602060185, ОГРН 1028600587399) 48 133 руб. 00 коп. государственной пошлины по  встречному иску, уплаченной по платежному поручению от 31.05.2023 № 32385.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть  обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского  округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам,  участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса  «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».  

Председательствующий А. В. Веревкин  

Судьи Н. В. Бацман  

Е. С. Халявин