ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-193941/22-89-1039

23 декабря 2022 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2022 года                                                              

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2022 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи О.А. Акименко, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Успуном Т.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАСТРОЙ" (366329, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КУРЧАЛОЕВСКИЙ РАЙОН, КУРЧАЛОЙ ГОРОД, ФИО1 ПРОСПЕКТ, ДОМ 193 А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2016, ИНН: 

<

***>, КПП: 200601001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ" (119180, 

<

...>/9, Э 8 П I К 1 ОФ А4У, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.03.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 770601001)  о взыскании 17 869 056,72 руб.

при участии: 

от истца:   ФИО2 по дов. от 01.08.2022г.; 

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании задолженности в размере 17 869 056,72 руб.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился. Суд располагает доказательствами его уведомления о времени и месте проведения судебного заседания в установленном  порядке, в связи с чем, считает возможным провести судебное заседание в отсутствие ответчика на основании ч. 1ст. 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Судом установлено, что между ООО «МЕГАТРАНС» и ООО «ТехСтрой» (Ответчик) был заключен договор подряда № М41.2-МТ от «03» июля 2019 г. (далее - Договор).

«09» декабря 2020 г. произошла замена стороны по Договору, вместо ООО «МЕГАТРАНС» Подрядчиком по Договору стало ООО «ЛИГАСТРОЙ» (Истец). Иные условия Договора, кроме замены сторон в обязательстве, не изменились.

В соответствии с п. 1.1. Договора: «Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика в соответствии с разработанным проектом или техническим заданием (ТЗ), с учетом возможных изменений работ, собственными силами с использованием своих материалов, строительных инструментов, оборудования и механизмов комплекс общестроительных и отделочных работ в квартирах и местах общего пользования (МОП) (далее по тексту Договора - «Работы»), а также работы, прямо Договором не предусмотренные, но необходимые для надлежащего выполнения Работ, и передать результат Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

Работы выполняются на Объекте капитального строительства: жилой дом, расположенный по адресу: Многоэтажный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой корп. 41. 14-25-ти этажный 4-х секционный жилой дом (Блок 41.2). 2-й этап строительства, расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г/п Мытищи, г. Мытищи, (далее - «Объект»),

Согласно п. 5.6. Договора Заказчик обязуется «Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в сроки, в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.».

В соответствии с п. 2.4. «Оплата выполненных Подрядчиком по настоящему Договору Работ производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанных Сторонами Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 (оформленного на основании Приложения № 1 к настоящему Договору) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Заказчик осуществляет оплату в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика оригинала счета на оплату, выставленного после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ, с резервным удержанием обеспечительного платежа в размере 5% (Пять процентов) от стоимости выполненных Работ, стоимости услуг Заказчика по обслуживанию Объекта в размере 3 % (Три процента) от стоимости выполненных Работ и иных сумм, подлежащих удержанию Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика».

Согласно п. 2.5. Договора: «После выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, в полном объеме, предоставления Заказчику полного комплекта исполнительной документации и подписания Сторонами Акта о выполнении работ и начале гарантийного срока по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, при условии отсутствия документально подтвержденных претензий Заказчика по качеству выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику, удержанный обеспечительный платеж в следующем порядке и размере:

• 60% (Шестьдесят процентов) от общей суммы обеспечительного платежа за вычетом фактически удержанных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора сумм - на основании письменного требования Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о выполнении работ и начале гарантийного срока и получения Заказчиком оригинала счета на оплату части обеспечительного платежа;

• Оставшаяся сумма обеспечительного платежа за вычетом фактически удержанных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора сумм - на основании письменного требования Подрядчика по истечении 24 календарных месяцев с даты подписания Сторонами Акта о выполнении работ и начале гарантийного срока течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком оригинала счета на оплату части обеспечительного платежа.

До выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору и до сдачи выполненных Работ Заказчику в полном объеме, а также без предоставления документации согласно п. 6.3. и п. 6.4. настоящего Договора, осуществление окончательного расчета и выплата обеспечительного платежа не производится».

Подрядчиком ООО «МЕГАТРАНС», а впоследствии Истцом (на основании соглашения о замене стороны по Договору от «09» декабря 2020 г.) выполнен 100% объем работ, предусмотренный Договором на общую сумму 178 472 501 (Сто семьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят две тысячи пятьсот один) руб. 13 коп. в т.ч. НДС 20%, что подтверждается представленными в материалы дела  актами КС-2, КС-3.

Однако, со стороны Ответчика оплата за данные работы поступила частично на сумму 160 603 444 (Сто шестьдесят миллионов шестьсот три тысячи четыреста сорок четыре) руб. 41 коп. в т. ч. НДС.

Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ, согласно подписанных актов КС-2, КС-3, за вычетом сумм обеспечительного платежа, предусмотренного Договором, составляет 13 813 936 (Тринадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) руб. 99 коп.

Также в рамках данного Договора Ответчик имеет задолженность перед Истцом в размере 4 055 119 (Четыре миллиона пятьдесят пять тысяч сто девятнадцать) руб. 73 коп. по возврату обеспечительного платежа, предусмотренного Договором, на основании следующего:

В порядке п. 2.5. Договора, срок возврата 60% (Шестидесяти процентов) от общей суммы обеспечительного платежа, что составляет 510 634 (Пятьсот десять тысяч шестьсот тридцать четыре) руб. 23 коп. наступил на основании Актов о выполнении работ и начале гарантийного срока, которые были подписаны Сторонами «21» июня 2021г. и «01» апреля 2022г.

Срок возврата оставшейся суммы обеспечительного платежа, что составляет 3 544 485 (Три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) руб. 50 коп. наступил «25» апреля 2022г. на основании подписанного Сторонами Дополнительного соглашения № 19 от «01» апреля 2022 г. к Договору подряда № М41.2- МТ от «03» июля 2019 г., по условиям которого ООО «ТехСтрой» взяло на себя обязательство досрочно оплатить остаток обеспечительного платежа, удержанного согласно условий Договора и Дополнительных соглашений №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 к Договору, в срок до «25» апреля 2022 г. в размере 3 544 485 (Три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 50 копеек, включая НДС-20%.

Однако, по состоянию на дату подачи настоящего заявления в суд, задолженность по оплате выполненных работ Ответчиком не погашена, средства обеспечительного платежа в пользу Истца не оплачены.

Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом по Договору подряда № М41.2-МТ от «03» июля 2019 г., составляет 17 869 056 (Семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьдесят шесть) руб. 72 коп., включая НДС-20%.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием по оплате задолженности, которая оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для подачи настоящего иска  в суд.

Статьей 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Исходя из положений ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Ответчик отзыв не представил, при этом суд отмечает, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ, является процессуальной обязанностью ответчика.

В определении суда, суд обязывал ответчика представить письменный мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ.

Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ, ответчик указанное требование не исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в соответствии со ст. 41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.

С учетом отсутствия доказательств погашения подтвержденной материалами дела задолженности, суд считает, что требование истца о взыскании денежных средств в размере 17 869 056, 72 руб. заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

 В соответствии со ст. 71 АПК РФ  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности, каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно  ст. 65 АПК РФ  -  каждое   лицо,  участвующее   в  деле,  должно доказать  обстоятельства,  на   которые  оно  ссылается  как  на  основание   своих  требований  и   возражений. 

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В связи с вышеизложенным, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине распределены на основании ст. 110 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 702, 711, 746, 753, ГК РФ и ст.ст. 4, 8, 9, 65, 69, 71, 75, 110, 156, 170-175 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 17 869 056, 72 руб., госпошлину в размере 112 345 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

О.А. Акименко