АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-51285/2020

16 марта 2023 года

г. Челябинск

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Михайлова К.В. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сбродовой М.Е. рассмотрев  в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального казенного учреждению  «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства Сатинского муниципального  района» (ОГРН 1157456027299, ИНН 7457006460) к обществу с ограниченной  ответственностью «Инжереный Центр АС Теплострой» (ОГРН 1057424000138, ИНН  7452041502) об обязании устранить недостатки и выполнить гарантийные работы по  контракту,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора акционерного общества «Энергосистемы» (ОГРН  1037401064524, ИНН 7417011223), общества с ограниченной ответственностью «Муллит»  (ОГРН 1027403766895, ИНН 7452027917),  

руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Инжереный Центр АС  Теплострой» (ИНН 7452041502) в течение одного месяца по окончании отопительного  сезона в г. Сатка Челябинской области устранить недостатки выполненных работ по  контракту от 12.11.2018 № Ф.2018.534540 путем выполнения следующих работ на баке-аккумуляторе для воды, емкостью 1 000 кубических метров, расположенном на центральной  котельной в г. Сатка Челябинской области, ул. Торговая, д. 8, согласно раздела 3  «Внутренняя антикоррозийная защита» локальной сметы № 1, являющейся приложением № 2  к указанному контракту:  

1. Выполнить очистку металлическим песком внутренней поверхности оборудования  и труб диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой  поверхности. Объем данных работ составляет 587,1 кв.м. (п. 23 локальной сметы № 1);  

2. Выполнить обеспыливание поверхности. Объем данных работ составляет 587,1  кв.м. (п. 24 локальной сметы № 1);  

3. Выполнить обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром  свыше 500 мм уайт-спиритом. Объем данных работ составляет 587,1 кв.м. (п. 25 локальной  сметы № 1);  

4. Выполнить окраску металлических огрунтованных поверхностей композицией  цинконаполненной. Объем данных работ составляет 587,1 кв.м. (п. 26 и п. 28 локальной  сметы № 1).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжереный Центр АС  Теплострой» (ИНН 7452041502) в пользу муниципального казенного учреждению  «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства Сатинского муниципального  района» (ИНН 7457006460) 6 000 руб. 00 коп. в возмещение судебных расходов по уплате  государственной пошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  

(изготовления в полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской  области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья К.В. Михайлов