АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

«

Дело № А32-26798/2023

г. Краснодар

27» сентября 2023 года

Суд в составе судьи Хмелевцевой А.С., 

руководствуясь статьями 167 – 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная  

компания «АРТСТРОЙ» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) г. Краснодар в течение  

30 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу устранить  

недостатки выполненных работ по муниципальному контракту от 12.03.2020г.  

 № 0818500000820000591 строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа по  

адресу: 

<

...> а именно: передать инструкцию пользования системой вентиляции истцу; 

произвести замену покрытия брусчатки возле блока А внутри двора;  произвести замену тактильной плитки по всей территории школы;  

произвести замену лотка по периметру стадиона, края беговой дорожки у  

стадиона, разрушенных конструкций; 

выполнить монтаж индивидуально-теплового пункта, передать акт пусконаладочных работ истцу;  

выполнить работы по установке кабеля в КВ 2 в соответствии с проектной  

документацией; произвести замену тактильной плитки на улице возле блока В; произвести замену кабеля по зданию школы (лестничные клетки и пищеблок); утеплить вентиляционные шахты; произвести замену деформированного плинтуса; провести работы по закреплению сантехнических хомутов по отоплению; 

произвести замену автомата в электрощите, ламп, перегоревших в 309В  

венкамеры; 

ликвидировать протечки трапиков на блоке Б 2 этажа, устранить течь в районе  

картофелерезки; 

выполнить работы по устройству короба или вентшахты в соответствии с  

проектной документацией; провести замену стеклопакета на лестнице 3 этажа блока Г; 

добавить крепления трубопроводов на кровле блока А, провести работы по  

окраске металлических элементов на кровле, доделать крышки вентшахт; провести работы по утеплению вентшахт на кровле; 

провести работы по устранению большой щели между отмостками и облицовкой  

зданий в соответствии с проектной документацией; 

провести работы по устранению перепадов между металлическими пандусами и  

плиткой (блок Д), устранить понижение между дорогой и тротуаром (выровнять) в  

соответствии с проектной документацией; 

провести работы по восстановлению вертикальных термошвов на фасаде;  

провести работы по устранению дефектов по закрытию окон в спортивном зале  

блока В; 

провести работы по восстановлению перегородок (раздевалок) на 1 этаже блока  

А, провести замену сломанных стеклопакетов, декоративных планок; 

обеспечить выходы в систему вентиляции в помещении с посудомойкой;  

выполнить работы по устранению течи труб отопления в подвале блока Б, В, Г,  

выполнить антикоррозийную обработку на всех трубах; 

провести закрепление по всему периметру 3D сетки ограждения спортивных  

площадок; устранить дефекты механизмов по закрытию окон блока Г; 

устранить повреждение крепления стекла на окнах блока Б 3 этажа;  выполнить монтаж обратных клапанов в кабинете 203;  

провести работы по антикоррозийной обработке металлических поверхностей на  

трубопроводах отопления и водопровода подвала; провести работы по покрытию стадиона; выполнить монтаж водоотводных труб крыльца центрального входа крыши; 

устранить разрушение штукатурки на наружных углах труб блока Г;  провести работы по замене подоконников библиотеки (кабинет 317);  устранить течь вдоль стены библиотеки (кабинет 317);  

устранить деформацию подоконников, сквознякового эффекта;  

выполнить работы по цементно-песчаной стяжке и силиконовому герметику,  

которое привело к задиранию отлива и прониканию воды при неблагоприятных погодных  

условиях; провести работы по отрегулированию окон; 

устранить деформацию пластиковых дверей, (заменить) крепления дверного  

навеса к коробке; 

устранить отрыв провести работы по закреплению вертикальной части молнии-защиты на основном здании и здании контрольно-пропускного пункта;  

провести работы по замене покрытий лестниц в районе волейбольной площадки  

тротуарной плитки; 

устранить дефект по установке фонарных столбов по проектной документации;  устранить подвижность (провести работы по замене) плитки на тротуарах;  

провести работы по устранению подвижности бетонных водоотводных жолоб;  

устранить разрушение станин унитазов в помещениях санузлов, (выполнить  

работы по замене крепления унитазов в помещениях санузлов);  

устранить замечания по монтажу теплоснабжения и систем приточной  

вентиляции; выполнить монтаж взрывных клапанов на дымовых трубах № 1, 2, 3; 

устранить кривизну кожуха дымовой трубы; 

предоставить истцу отчет по выполнению инструментального контроля  

оборудования электроустановки, проверки сопротивления изоляции и контура заземления;  выполнить монтаж вибровставок на насосах;  

выполнить монтаж тягонапорометров на котел в количестве 3 шт.; 

выполнить монтаж вентиля перед автовоздушниками;  

выполнить монтаж сливного трубопровода с выводом в канализационный  

колодец от гидравлической стрелки; 

обеспечить вынос сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт,  

обеспечить его наличие согласно п. 5.3.32 ПТЭТЭУ; 

разработать технологические схемы на: газопровод, тепловой и электрической и  

предоставить истцу; 

оборудовать расширительные баки предохранительным клапаном с  

организованным отводом воды от клапана, оборудованным видимым разрывом и сливом в  

канализацию согласно п. 9. 3. 16 ПТЭТЭУ; 

выполнить работы по замене трубки реле перепада давления на насосах  

диаметром 8 мм; 

заменить не рабочие датчики давления на котлах с котловыми регуляторами;  выполнить работы по замене соленойд подпитки;  

выполнить работы по замене термометра сопротивления на узле учета тепла;  

выполнить монтаж фиксаторов шиберов (заслонок) на дымоходах котлов;  

выполнить работы по соединению аварийного пульта в помещении охраны, заложить 12  

жил; 

выполнить работы по установке дросселя и сетевого фильтра после частотного  

преобразователя сетевых насосов; 

устранить разрушение отмостки из брусчатки вокруг здания блочно-модульной  

котельной, просадки тротуарной плитки; устранить причину грязной горячей воды; 

по итогам выполненных работ предоставить Истцу документы, подтверждающие  

качество используемых материалов (оборудования), в том числе исполнительную  

документацию, подтверждающую качество выполненных работ. 

В удовлетворении остальных требований – отказать. 

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Торгово-строительная  

компания «АРТСТРОЙ» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) г. Краснодар в доход  

федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный  

апелляционный суд в течение 1 месяца со дня его принятия. 

Судья А.С. Хмелевцева