Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира д. 27, 

<

...>, тел. 

<

***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-2159/2025

23 апреля 2025 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 22 апреля 2025 г.

Полный текст решения изготовлен 23 апреля 2025 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Кубасовой Э.Л., при ведении протокола секретарем Махмудовой М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 22.11.2002, адрес: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) к акционерному обществу «ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 26.06.1997, адрес: 625027, 

<

...>) о понуждении к выполнению работ по договору

в заседании приняли участие представители:

от истца – ФИО1 по доверенности от 01.11.2024 № 14-дд,

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 03.12.2024 № 20-298,

установил:

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – истец, Департамент) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к акционерному обществу «ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ» (далее - ответчик) о понуждении в срок до 30.09.2025 выполнить работы по дополнению лесовосстановления на общей площади 21,52 га согласно проектам лесовосстановления:

- №137/26-29/2023 на участке площадью 8.08 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочища, квартал 137, выдела 26,29.

№156/27-35/2023 на участке площадью 8,3 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества. Супринского урочища. квартал 156. выдела 27,35

№156/30/2023 на участке площадью 5,14 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочиша. квартал 156. выдел 30.

Определением суда от 12.02.2025 иск принят к производству, предварительное и основанное судебные заседания назначены на 11.03.2025.

От ответчика в суд поступил отзыв (зарегистрирован канцелярией суда 07.03.2025).

От истца в суд поступили письменные пояснения на доводы отзыва.

Определением суда от 11.03.2025 судебное разбирательство назначено на 22.04.2025.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.

Представитель ответчика иск не признал.

В силу статей 71, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

Суд, исследовав с учетом требований статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что между Департаментом (далее – арендодатель, Департамент) и АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» (далее – арендатор) заключены договоры аренды лесных участков:

1. № 0113/19-09-ДА от 20.08.2019 (далее – договор 1), в соответствии с которым арендодатель предоставил арендатору во временное пользование лесной участок, находящийся в государственной собственности под объект: «МН КШК 0-243. Замена трубу на участке 26-68,15км., 100,8-124,7, Д-820мм.Урайское УМН.Реконструкция.».

Вид использования лесов: для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (статья 45 Лесного кодекса Российской Федерации).

Лесной участок, площадью 13,5907 га, местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, Октябрьское лесничество, Ендырское участковое лесничество, Ендырское урочище.

Срок действия договора устанавливается с момента подписания и составляет 11 (одиннадцать) месяцев.

2. № 0364/19-06-ДА от 18.07.2019 (далее - договор 2), в соответствии с которым арендодатель предоставил арендатору во временное пользование лесной участок, находящийся в государственной собственности под объект: «МН УБКУА Участок 0-58 км. Ду 1200 мм. Замена трубы на участке 0-30 км. Нефтеюганское.УМН.Реконструкция».

Вид использования лесов: для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (статья 45 Лесного кодекса Российской Федерации).

Лесной участок, площадью 91,5693 га, местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Нефтеюганское урочище.

Срок действия договора устанавливается с момента подписания и составляет 3 (три) года.

Согласно подпункта «б» пункта 3.4 договоров 1, 2 арендатор обязан использовать лесной участок по назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

На основании подпункта «г» пункта 3.4 договоров 1, 2 арендатор обязан в течение 6 месяцев со дня заключения договора разработать и представить арендодателю проект освоения лесов для проведения государственной экспертизы.

В соответствии с подпунктом «л» пункта 3.4 договоров 1, 2 арендатор обязан осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом освоения лесов. 

Ответчиком направлено заявление о намерении провести работы по восстановлению от 27.05.2022 № ТСИБ-08-0801380-14/30987 по договорам:

№ 0113/19-09-ДА от 20.08.2019, лесная декларация №377 от 16.12.2019, на площади 11,2681 га;

№ 0364/19-06-ДА от 18.07.2019, лесная декларация № 182н/19 от 31.10.2019, на площади 33,3742 га;

Обществом с ограниченной ответственностью «Актив - Торг», уполномоченным по доверенности от 16.02.2023 №72АА2350183, от акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ», разработаны и представлены на согласование следующие проекты лесовосстановления:

проект лесовосстановления на лесном участке №137/26-29/2023 на участке площадью 8,08 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочища, квартал 137, выдела 26,29.

проект лесовосстановления на лесном участке №156/27-35/2023 на участке площадью 8,3 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочища, квартал 156, выдела 27,35

проект лесовосстановления на лесном участке №156/30/2023 на участке площадью 5,14 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочища, квартал 156, выдел 30. (далее - Проекты лесовосстановления)

Общая площадь лесовосстановления - 21,52 га

Согласно актов технической приемки лесных культур по компенсационному лесовосстановлению от 25.09.2023 АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» выполнено искусственное лесовосстановление в полном объеме на общей площади 21,52 га.

В соответствии со сроками и технологией выполнения работ по агротехническому уходу, согласно Проектов лесовосстановления, в 2024 году предусмотрено дополнение лесных культур по результатам инвентаризации.

В соответствии с Техническими указаниями по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений, на второй календарный год проводится визуальный осмотр заложенных лесных культур с целью определения их состояния и объемов дополнения, а также соответствия техническим требованиям по тем регионам, где они выращиваются.

В результате инвентаризации лесных культур, проведенной в июле 2024 года, по Урайскому лесничеству Верхне - Кондинскому участковому лесничеству, Супринскому урочищу было выявлено, что на лесных участках, созданные осенью 2023 года, общей площадью 21,52 га приживаемость лесных культур составляет 49-57 %, в связи с чем, необходимо произвести дополнение лесных культур.

Во исполнение условий договора арендодателем 13.12.2024 в адрес ответчика направлено письмо исх. № 12.11-исх-907 от 12.12.2024 с предложением выполнить в добровольном порядке работы по дополнению лесовосстановления (агротехнический уход).

Ответчик в добровольном порядке требования истца не исполнил.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Департамента в арбитражный суд. 

В силу части 4 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу подпункта «б» пункта 3.4 договоров 1, 2 арендатор обязан использовать лесной участок по назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

На основании подпункта «г» пункта 3.4 договоров 1,2 арендатор обязан в течение 6 месяцев со дня заключения договора разработать и представить арендодателю проект освоения лесов для проведения государственной экспертизы.

В соответствии с подпунктом «л» пункта 3.4 договоров 1, 2 арендатор обязан осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом освоения лесов. 

Согласно части 1 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации лица, которые используют леса, обязаны осуществлять мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению.

В соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов включает в себя, в том числе лесовосстановление.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 61 Лесного кодекса Российской Федерации воспроизводство лесов включает в себя лесовосстановление.

Согласно пункту 2 Правил лесовосстановления, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29..12.2021 № 1024 (далее - Правила № 1024), лесовосстановление состоит из комплекса природных процессов, в том числе обусловленных специальными технологическими и организационными мероприятиями, по образованию молодых сомкнутых лесных насаждений (молодняков) основных лесных древесных пород на землях, предназначенных для лесовосстановления и влючает в себя: планирование - определение местоположения и ежегодный учет площадей земель; обследование участков земель; проектирование работ по лесовосстановлению; выполнение работ по лесовосстановлению; приемку выполненных работ по лесовосстановлению (далее - приемка работ); инвентаризацию мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению.

Инвентаризация мероприятий как один из этапов лесовосстановления также была предусмотрена ранее действующими Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.12.2020 № 1014 (далее - Правила № 1014).

Согласно пункту 9 Правил № 1014 с целью оценки состояния участков с проведенными мерами искусственного и комбинированного лесовосстановления и назначения мероприятий по улучшению состояния этих участков проводится инвентаризация лесных культур первого, третьего и пятого года.

Инвентаризация выполненных мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению осуществляется ежегодно в III - IV кварталах года проведения работ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

На лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользовании, аренду, инвентаризация выполненных мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится с участием представителей лиц, использующих леса, на которых возложена обязанность по лесовосстановлению.

Инвентаризация выполненных мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению осуществляются, в том числе, с использованием результатов обследования, материалов дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации.

Таким образом, в соответствии с абзацем вторым пункта 9 Правил № 1014 (действующим, до издания Правил № 1024), с целью оценки состояния участков с проведенными мерами искусственного и комбинированного лесовосстановления и назначения мероприятий по улучшению состояния этих участков должна проводиться инвентаризация лесных культур первого, третьего и пятого года.

Пунктом 53 Правил № 1014 предусмотрено, что лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%, определенной при инвентаризации в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил, в которых не обеспечивается количество деревьев главной породы, предусмотренной в таблицах 1 Приложений 1 - 41 к настоящим Правилам, подлежат дополнению.

Как следует из материалов дела, июле 2024 года сотрудниками лесничества был произведен осмотр в целях проверки качества осуществления ответчиком мероприятий по лесовосстановлению. 

В результате инвентаризации лесных культур, проведенной в июле 2024 года, по Урайскому лесничеству Верхне - Кондинскому участковому лесничеству, Супринскому урочищу было выявлено, что на лесных участках, созданные осенью 2023 года, общей площадью 21,52 га приживаемость лесных культур составила 49-57 %.

В ходе визуального осмотра установлено, что произошло усыхание культур в связи с чем, необходимо произвести дополнение лесных культур.

О необходимости проведения агротехнического ухода в виде дополнения лесных культур (посадки взамен погибших растений) ответчик был уведомлен претензионным письмом от 12.11-исх-907 от 12.12.2024, в котором ему предложено выполнить дополнение лесных культур.

Разработанными проектами лесовосстановления предусмотрен агротехнический уход, следовательно, на ответчика возложено обязательство по осуществлению мероприятий, направленных на улучшение условий для приживаемости и роста культивируемых пород на лесокультурной площади. 

Агротехнический уход ответчиком не выполнен, что подтверждается претензионным письмом Департамента и не оспаривается самим ответчиком. 

Как пояснил истец, искусственно создаваемые лесные насаждения требуют агротехнического ухода, при этом потребность в агротехническом уходе, ответчиком не удовлетворена. 

Таким образом, у арендатора имеется невыполненное обязательство по лесовосстановлению на площади 21,52 га в рамках договоров аренды . № 0113/19-09-ДА от 20.08.2019, № 0364/19-06-ДА от 18.07.2019 по проектам лесовосстановления:

- №137/26-29/2023 на участке площадью 8,08 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочища, квартал 137, выдела 26, 29;

- №156/27-35/2023 на участке площадью 8,3 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества. Супринского урочища. квартал 156. выдела 27, 35;

- №156/30/2023 на участке площадью 5,14 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочиша. квартал 156. выдел 30.

С учетом изложенного, заявленные требования признаются судом обоснованными и подлежат удовлетворению.

Учитывая период и сроки выполнения работ по лесовосстановлению, суд полагает возможным и обоснованным возложить на ответчика обязанность по выполнению дополнительных работ по лесовосстановлению в срок до 30.09.2025.

Статьёй 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В силу пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины. 

При подаче искового заявления государственная пошлина истцом не уплачена. В силу пункта 1 статьи 333.37. Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера: для организаций составляет 50 000 руб. 00 коп. 

Учитывая удовлетворение исковых требований, на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина 50 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ» в срок до 30.09.2025 выполнить работы по дополнению лесовосстановления на общей площади 21,52 га согласно проектам лесовосстановления:

- №137/26-29/2023 на участке площадью 8,08 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочища, квартал 137, выдела 26, 29;

- №156/27-35/2023 на участке площадью 8,3 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества. Супринского урочища. квартал 156. выдела 27, 35;

- №156/30/2023 на участке площадью 5,14 га в границах Урайского лесничества, Верхне - Кондинского участкового лесничества, Супринского урочиша. квартал 156. выдел 30.

Взыскать с акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ – СИБИРЬ» в доход федерального бюджета государственную пошлину 50 000 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через суд, принявший решение.  

СудьяЭ.ФИО3