АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-4302/2020

город Саранск13 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 июля 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 13 июля 2020 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи   Бояркиной С.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "ЕЭС-Гарант"

к муниципальному бюджетному учреждению городского поселения Рузаевка "Городское хозяйство"

о взыскании задолженности в сумме 4334549 руб. 75 коп., неустойки в сумме 162537 руб. 53 коп.,  неустойки по день фактической оплаты долга,

при участии:

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 15.01.2020,

от ответчика: ФИО3, представителя по доверенности от 30.04.2020,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью "ЕЭС-Гарант" (далее – ООО "ЕЭС-Гарант", истец) обратилось в суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к муниципальному бюджетному учреждению городского поселения Рузаевка "Городское хозяйство" (далее – МБУ "Городское хозяйство", ответчик) о взыскании задолженности в сумме задолженности в сумме 4334549 руб. 75 коп., неустойки в сумме 162537 руб. 53 коп.,  неустойки по день фактической оплаты долга.

Из материалов дела следует, что 17.01.2019 между ООО "ЕЭС-Гарант" (Исполнитель) и МБУ "Городское хозяйство" (Заказчик) заключен Энергосервисный контракт № 1 на осуществление действий, направленных на энергосбережение, повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения городского поселения Рузаевка (далее - Контракт.)

Предметом Контракта является осуществление Исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком при эксплуатации системы наружного освещения городского поселения Рузаевка, в соответствии с которым Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику предусмотренную в пункте 5.1 настоящего Контракта экономию электрической энергии в натуральном выражении без учёта экономии в денежном выражении, а Заказчик обязуется выплачивать в течение срока действия настоящего Контракта процент от экономии электрической энергии Заказчика, определенной в соответствии с разделом б Контракта (ппункты 1.1.,1.2.).

Объектом, в отношении которого выполняется Перечень мероприятий, являются объекты системы уличного освещения городского поселения Рузаевка (пункт 2.1 Контракта.)

Согласно пунктов 4.6., 4.7. Контракта, способ определения объема (доли объема) потребления электрической энергии на Объекте энергосервиса в отчетном периоде определяется и согласовывается сторонами в Акте фиксации базовых значений. 

13 февраля 2019 года сторонами подписан Акт фиксации базовых значений, которым стороны сформировали и зафиксировали базовые параметры и значения, необходимые для реализации Контракта. При выборе способа определения объема (доли объема) потребления электрической энергии системой наружного освещения в базовой периоде, определенном на срок действия Контракта, с целью реализации Контракта было решено использовать расчетно-измерительный способ в соответствии с утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления электрической энергии в натуральном выражении. Базовая мощность, потребляемая световыми приборами системы наружного освещения, в базовом периоде на срок действия Контракта, определена в соответствии с проведенными измерениями мощности в виде 10% (но не более 100 шт.) световых приборов системы наружного освещения.

Порядок реализации и сдачи-приема Перечня мероприятий определён пунктами 3.11. - 3.11.8. Контракта. 

Исполнителем в результате исполнения Контракта за весь срок действия Контракта должен обеспечиваться размер экономии электрической энергии в натуральном выражении не менее 8215797,30 кВт/ч, с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объем потребления электроэнергии Заказчиком (пункт 5.1. Контракта)

Согласно пункту 5.2. Контракта, начальным сроком достижения предусмотренной Контрактом доли размера экономии (первым отчетным периодом) является календарный месяц, следующий за месяцем, в котором Исполнителем были реализованы энергосберегающие мероприятия или этап мероприятий, предусмотренный перечнем мероприятий; конечным сроком достижения доли размера экономии является последний календарный месяц действия настоящего Контракта, то есть шестидесятый месяц с момента выполнения Исполнителем энергосберегающих мероприятий, предусмотренных перечнем мероприятий (с даты подписания Акта сдачи-приема выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и Акта приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3.)

Пунктом 5.4. Контракта определено, что размер экономии в натуральном выражении, достигнутый в результате исполнения Контракта, определяется как разница между объемом потребления Заказчиком электроэнергии за период, равный календарному периоду достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии, определенным до начала реализации Перечня мероприятий (в базовом периоде), и объемом потребления Заказчиком электроэнергии, определенным после реализации Исполнителем Перечня мероприятий (в отчетном периоде) с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объем потребления электроэнергии.

Размер экономии электроэнергии в стоимостном выражении, достигнутый в результате исполнения Контракта, определяется как разница между объемом потребления Заказчиком электроэнергии в стоимостном выражении за период, равный календарному периоду достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии, определенным до начала реализации Перечня мероприятий (в базовом периоде), и объемом потребления Заказчиком электроэнергии в стоимостном выражении, определенным после реализации Исполнителем Перечня мероприятий (в отчетном периоде) с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объем потребления электроэнергии.

В соответствии с пунктом 5.9. Контракта, размер экономии потребления Заказчиком электроэнергии в натуральном выражении за отчетный период определяется и фиксируется сторонами ежемесячно Актом определения размера экономии электроэнергии в натуральном выражении (по форме, приведенной в приложении № 5.1) В случае уклонения одной из сторон от определения размера экономии, такой размер определяется другой стороной в одностороннем порядке.

Согласно пункту 7.2. контракта в целях оплаты настоящего Контракта фактически сложившихся за период исполнения контракта цен (тарифов) на соответствующие энергетические ресурсы (электрическая энергия) понимается средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) электрической энергии и тарифов (цен), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы электрической энергии, сложившихся за период достижения размера экономии (доли размера экономии), к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) электрической энергии за этот период.

Если фактически сложившиеся за отчетный период исполнения настоящего Контракта цены (тарифы) на электрическую энергию меньше стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса, то фактически сложившиеся за отчетный период исполнения настоящего контракта цены (тарифы) на электрическую энергию принимаются равными стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении  открытого конкурса.

Во исполнение условий заключенного Контракта истец осуществил действия, направленные на энергоснабжение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов ответчика при эксплуатации наружного освещения городского поселения Рузаевка, что подтверждается следующими документами:

- Актом №1 сдачи-приема выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Энергосервисному контракту от 17.01.2019, в пункте 2 которого указано, что фактическое качество выполненных мероприятий соответствует требованиям Энергосервисного контракта от 17.01.2019г. № 1, в пункте 5 указано, что недостатки в перечне выполненных мероприятий (работах) не выявлены,

- Актом № 2 приема - передачи оборудования, установленного (созданного) Исполнителем на объекте энергосервиса, в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ходе реализации Энергосервисного контракта от 17.07.2019г. № 1, в пункте 1 которого указано, что дефекты и недоделки не выявлены; приемка оборудования выполнена в соответствии с требованиями Энергосервисного контракта от 17.01.2019г. № 1 и действующего законодательства РФ,

- Актом № 3 приема-передачи Заказчику Схемы расположения опор освещения и осветительных приборов, входящих в состав наружного освещения городского поселения Рузаевка, в пункте 2 которого указано, что претензии Сторон по качеству Схемы отсутствуют,

- Актом о приемке выполненных работ от 21.03.2019 №Акт-1 (по форме КС-2).

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 21.03.2019 №ФЗ-1 (по форме КС-3).

Ответчик не в полном объеме исполнил обязательства по оплате оказанных исполнителем услуг, задолженность (с учетом уточнения к иску) за период с августа 2019 года по январь 2020 года составила 4334549 руб. 75 коп.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования споров истцом в адрес ответчика направлена претензия от 10.03.2020 (получена ответчиком нарочно 10.03.2020) с требованием оплаты возникшей задолженности. 

Оплата задолженности ответчиком не произведена.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав характер спорных правоотношений, исходя из содержания прав и обязанностей сторон, предусмотренных муниципальным контрактом от 17.01.2019, суд приходит к выводу, что правоотношения по муниципальному энергосервисному договору (контракту) регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Согласно пункту 1 статьи 19 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ предметом энергосервисного договора (контракта) является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 названного закона, в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты).

Государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты) заключаются и оплачиваются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (пункт 2 этой же статьи).

В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

На основании части 3 статьи 108 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота) определяется с учетом фактических расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов за прошлый год и не может превышать указанные расходы с учетом Требований к условиям энергосервисного контракта и Особенностей определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота), установленных Постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 (далее - Постановление № 636).

При заключении энергосервисного договора (контракта) в нем указывается экономия в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов по каждому виду таких ресурсов (пункт 14 статьи 108 Федерального закона № 44-ФЗ).

Обязательством исполнителя, предусмотренным энергосервисным договором (контрактом), является обеспечение предусмотренной контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов без учета экономии в стоимостном выражении (пункт 14 статьи 108 Федерального закона № 44-ФЗ).

Согласно пункту 18 статьи 108 Федерального закона № 44-ФЗ оплата энергосервисного контракта осуществляется исходя из размера предусмотренных этим контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период исполнения этого контракта.

Ответчик в судебном заседании заявил о признании иска в полном объеме.

Согласно части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика суммы долга в размере 4334549 руб. 75 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

За просрочку оплаты оказанных услуг истец начислил ответчику пени за период с 01.10.2019 по 07.07.2020 в размере 162537 руб. 53 коп.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с пунктом 10.4. контракта, за неисполнение заказчиком обязательства по оплате настоящего контракта начисляется неустойка (штраф, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения  обязательства, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим контрактом  срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера платежа, который должен быть уплачен заказчиком.

Указанная мера ответственности соответствует положениям пункта 5 статьи 34 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Расчет пени судом проверен, признан обоснованным. 

Поскольку ответчик не исполнил обязательство по оплате оказанных услуг, факт просрочки подтвержден материалами дела, требование истца о взыскании пени в сумме 162537 руб. 53 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» истец вправе требовать присуждения неустойки по  день фактического исполнения обязательства.

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки по  день фактической оплаты  4334549 руб. 75 коп подлежит удовлетворению, начиная с 08.07.2020, исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

Истцом при подаче иска по платежному поручению №5524 от 17.04.2020 уплачена государственная пошлина в сумме 51923 руб.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины в сумме 13645руб. относятся на истца и подлежат возмещению ответчику.

В соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом частичного признания иска в полном объеме,  государственная пошлина в сумме 38278 руб., уплаченная по платежному поручению №5524 от 17.04.2020, подлежит возврату истцу из федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

взыскать с муниципального бюджетного учреждения городского поселения Рузаевка "Городское хозяйство" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Республика Мордовия, г. Рузаевка) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЕЭС-Гарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия) задолженности в сумме 4334549 руб. 75 коп., неустойку в сумме 162537 руб. 53 коп., неустойку, начисленную на сумму долга в 4334549 руб. 75 коп., исходя из 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная с 08.07.2020 и по день фактической оплаты долга, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13645руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЕЭС-Гарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 38278 руб., уплаченную по платежному поручению №5524 от 17.04.2020.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяС.Ю. Бояркина