Арбитражный суд Липецкой области

пл.Петра Великого, д.7, г.Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-8181/2021

г.Липецк

06 мая 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 апреля 2022 года.  

Решение в полном объеме изготовлено 06 мая 2022 года.     

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Канаевой А.В.,   при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леликовой О.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Донбассдомнаремонт-Липецк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...> влд.20, офис 105)

к обществу с ограниченной ответственностью «Кэмон-инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>, каб.16)

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Кэмон-инжиниринг» ФИО1,

о взыскании 12 290 546 руб. 75 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, доверенность № 69/2022 от 01.01.2022,

от ответчика – представитель не явился,

от третьего лица – представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Донбассдомнаремонт-Липецк» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Кэмон-инжиниринг» о взыскании стоимости давальческого материала на сумму 12 302 769 руб. 53 коп.

Определением арбитражного суда от 24.09.2021 исковое заявление принято к производству.

Определением от 17.01.2022 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Кэмон-инжиниринг» – ФИО1.

В ходе рассмотрения дела истец уменьшил размер исковых требований до     12 290 546 руб. 75 коп.

Ответчик и третье лицо в судебное заседание не явились, надлежащим образом были извещены о начавшемся по делу судебном процессе.

Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания в соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации размещена арбитражным судом в сети «Интернет».

При таких обстоятельствах, на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие неявившихся лиц.

В настоящем судебном заседании истец поддержал требования по основаниям, указанным в исковом заявлении.

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв сроком на два дня.

Информация об объявлении перерыва размещена на официальном сайте суда в сети «Интернет», что является публичным извещением.

После перерыва в судебное заседание не явились ответчик и третье лицо, суд считает возможным продолжить рассмотрение дела в их отсутствие.

Принимая во внимание, что исковое заявление подано истцом в суд до даты введения наблюдения в отношении ответчика, а также учитывая, что истцом не заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу, суд, исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 28 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», рассматривает дело в общем порядке.

Арбитражный суд, выслушав истца, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, установил следующее.

Как видно из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «Донбассдомнаремонт-Липецк» (генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Кэмон-инжиниринг» (подрядчик) подписан договор подряда № 12/08-20 от 12.08.2020 (далее – договор), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по выполнению в полном объеме комплекса строительно-монтажных работ при строительстве объекта «Объекты инфраструктуры ДП-4», а генподрядчик – создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Окончательный перечень работ по объекту и окончательные условия по ним определяются на основании подписанных сторонами дополнительных соглашений.

В соответствии с пунктом 2.2 договора поставку всего оборудования осуществляет заказчик. Генподрядчик осуществляет поставку основных материалов. 

В силу пункта 3.1 договора цена договора определяется на основании суммы всех дополнительных соглашений и включает в себя:

- стоимость строительно-монтажных работ;

- стоимость основных материалов поставки подрядчика (при заключении дополнительного соглашения);

- стоимость малоценных материалов поставки подрядчика.

Платежи по договору осуществляются в российских рублях в безналичной форме путем перечисления соответствующих сумм денежных средств на счет подрядчика, указанный в статье 32 (Место нахождения и реквизиты сторон) договора в порядке, установленном в настоящей статье 4 (Порядок расчетов) и статье 13 договора (Сдача-приемка выполненных работ. Пусконаладочные работы) (пункт 4.1 договора).

В соответствии с пунктом 4.3 договора генподрядчик оплачивает выполненные работы на ежемесячной основе в течение 35 дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставления подрядчиком полного комплекта исполнительной документации на фактически выполненные работы.

Согласно пункту 5.2 договора для целей статьи 708 ГК РФ даты начала и окончания выполнения работ определяются сторонами при заключении дополнительного соглашения в графике реализации работ по каждому объекту.

В пункте 4.4 договора стороны предусмотрели, что материалы и конструкции, полученные подрядчиком со склада генподрядчика и/или заказчика списываются ежемесячно в объемах выполненных работ по акту на израсходованные материально-производственные запасы (ф. № 

<

***>), акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с нормами расхода и действующими нормативными документами РФ в области строительства.

В соответствии с пунктом 7.16 договора подрядчик обязан не позднее 30 дней после окончания работ по объекту предоставить генподрядчику окончательный отчет об израсходовании оборудования и давальческих материалов, а также возвратить или оплатить их остаток в ценах, месяца передачи материалов заказчиком или генподрядчиком. Обязанность предоставления отчета заказчику или генподрядчику об израсходовании оборудования и давальческих материалов, с возвратом оборудования и давальческих материалов заказчику и/или генподрядчику или оплатой их стоимости считается ключевым событием по договору. 

Подрядчик обязан обеспечить сохранность полученного от заказчика и/или генподрядчика оборудования и материалов, а при утрате или повреждении возместить в полном объеме их стоимость, убытки, а также уплатить штраф согласно условиям пункта 18.10 договора (пункт 7.25 договора).

В силу пункта 8.7 договора генподрядчик обязан передать подрядчику необходимые давальческие основные материалы и оборудование в случае, если работы в соответствии с пунктом 2.2 договора производятся с использованием материалов и оборудования генподрядчика. При этом цены на давальческие материалы и оборудование. Указанные заказчиком и генподрядчиком в накладных (ф. М-15) и в актах о приемке-передаче оборудования в монтаж (ф. ОС-15) являются предварительными. Окончательная цена материалов и оборудования определяются генподрядчиком по итогам составления отчетности за месяц передачи имущества подрядчику. Передача генподрядчиком давальческих материалов и оборудования для выполнения работ не влечет перехода права собственности на них подрядчику.  

Согласно пункту 13.1 договора поэтапная приемка производится генподрядчиком ежемесячно с подписанием сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Этапом является ежемесячно выполненный объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ в период с 16 числа предшествующего месяца по 15 число отчетного месяца в соответствии с согласованным графиком реализации работ.

В пункте 13.2 договора стороны договорились о следующем порядке предоставления отчетных документов между генподрядчиком и подрядчиком:

- подрядчик обязан представить генподрядчику не позднее 16 числа отчетного месяца акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный и завизированный представителями заказчика, и завизированный подписью начальника ОСК УТЗ заказчика с печатью Управления по закупкам подрядных услуг заказчика;

- подрядчик обязан предоставить генподрядчику с актами о приемке выполненных работ полный комплект необходимой исполнительной документации на фактически выполненные работы со всеми необходимыми визами и печатями заказчика;

- подрядчик обязан представить генподрядчику не позднее 27 числа отчетного месяца справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) между генподрядчиком и подрядчиком;

- подрядчик обязан предоставить генподрядчику со справкой о выполненных работах счета-фактуры. 

Акт приемки и справка о стоимости выполненных работ и затрат должны быть выполнены на бумажном и электронном носителе в формате ПК РИК Проф Сеть и соответствовать согласованному сторонами графику реализации работ.

По окончании выполнения работ подрядчик обязан письменно известить генподрядчика о готовности к сдаче результата работ в течение 5 рабочих дней. Подрядчик за 5 дней до начала приемки результата работ по акту технической готовности передает генподрядчику экземпляр исполнительной документации в составе, необходимом заказчику для эксплуатации.

С актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) подрядчик обязан предоставить акт о писании давальческих материалов генподрядчика.

В соответствии с пунктом 13.13 договора объект строительства считается переданным подрядчиком и принятым генподрядчиком с фактической даты подписания акта приемки законченных строительством работ по объекту.

В пункте 29.5 договора стороны предусмотрели, что генподрядчик вправе  в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, письменно предупредив подрядчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

Согласно пункту 29.9 договора подрядчик при расторжении договора обязуется возвратить генподрядчику все его имущество либо возместить генподрядчику его стоимость, как это предусмотрено статьей 728 ГК РФ и передать генподрядчику незавершенный результат работ со всей технической документацией.

Из материалов дела видно, что между сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2020 к договору на строительство объекта «ДЦ-1. Объекты инфраструктуры ДП-4», в приложении № 1 к которому стороны согласовали ведомость договорной цены, а в приложениях № 2 и № 3 установили график реализации работ и график ключевых событий соответственно.

Дополнительным соглашением № 2 от 09.10.2020 стороны изменили график реализации работ к договору и дополнительному соглашению № 1 и утвердили новый график реализации работ, согласно которому дата начала работ – 07.09.2020, дата окончания – 11.02.2021.

Дополнительным соглашением № 3 от 26.01.2021 стороны вновь изменили график реализации работ к договору и дополнительному соглашению № 2 и утвердили новый график реализации работ, согласно которому дата окончания работ 18.03.2021.

Дополнительным соглашением № 4 от 15.03.2021 стороны согласовали, что генподрядчик предоставляет доступ на строительную площадку работникам подрядчика до 15.05.2021.

Из материалов дела следует, что в рамках исполнения обязательств по договору истец в период с сентября 2020 года по апрель 2021 года передал ответчику для выполнения работ давальческий материал на общую сумму 52 192 260 руб. 22 коп., что подтверждается следующими накладными на отпуск материалов на сторону:

- № 1760 от 18.09.2020 на сумму 654 834 руб. 51 коп.;

- № 1761 от 18.09.2020 на сумму 184 381 руб. 56 коп.;

- № 1742 от 24.09.2020 на сумму 453 754 руб. 62 коп.;

- № 1743 от 24.09.2020 на сумму 400 159 руб. 98 коп.;

- № 1749 от 24.09.2020 на сумму 703 429 руб. 65 коп.;

- № 1750 от 24.09.2020 на сумму 328 467 руб. 15 коп.;

- № 1840 от 24.09.2020 на сумму 356 664 руб. 33 коп.;

- № 1892 от 24.09.2020 на сумму 501 949 руб. 80 коп.;

- № 1893 от 24.09.2020 на сумму 316 968 руб. 30 коп.;

- № 2013 от 24.09.2020 на сумму 138 186 руб. 18 коп.;

- № 2014 от 24.09.2020 на сумму 269 273 руб. 07 коп.;

- № 2285 от 08.10.2020 на сумму 1 343 565 руб. 63 коп.;

- № 2289 от 08.10.2020 на сумму 562 243 руб. 77 коп.;

- № 2291 от 10.10.2020 на сумму 182 781 руб. 72 коп.;

- № 2184 от 14.10.2020 на сумму 948 150 руб.;

- № 2641 от 14.10.2020 на сумму 164 083 руб. 59 коп.; 

- № 2640 от 15.10.2020 на сумму 322 867 руб. 71 коп.;

- № 2305 от 21.10.2020 на сумму 182 181 руб. 78 коп.;

- № 2696 от 29.10.2020 на сумму 589 250 руб. 80 коп.;

- № 2923 от 29.10.2020 на сумму 914 108 руб. 58 коп.;

- № 2924 от 29.10.2020 на сумму 936 606 руб. 33 коп.;

- № 2162 от 30.10.2020 на сумму 2 483 455 руб. 38 коп.;

- № 2421 от 02.11.2020 на сумму 988 750 руб. 22 коп.;

- № 2422 от 02.11.2020 на сумму 1 526 425 руб. 73 коп.;

- № 2482 от 24.11.2020 на сумму 469 453 руб. 05 коп.;

- № 2564 от 01.12.2020 на сумму 411 058 руб. 89 коп.;

- № 2565 от 01.12.2020 на сумму 370 962 руб. 90 коп.;

- № 2566 от 01.12.2020 на сумму 596 640 руб. 33 коп.;

- № 2571 от 01.12.2020 на сумму 383 461 руб. 65 коп.;

- № 2572 от 01.12.2020 на сумму 353 164 руб. 68 коп.;

- № 2573 от 01.12.2020 на сумму 396 660 руб. 33 коп.;

- № 2577 от 01.12.2020 на сумму 508 449 руб. 15 коп.;

- № 2578 от 01.12.2020 на сумму 1 240 356 руб. 69 коп.;

- № 2579 от 01.12.2020 на сумму 1 124 428 руб. 12 коп.;

- № 2580 от 01.12.2020 на сумму 1 467 276 руб. 49 коп.;

- № 2581 от 01.12.2020 на сумму 1 185 453 руб. 55 коп.;

- № 2582 от 01.12.2020 на сумму 243 275 руб. 67 коп.;

- № 2583 от 01.12.2020 на сумму 463 953 руб. 60 коп.;

- № 2584 от 01.12.2020 на сумму 369 663 руб. 03 коп.;

- № 2585 от 01.12.2020 на сумму 308 569 руб. 14 коп.;

- № 2586 от 01.12.2020 на сумму 305 169 руб. 48 коп.;

- № 2587 от 01.12.2020 на сумму 383 461 руб. 65 коп.;

- № 2594 от 01.12.2020 на сумму 1 367 838 руб. 61 коп.;

- № 2734 от 01.12.2020 на сумму 514 548 руб. 54 коп.;

- № 2735 от 01.12.2020 на сумму 311 968 руб. 80 коп.;

- № 2737 от 01.12.2020 на сумму 953 204 руб. 67 коп.;

- № 2738 от 01.12.2020 на сумму 1 096 490 руб. 34 коп.;

- № 2739 от 01.12.2020 на сумму 141 485 руб. 85 коп.;

- № 2740 от 01.12.2020 на сумму 280 971 руб. 90 коп.;

- № 2741 от 01.12.2020 на сумму 508 349 руб. 16 коп.;

- № 2930 от 01.12.2020 на сумму 894 210 руб. 57 коп.;

- № 2931 от 01.12.2020 на сумму 486 051 руб. 09 коп.;

- № 2932 от 01.12.2020 на сумму 183 081 руб. 69 коп.;

- № 2933 от 01.12.2020 на сумму 425 857 руб. 41 коп.;

- № 2993 от 01.12.2020 на сумму 244 675 руб. 53 коп.;

- № 2994 от 01.12.2020 на сумму 190 780 руб. 92 коп.;

- № 3033 от 01.12.2020 на сумму 61 893 руб. 81 коп.;

- № 2865 от 15.12.2020 на сумму 289 548 руб. 78 коп.;

- № 2866 от 15.12.2020 на сумму 339 126 руб. 90 коп.;

- № 2987 от 18.12.2020 на сумму 267 628 руб. 33 коп.;

- № 3035 от 18.12.2020 на сумму 7 295 руб. 83 коп.;

- № 3042 от 18.12.2020 на сумму 120 187 руб. 98 коп.;

- № 3043 от 18.12.2020 на сумму 320 967 руб. 90 коп.;

- № 3044 от 18.12.2020 на сумму 249 875 руб. 01 коп.;

- № 3045 от 18.12.2020 на сумму 214 778 руб. 52 коп.;

- № 3046 от 18.12.2020 на сумму 201 579 руб. 84 коп.;

- № 3047 от 18.12.2020 на сумму 567 943 руб. 20 коп.;

- № 3048 от 18.12.2020 на сумму 320 167 руб. 98 коп.;

- № 3049 от 18.12.2020 на сумму 455 054 руб. 49 коп.;

- № 3050 от 18.12.2020 на сумму 561 043 руб. 89 коп.;

- № 3051 от 18.12.2020 на сумму 242 975 руб. 70 коп.;

- № 3052 от 18.12.2020 на сумму 416 558 руб. 34 коп.;

- № 3053 от 18.12.2020 на сумму 317 868 руб. 21 коп.;

- № 3054 от 18.12.2020 на сумму 309 869 руб. 01 коп.;

- № 3055 от 18.12.2020 на сумму 819 318 руб. 06 коп.;

- № 3056 от 18.12.2020 на сумму 451 454 руб. 85 коп.;

- № 3057 от 18.12.2020 на сумму 446 055 руб. 39 коп.;

- № 3058 от 18.12.2020 на сумму 96 490 руб. 35 коп.;

- № 3059 от 18.12.2020 на сумму 193 780 руб. 62 коп.;

- № 3060 от 18.12.2020 на сумму 433 156 руб. 68 коп.;

- № 3061 от 18.12.2020 на сумму 487 551 руб. 24 коп.;

- № 3062 от 18.12.2020 на суму 429 457 руб. 05 коп.;

- № 3063 от 18.12.2020 на сумму 394 760 руб. 52 коп.;

- № 3064 от 18.12.2020 на сумму 138 786 руб. 12 коп.;

- № 2995 от 23.12.2020 на сумму 17 062 руб. 50 коп.;

- № 589 от 08.01.2021 на сумму 138 786 руб. 12 коп.;

- № 590 от 08.01.2021 на сумму 185 581 руб. 44 коп.;

- № 451 от 11.01.2021 на сумму 24 697 руб. 53 коп.;

- № 458 от 11.01.2021 на сумму 2 397 руб. 96 коп.;

- № 591 от 11.01.2021 на сумму 264 173 руб. 58 коп.;

- № 592 от 11.01.2021 на сумму 390 560 руб. 94 коп.;

- № 593 от 11.01.2021 на сумму 525 647 руб. 43 коп.;

- № 594 от 11.01.2021 на сумму 173 582 руб. 64 коп.;

- № 84 от 16.01.2021 на сумму 131 686 руб. 83 коп.;

- № 85 от 16.01.2021 на сумму 250 462 руб. 96 коп.;

- № 86 от 16.01.2021 на сумму 508 709 руб. 22 коп.;

- № 87 от 16.01.2021 на сумму 268 324 руб. 66 коп.;

- № 97 от 16.01.2021 на сумму 369 407 руб. 91 коп.;

- № 98 от 16.01.2021 на сумму 447 440 руб. 60 коп.;

- № 99 от 16.01.2021 на сумму 542 736 руб. 26 коп.;

- № 100 от 16.01.2021 на сумму 481 168 руб. 28 коп.;

- № 101 от 16.01.2021 на сумму 126 728 руб. 27 коп.;

- № 102 от 16.01.2021 на сумму 481 168 руб. 27 коп.;

- № 126 от 16.01.2021 на сумму 199 671 руб. 86 коп.;

- № 228 от 16.01.2021 на сумму 599 140 руб. 08 коп.;

- № 174 от 25.01.2021 на сумму 5 899 руб. 41 коп.;

- № 392 от 29.01.2021 на сумму 169 337 руб. 50 коп.;

- № 358 от 13.02.2021 на сумму 723 365 руб. 95 коп.;

- № 398 от 13.02.2021 на сумму 692 587 руб. 50 коп.

- № 399 от 13.02.2021 на сумму 14 025 руб.;

- № 420 от 18.02.2021 на сумму 86 729 руб. 17 коп.;

- № 671 от 22.03.2021 на сумму 10 734 руб. 95 коп.;

- № 892 от 01.04.2021 на сумму 525 447 руб. 45 коп.;

- № 893 от 01.04.2021 на сумму 819 618 руб. 03 коп.;

- № 916 от 01.04.2021 на сумму 160 483 руб. 95 коп.;

- № 756 от 07.04.2021 на сумму 63 207 руб. 50 коп.

Ответчик выполнил работы по договору и передал их результат истцу согласно следующим документам:

- акты о приемке выполненных работ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 от 15.12.2020 и справка и стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.12.2020 на сумму 17 007 782 руб. 40 коп.;

- акты о приемке выполненных работ №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 от 15.01.2021 и справка и стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 15.01.2021 на сумму 13 978 381 руб. 20 коп.;

- акты о приемке выполненных работ №№ 17, 18, 19, 20 от 15.03.2021 и справка и стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 15.03.2021 на сумму 966 151 руб. 20 коп.

Всего на общую сумму 31 952 314 руб. 80 коп.

Из материалов дела усматривается, что при выполнении работ по договору ответчиком использованы давальческие материалы на сумму 39 901 713 руб.                    47 коп., что подтверждается актами на израсходованные материально-производственные запасы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за декабрь 2020 года, №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 за январь 2021 года.

Как видно из материалов дела, 28.05.2021 истцом составлен акт о невыполнении ключевого события, которым зафиксировано нарушение графика выполнение работ, и отставание по проекту 292112-01-КМ1 совместно с 292112-03КМ1 на 206 календарных дней, по проектам 291993-КМ3, 292112-КМд, 292112-03-КМД на 176 календарных дней.

Указанный акт направлен в адрес ответчика 04.06.2021.

04.06.2021 истец также направил ответчику претензию № 28/05/1045 от 28.05.2021, в которой указал на нарушение сроков исполнения обязательств по ключевым событиям и на не предоставление отчета об израсходовании оборудования и давальческих материалов на сумму 12 302 769 руб. 53 коп., в связи с чем, просил возместить стоимость неизрасходованных давальческих материалов в указанной сумме.

03.09.2021 истец направил ответчику уведомление № 02/09/1855 от 02.09.2021 о расторжении договора на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащее также требование о возмещении стоимости давальческих материалов в сумме 12 302 769 руб. 53 коп. и уплате неустойки.

Неисполнение ответчиком требования по возмещению стоимости давальческого материала в добровольном порядке, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Проанализировав условия заключенного между сторонами договора, суд приходит к выводу, что по своей правовой природе он является договором строительного подряда, и взаимоотношения сторон должны регулироваться нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу пунктов 1, 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Тем самым, договорные отношения прекращаются (изменяются) с момента, когда соответствующее уведомление доставлено контрагенту или считается доставленным по правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором.

В пункте 29.5 договора стороны предусмотрели, что генподрядчик вправе  в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, письменно предупредив подрядчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

Из материалов дела усматривается, что письмом № 02/09/1855 от 02.09.2021 истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно сведениям, размещенным на информационном ресурсе сайта www.russianpost.ru (Почта России. Отслеживание почтовых отправлений), указанное уведомление вручено ответчику 19.09.2021.

Таким образом, договор подряда № 12/08-20 от 12.08.2020 считается прекращенным с 19.10.2021.

В связи с расторжением договора истец просит взыскать с ответчика стоимость невозвращенного давальческого материала в размере 12 290 546 руб.                 75 коп. (с учетом уточнения).

Согласно части 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

По иску о взыскании стоимости неотработанных и неиспользованных материалов истец должен доказать факт передачи материалов подрядчику, обстоятельства прекращения договорных отношений, не использование переданных материалов, а также то обстоятельство, что последние отсутствуют у его контрагента после окончания работ.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (статья 714 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 728 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Таким образом, обязанности по хранению, целевому использованию и соответствующему учету полученного от заказчика давальческого материала, а также по возврату неиспользованного давальческого материала, законом возложены на подрядчика.

Согласно пункту 29.9 договора подрядчик при расторжении договора обязуется возвратить генподрядчику все его имущество либо возместить генподрядчику его стоимость, как это предусмотрено статьей 728 ГК РФ.

Материалами дела подтверждается передача истцом ответчику давальческих материалов по накладным на общую сумму 52 192 260 руб. 22 коп.

Довод ответчика о том, что истцом не представлены документы, подтверждающие полномочия лица, получившего товарно-материальные ценности по накладным, за период с 18.09.2020 по 31.12.2021, не соответствует материалам дела.

Истцом в материалы дела представлены доверенности, выданные ответчиком на получение товарно-материальных ценностей по спорному договору подряда.

Из материалов дела следует, что ответчик выполнил работы по договору на общую сумму 31 952 314 руб. 80 коп.

Согласно расчету истца при выполнении работ по договору ответчиком использованы давальческие материалы на сумму 39 901 713 руб. 47 коп., что подтверждается актами на израсходованные материально-производственные запасы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за декабрь 2020 года, №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 за январь 2021 года, подписанными сторонами.

Ответчиком указанный расчет истца не оспорен, контррасчет со ссылкой на первичные документы не представлен.

Таким образом, стоимость неизрасходованного давальческого материала по договору составляет 12 290 546 руб. 75 коп.

Ответчик доказательств фактического наличия неизрасходованного давальческого материала на строительной площадке, или возврата давальческого материала истцу либо возмещения истцу его стоимости в материалы дела не представил.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, оценив по своему внутреннему убеждению каждое доказательство в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании стоимости невозвращенного давальческого материала в размере                     12 290 546 руб. 75 коп. является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.   

При обращении в суд с иском истец уплатил государственную пошлину в размере 84 514 руб. (платежное поручение № 10984 от 16.09.2021).

При цене иска 12 290 546 руб. 75 коп. размер государственной пошлины составляет 84 453 руб.

В связи с чем, истцу подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в размере 61 руб.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены в полном объеме, судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 84 453 руб. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кэмон-инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>, каб.16) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Донбассдомнаремонт-Липецк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...> влд.20, офис 105) стоимость давальческого материала в размере 12 290 546 руб. 75 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 84 453 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Донбассдомнаремонт-Липецк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...> влд.20, офис 105) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 61 руб.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок со дня принятия.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия судебного акта на бумажном носителе может быть направлена им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена им под расписку.

Судья                                                                                                             А.В.Канаева