АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

26 августа 2025 года

Дело № А33-6536/2025

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена 13 августа 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено августа 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Щелоковой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ГРИАЛ» (ИНН 2465183248, ОГРН 1182468039786)

к акционерному обществу "Бамтоннельстрой-Мост" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в присутствии:

от истца: ФИО1, по доверенности от 15.01.2024 №1, 

от ответчика: (посредством сервиса «Онлайн-заседания» информационной системы «Картотека арбитражных дел») ФИО2, по доверенности от 03.06.2025, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Альтерготом С.В.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ГРИАЛ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу "Бамтоннельстрой-Мост" (далее – ответчик) о взыскании неустойки (пени) по договору № 141-Д/2022 от 22.12.2022 в размере 3 394 677,52 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 28.03.2025 возбуждено производство по делу. Судебное разбирательство откладывалось.

Ко дню судебного заседания от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, в котором истец просит взыскать с ответчика 3 391 910,82 руб. неустойки (пени) по договору № 141-Д/2022 от 22.12.2022.

Уточнение размера исковых требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца в судебном заседании на исковых требованиях настаивала, с учетом заявленного уточнения. 

Представитель ответчика требования не признала по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление. Ходатайствовала о снижении размера неустойки по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 АПК РФ, объявлен перерыв до 17 час. 30 мин. 13.08.2025 , о чем вынесено протокольное определение. Сведения о дате и месте слушания размещены в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно статье 156 АПК РФ после перерыва судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ГРИАЛ» (исполнитель) и акционерным обществом «Бамтоннельстрой-Мост» (заказчик) 22.12.2022 заключен договор №141-Д/2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей TATRA.

 Перечень автотранспортных средств заказчика, заявленных для проведения технического обслуживания и ремонта в сервисном центре исполнителя, согласован в Приложении № 4 к договору, изменен в Приложении №1 к дополнительному соглашению № 1 от 02.08.2023 к указанному договору. 

13.06.2024 сторонами подписано дополнительному соглашению №6 к договору, в котором расширен перечень обслуживаемой техники. Пункт 1.1 договора изложен в следующей редакции: «В рамках настоящего договора исполнитель обязуется по заданию заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей TATRA и иной техники (далее - Техники), предусмотренные пунктом 1.2 договора (далее - услуги), а заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные исполнителем в надлежащим качеством и в установленные сроки». Договор дополнен пунктом 1.2.3 «Техническое обслуживание и ремонт принадлежащего заказчику экскаватора Doosan Solar 500 LC-V».

Стоимость оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей TATRA по договору № 141-Д/2022 от 22.12.2022 установлена в Приложении №1 к договору: «Стоимость одного нормо-часа: 4 600,00 руб., в том числе НДС 20% в сумме 766,66 руб.», и изменена Приложением №1 к дополнительному соглашению №4 от 04.06.2024: «Стоимость одного нормо-часа составляет 4 140,00 руб., в том числе НДС 20% в сумме 690,00 руб.».

В соответствии с пунктом 1.4 договор признается сторонами рамочным, определяющим общие условия обязательственных отношений сторон, связанных с оказанием исполнителем услуг и поставкой товара (запасных частей и расходных материалов).

Услуги оказываются по месту нахождения техники заказчика в г. Благовещенске или Благовещенском районе Амурской области (пункт 3.1.4).

По завершении услуг Исполнитель формирует Заказ-наряд, содержащий окончательные объем и стоимость услуг (если они не были сформированы ранее), а также акт оказанных услуг. На поставленный исполнителем товар оформляется УПД (пункт 3.1.9).

Согласно пункту 3.2.1 договора по факту оказания услуг исполнитель направляет заказчику акт оказанных услуг (составленный по форме Приложения № 3 к настоящему договору) почтовым отправлением или нарочно. Акт оказанных услуг формируется на основании данных о фактически оказанных услугах по каждому заказу-наряду, результат оказания услуг должен подтверждаться соответствующими документами. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактического завершения оказания услуг, исполнитель передает заказчику заказ-наряд по ремонту автомобиля. При отсутствии обоснованных претензий со своей стороны, заказчик подписывает заказ-наряд и передает его исполнителю.

В случае предоставления запасных частей или расходных материалов исполнителем, сторонами оформляется и подписывается универсальный передаточный документ (УПД), Все указанные документы в обязательном порядке должны содержать ссылку на объект строительства и на идентификатор государственного контракта при казначейском сопровождении средств (п. 1.6 Договора).

Согласно пункту 3.2.2 договора заказчик в течение 5 пяти рабочих дней со дня получения от исполнителя акта оказанных услуг и заказа-наряда (подготовленного в окончательной форме) обязан подписать и вернуть указанные документы исполнителю, либо направить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

Согласно пункту 3.2.3 договора в случае выявления недостатков при приёмке оказанных услуг, заказчик вправе отказаться от приемки результата оказанных услуг до устранения исполнителем выявленных недостатков.

Согласно пункту 3.2.4 услуги по договору считаются оказанными исполнителем с момента подписания сторонами акта оказанных услуг и заказа-наряда (подготовленного в окончательной форме). Каждой стороне предоставляется по одному экземпляру акта оказанных услуг и заказа-наряда. 

Согласно пункту 4.3.4 договора заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать фактически оказанные с надлежащим качеством услуги исполнителя в порядке и сроки, установленные договором.

Согласно пункту 5.1 договора стоимость услуг, указанных в пункте 1.2 договора, определяется отдельно по каждому заказ-наряду (подготовленному в окончательной форме) и акту оказанных услуг (по форме Приложения №3 к настоящему договору) на каждый конкретный заказ.

В пункте 5.5.2 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.08.2023) согласовано, что расчет за каждый отдельный объем фактически оказанных услуг (каждую поставленную партию товара) осуществляется заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в акте оказанных услуг либо товаросопроводительных документах.

В соответствии с пунктом 7.1 договора за нарушение договорных обязательств виновная сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 7.5 договора в случае просрочки оплаты оказанных услуг исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Согласно пункту 8.2 договора претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснования с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, получившая претензию обязана дать ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения (пункт 8.3).

Согласно пункту 10.3 договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2023.

Исполнителем в период действия договора оказаны услуги на сумму 66 647 145,00 руб.

Обязательства по оплате услуг заказчиков выполнялись с нарушением условий договора.

За просрочку оплаты начислена неустойка (пеня) в сумме 3 391 910,82 руб. (согласно уточненному требованию, принятому судом в порядке ст. 49 АПК РФ.)

04.10.2024 исполнитель в адрес заказчика направил досудебную претензию с требованием об оплате долга и неустойки (пени), на контактный адрес электронной почты и почтовым отправлением (РПО 66000598015918; РПО 66000598015802).

Претензия получена 09.10.2024 в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления, после чего произведена оплата основной суммы задолженности по договору. Неустойка не оплачена, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Ответчик, возражая против иска, в отзыве привел следующие доводы.

За период действия договора между сторонами, ответчик произвел оплату истцу за оказанные услуги на общую сумму 65 324 745,00 руб. 

Поведение истца при исполнении договора нельзя признать добросовестным, поскольку в конце 2023 года ответчик был подвергнут налоговому контролю со стороны Федеральной налоговой службы в связи с противоправным и недобросовестным поведением истца, выразившимся в недостоверном отражении в налоговой отчетности сумм НДС, в том числе по спорному договору.

Налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля в отношении представленной акционерным обществом «Бамтоннельстрой-Мост» налоговых деклараций по НДС выявлено наличие несформированного источника для принятия нелоговых вычетов по взаимоотношениям с ООО «ГРИАЛ» - выявлено расхождение в декларациях по НДС за 3 и 4 кварталы 2023 года (далее - налоговый разрыв). Данные обстоятельства свидетельствуют о занижении ООО «ГРИАЛ» налоговой базы по НДС по сделкам, заключенным с Акционерным обществом «Бамтоннельстрой-Мост». О необходимости устранения нарушения налогового законодательства ответчик письменно уведомлял истца письмами от 02.02.2024 №988/БТС, от 22.12.2023 № 2983/БТС, от 29.02.2024 №1923/БТС. Избежание налогообложения в результате совершения действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды» является неправомерным поведением участника гражданского оборота, не совместимым с указанными положениями статьи 3 НК РФ, поскольку приводит к возникновению у лиц, обязанных к оплате налога. неоправданного преимущества в сравнении с другими налогоплательщиками нарушению публичного интереса (определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2016 Ж 305-КП6-4920).

Ответчик считает, что заявленный истцом размер неустойки явно завышен и не соответствует характеру вменяемого нарушения условий договора. Истец в исковом заявлении не приводит доводы о наступлении каких-либо неблагоприятных для него последствий в результате неоплаты работ. Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассчитанной по ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (статья 395).

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

В силу пунктов 1, 2, 3, 4 статьи 421 ГК. РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.

Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и ее пределах").

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду (пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора"). 

Между обществом с ограниченной ответственностью «ГРИАЛ» (исполнитель) и акционерным обществом «Бамтоннельстрой-Мост» (заказчик) 22.12.2022 заключен договор №141-Д/2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей TATRA. В соответствии с пунктом 1.4 договор признается сторонами рамочным, определяющим общие условия обязательственных отношений сторон, связанных с оказанием исполнителем услуг и поставкой товара (запасных частей и расходных материалов).

Заключенный сторонами договор на проведение технического обслуживания, ремонта автомобилей и поставки запасных частей является смешанным договором, т. к. содержит элементы договоров поставки, подряда и возмездного оказания услуг.

В силу статьи 429.1 ГК РФ рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Статья 779 ГК РФ предусматривает, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Предметом договора возмездного оказания услуг является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности. Исходя из норм пункта 1 статьи 779 ГК РФ и поскольку стороны в силу статьи 421 ГК РФ вправе определять условия договора по своему усмотрению, обязанности исполнителя по договору возмездного оказания услуг могут включать в себя не только совершение определенных действий (деятельности), но и представление заказчику результата своих действий.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ). Из пункта 1 статьи 711 ГК. РФ следует, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную иену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. На основании части 1 статьи 702, пункту 1 статьи 711 ГК РФ сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

В порядке статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Как следует из материалов дела, в соответствии с условиями Договора № 141-Д/2022 от 22.12.2022 , ООО «ГРИАЛ» оказало услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей TATRA, что подтверждается, актами выполненных работ, заказ-нарядами, счетами, принятыми и подписанными АО «БТС-Мост» без каких-либо возражений по объему, качеству услуг/работ на сумму 66 647 145,00 руб. Подпись должностных лиц заказчика заверена печатью организации.   

Обязательства по оплате ответчиком выполнены с нарушением согласованного в договоре срока, что не оспаривается ответчиком. В связи с чем, у АО «БТС-Мост» возникла обязанность по оплате неустойки (пени) перед ООО «ГРИАЛ».

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В пункте 5.5.2 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.08.2023) согласовано, что расчет за каждый отдельный объем фактически оказанных услуг (каждую поставленную партию товара) осуществляется заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в акте оказанных услуг либо товаросопроводительных документах.

Согласно пункту 7.5 договора в случае просрочки оплаты оказанных услуг исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

За просрочку оплаты ответчику начислены пени в сумме 3 391 910,82 руб. за период просрочки с 26.06.2023 по 19.09.2024:

ОПЛАТА

Срок оплаты

Период

просрочки

оплаты

Пени 0,1%

дата

дата

сумма

П. Заказ наряд

23.06.2023

115 000,00

26.06.2023

-

0,00

23.06.2023

38 880,00

П. Заказ наряд

23.06.2023

119 140,00

26.06.2023

-

0,00

23.06.2023

57 470,00

П. Заказ наряд

27.06.2023

401 580,00

26.06.2023

-

0,00

27.06.2023

53 310.00

П. Заказ наряд

26.06.2023

25 300,00

26.06.2023

-

0,00

26.06.2023

452 900,00

П. Заказ наряд

23.06.2023

14 720,00

26.06.2023

-

0,00

23.06.2023

44 100,00

П. Заказ наряд

25.08.2023

428 430,00

24.07.2023

25.07.2023 -25.08.2023

31 270,72

25.08.2023

548 780,00

П. Заказ наряд

06.09.2023

258 060,00

24.07.2023

25.07.2023 -06.09.2023

39 033,72

06.09.2023

629 070,00

П. Заказ наряд

24.08.2023

1 133 900,00

24.07.2023

25.07.2023 -24.08.2023

35 150,90

П. Заказ наряд

25.08.2023

150 880,00

24.07.2023

25.07.2023 -25.08.2023

19 847,36

25.08.2023

469 350,00

П. Заказ наряд

25.08.2023

129 720,00

24.07.2023

25.07.2023 -25.08.2023

5 800,64

25.08.2023

51 550,00

П. Заказ наряд

25.08.2023

473 340,00

28.07.2023

29.07.2023 -25.08.2023

13 320,16

25.08.2023

2 380,00

П. Заказ наряд

01.09.2023

451 720,00

28.07.2023

29.07.2023 -01.09.2023

34 932,10

01.09.2023

546 340,00

П. Заказ наряд

25.08.2023

257 140,00

28.07.2023

29.07.2023 -25.08.2023

24 462,90

25.08.2023

616 535,00

П. Заказ наряд

25.08.2023

165 140,00

28.07.2023

29.07.2023 -25.08.2023

6 260,24

25.08.2023

58 440,00

П. Заказ наряд

25.08.2023

218 960,00

31.07.2023

01.08.2023-25.08.2023

7 667,75

25.08.2023

87 750,00

П. Заказ наряд

25.08,2023

142 968,00

02.08.2023

03.08.2023 -25.08.2023

6 897,88

25.08.2023

156 940,00

П. Заказ наряд

04.09.2023

376 510,00

02.08.2023

03.08.2023 -04.09.2023

27 233,91

04.09.2023

448 760,00

П. Заказ наряд

25.08.2023

13 800,00

02.08.2023

03.08.2023 -25.08.2023

1 209,34

25.08.2023

38 780,00

П. Заказ наряд

04.09.2023

612 250,00

14.08.2023

15.08.2023-04.09.2023

12 857,25

П. Заказ наряд

21.11.2023

329 700,00

21.08.2023

22.08.2023 -21.11.2023

30 332,40

П. Заказ наряд

21.09.2023

632 168,00

21.08.2023

22.08.2023 -21.09.2023

19 597,21

П. Заказ наряд

21.11.2023

410 950,00

21.08.2023

22.08.2023 -21.11.2023

37 807,40

П. Заказ наряд

21.09.2023

1 557 975,00

28.08.2023

29.08.2023 -21.09.2023

37 391,40

П. Заказ наряд

21.09.2023

1 855 980,00

30.08.2023

31.08.2023-. 21.09.2023

40 831,56

П. Заказ наряд

21.11.2023

583 495,00

30.08.2023

31.08.2023-21.11.2023

48 430,09

П. Заказ наряд

21.11.2023

404 490,00

30.08.2023

31.08.2023-21.11.2023

33 572,67

П. Заказ наряд

21,11,2023

303 790,00

30.08.2023

31.08.2023-21.11.2023

25 214,57

П. Заказ наряд

21.09.2023

896 755,00

30.08.2023

31.08.2023-21.09.2023

19 728,61

П. Заказ наряд

21.11.2023

466 640,00

30.08.2023

31.08.2023-21.11.2023

38 731,12

П. Заказ наряд

22.11.2023

243 070,00

30.08.2023

31.08.2023-22.11.2023

20 174,81

П. Заказ наряд

21.09.2023

130 970,00

30.08.2023

31.08.2023-21.09.2023

2 881,34

П. Заказ наряд

22.11.2023

382 686,00

30.08.2023

31.08.2023-22.11.2023

32 145,62

П. Заказ наряд

21.11.2023

78 060,00

30.08.2023

31.08.2023-21.11.2023

6 557,04

П. Заказ наряд

29.11.2023

267 060,00

01.09.2023

02.09.2023 -29.11.2023

23 768,34

П. Заказ наряд

22.11.2023

186 820,00

04.09.2023

05.09.2023 -22.11.2023

14 758,78

П. Заказ наряд

22.11.2023

228 525,00

04.09.2023

05.09.2023 -22.11.2023

18 053,48

П. Заказ наряд

21.11.2023

846 640,00

11 09 202 J

12 09 2023 21 11 202?

60 111 Н

П. Заказ наряд

21.11.2023

536 710,00

11 09>02?

12 09>О23 11 11 2023

?Х 106 И

П. Заказ наряд

21.11.2023

260 160,00

11.09.2023

12.09.2023 -21.11.2023

18 471,36

П. Заказ наряд

21.11.2023

121 960,00

11.09.2023

12.09.2023 -21.11.2023

8 659,16

П. Заказ наряд

21.11.2023

402 025,00

25.09.2023

26.09.2023 -21.11.2023

22 915,43

П. Заказ наряд

21.11.2023

214 980,00

25.09.2023

26.09.2023 -21.11.2023

12 253,86

П. Заказ наряд

21.11.2023

345 970,00

25.09.2023

26.09.2023 -21.11.2023

19 720,29

П. Заказ наряд

21.11.2023

200 515,00

25.09.2023

26,09.2023 -21.11.2023

11 429,36

П. Заказ наряд

21.11.2023

236 440,00

25.09.2023

26.09.2023 -21.11.2023

13 477,08

П. Заказ наряд

21.11.2023

336 380,00

25.09.2023

26.09.2023 -21.11.2023

19 173,66

П. Заказ наряд

23.11.2023

418 700,00

25.09.2023

26.09.2023 -23.11.2023

24 703,30

П. Заказ наряд

24.11.2023

429 830,00

27.09.2023

28.09.2023 -24.11.2023

24 930,14

П. Заказ наряд

21.11.2023

694 630,00

27.09.2023

28.09.2023 -21.11.2023

38 204,65

П. Заказ наряд

23.11.2023

589 580,00

27.09.2023

28.09.2023 -23.11.2023

33 606,06

П. Заказ наряд

24.11.2023

240 980,00

28.09.2023

29.09.2023 -25.11.2023

13 976,84

П. Заказ наряд

06.12.2023

268 080,00

29.09.2023

30.09.2023 -06.12.2023

18 229,44

П. Заказ наряд

06.12.2023

348 520,00

02.10.2023

03.10.2023-06.12.2023

22 653,80

П. Заказ наряд

21.12.2023

122 150,00

02.10.2023

03.10.2023-21.12.2023

9 772,00

П. Заказ наряд

07.12.2023

231430.00

02.10.2023

03.10.2023-07.12.2023

15 274,38

П. Заказ наряд

23.01.2024

479 130,00

02.10.2023

03.10.2023-23.12.2023

39 288,66

П. Заказ наряд

21.12.2023

119 350,00

25.10.2023

26.10.2023-21.12.2023

6 802,95

П. Заказ наряд

24.01.2024

2 122 080,00

25.10.2023

26.10.2023-24.01.2024

193 109,28

П. Заказ наряд

24.01.2024

2 224 235,00

25.10.2023

26.10.2023-24.01.2024

202 405,39

П. Заказ наряд

24.01.2024

494 320,00

25.10.2023

26.10.2023-24.01.2024

44 983,12

П. Заказ наряд

06.12.2023

348 665,00

02.11.2023

03.11.2023-06.12.2023

11 854,61

П. Заказ наряд

06.12.2023

280 150,00

08.11.2023

09.11.2023-06.12.2023

7 844,20

П. Заказ наряд

29.11.2023

231 540,00

10.11.2023

11.11.2023-29.11.2023

4 399,26

П. Заказ наряд

01.12.2023

253 500,00

13.11.2023

14.11.2023-01.12.2023

4 563,00

П. Заказ наряд

29.11.2023

207 190,00

13.11.2023

14.11.2023-29.11.2023

3 315,04

П. Заказ наряд

29 11 2023

248 840,00

13.11 2023

14.11.2023-

3 981 44

. Заказ наряд

29.11.2023

195 580,00

13.11.2023

14.11.2023-

29.11.2023

3 129,28

П. Заказ наряд

23.01.2024

425 282,00

13.11.2023

14.11.2023-

23.01.2024

30 195,03

П. Заказ наряд

29.11.2023

149 500,00

20.11.2023

21.11.2023-

29.11.2023

1 345,50

П. Заказ наряд

21.12.2023

585 750,00

20.11.2023

21.11.2023 -

21.12.2023

18 158,25

П. Заказ наряд

29.11.2023

133 502,00

20.11.2023

21.11.2023-

29.11.2023

1 201,52

П. Заказ наряд

29.11.2023

236 440,00

22.11.2023

23.11.2023 –

29.11.2023

1 655,08

П. Заказ наряд

29.11.2023

230 752,00

27.11.2023

28.11.2023 –

29.11.2023

461,50

П. Заказ наряд

29.11.2023

122 522,00

27.11.2023

28.11.2023 -

29.11.2023

245,04

П. Заказ наряд

29.11.2023

97 740,00

27.11.2023

28.11.2023-

29.11.2023

195,48

П. Заказ наряд

29.11.2023

66 920,00

27.11.2023

28.11.2023 -

29.11.2023

133,84

П. Заказ наряд

21.12.2023

434 555,00

27.11.2023

28.11.2023 -

21.12.2023

10 429,32

П. Заказ наряд

24.01.2024

2 018 787,00

14.12.2023

15.12.2023-

24.01.2024

82 770,27

П. Заказ наряд

31.01.2024

2 717 742,00

14.12.2023

15.12.2023-

31.01.2024

130 451,61

П. Заказ наряд

23.01.2024

1 002 002,00

14.12.2023

15.12.2023-

23.01.2024

40 080,08

П. Заказ наряд

10.01.2024

120 722,00

15.12.2023

16.12.2023-

10.01.2024

3 138,77

П. Заказ наряд

22.12.2023

200 150,00

15.12.2023

16.12.2023-

22.12.2023

1 401,05

П. Заказ наряд

22.12.2023

209 960,00

21.12.2023

22.12.2023-

22.12.2023

209,96

П. Заказ наряд

22.12.2023

20 420,00

21.12.2023

22.12.2023-

22.12.2023

20,42

П. Заказ наряд

25.12.2023

368 330,00

21.12.2023

22.12.2023-

25,12.2023

1 473,32

П. Заказ наряд

22.12.2023

129 540,00

21.12.2023

22.12.2023-

22.12.2023

129,54

П. Заказ наряд

22.12.2023

267 230,00

22.12.2023

-

0,00

П. Заказ наряд

22.12.2023

143 400,00

25.12.2023

-

0,00

П. Заказ наряд

10.01.2024

101 720,00

27.12.2023

28.12.2023-

10.01.2024

1 424,08

П. Заказ наряд

30.12.2023

56 810,00

27.12.2023

28.12.2023-

30.12.2023

170,43

П. Заказ наряд

30.12.2023

359 100,00

28.12.2023

29.12.2023-

30.12.2023

718,20

П. Заказ наряд

10.01.2024

154 940,00

28.12.2023

29.12.2023-

10.01.2024

2 014,22

П. Заказ наряд

10.01.2024

106 370,00

28.12.2023

29.12.2023-

10.01.2024

1 382,81

П. Заказ наряд

24.01.2024

325 480,00

15.01.2024

16.01.2024-

24.01.2024

2 929,32

П. Заказ наряд

27.06.2024

353 280,00

15.01.2024

16.01.2024-

27.01.2024

4 239,36

П. Заказ наряд

31.01.2024

243 620,00

17.01.2024

18.01.2024-

31,01,2024

3 410,68

П. Заказ наряд

06.02.2024

398 680,00

17.01.2024

18.01.2024-

06.02.2024

7 937,60

П. Заказ наряд

06.02.2024

536 350,00

17.01.2024

18.01.2024-

06.02.2024

10 727,00

П. Заказ наряд

24.01.2024

263 370,00

18.01.2024

19.01.2024-

24.01.2024

1 580,22

П. Заказ наряд

06.02.2024

521 710,00

18.01.2024

19.01.2024-

06.02.2024

9 912,49

П. Заказ наряд

24.01.2024

294 510,00

18.01.2024

19.01.2024-

24.01.2024

1 767,06

П. Заказ наряд

24.01.2024

156 050,00

18.01.2024

19.01.2024-

24.01.2024

936,30

П. Заказ наряд

24.01.2024

173 170.00

18.01.2024

19.01.2024-

24.01.2024

1 039,02

П. Заказ наряд

14.03.2024

419 148,00

16.02.2024

17.02.2024-

14.03.2024

11 317,00

П. Заказ наряд

14.03.2024

438 666,00

19.02.2024

20.02.2024 

14.03.2024

10 527,98

П. Заказ наряд

14.02.2024

272 860,00

22.02.2024

-

0,00

П. Заказ наряд

14.02.2024

336 252,00

28.02.2024

-

0,00

П. Заказ наряд

14.02.2024

296 558,00

28.02.2024

-

0,00

П. Заказ наряд

25.03.2024

711628,00

28.02.2024

29.02.2024 -25.03.2024

18 502,33

П. Заказ наряд

14.03.2024

468 997,00

28.02.2024

29.02.2024 -14.03.2024

7 034,96

П. Заказ наряд

14.03.2024

516 828,00

29.02.2024 ,

01.03.2024-14.03.2024

7 235,59

П. Заказ наряд

14.02.2024

232 860,00

29.02.2024

-

0,00

П. Заказ наряд

05.07.2024

880 900,00

29.02.2024

01.03.2024-

05.07.2024

111 874,30

П. Заказ наряд

28.06.2024

515 620,00

15.03.2024

16.03.2024 -28.06.2024

54 140,10

П. Заказ наряд

01.07.2024

488 890,00

15.03.2024

16.03.2024 -01.07.2023

52 800,12

П. Заказ наряд

27.06.2024

255 603,00

18.03.2024

19.03.2024 -27.06.2024

25 815,90

П. Заказ наряд

02.07.2024

348 190,00

21.03.2024

22.03.2024 –

02.07.2024

36 908,14

П. Заказ наряд

27.06.2024

349 900,00

28.03.2024

29.03.2024 –

27.06.2024

32 190,80

П. Заказ наряд

28.06.2024

346 140,00

28.03.2024

29.03.2024 –

28.06.2024

31 844,88

П. Заказ наряд

27.06.2024

349 880,00

29.03.2024

30.03.2024 –

27.06.2024

31 489,20

П. Заказ наряд

27.06.2024

349 600,00

29.03.2024

30.03.2024 –

27.06.2024

31 464,00

П. Заказ наряд

27.06.2024

349 950,00

29.03.2024

30.03.2024 –

27.06.2024

31 495,50

П. Заказ наряд

27.06.2024

349 720,00

29.03.2024

30.03.2024 –

27.06,2024

31 474,80

П. Заказ наряд

27.06.2024

2 010 870,00

29.03.2024

30.03.2024 

-27.06.2024

180 978,30

П. Заказ наряд

26.06.2024

324 160,00

01.04.2024

02.04.2024 

-26.06.2024

27 877,76

П. Заказ наряд

27.06.2024

349360,00

01.04.2024

02.04.2024 

-27.06.2024

30 394,32

П. Заказ наряд

26.06.2024

181 903,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

10 368,47

П. Заказ наряд

26.06.2024

276 370,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

15 753,09

П. Заказ наряд

26.06.2024

68 200,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

3 887,40

П. Заказ наряд

26.06.2024

162 564,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

9 266,15

П. Заказ наряд

26.06.2024

349 788,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

19 937,92

П. Заказ наряд

26.06.2024

215 309,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

12 272,61

П. Заказ наряд

26.06.2024

206 850,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

11 790,45

П. Заказ наряд

26.06.2024

186 697,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

10 641,73

П. Заказ наряд

26.06.2024

276 070,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

15 735,99

П. Заказ наряд

26.06.2024

166 040,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

9 464,28

П. Заказ наряд

26.06.2024

123 540,00

30.04.2024

01.05.2024-

26.06.2024

7 041,78

П. Заказ наряд

26.06.2024

1 063 660,00

10.05.2024

11.05.2024-

26.06.2024

49 992,02

П. Заказ наряд

24.06.2024

117 580,00

27.05.2024

28.05.2024 

-24.06.2024

3 292,24

П. Заказ наряд

27.06.2024

86 122,00

27.05.2024

28.05.2024 

-27.06.2024

2 669,78

П. Заказ наряд

21.06.2024

170 530,00

27.05.2024

28.05.2024

-21.06.2024

4 263,25 .

П. Заказ наряд

21.06.2024

183 720,00

27.05.2024

28.05.2024 

-21.06.2024

4 593,00

П. Заказ наряд

21.06.2024

482 730,00

27.05.2024

28.05.2024-

21.06.2024

12 068,25

П. Заказ наряд

21.06.2024

528 203,00

27.05.2024

28.05.2024 

-21.06.2024

13 205,08

П. Заказ наряд

21.06.2024

184 720,00

27.05.2024

28.05.2024 

-21.06.2024

4 618,00

П. Заказ наряд

29.10.2024

1 008 410,00

17.06.2024

18.06.2024-

29.10.2024

135 126,94

П. Заказ наряд

29.10.2024

316 120,00

12.08.2024

13.08.2024-

29.10.2024

24 657,36

П. Заказ наряд

29.10.2024

116 169,00

12.08.2024

13.08.2024

29.10.2024

9061,18

П. Заказ наряд

29.10.2024

321 998,00

12.08.2024

13.08.2024-

29.10.2024

25 115,84

П. Заказ наряд

29.10.2024

1 178 759,00

14.08.2024

15.08.2024-

29.10.2024

89 585,68

П. Заказ наряд

29.10.2024

985 676,00

16.08.2024

17.08.2024-

29.10.2024

72 940,02

П. ЗавЯЗ наряд

29.10.2024

201 144,00

19.09.2024

20.09.2024 –

29.10.2024

8 045,76

ИТОГО

65 324 745,00

3 391910,82

Проверив уточненный расчет начисленной суммы пени, суд признает его верным.

Ссылка ответчика на обстоятельства, установленные налоговыми органами в ходе мероприятий налогового контроля при проверке исполнения налоговых обязательств перед бюджетом, значения для разрешения гражданско-правового спора не имеет.

Из материалов дела и представленных доказательств не усматривается, что истец вел себя недобросовестно, а его действия явно не соответствовали принципам статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Ответчик считает сумму неустойки завышенной и несоответствующей характеру нарушения условий договора, в связи с чем ходатайствует о снижении неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее также Постановление №7) подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса).

В данном случае степень соразмерности заявленной к взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд из принципа самостоятельности судебной власти вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения, обстоятельств конкретного дела и взаимоотношений сторон, что является достаточным для применения статьи 333 ГК РФ.

Заявление об уменьшении неустойки может быть сделано в любой форме (письменной или устной) и подлежит рассмотрению судом независимо от того, выражено ли оно в виде самостоятельного ходатайства. В частности, такое заявление может содержаться в отзыве на иск. Возражения должника относительно наличия оснований для взыскания неустойки и обоснованности ее размера сами по себе не считаются заявлением о снижении неустойки (п. 29 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020, п. 2 Обзора, утв. Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.07.1997 Jfe 17, определения Верховного Суда РФ от 06.03.2019 №» 305-ЭС18-20112, от 18.09.2018 № 44-КГ18-18).

Ответчик считает, что заявленный истцом размер неустойки явно завышен и не соответствует характеру вменяемого истцом Ответчику нарушения условий Договора. 

В пункте 77 Постановления №7, Пленум Верховного Суда Российской Федераций разъяснил, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Под явной несоразмерностью неустойки последствиям нарушения обязательства или необоснованной выгодой кредитора в первую очередь понимается значительное превышение суммы начисленной неустойки над размером действительных или возможных убытков кредитора (п.п. 73 и 74 Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

С учетом вышеизложенного, оценивая размер нарушенного обязательства, период просрочки оплаты и обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что начисление неустойки согласно пункту 7.5 Договора № 141-Д/2022 от 22.12.2022 в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств не является несоразмерным и завышенным. 

Таким образом, иск подлежит удовлетворению.

 Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска равна 126 757,00 руб.

Истцом при подаче заявления уплачена государственная пошлина в размере 126 840,00 руб. (платежное поручение №83 от 06.03.2025).

Учитывая результат рассмотрения дела – удовлетворение исковых требований, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 126 757,00 руб. подлежат отнесению на ответчика. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Бамтоннельстрой-Мост" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГРИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 391 910,82 руб. неустойки, 126 757,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ГРИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 83,00 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №83 от 06.03.2025.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щелокова