41/2017-59802(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А13-3069/2017

город Вологда

05 июня 2017 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области   

р е ш и л :

внести изменения в государственный контракт № 4-35 от 10.11.2016 на  разработку проектной документации на реконструкцию автодороги  Устюжна-Модно на участке км 30+150 – км 31+910 в Устюженском районе  Вологодской области следующего содержания:  

1. Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:  «3.1. Сроки выполнения работ по Контракту: Начало – с даты заключения Контракта. Окончание – до 30 октября 2017 года (включительно).». 

 2. Пункт 13.7. Контракта изложить в новой редакции следующего  содержания:  

 «13.7. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его  Сторонами и действует до 30 октября 2017 года (включительно). Окончание  срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по  Контракту в части взаимных расчетов, штрафных санкций и гарантийных  обязательств.».  

Взыскать с казенного учреждения Вологодской области «Управление  автомобильных дорог Вологодской области» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ЮгГипроТранс» 3 000 руб. 00 коп. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия судебного акта через  Арбитражный суд Вологодской области  

Судья Т.Б. Виноградова