Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-39599/24

13 августа 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть объявлена 08 июля 2024

Полный текст решения изготовлен 13 августа 2024

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Попова А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кадыровой Е.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРОЙКА ПЛЮС" (141701, Московская область, г.о. Долгопрудный, 

<

...>, эт. 3, помещ/офис НП-№5/18ОГРН: 1215000074728, ИНН: 

<

***>) к 

Администрация городского округа Пушкинский Московской области (141207, Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о продлении сроков муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений 

при участии согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО СЗ "ТРОЙКА ПЛЮС" обратилось в суд с исковым заявлением к Администрации городского округа Пушкинский Московской области со следующими требованиями: 

Внести в муниципальные контракты по приобретению жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, гражданам, переселяемым из аварийного жилья, заключенные между истцом ООО СЗ «Тройка Плюс» и ответчиком Администрацией городского округа Пушкинский Московской области, № 0848600003322000798-1 от 05.12.2022; № 0848600003322000800-1 от 05.12.2022; № 0848600003322000828-1 от 05.12.2022; № 0848600003322000805-1 от 06.12.2022; № 0848600003322000808-1 от 06.12.2022; № 0848600003322000817-1 от 06.12.2022; № 0848600003322000809-1 от 08.12.2022; № 0848600003322000810-1 от 08.12.2022; № 0848600003322000825-1 от 08.12.2022; № 0848600003322000797-1 от 09.12.2022; № 0848600003322000799-1 от 09.12.2022; № 0848600003322000811-1 от 09.12.2022; № 0848600003322000812-1 от 09.12.2022; № 0848600003322000806-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000821-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000823-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000824-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000829-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000813-1 от 13.12.2022; № 0848600003322000822-1 от 13.12.2022; № 0848600003322000827-1 от 13.12.2022; № 0848600003322000831-1 от 13.12.2022; № 0848600003322000802-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000803-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000814-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000830-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000815-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000826-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000880-1 от 19.12.2022; № 0848600003322000882-1 от 19.12.2022; № 0848600003322000883-1 от 19.12.2022; № 0848600003322000884-1 от 19.12.2022; № 0848600003322000888-1 от 22.12.2022; № 0848600003322000889-1 от 22.12.2022; № 0848600003322000890-1 от 22.12.2022; № 0848600003322000908-1 от 23.12.2022; № 0848600003322000911-1 от 23.12.2022; № 0848600003323000088-1 от 20.03.2023; № 0848600003323000091-1 от 22.03.2023; № 0848600003323000093-1 от 22.03.2023; № 0848600003323000094-1 от 22.03.2023; № 0848600003323000097-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000101-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000102-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000103-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000106-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000109-1 от 28.03.2023; № 0848600003323000113-1 от 28.03.2023; № 0848600003323000122-1 от 28.03.2023; № 0848600003323000100-1 от 30.03.2023; № 0848600003323000105-1 от 30.03.2023; № 0848600003323000108-1 от 30.03.2023; № 0848600003323000116-1 от 31.03.2023; № 0848600003323000117-1 от 31.03.2023; № 0848600003323000118-1 от 31.03.2023; № 0848600003323000121-1 от 31.03.2023; № 0848600003323000115-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000130-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000137-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000139-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000142-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000135-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000136-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000110-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000112-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000131-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000138-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000114-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000119-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000120-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000182-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000184-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000190-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000180-1 от 11.04.2023; № 0848600003323000191-1 от 11.04.2023; № 0848600003323000259-1 от 17.04.2023; № 0848600003323000228-1 от 19.04.2023; № 0848600003323000258-1 от 21.04.2023; № 0848600003323000260-1 от 21.04.2023; № 0848600003323000261-1 от 21.04.2023; № 0848600003323000263-1 от 21.04.2023; № 0848600003323000262-1 от 24.04.2023; № 0848600003323000266-1 от 24.04.2023; № 0848600003323000279-1 от 25.04.2023; № 0848600003323000303-1 от 25.04.2023; № 0848600003323000307-1 от 25.04.2023; № 0848600003323000305-1 от 26.04.2023; № 0848600003323000304-1 от 28.04.2023; № 0848600003323000306-1 от 28.04.2023; № 0848600003323000365-1 от 15.05.2023; № 0848600003323000362-1 от 17.05.2023; № 0848600003323000367-1 от 17.05.2023; № 0848600003323000368-1 от 17.05.2023; № 0848600003323000364-1 от 22.05.2023; № 0848600003323000360-1 от 23.05.2023; № 0848600003323000430-1 от 29.05.2023; № 0848600003323000431-1 от 29.05.2023; № 0848600003323000456-1 от 02.06.2023; № 0848600003323000468-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000469-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000471-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000472-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000473-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000475-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000474-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000483-1 от 06.06.2023; № 0848600003323000511-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000512-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000513-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000515-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000514-1 от 15.06.2023; № 0848600003323000518-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000516-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000520-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000526-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000527-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000622-1 от 29.06.2023; № 0848600003323000623-1 от 29.06.2023; № 0848600003323000625-1 от 29.06.2023; № 0848600003323000620-1 от 30.06.2023; № 0848600003323000624-1 от 30.06.2023; № 0848600003323000602-1 от 04.07.2023; № 0848600003323000593-1 от 05.07.2023; № 0848600003323000598-1 от 05.07.2023; № 0848600003323000639-1 от 05.07.2023; № 0848600003323000642-1 от 07.07.2023; № 0848600003323000644-1 от 07.07.2023; № 0848600003323000659-1 от 12.07.2023; № 0848600003323000613-1 от 17.07.2023; № 0848600003323000616-1 от 17.07.2023; № 0848600003323000655-1 от 17.07.2023; № 0848600003323000614-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000615-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000656-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000682-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000692-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000694-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000668-1 от 21.07.2023; № 0848600003323000766-1 от 25.07.2023; № 0848600003323000767-1 от 25.07.2023; № 0848600003323000780-1 от 04.08.2023; № 0848600003323000781-1 от 04.08.2023; № 0848600003323000787-1 от 04.08.2023; № 0848600003323000832-1 от 15.08.2023; № 0848600003323000833-1 от 15.08.2023; № 0848600003323000835-1 от 15.08.2023; № 0848600003323000839-1 от 15.08.2023; № 0848600003323000828-1 от 16.08.2023; № 0848600003323000772-1 от 17.08.2023; № 0848600003323000840-1 от 18.08.2023; № 0848600003323000842-1 от 18.08.2023; № 0848600003323000846-1 от 18.08.2023; № 0848600003323000847-1 от 18.08.2023; № 0848600003323000838-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000843-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000848-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000849-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000853-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000845-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000851-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000852-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000850-1 от 23.08.2023; № 0848600003323000844-1 от 24.08.2023; № 0848600003323000862-1 от 25.08.2023; № 0848600003323000863-1 от 25.08.2023; № 0848600003323000878-1 от 25.08.2023; № 0848600003323000868-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000873-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000877-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000869-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000876-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000870-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000872-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000881-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000971-1 от 26.09.2023; № 0848600003323000996-1 от 26.09.2023; № 0848600003323001019-1 от 02.10.2023; № 0848600003323001093-1 от 23.10.2023; № 0848600003323001220-1 от 24.11.2023; № 0848600003323001223-1 от 24.11.2023; № 0848600003323001225-1 от 24.11.2023; № 0848600003323001228-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001229-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001230-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001231-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001234-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001235-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001236-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001237-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001238-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001241-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001243-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001245-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001246-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001247-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001248-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001249-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001251-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001252-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001253-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001254-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001255-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001256-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001257-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001258-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001260-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001261-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001264-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001265-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001266-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001267-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001268-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001269-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001270-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001271-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001272-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001273-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001278-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001280-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001283-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001284-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001285-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001286-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001287-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001290-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001293-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001294-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001295-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001296-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001297-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001298-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001299-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001300-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001301-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001302-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001303-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001304-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001305-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001306-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001307-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001308-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001309-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001310-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001311-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001279-1 от 06.12.2023; № 0848600003323001281-1 от 06.12.2023; № 0848600003323001282-1 от 06.12.2023; № 0848600003323001319-1 от 08.12.2023; № 0848600003323001320-1 от 08.12.2023; № 0848600003323001321-1 от 08.12.2023 следующие изменения:

1.         Пункт 3.2 муниципальных контрактов изложить в следующей редакции: «Срок исполнения Продавцом своих обязательств по настоящему Контракту: с момента подписания Контракта до 01.08.2024 года».

2.         В разделе 1 Приложение 2 к муниципальным контрактам «График выполнения обязательств по контракту» изложить в новой редакции с учетом изменения сроков исполнения обязательств Продавцом:

«Срок окончания исполнения обязательства Продавцом: 01.08.2024».

В судебное заседание явку обеспечили истец и ответчик.

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, с 05.12.2022 по 08.12.2023 между истцом (продавец) и ответчиком (покупатель) на основании протоколов подведения итогов открытых аукционов заключено 250 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилья, в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 №182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области на 2019-2025 годы», муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пушкинский от 17.11.2021 № 1048-ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022 -2026 годы»:

№ 0848600003322000798-1 от 05.12.2022; № 0848600003322000800-1 от 05.12.2022;

№ 0848600003322000828-1 от 05.12.2022; № 0848600003322000805-1 от 06.12.2022;

№ 0848600003322000808-1 от 06.12.2022; № 0848600003322000817-1 от 06.12.2022;

№ 0848600003322000809-1 от 08.12.2022; № 0848600003322000810-1 от 08.12.2022;

№ 0848600003322000825-1 от 08.12.2022; № 0848600003322000797-1 от 09.12.2022;

№ 0848600003322000799-1 от 09.12.2022; № 0848600003322000811-1 от 09.12.2022;

№ 0848600003322000812-1 от 09.12.2022; № 0848600003322000806-1 от 12.12.2022;

№ 0848600003322000821-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000823-1 от 12.12.2022;

№ 0848600003322000824-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000829-1 от 12.12.2022;

№ 0848600003322000813-1 от 13.12.2022; № 0848600003322000822-1 от 13.12.2022;

№ 0848600003322000827-1 от 13.12.2022; № 0848600003322000831-1 от 13.12.2022;

№ 0848600003322000802-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000803-1 от 16.12.2022;

№ 0848600003322000814-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000830-1 от 16.12.2022;

№ 0848600003322000815-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000826-1 от 16.12.2022;

№ 0848600003322000880-1 от 19.12.2022; № 0848600003322000882-1 от 19.12.2022;

№ 0848600003322000883-1 от 19.12.2022; № 0848600003322000884-1 от 19.12.2022;

№ 0848600003322000888-1 от 22.12.2022; № 0848600003322000889-1 от 22.12.2022;

№ 0848600003322000890-1 от 22.12.2022; № 0848600003322000908-1 от 23.12.2022;

№ 0848600003322000911-1 от 23.12.2022; № 0848600003323000088-1 от 20.03.2023;

№ 0848600003323000091-1 от 22.03.2023; № 0848600003323000093-1 от 22.03.2023;

№ 0848600003323000094-1 от 22.03.2023; № 0848600003323000097-1 от 27.03.2023;

№ 0848600003323000101-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000102-1 от 27.03.2023;

№ 0848600003323000103-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000106-1 от 27.03.2023;

№ 0848600003323000109-1 от 28.03.2023; № 0848600003323000113-1 от 28.03.2023;

№ 0848600003323000122-1 от 28.03.2023; № 0848600003323000100-1 от 30.03.2023;

№ 0848600003323000105-1 от 30.03.2023; № 0848600003323000108-1 от 30.03.2023;

№ 0848600003323000116-1 от 31.03.2023; № 0848600003323000117-1 от 31.03.2023;

№ 0848600003323000118-1 от 31.03.2023; № 0848600003323000121-1 от 31.03.2023;

№ 0848600003323000115-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000130-1 от 03.04.2023;

№ 0848600003323000137-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000139-1 от 03.04.2023;

№ 0848600003323000142-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000135-1 от 06.04.2023;

№ 0848600003323000136-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000110-1 от 06.04.2023;

№ 0848600003323000112-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000131-1 от 06.04.2023;

№ 0848600003323000138-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000114-1 от 10.04.2023;

№ 0848600003323000119-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000120-1 от 10.04.2023;

№ 0848600003323000182-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000184-1 от 10.04.2023;

№ 0848600003323000190-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000180-1 от 11.04.2023;

№ 0848600003323000191-1 от 11.04.2023; № 0848600003323000259-1 от 17.04.2023;

№ 0848600003323000228-1 от 19.04.2023; № 0848600003323000258-1 от 21.04.2023;

№ 0848600003323000260-1 от 21.04.2023; № 0848600003323000261-1 от 21.04.2023;

№ 0848600003323000263-1 от 21.04.2023; № 0848600003323000262-1 от 24.04.2023;

№ 0848600003323000266-1 от 24.04.2023; № 0848600003323000279-1 от 25.04.2023;

№ 0848600003323000303-1 от 25.04.2023; № 0848600003323000307-1 от 25.04.2023;

№ 0848600003323000305-1 от 26.04.2023; № 0848600003323000304-1 от 28.04.2023;

№ 0848600003323000306-1 от 28.04.2023; № 0848600003323000365-1 от 15.05.2023;

№ 0848600003323000362-1 от 17.05.2023; № 0848600003323000367-1 от 17.05.2023;

№ 0848600003323000368-1 от 17.05.2023; № 0848600003323000364-1 от 22.05.2023;

№ 0848600003323000360-1 от 23.05.2023; № 0848600003323000430-1 от 29.05.2023;

№ 0848600003323000431-1 от 29.05.2023; № 0848600003323000456-1 от 02.06.2023;

№ 0848600003323000468-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000469-1 от 05.06.2023;

№ 0848600003323000471-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000472-1 от 05.06.2023;

№ 0848600003323000473-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000475-1 от 05.06.2023;

№ 0848600003323000474-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000483-1 от 06.06.2023;

№ 0848600003323000511-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000512-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000513-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000515-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000514-1 от 15.06.2023; № 0848600003323000518-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000516-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000520-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000526-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000527-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000622-1 от 29.06.2023; № 0848600003323000623-1 от 29.06.2023;

№ 0848600003323000625-1 от 29.06.2023; № 0848600003323000620-1 от 30.06.2023;

№ 0848600003323000624-1 от 30.06.2023; № 0848600003323000602-1 от 04.07.2023;

№ 0848600003323000593-1 от 05.07.2023; № 0848600003323000598-1 от 05.07.2023;

№ 0848600003323000639-1 от 05.07.2023; № 0848600003323000642-1 от 07.07.2023;

№ 0848600003323000644-1 от 07.07.2023; № 0848600003323000659-1 от 12.07.2023;

№ 0848600003323000613-1 от 17.07.2023; № 0848600003323000616-1 от 17.07.2023;

№ 0848600003323000655-1 от 17.07.2023; № 0848600003323000614-1 от 18.07.2023;

№ 0848600003323000615-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000656-1 от 18.07.2023;

№ 0848600003323000682-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000692-1 от 18.07.2023;

№ 0848600003323000694-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000668-1 от 21.07.2023;

№ 0848600003323000766-1 от 25.07.2023; № 0848600003323000767-1 от 25.07.2023;

№ 0848600003323000780-1 от 04.08.2023; № 0848600003323000781-1 от 04.08.2023;

№ 0848600003323000787-1 от 04.08.2023; № 0848600003323000832-1 от 15.08.2023;

№ 0848600003323000833-1 от 15.08.2023; № 0848600003323000835-1 от 15.08.2023;

№ 0848600003323000839-1 от 15.08.2023; № 0848600003323000828-1 от 16.08.2023;

№ 0848600003323000772-1 от 17.08.2023; № 0848600003323000840-1 от 18.08.2023;

№ 0848600003323000842-1 от 18.08.2023; № 0848600003323000846-1 от 18.08.2023;

№ 0848600003323000847-1 от 18.08.2023; № 0848600003323000838-1 от 21.08.2023;

№ 0848600003323000843-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000848-1 от 21.08.2023;

№ 0848600003323000849-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000853-1 от 21.08.2023;

№ 0848600003323000845-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000851-1 от 21.08.2023;

№ 0848600003323000852-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000850-1 от 23.08.2023;

№ 0848600003323000844-1 от 24.08.2023; № 0848600003323000862-1 от 25.08.2023;

№ 0848600003323000863-1 от 25.08.2023; № 0848600003323000878-1 от 25.08.2023;

№ 0848600003323000868-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000873-1 от 28.08.2023;

№ 0848600003323000877-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000869-1 от 28.08.2023;

№ 0848600003323000876-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000870-1 от 28.08.2023;

№ 0848600003323000872-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000881-1 от 28.08.2023;

№ 0848600003323000971-1 от 26.09.2023; № 0848600003323000996-1 от 26.09.2023;

№ 0848600003323001019-1 от 02.10.2023; № 0848600003323001093-1 от 23.10.2023;

№ 0848600003323001220-1 от 24.11.2023; № 0848600003323001223-1 от 24.11.2023;

№ 0848600003323001225-1 от 24.11.2023; № 0848600003323001228-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001229-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001230-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001231-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001234-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001235-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001236-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001237-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001238-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001241-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001243-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001245-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001246-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001247-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001248-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001249-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001251-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001252-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001253-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001254-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001255-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001256-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001257-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001258-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001260-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001261-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001264-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001265-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001266-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001267-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001268-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001269-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001270-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001271-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001272-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001273-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001278-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001280-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001283-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001284-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001285-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001286-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001287-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001290-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001293-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001294-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001295-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001296-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001297-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001298-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001299-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001300-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001301-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001302-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001303-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001304-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001305-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001306-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001307-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001308-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001309-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001310-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001311-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001279-1 от 06.12.2023; № 0848600003323001281-1 от 06.12.2023;

№ 0848600003323001282-1 от 06.12.2023; № 0848600003323001319-1 от 08.12.2023;

№ 0848600003323001320-1 от 08.12.2023; № 0848600003323001321-1 от 08.12.2023.

В соответствии с пунктом 1.1 контрактов продавец обязуется передать покупателю принадлежащие на праве собственности продавцу в собственность покупателя 250 жилых помещений в виде квартир в жилом доме по адресу: Московская область, городской округ Пушкинский, 

<

...>., а покупатель обязуется принять 250 квартир и оплатить их.

Сроки выполнения контрактов указаны в пункте 3.2 контрактов и в разделе 1 Приложения 2 к контрактам «График выполнения обязательств по контракту»: с 30.11.2023 до 11.12.2023.

Как указывает истец, во время действия муниципальных контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения в установленный срок.

Истец обращался письмами от 09.11.2023, от 16.11.2023 к ответчику с предложением изменить срок исполнения контрактов.

Оставление предложений без реагирования послужило основанием для обращения истца с настоящими требованиями в суд.

В соответствии с п. 8 ст. 448 ГК РФ условия договора, заключенного по результатам торгов в случаях, когда его заключение в соответствии с законом допускается только путем проведения торгов, могут быть изменены сторонами:

1) по основаниям, установленным законом;

2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

Статья 451 ГК РФ определяет изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Согласно п. 4 ст. 451 ГК РФ изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом в обоснование заявленных требований представлены:

- письмо от Карачаевского механического завода от 13.09.2023 в адрес ООО «МР Старт» об увеличении срока производства лифтового оборудования в связи с долговой поставкой импортных комплектующих из-за экономических санкций в отношении Российской Федерации; указаны новые сроки поставки;

- письмо от 18.09.2023 ООО «МР Старт» в адрес ООО «СтройИнвест» об увеличении сроков выполнения монтажных работ, не ранее марта 2024 года, в связи с задержкой поставок импортных комплектующих,

- письмо ООО «Электротехнологии» от 15.10.2023 в адрес ООО «АВР Технология» об увеличении до 3-х месяцев срока поставки оборудования из-за экономической ситуации в Российской Федерации,

- письмо ООО АВР Технология от 16.10.2023 в адрес ООО СЗ Тройка Плюс об увеличении срока выполнения работ по договору подряда в связи с увеличением сроков поставки строительных материалов и комплектующих с заводов изготовителей и увеличением сроков изготовления изделий и оборудования заводами-изготовителями,

- письмо от ООО «ГК ПрофЭлектро» от 15.11.2023 об увеличении из за санкций в отношении Российской Федерации срока производства индивидуальных материалов для выключателя автоматического дифференциального тока, светильника светодиодного, ближайшая поставки запланирована на февраль-март 2024 г.;

- - письмо от ООО «НБ Групп» от 14.10.2023 в адрес ООО «СК Сафари» о наличии задержки на 4 месяца оборудования, задержки связан с поставкой импортных комплектующих из-за мировой политической и экономической ситуации;

- письмо ООО «СК Сафари» от 23.10.2023 в адрес ООО СЗ «Тройка Плюс» об увеличении сроков выполнения работ по договору подряда в связи с увеличением сроков поставки строительных материалов и комплектующих с заводов изготовителей и увеличением сроков изготовления изделий и оборудования заводами-изготовителями,

- письмо от ООО «Московский Системы Безопасности Плюс» от 05.04.2024 об увеличении сроков поставки на оборудование и комплектующие данные производителей в связи с действием ограничительных мер, введенных государствами и международными организациями в отношении Российской Федерации,

- договор подряда от 09.09.2023 № 07/09-К, заключенный между ООО Стройинвест и ООО СК Сафари (монтаж вентиляционной системы),

- договор подряда № 12/09-К от 12.09.2023 между ООО Стройинвест и ООО АВР Технология (слаботочные системы и оборудование),

- договор генерального подряда на строительство от 13.06.2022 № 1-СР между ООО Тройка Плюс и ООО Стройинвест,

- договор № 11/23 от 27.06.2023 на поставку лифтового оборудования и выполнения работ между ООО Стройинвест и ООО «МР Старт».

Ответчиком представленные истцом доказательства не оспорены и иными доказательствами не опровергнуты.

Таким образом, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждается существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, что может по смыслу действующего законодательства являться основанием для внесения изменений в заключенные на торгах контракты.

При этом суд также отмечает, что Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" дополнена частью 65.1.

Согласно указанной правовой норме (в действующей редакции) по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации в 2022, 2023 и 2024 годах вправе принимать решения, предусматривающие установление порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с пп. «а» п. 1 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов (далее - контракт), предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2024 годах допускаются следующие изменения существенных условий контракта: изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ранее изменялся.

Таким образом, действующее законодательство допускает возможность внесения изменений в муниципальные контракты в части продления срока их исполнения.

Доводы ответчика о том, что неисполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами повлечет причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и государства, которые в данном случае выразится в существенном нарушении жилищных прав граждан, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья; неосвоении бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории г.о. Пушкинский Московской области, наступление финансовой ответственности бюджета муниципального образования, подлежат отклонению судом как документально неподтвержденные, основанные на неверном толковании норм материального права.

Доказательств нарушения прав ответчика продлением срока исполнения контракта суду не представлено, как и не представлено доказательств причинения вреда охраняемым законом общественным интересам.

Доказательств недобросовестного поведения истца и злоупотребления им своими правами суду также не представлено.

Суд принимает во внимание положения п. 4 ст. 451 ГК РФ, а потому полагает обоснованными исковые требования об изменении контрактов в части продления срока исполнения, поскольку расторжение контрактов противоречит общественным интересам, а именно социально значимым интересам в реализации государственных и муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Заявленный истцом срок исполнения продавцом своих обязательств до 01.08.2024, с учетом представленных в материалы дела доказательств, подтверждающих увеличение сроков поставки и выполнения работ, судом признается разумным, обоснованным и соответствующим указанным обстоятельствам.

В соответствии с п. 3 ст. 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора в судебном порядке обязательства считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора, если этим решением не предусмотрена дата, с которой обязательства считаются соответственно измененными или прекращенными.

На основании изложенного, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд признает обоснованным иск удовлетворить.

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Внести в муниципальные контракты по приобретению жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, гражданам, переселяемым из аварийного жилья, заключенные между ООО СЗ «Тройка Плюс» и Администрацией городского округа Пушкинский Московской области,

№ 0848600003322000798-1 от 05.12.2022; № 0848600003322000800-1 от 05.12.2022;

№ 0848600003322000828-1 от 05.12.2022; № 0848600003322000805-1 от 06.12.2022;

№ 0848600003322000808-1 от 06.12.2022; № 0848600003322000817-1 от 06.12.2022;

№ 0848600003322000809-1 от 08.12.2022; № 0848600003322000810-1 от 08.12.2022;

№ 0848600003322000825-1 от 08.12.2022; № 0848600003322000797-1 от 09.12.2022;

№ 0848600003322000799-1 от 09.12.2022; № 0848600003322000811-1 от 09.12.2022;

№ 0848600003322000812-1 от 09.12.2022; № 0848600003322000806-1 от 12.12.2022;

№ 0848600003322000821-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000823-1 от 12.12.2022;

№ 0848600003322000824-1 от 12.12.2022; № 0848600003322000829-1 от 12.12.2022;

№ 0848600003322000813-1 от 13.12.2022; № 0848600003322000822-1 от 13.12.2022;

№ 0848600003322000827-1 от 13.12.2022; № 0848600003322000831-1 от 13.12.2022;

№ 0848600003322000802-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000803-1 от 16.12.2022;

№ 0848600003322000814-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000830-1 от 16.12.2022;

№ 0848600003322000815-1 от 16.12.2022; № 0848600003322000826-1 от 16.12.2022;

№ 0848600003322000880-1 от 19.12.2022; № 0848600003322000882-1 от 19.12.2022;

№ 0848600003322000883-1 от 19.12.2022; № 0848600003322000884-1 от 19.12.2022;

№ 0848600003322000888-1 от 22.12.2022; № 0848600003322000889-1 от 22.12.2022;

№ 0848600003322000890-1 от 22.12.2022; № 0848600003322000908-1 от 23.12.2022;

№ 0848600003322000911-1 от 23.12.2022 следующие изменения:

- пункт 3.2 муниципальных контрактов изложить в следующей редакции:

«3.2. Срок исполнения Продавцом своих обязательств по настоящему Контракту: с момента подписания Контракта до 01.08.2024 года».

- в разделе 1 Приложения 2 к муниципальным контрактам «График выполнения обязательств по контракту» предложение «Срок окончания исполнения обязательства Исполнителем / Поставщиком: 07.12.2023 (МСК);» заменить на «Срок окончания исполнения обязательства Продавцом: 01.08.2024».

 

Внести в муниципальные контракты по приобретению жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, гражданам, переселяемым из аварийного жилья, заключенные между ООО СЗ «Тройка Плюс» и Администрацией городского округа Пушкинский Московской области,

№ 0848600003323000088-1 от 20.03.2023;

№ 0848600003323000091-1 от 22.03.2023; № 0848600003323000093-1 от 22.03.2023;

№ 0848600003323000094-1 от 22.03.2023; № 0848600003323000097-1 от 27.03.2023;

№ 0848600003323000101-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000102-1 от 27.03.2023;

№ 0848600003323000103-1 от 27.03.2023; № 0848600003323000106-1 от 27.03.2023;

№ 0848600003323000109-1 от 28.03.2023; № 0848600003323000113-1 от 28.03.2023;

№ 0848600003323000122-1 от 28.03.2023; № 0848600003323000100-1 от 30.03.2023;

№ 0848600003323000105-1 от 30.03.2023; № 0848600003323000108-1 от 30.03.2023;

№ 0848600003323000116-1 от 31.03.2023; № 0848600003323000117-1 от 31.03.2023;

№ 0848600003323000118-1 от 31.03.2023; № 0848600003323000121-1 от 31.03.2023;

№ 0848600003323000115-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000130-1 от 03.04.2023;

№ 0848600003323000137-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000139-1 от 03.04.2023;

№ 0848600003323000142-1 от 03.04.2023; № 0848600003323000135-1 от 06.04.2023;

№ 0848600003323000136-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000110-1 от 06.04.2023;

№ 0848600003323000112-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000131-1 от 06.04.2023;

№ 0848600003323000138-1 от 06.04.2023; № 0848600003323000114-1 от 10.04.2023;

№ 0848600003323000119-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000120-1 от 10.04.2023;

№ 0848600003323000182-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000184-1 от 10.04.2023;

№ 0848600003323000190-1 от 10.04.2023; № 0848600003323000180-1 от 11.04.2023;

№ 0848600003323000191-1 от 11.04.2023; № 0848600003323000259-1 от 17.04.2023;

№ 0848600003323000228-1 от 19.04.2023; № 0848600003323000258-1 от 21.04.2023;

№ 0848600003323000260-1 от 21.04.2023; № 0848600003323000261-1 от 21.04.2023;

№ 0848600003323000263-1 от 21.04.2023; № 0848600003323000262-1 от 24.04.2023;

№ 0848600003323000266-1 от 24.04.2023; № 0848600003323000279-1 от 25.04.2023;

№ 0848600003323000303-1 от 25.04.2023; № 0848600003323000307-1 от 25.04.2023;

№ 0848600003323000305-1 от 26.04.2023; № 0848600003323000304-1 от 28.04.2023;

№ 0848600003323000306-1 от 28.04.2023; № 0848600003323000365-1 от 15.05.2023;

№ 0848600003323000362-1 от 17.05.2023; № 0848600003323000367-1 от 17.05.2023;

№ 0848600003323000368-1 от 17.05.2023; № 0848600003323000364-1 от 22.05.2023;

№ 0848600003323000360-1 от 23.05.2023; № 0848600003323000430-1 от 29.05.2023;

№ 0848600003323000431-1 от 29.05.2023; № 0848600003323000456-1 от 02.06.2023;

№ 0848600003323000468-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000469-1 от 05.06.2023;

№ 0848600003323000471-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000472-1 от 05.06.2023;

№ 0848600003323000473-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000475-1 от 05.06.2023;

№ 0848600003323000474-1 от 05.06.2023; № 0848600003323000483-1 от 06.06.2023;

№ 0848600003323000511-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000512-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000513-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000515-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000514-1 от 15.06.2023; № 0848600003323000518-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000516-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000520-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000526-1 от 13.06.2023; № 0848600003323000527-1 от 13.06.2023;

№ 0848600003323000622-1 от 29.06.2023; № 0848600003323000623-1 от 29.06.2023;

№ 0848600003323000625-1 от 29.06.2023; № 0848600003323000620-1 от 30.06.2023;

№ 0848600003323000624-1 от 30.06.2023; № 0848600003323000602-1 от 04.07.2023;

№ 0848600003323000593-1 от 05.07.2023; № 0848600003323000598-1 от 05.07.2023;

№ 0848600003323000639-1 от 05.07.2023; № 0848600003323000642-1 от 07.07.2023;

№ 0848600003323000644-1 от 07.07.2023; № 0848600003323000659-1 от 12.07.2023;

№ 0848600003323000613-1 от 17.07.2023; № 0848600003323000616-1 от 17.07.2023;

№ 0848600003323000655-1 от 17.07.2023; № 0848600003323000614-1 от 18.07.2023;

№ 0848600003323000615-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000656-1 от 18.07.2023;

№ 0848600003323000682-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000692-1 от 18.07.2023;

№ 0848600003323000694-1 от 18.07.2023; № 0848600003323000668-1 от 21.07.2023;

№ 0848600003323000766-1 от 25.07.2023; № 0848600003323000767-1 от 25.07.2023;

№ 0848600003323000780-1 от 04.08.2023; № 0848600003323000781-1 от 04.08.2023;

№ 0848600003323000787-1 от 04.08.2023; № 0848600003323000832-1 от 15.08.2023;

№ 0848600003323000833-1 от 15.08.2023; № 0848600003323000835-1 от 15.08.2023;

№ 0848600003323000839-1 от 15.08.2023; № 0848600003323000828-1 от 16.08.2023;

№ 0848600003323000772-1 от 17.08.2023; № 0848600003323000840-1 от 18.08.2023;

№ 0848600003323000842-1 от 18.08.2023; № 0848600003323000846-1 от 18.08.2023;

№ 0848600003323000847-1 от 18.08.2023; № 0848600003323000838-1 от 21.08.2023;

№ 0848600003323000843-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000848-1 от 21.08.2023;

№ 0848600003323000849-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000853-1 от 21.08.2023;

№ 0848600003323000845-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000851-1 от 21.08.2023;

№ 0848600003323000852-1 от 21.08.2023; № 0848600003323000850-1 от 23.08.2023;

№ 0848600003323000844-1 от 24.08.2023; № 0848600003323000862-1 от 25.08.2023;

№ 0848600003323000863-1 от 25.08.2023; № 0848600003323000878-1 от 25.08.2023;

№ 0848600003323000868-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000873-1 от 28.08.2023;

№ 0848600003323000877-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000869-1 от 28.08.2023;

№ 0848600003323000876-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000870-1 от 28.08.2023;

№ 0848600003323000872-1 от 28.08.2023; № 0848600003323000881-1 от 28.08.2023;

№ 0848600003323000971-1 от 26.09.2023; № 0848600003323000996-1 от 26.09.2023;

№ 0848600003323001019-1 от 02.10.2023; № 0848600003323001093-1 от 23.10.2023

следующее изменение:

- в разделе 1 Приложения 2 к муниципальным контрактам «График выполнения обязательств по контракту» предложение «Срок окончания поставки товара Поставщиком: 30.11.2023 (МСК);» заменить на «Срок окончания поставки товара Поставщиком: 01.08.2024».

 

Внести в муниципальные контракты по приобретению жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, гражданам, переселяемым из аварийного жилья, заключенные между ООО СЗ «Тройка Плюс» и Администрацией городского округа Пушкинский Московской области,

№ 0848600003323001220-1 от 24.11.2023; № 0848600003323001223-1 от 24.11.2023;

№ 0848600003323001225-1 от 24.11.2023; № 0848600003323001228-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001229-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001230-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001231-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001234-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001235-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001236-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001237-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001238-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001241-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001243-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001245-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001246-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001247-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001248-1 от 27.11.2023;

№ 0848600003323001249-1 от 27.11.2023; № 0848600003323001251-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001252-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001253-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001254-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001255-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001256-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001257-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001258-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001260-1 от 28.11.2023;

№ 0848600003323001261-1 от 28.11.2023; № 0848600003323001264-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001265-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001266-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001267-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001268-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001269-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001270-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001271-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001272-1 от 01.12.2023;

№ 0848600003323001273-1 от 01.12.2023; № 0848600003323001278-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001280-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001283-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001284-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001285-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001286-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001287-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001290-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001293-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001294-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001295-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001296-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001297-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001298-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001299-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001300-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001301-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001302-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001303-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001304-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001305-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001306-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001307-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001308-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001309-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001310-1 от 05.12.2023; № 0848600003323001311-1 от 05.12.2023;

№ 0848600003323001279-1 от 06.12.2023; № 0848600003323001281-1 от 06.12.2023;

№ 0848600003323001282-1 от 06.12.2023; № 0848600003323001319-1 от 08.12.2023;

№ 0848600003323001320-1 от 08.12.2023; № 0848600003323001321-1 от 08.12.2023

следующее изменение:

- в разделе 1 Приложения 2 к муниципальным контрактам «График выполнения обязательств по контракту» предложение «Срок окончания исполнения обязательства: 04.12.2023 (МСК);» заменить на «Срок окончания исполнения обязательства: 01.08.2024».

 

Решение может быть обжаловано.

 

Судья                                                       А.А. Попов