110/2020-34462(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-25359/2019

г. Хабаровск

10 марта 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Краевого  государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства  строительства Хабаровского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  адрес: 680021, 

<

...>)  

к Акционерному обществу «ГИПРОЗДРАВ» - Научно-проектный  центр по объектам здравоохранения и отдыха» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; адрес: 117246, 

<

...>)  

об устранении недостатков выполненных работ и взыскании судебной  неустойки  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Обязать Акционерное общество «ГИПРОЗДРАВ» - Научно-проектный  

центр по объектам здравоохранения и отдыха» в срок до 01 июня 2020 года  

устранить недостатки выполненных работ по контракту от 14.12.2016   № 0122200002516008621-ОК, а именно:  

1) Генеральный план (0122200002516008621-ОК-ГП): 

- произвести корректировку сметной документации по выданным  изменениям (откорректированы чертежи на ограждение, на конструктив  подземной части ограждения);  

2) Архитектурные решения (0122200002516008621-ОК-АР): - произвести корректировку сметной документации по 

внесенным изменениям в части марки керамзитобетонных блоков (изменена  плотность керамзитобетонного блока для наружных стен с 800 кг/м3 на 1000  кг/м3), уточнения объемов работ и марки материалов по подвесным потолкам  (добавлены планы подвесных потолков, добавлены объёмы по подвесным  потолкам - лист 34, 35, 36, 37, 38, 39), по отбойным доскам (изм.4 -  дополнено расположение отбойных досок, уточнены спецификации), по  дверям, окнам, витражам;  

3) Конструкции железобетонные (0122200002516008621-ОК-КЖ 1):  

- выдать на бумажном носителе корректировки сметной документации  по внесенным изменениям № 1-12 (Изм.1 - добавлены спецификации  фундаментов Фм-1-14; Лф-1,2. Изм.2 - скорректирована спецификация  фундаментов Фм1-14. Изменены планы конструкций. Изм.3 - добавлены  спецификации по колоннам К-П-1-10, лестницам. Изм.4 - откорректированы  планы несущих конструкций. Изм.5 - добавлены узлы по планам несущих  конструкций, лестницы. Изм.6,7,8 - корректировка планов. Изм.9 - добавлен  световой приямок. Изм. 10 - добавлены крыльца 1-7);  

- выдать проектное решение по крыльцам № 5 и № 6, препятствующим  входу в тепловой пункт;  

4) Конструкции железобетонные (0122200002516008621-ОК-КЖ 2):  

- выдать на бумажном носителе корректировки сметной документации  по внесенным изменениям № 1-22 (Изм.1-4 - добавлены спецификации по  узлам и сечениям фундаментной плиты, изменены планы конструкций по  бункеру циклотрона, откорректированы спецификации на элементы  фундаментных плит и колонны. Изм.5-7 - корректировка планов несущих  

конструкций. Изм.8-10 - добавлены узлы обрамления отверстий в плите  

перекрытия. Изм.11 - корректировка сечений по плитам перекрытия,  монолитным балкам. Изм.12 - добавлены спецификации по армированию  колонн, крылец. Изм.13-17 - добавлены спецификации элементов на  лестницы, изменения в планах несущих конструкций. Изм.18-21 - изменения  в плане конструкций, откорректировано расположение балок. Изм.22 -  откорректированы отверстия под ОВ);  

5) Конструкции железобетонные (0122200002516008621-ОК-КЖ 3): 

- выдать на бумажном носителе корректировки сметной документации  по внесенным изменениям № 1-8 (Изм.1 - откорректировано расположение  стен, колонн на плане, добавлена спецификация на фундаменты Фм-1,2.  Изм.2 - добавлены сечения по плите на отм. -0,080. Изм.3 - корректировка  планов несущих конструкций подвала. Изм.4, 5 - добавлена спецификация по  узлам стен и колон выше 0,000, добавлены узлы по плите на отм. выше 0,000.  Изм.6 - добавлен световой приямок. Изм.7 - замена в РД листов 8 и 10,  добавлены приямки ПР-1. Изм.8 - добавлены спецификации и чертежи по  крыльцам);  

6) Наружные электрические сети (0122200002516008621-ОК-НЭС): 

- откорректировать проект в связи с уточненными ТУ.  Откорректировать смету, в соответствии с согласованным проектом;  

7) Вентиляция и кондиционирование воздуха (0122200002516008621- ОК-ОВ):  

- внести изменения в сметную документацию после корректировки  технической части в части характеристик вентиляционных систем;  

8) Произвести корректировку сметной документации согласно решений  технической части по марке оборудования;  

9) Тепловые сети (0122200002516008621-ОК-ТС): 

- выполнить проектное решение о переносе действующего контура  заземления хирургического стола попадающего в пятно прокладки тепловых  сетей и внести указания в техническую часть по неподвижным опорам и  опорным подушкам;  

- выполнить ведомость работ и сметную документацию на работы по  восстановлению благоустройства после монтажа теплотрассы по жилому  району;  

10) Индивидуальный тепловой пункт (0122200002516008621-ОК-ИТП):  

- произвести корректировку сметной документации согласно решений  технической части;  

11) Вертикальный транспорт (0122200002516008621-ОК-ВТ): 

- отсутствует корректировка сметной документации согласно решений  технической части по количеству и марке лифтов;  

12) Наружные сети водопровода и канализации (0122200002516008621- ОК-НВК):  

- произвести корректировку сметной документации согласно решений  технической части;  

13) Медицинские газы (0122200002516008621-ОК-МГ): 

- произвести корректировку сметной документации согласно решений  технической части;  

- передать книги прайс-листов в составе сметной документации. 

Взыскать с Акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - Научно- проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в пользу Краевого  государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства  строительства Хабаровского края» судебную неустойку в случае  неисполнения настоящего решения суда в установленный срок в размере  10 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки, начиная с 02 июня 2020 года  по день фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с Акционерного общества «ГИПРОЗДРАВ» - Научно- проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 24.05.2019 4:53:45

Кому выдана Малашкин Дмитрий Леонидович