Арбитражный суд Краснодарского края

Именем  Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ А32-58111/2019

г. Краснодар

24 марта 2020г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2020г.

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2020г. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи  Миргородской О.П., при ведении протокола помощником судьи Гоовым Н.Ю., рассмотрев материалы производства по делу № А32-58111/2019

по исковому заявлению ООО ГЕВА» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар

к ООО «Северское ДРСУ» (ИНН 

<

***>) ст. Северская

о взыскании основного долга, неустойки, процентов по ст. 317.1 ГК РФ

при участии в судебном заседании:

от истца директор ФИО1, представитель по доверенности ФИО2,

от ответчика представитель не явился. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО ГЕВА» (далее – истец) обратилось в суд с иском к ООО «Северское ДРСУ» (далее – ответчик) о взыскании 8 669 541 рублей 74 копеек основного долга, 119 354 рублей 97 копеек неустойки, 100 475 рублей 32 копеек процентов по ст. 317.1 ГК РФ.

В судебное заседание явку представителя обеспечил только истец, ответчик уведомлен надлежащим способом о времени и месте судебного заседания в порядке статьи 123 АПК РФ.

Судебное заседание проведено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика.

Истец заявил ходатайство об уменьшении суммы исковых требований до 8 816 372 рублей 04 копеек, в связи с оплатой долга на сумму 73 000 рублей.

Ходатайство судом было рассмотрено и удовлетворено.

Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для предоставления возможность заключить мировое соглашение.

Истец такую возможность отклонил, в связи с чем ходатайство оставлено судом без удовлетворения.

Суд, заслушав представителей сторон, изучив и исследовав материалы дела, счел требования подлежащими частичному удовлетворению на основании следующего.

 «19» апреля 2019 г. между ООО «ГЕВА» (Истец) и ООО «Северское ДРСУ» (Ответчик) был заключен договор субподряда №8-суб/2 выполнение работ по объекту: «Ремонт ул. им. Тургенева от ул. им. Космонавта ФИО3 до ул. им. Атарбекова в г. Краснодаре» (обустройство дороги). Согласно условиям договора, Истец обязался осуществить своими силами и средствами работы в объемах, которые определены техническим заданием Ответчика и ведомостью объемов работ, а Ответчик, в соответствии с п.п. 1.1., 2.3, 2.4 договора, обязался оплачивать выполненные Истцом работы в следующем порядке: аванс в размере 500 000 (Пятьсот тысяч), оставшуюся часть суммы Ответчик должен был оплатить после выполнения Истцом работ на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), а так же предоставления надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры в течении 30 календарных дней. Общая стоимость работ по договору, согласно фактически выполненным работам и подписанным Сторонами Справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) составила 5 170 586.64 руб.

Ответчик, согласно условиям договора перечислил Истцу денежные средства в размере 200 000.00 рублей (ПП №230 от 07.06.2019г.), 100 000,00 рублей (ПП №250 от 11.06.2019г.), 30 000,00 рублей (ПП №300 от 20.06.2019г.), 1 000 000,00 рублей (ПП №372 от 01.07.2019г.), 2 000 000,00 рублей (ПП №982 от 27.08.2019г.) и 1 000 000,00 рублей (ПП №1093 от 06.09.2019.). Общая сумма оплаты составила 4 330 000,00 руб. Более оплат от Ответчика за выполненные Истцом по Договору субподряда №8-суб/2 от 19.04.2019 г. не поступало.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанные Ответчиком:

-   Акт о приемке выполненных работ №1 от 14.05.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2019 г. на сумму 1 068 323,81 руб.

-   Акт о приемке выполненных работ №2 от 06.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 2 от 06.08.2019 г. на сумму 2 351 530,04 руб.

Акт о приемке выполненных работ №3 от 06.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 3 от 06.08.2019 г. на сумму 1 750 732,79 руб.

Оставшуюся часть суммы за выполненные работы должна была быть произведена Ответчиком в размере 840 586,64 руб. не позднее 06.09.2019 г., согласно п. 2.4. договора субподряда № 8-суб/2 от 19.04.2019 г.

Однако, в установленные договором сроки Ответчик оплату не произвёл.

 «06» апреля 2019 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор субподряда №277-суб/7 (далее-договор) и дополнительное соглашение №1 от 05.08.2019 г. на выполнение работ по объекту: «Нанесение горизонтальной дорожной разметки, ремонт дорожных знаков, перильное ограждение и ограждающие столбики по   ул. Шоссе Нефтяников от ул.Красной доул.Стахановской в г.Краснодаре». Согласно условиям договора Истец обязался осуществить своими силами и средствами работы в объемах, которые определены техническим заданием Ответчика и ведомостью объемов работ, а Ответчик, в соответствии с п.п. 1.1.. 2.3, 2.4 договора, обязался оплачивать выполненные Истцом работы в следующем порядке: аванс в размере 30% от стоимости договора, оставшуюся часть суммы Ответчик оплачивает после выполнения Истцом Работ на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), а так же предоставления надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры в течении 30 календарных дней.

Ответчик, согласно условиям договора перечислил Истцу денежные средства в размере 858 757,90 рублей (ПП №571 от 30.07.2019г.), 1 000 000,00 рублей (ПП №1544 от 14.10.2019г.) и 200 000,00 рублей (ПП №1784 от 06.11.2019г.). Общая сумма оплаты составила 2 058 757,90 руб. Более оплат от Ответчика по Договору субподряда №277-суб/7 от 06.05.2019 г. не поступало.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанные Ответчиком:

-   Акт о приемке выполненных работ №1 от 13.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 1 от 13.08.2019 г. на сумму 924 184,42 руб.

-   Акт о приемке выполненных работ №2 от 22.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 2 от 22.08.2019 г. на сумму 284 056,70 руб.

-   Акт о приемке выполненных работ №3 от 28.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 3 от 28.08.2019 г. на сумму 94 691,69 руб.

Акт о приемке выполненных работ №4 от 16.09.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 4 от 16.09.2019 г. на сумму 1 275 454.76 руб.

Общая стоимость работ по договору, согласно фактически выполненным работам и подписанным Сторонами Справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) составила 2 578 387,57 руб.

Оставшуюся часть суммы за выполненные работы должна была быть произведена Ответчиком в размере 519 629,67 руб. не позднее 16.10.2019 г., согласно п. 2.4. Договора субподряда №277-суб/7 от 06.05.2019 г.

Однако, в установленные договором сроки Ответчик оплату не произвёл.

 «06» апреля 2019 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор субподряда

№277-суб/11 от 06.05.2019 г. (далее-договор) и дополнительное соглашение №1 от 20.08.2019 г. на выполнение работ по объекту: «Обустройство дороги по ул. Российская от ул. Жлобы до ул. Солнечной в г.Краснодаре». Согласно условиям договора Истец обязался осуществить своими силами и средствами работы в объемах, которые определены техническим заданием Ответчика и ведомостью объемов работ, а Ответчик, в соответствии с п.п. 1.1., 2.3, 2.4 договора, обязался оплачивать выполненные Истцом работы в следующем порядке: аванс в размере 1 000 000,00 руб., оставшуюся часть суммы Ответчик оплачивает после выполнения Истцом Работ на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), а так же предоставления надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры в течении 30 календарных дней.

Ответчик, согласно условиям договора перечислил Истцу денежные средства в размере 1 000 000.00 рублей (ПП №605 от 31.07.2019г.), и 700 000,00 рублей (ПП №1798 от 07.11.2019г.), соответственно. Общая сумма оплаты составила 1 700 000,00 руб. Более оплат от Ответчика за выполненные Истцом по Договору субподряда №277-суб/11 от 06.05.2019 г. не поступало.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанные Ответчиком:

-   Акт о приемке выполненных работ №1 от 28.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 1 от 28.08.2019 г. на сумму 378 832,61 руб.

-   Акт о приемке выполненных работ №2 от 16.09.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 2 от 16.09.2019 г. на сумму 3 849 268,42 руб.

Общая стоимость работ по договору, согласно фактически выполненным работам и подписанным Сторонами Справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) составила 4 228 101.03 руб.

Оставшуюся часть суммы за выполненные работы должна была быть произведена Ответчиком в размере 2 528 101,03 руб. не позднее 16.10.2019 г., согласно п. 2.4. Договора субподряда №277-суб/11 от 06.05.2019 г.

Однако, в установленные договором сроки Ответчик оплату не произвёл. 4)           «20» мая 2019 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор субподряда №277-суб/4 от 20.05.2019 г. (далее-договор) на выполнение работ по монтажу дорожных знаков ЗИП («Паспорт объекта») на стойках на объекте: «Ремонт ул. Ставропольская от ул. Суворова до ул. Вишняковой в г. Краснодаре. Ремонт ул. им. Суворова от ул. Станкостроительной до путепровода по ул. Суворова и от ул. Постовой до ул. Дмитриевская Дамба в г. Краснодаре. Ремонт ул. Шоссе Нефтяников от ул. Красной до ул. Стахановской в г. Краснодаре. Ремонт ул. Солнечная от ул. 1 Мая до ул. Ростовское Шоссе в г. Краснодаре. Ремонт ул. Российская от ул. Жлобы до ул. Солнечной в г. Краснодаре». Согласно условиям договора Истец обязался осуществить своими силами и средствами работы в объемах, которые определены техническим заданием Ответчика и ведомостью объемов работ, а Ответчик, в соответствии с п.п. 1.1., 2.3, 2.5 договора, обязался оплачивать выполненные Истцом работы в следующем порядке: аванс в размере 30% от стоимости договора. оставшуюся часть суммы Ответчик оплачивает после выполнения Истцом Работ на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), а так же предоставления надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры в течении 30 календарных дней.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанные Ответчиком:

-  Акт о приемке выполненных работ №1 от 04.06.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 1 от 04.06.2019 г. на сумму 200 000,00 руб.

-  Акт о приемке выполненных работ №2 от 13.06.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 2 от 13.06.2019 г. на сумму 26 000,00 руб.

Общая стоимость работ по договору, согласно фактически выполненным работам и подписанным Сторонами Справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) составила 226 000 руб.

Оплата за выполненные работы должна была быть произведена Ответчиком не позднее 16.07.2019 г., согласно п. 2.5. Договора субподряда №277-суб/4 от 20.05.2019 г. Однако, в установленные договором сроки Ответчик оплату не произвёл.

 «24» июня 2019 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор субподряда №277-суб/12 от 24.06.2019 г. (далее-договор) и дополнительное соглашение №1 от 13.08.2019 г. на выполнение работ по объекту: «Нанесение горизонтальной дорожной разметки по ул. Ставропольская от ул. Суворова до ул. Вишняковой в г. Краснодаре». Согласно условиям договора Истец обязался осуществить своими силами и средствами работы в объемах, которые определены техническим заданием Ответчика и ведомостью объемов работ, а Ответчик, в соответствии с п.п. 1.1., 2.3, 2.4 договора, обязался оплачивать выполненные Истцом работы в следующем порядке: аванс в размере 30 % от стоимости договора, оставшуюся часть суммы Ответчик оплачивает после выполнения Истцом Работ на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), а так же предоставления надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры в течении 30 календарных дней.

Ответчик, согласно условиям договора перечислил Истцу денежные средства в размере 541 663,94 рублей (ПП №601 от 31.07.2019г.), и 1 263 943,75 рублей (ПП №757 от 08.08.2019г.), соответственно. Общая сумма оплаты составила 1 805 607,69 руб.

Более оплат от Ответчика за выполненные Истцом по Договору №277-суб/12 от 24.06.2019 г. не поступало.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанные Ответчиком:

-   Акт о приемке выполненных работ №1 от 28.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 1 от 28.08.2019 г. на сумму 1 578 767,03 руб.

-   Акт о приемке выполненных работ №2 от 16.09.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 2 от 16.09.2019 г. на сумму 700 373,59 руб.

Общая стоимость работ по договору, согласно фактически выполненным работам и подписанным Сторонами Справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) составила 2 279 140,62 руб.

Оставшуюся часть суммы за выполненные работы должна была быть произведена Ответчиком в размере 473 532,93 руб. не позднее 16.10.2019 г., согласно п. 2.4. Договора субподряда №277-суб/12 от 24.06.2019 г.

Однако, в установленные договором сроки Ответчик оплату не произвёл.

 «04» июля 2019 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор субподряда №277-суб/15 от 04.07.2019 г. (далее-договор) и дополнительное соглашение №1 от 20.08.2019 г, па выполнение работ по объекту: «Ремонт дорожных знаков по ул. им. Суворова от ул.Станкостроительной до путепровода по ул.Суворова и от ул. Постовой до ул.Дмитриевская Дамба в г.Краснодаре». Согласно условиям договора Истец обязался осуществить своими силами и средствами работы в объемах, которые определены техническим заданием Ответчика и ведомостью объемов работ, а Ответчик, в соответствии с п.п. 1.1., 2.3, 2.4 договора, обязался оплачивать выполненные Истцом работы в следующем порядке: аванс в размере 30 % от стоимости договора, оставшуюся часть суммы Ответчик оплачивает после выполнения Истцом Работ на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), а так же предоставления надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры в течении 30 календарных дней.

Ответчик, согласно условиям договора перечислил Истцу денежные средства в размере 2 000 000,00 рублей (ПП №500 от 16.07.2019г. и письмо об изменение назначении платежа от 16.07.2019 №б/н), и 460 000,00 рублей (ПП №602 от 31.07.2019г. и письмо об изменение назначении платежа от 31.07.2019 №б/н), соответственно. Общая сумма оплаты составила 2 460 000,00 руб. Более оплат от Ответчика за выполненные Истцом по Договору №277-суб/15 от 04.07.2019 г. работы не поступало.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанные Ответчиком:

-   Акт о приемке выполненных работ №1 от 13.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 1 от 13.08.2019 г. на сумму 759 985,64 руб.

-   Акт о приемке выполненных работ №2 от 22.08.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 2 от 22.08.2019 г. на сумму 762 644,04 руб.

-   Акт о приемке выполненных работ №3 от 16.09.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 3 от 16.09.2019 г. на сумму 628 198,39 руб.

Общая стоимость работ по договору, согласно фактически выполненным работам и подписанным Сторонами Справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) составила 2 150 828,07 руб.

За выполненные работы Ответчиком произведена переплата в размере 309 171,93 руб.

 «24» июля 2019 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор субподряда №277-суб/22 от 24.07.2019 г. (далее-договор) и дополнительное соглашение №1 от 13.08.2019 г. на выполнение работ по объекту: «Обустройство дороги по ул. Ставропольская от ул.Суворова до ул.Вишняковой в г.Краснодаре». Согласно условиям договора Истец обязался осуществить своими силами и средствами работы в объемах, которые определены техническим заданием Ответчика и ведомостью объемов работ, а Ответчик, в соответствии с п.п. 1.1., 2.3, 2.4 договора, обязался оплачивать выполненные Истцом работы в следующем порядке: аванс в размере 30 % от стоимости договора, оставшуюся часть суммы Ответчик оплачивает после выполнения Истцом Работ на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), а так же предоставления надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры в течение 30 календарных дней.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанные Ответчиком Акт о приемке выполненных работ №1 от 16.09.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 1 от 16.09.2019 г. на сумму 3 130 825,91 руб.

Общая стоимость работ по договору, согласно фактически выполненным работам и подписанным Сторонами Справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) составила 3 130 825,91 руб.

Оплата за выполненные работы должна была быть произведена Ответчиком в размере 3 130 825,91 руб. не позднее 16.10.2019 г., согласно п. 2.4. Договора субподряда №277-суб/22 от 24.07.2019 г.

Однако, в установленные договором сроки Ответчик оплату не произвёл.

 «19» августа 2019 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор субподряда №277-суб/25 от 19.08.2019 г. (далее-договор) и дополнительное соглашение №1 от 05.09.2019 г. на выполнение работ по объекту: «Нанесение горизонтальной дорожной разметки по ул. Солнечная от ул. 1 Мая до ул. Ростовское Шоссе в г.Краснодаре». Согласно условиям договора Истец обязался осуществить своими силами и средствами работы в объемах, которые определены техническим заданием Ответчика и ведомостью объемов работ, а Ответчик, в соответствии с п.п. 1.1., 2.3, 2.4 договора, обязался оплачивать выполненные Истцом работы в следующем порядке: аванс в размере 30 % от стоимости договора, оставшуюся часть суммы Ответчик оплачивает после выполнения Истцом Работ на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), а так же предоставления надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры в течении 30 календарных дней.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанные Ответчиком Акт о приемке выполненных работ №1 от 16.09.2019 г. и справка о стоимости выполненных работ № 1 от 16.09.2019 г. на сумму 1 715 037,50 руб.

Общая стоимость работ по договору, согласно фактически выполненным работам и подписанным Сторонами Справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) составила         1 715 037,50 руб.

Оплата за выполненные работы должна была быть произведена Ответчиком не позднее 16.10.2019 г., согласно п. 2.4. Договора субподряда №277-суб/25 от 19.08.2019 г.

Однако, в установленные договором сроки Ответчик оплату не произвёл.

 «02» сентября 2019 г. между Истцом и Ответчиком был заключен Договор №02/09-19 А аренды дорожно-строительной техники с доставкой на объект. Согласно условиям договора Истец предоставляет во временное владение и пользование строительную технику и оказывает своими силами услуги по управлению и технической эксплуатации Техники, а Ответчик, в соответствии с п.п. 5.4 договора оплачивает на основании представленных Истцом и подписанных Ответчиком актов выполненных работ оказанные услуги в течении 3 календарных дней.

Истец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, что подтверждают подписанный Ответчиком Акт № 01 от 05 сентября 2019 г. на сумму 45 000,00руб.

Оплата за аренду дорожно-строительной техники с доставкой на объект должна была быть произведена Ответчиком в размере 45 000,00 руб. не позднее 10.09.2019 г., согласно п. 5.4. Договора №02/09-19 А от «02» сентября 2019 г.

Однако, в установленные Договором сроки Подрядчик оплату не произвёл.

Таким образом, Ответчик произвел переплату по договору субподряда №277-суб/15 от 04.07.2019 г. в размере 309 171,93 руб., а по договорам субподряда №8-суб/2 от 19.04.2019 г., №277-суб/7 от 06.05.2019 г., №277-суб/11 от 06.05.2019 г., №277-суб/4 от 20.05.2019 г., №277-суб/12 от 24.06.2019 г., №277-суб/22 от 24.07.2019 г., №277-суб/25 от 19.08.2019 г. и №02/09-19 А от «02» сентября 2019 г. недоплатил сумму в размере 9 478 713,67 руб.

Согласно ст. 410 ГК РФ Истец произвёл зачёт встречного однородного требования в рамках договора субподряда №277-суб/15 от 04.07.2019 г. и зачёл переплату в размере 309 171,93 руб. в счёт оплаты по договору субподряда №277-суб/25 от 19.08.2019 г., о чём сообщил Ответчику. Возражений от Ответчика не поступило.

В связи с вышеизложенным, по состоянию на 26.11.2019г., согласно акта сверки от 18.11.2019 г. у Ответчика имелась задолженность перед Истцом по вышеперечисленным договорам в размере 9 169 541,74 рублей.

27.11.2019г. Истец направил в адрес Ответчика (нарочно) досудебную претензию (исх. №26/11-1 от 26.11.2019г.) с просьбой оплатить выполненные работы в срок не позднее 09.12.2019г. Претензия получена Ответчиком 27.11.2019г., что подтверждается входящим номером на экземпляре претензии Истца (вх. №380 от 27.11.2019г.). Ответа на данную претензию по настоящий момент Ответчик не дал, оплату произвёл частично, в размере 500 000 руб. в рамках исполнения своих обязательств по договору субподряда №277-суб/15 от 04.07.2019 г.

По состоянию на 09.12.2019г., с учётом поступившей оплаты от 04.12.2019г. в размере 500 000 руб., за Ответчиком числится задолженность в размере 8 669 541,74 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд.

При рассмотрении дела в суде ответчик оплатил долг на сумму 73 000 рублей, в связи с чем истец уменьшил размер требования, задолженность составила 8596541,74 руб. 

При решении об обоснованности заявленных требований суд руководствуется следующим.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно положениям статей 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Факт выполнения работ, а также наличие задолженности ответчиком не оспаривались. Ответчик подписал акты выполненных работ без разногласий.

Доказательств последующей оплаты задолженности ответчик не представил.

Поскольку размер задолженности подтвержден материалами дела, а ответчик доказательств надлежащего исполнения обязательств не представил, суд приходит к выводу об удовлетворении исковые требования в части взыскания основного долга в размере 8596541,74 руб. 

На сумму задолженности истец начисляет неустойку по состоянию на 09.12.2019г. в размере 119 354,97 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 12.6 договоров субподряда №277-суб/15 от 04.07.2019 г., №8-суб/2 от 19.04.2019 г., №277-суб/7 от 06.05.2019 г., №277-суб/11 от 06.05.2019 г., №277-суб/4 от 20.05.2019 г., №277-суб/12 от 24.06.2019 г., №277-суб/22 от 24.07.2019 г., №277-суб/25 от 19.08.2019 г.. в случае просрочки исполнения Подрядчиком (Ответчиком) обязательств по Договору, Субподрядчик (Истец) вправе требовать с Ответчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки установлен в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, определенного на день уплаты неустойки.

Согласно п. 6.1. договора №02/09-19 А от «02» сентября 2019 г., за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Суд проверил расчет неустойки и признает его составленным верно.

Поскольку ответчик допустил просрочку в оплате задолженности, требование о взыскании неустойки также подлежит удовлетворению.

Истец просит взыскать с ответчика проценты, рассчитанные на основании статьи 317.1 АПК РФ.

Согласно редакции статьи 317.1 ГК РФ, действующей с 01.08.2016 проценты подлежат начислению в случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на сумму денежного обязательства подлежат начислению проценты.

Договорами условие о применении статьи 317.1 Кодекса не предусмотрено, законом применительно к спорным договорам также не предусмотрена возможность взыскания законных процентов.

Таким образом, требование о начислении процентов не подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При расчете пропорции судом учитывается фактическое удовлетворение ответчиком требований в части после обращения истца в суд, а также правомерность предъявленных истцом требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 167 – 170, 176  Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца  об уменьшении размера требований удовлетворить.

Взыскать ООО «Северское ДРСУ» (ИНН 

<

***>) ст. Северская в пользу ООО ГЕВА» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар 8 596 541 рублей 74 копейки основного долга, 119 354 рублей 97 копеек неустойки, а также 66 684 рублей 85 копеек в порядке возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение суда может быть обжаловано в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края

 

Судья                                                                                                           О.П. Миргородская