АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, дом 19, город Владимир, 600005

тел. (4922) 47-23-41, факс (4922) 47-23-98

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

город  Владимир          

«27» октября 2022 года                                               Дело № А11-15952/2019

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой - Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Курорт Доброград» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: мкр. Доброград, д. 1, пом. 17, д. Гороженово, Ковровский р-н, Владимирская обл., 601965)

к обществу с ограниченной ответственностью «МиКва» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, эт/пом 4/I, ком./оф. 19Б/256, вн.тер.г. МО Царицино, 

<

...>)

о понуждении передать исполнительную документацию,

при участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности  от 20.08.2021 (сроком на 5 лет);

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности  от 11.01.2021, диплом, паспорт;

установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Курорт Доброград» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МиКва» о понуждении передать исполнительную документацию согласно перечню.

Ответчик в отзыве на исковое заявление полагал, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, поскольку ответчиком полностью исполнены обязательства по договору, в том числе по передаче исполнительской документации, факт передачи которой подтверждается письмом от 30.09.2021 № 399.

Истец в возражения на отзыв указал, что не согласен с позицией ответчика относительного того, что факт принятия истцом работ подтверждает факт передачи исполнительской документации. Материалы дела не содержат доказательств составления исполнительской документации. По условиям договора исполнительская документация подлежит передаче по реестрам.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Арбитражный суд, руководствуясь статьями 163, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил объявить перерыв в судебном заседании до 20.09 до 10:05. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) 31.07.2019 заключен договор подряда № АТ-2472, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить собственными и/или с привлеченными силами и средствами комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ на отм. ниже 0,000 (далее - Работы), по строительству объекта: «Парк-отеля «Доброград» (корпус 3)», на земельном участке кадастровый № 33:07:000317:1558 расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкр. Доброград, Общая проектная площадь Объекта составляет 9056,1 м2 (далее - объект), а заказчик обязуется принять и оплатить результат надлежащим образом выполненных работ в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Согласно пункту 2.1 договора цена договора определяется на основании Сметы (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 87 983 385 рублей (восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста восемьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % - 14 663 897 рублей 50 копеек (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто семь рублей 50 копеек), является твердой и изменению не подлежит.

Согласно пункту 2.3.6 договора для расчетов за выполненные работы, подрядчик предоставляет заказчику счета, а так же счета-фактуры, оформленные в соответствие с НК РФ и постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011, исполнительную производственную документацию в 4-х экземплярах (акты промежуточной приёмки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного контроля, сертификаты, исполнительные геодезические съемки, журналы работ). Эти первичные документы комплектуются подрядчиком и контролируются техническим надзором заказчика и строительным контролем. Документы передаются подрядчиком заказчику по перечню, который является приложением к перечню основных документов. Исполнительная производственная документация необходима на время производства работ для обеспечения и подтверждения ведения строительного контроля со стороны заказчика.

Согласно пункту 3.1 договора срок начала работ – 08.08.2019. 

Срок окончания работ - до 08.11.2019 (включительно) (пункт 3.2 договора).

В соответствии с пунктом 4.1.6 договора подрядчик обязан сдать результат работ заказчику с комплектом исполнительной документации, а также передать заказчику документы, подготовка которых входит в обязанности подрядчика как лица, выполняющего работы, в соответствии с законодательством РФ, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно пункту 4.1.18 договора подрядчик обязан незамедлительно после завершения работ (этапа работ), а также в сроки, установленные Заказчиком, предоставлять Заказчику исполнительную документацию, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, в количестве 5 (пяти) экземплярах в бумажном виде.

Как указал истец в исковом заявлении, ответчик в нарушение условий договора не предоставил заказчику исполнительную документацию на комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ. 

С учетом выполненных ответчиком работ по актам КС-2, КС-3 ответчику предлагалось в досудебной претензии предоставить исполнительную документацию в 4 экземплярах. 

Ответчик данную претензию отклонил, ссылаясь на то, что работы им были сданы в 2020 году без замечаний и вся исполнительная документация предоставлялась вместе с актами выполненных работ.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по спорному договору послужило истцу основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

На основании части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Проанализировав представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из буквального толкования данных норм следует, что по договору подряда для заказчика, прежде всего, имеет значение достижение подрядчиком определенного вещественного результата.

Согласно статье 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком, и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, то есть надлежащим доказательством выполнения работ является названный документ. Исходя из назначения указанного документа, акт выполненных работ должен отражать сведения о содержании выполненных работ, их объеме.

Статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при толковании договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 утверждены Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее Требования).

Согласно пункту 5 Требований исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в главе II Порядок ведения исполнительной документации. Императивных норм, устанавливающих обязанность подрядчика передать заказчику исполнительную документацию, а также определяющих состав исполнительной документации подлежащей передаче подрядчику, нормы действующего законодательства не содержат.

По правилам пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как следует из материалов дела, ответчиком выполнены работы предусмотренные договором в указанной части, однако в нарушение условий договора исполнитель не предоставил заказчику исполнительную документацию в полном объеме.

В судебных заседаниях стороны не заявляли претензий по объему и качеству работ.

Довод ответчика, о том, что исполнительная документация на выполненные работы передана после принятия всех выполненных работ и подписания актов выполненных работ по спорному договору судом отклоняется на основании следующего.  

В соответствии со статьей 726 Гражданского кодекса подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 утверждены требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения (РД-11-02-2006). 

Таким образом, ведение исполнительной документации является обязательным для подрядчика, а ее отсутствие препятствует заказчику сдаче объекта в эксплуатацию с учетом требований органов Стройнадзора.

Обязанность подрядчика передать заказчику исполнительную документацию предусмотрена договором.

Выполненные работы приняты заказчиком, как указано ранее, замечаний в отношении выполненных работ в рамках дела не заявлялось.

Ответчиком какая-либо документация с информацией о составлении и передаче заказчику исполнительной документации, в том числе реестры передаваемой документации в материалы дела не представлены.

Таким образом, требование истца об обязании ответчика передать исполнительную документацию, арбитражный суд считает подлежащим удовлетворению.

При этом разумным сроком, с учетом объема документации, истребованной истцом, суд считает 10 рабочих дней.

Судебные расходы в виде государственной пошлины в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в сумме 6000 рублей 00 копеек относятся на ответчика и подлежат к взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 17, 65, 70, 71, 110, 167 – 171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «МиКва» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Курорт Доброград» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда, следующую исполнительную документацию:

Наименование работ по КС2

Перечень исполнительной документации

КС-2 №1 от 30.08.2019.

"Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см

1.Общий журнал работ

2.Исполнительная схема с указанием валки деревьев

КС-2 №1 от 30.08.2019. КС-2 №2 от 30.09.2019.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

"Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (труба, кабель)

1.Общий журнал работ

2.Акт разбивки основных осей здания;

3. Исполнительная схема разбивки основных осей здания;

4.Исполнительная схема котлована с подсчетом объемов

грунта;

5. Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под фундаменты 6.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за

 

производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №1 от 30.08.2019.

"Устройство заборов (с установкой столбов): глухих (с обшивкой профнастилом)- прим-но

Общий журнал работ

КС-2 №1 от 30.08.2019.

"Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических

Общий журнал работ

КС-2 №1 от 30.08.2019. КС-2 №2 от 30.09.2019.

"Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

1.Общий журнал работ

2.Акт разбивки основных осей здания;

3.Исполнительная схема разбивки основных осей здания;4.Исполнительная схема котлована с подсчетом объемов грунта;

5. Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под фундаменты 6.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №1 от 30.08.2019.

"Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (временные дороги на стройплощадке)

1.Общий журнал работ

2.Исполнительная схема устройства естественного основания под фундаменты;

3 . Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под фундаменты 4.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №1 от 30.08.2019. КС-2 №2 от 30.09.2019.

"Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2

1.Общий журнал работ

2.Журнал производства земляных работ

3.Журнал входного учета и контроля качества материалов

4.Исполнительная геодезическая документация:

5.1.Акт разбивки основных осей проезжей части

5.2.Исполнительная схема разбивки основных осейпроезжей части

6.Акты освидетельствования скрытых работ

6.1.Устройство подстилающего слоя из песка

6.2.Устройство щебеночного основания

7.Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами

8.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

9.Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве

КС-2 №2 от 30.09.2019.

КС-2 №4 от 11.11.2019. КС-2 №5 от 11.12.2019. КС-2 №6 от 27.12.2019. КС-2 №7 от 28.02.2020.

Устройство бетонной подготовки

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ на устройство бетонной подготовки под фундаменты 3. Журнал бетонных работ.

4.Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. 6.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №3 от 23.10.2019.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Армирование подстилающих слоев и на бетонок(сетки С-2)

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ на армирование монолитных фундаментов, установка анкерных болтов

3.Журнал бетонных работ.

4.Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.5.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №2 от 30.09.2019.

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песок)

1.Общий журнал работ

2. Акты освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку пазух фундаментов (с послойным уплотнением) 3.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №2 от 30.09.2019. КС-2 №3 от 23.10.2019. КС-2 №4 от 11.11.2019.

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3(Фм-1...Фм-31)

1.Общий журнал работ 2.Исполнительная схема фундаментов;

3.Журнал бетонных работ;

4.Акт освидетельствования ответственных конструкций (фундаментов).

5.Протоколы испытания качества послойного уплотнения грунта при обратной засыпке;

6.Температурные листы прогрева бетона

7.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж опалубки монолитных фундаментов

8.Акты освидетельствования скрытых работ набетонирование монолитных фундаментов

9.Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.10.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №2 от 30.09.2019. КС-2 №3 от 23.10.2019.

1 .Общий журнал работ 2.Исполнительная схема анкерных болтов

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (блок фундаментных болтов)

3 . Акты освидетельствования скрытых работ на Армирование монолитных фундаментов, установка анкерных болтов;

4. Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. 5 .Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №2 от 30.09.2019. КС-2 №3 от 23.10.2019.

КС-2 №6 от 27.12.2019.

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ на горизонтальная гидроизоляция фундаментов;

3.Акты освидетельствования скрытых работ на вертикальная обмазочная гидроизоляция фундаментов

4.Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.5.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №2 от 30.09.2019.

КС-2 №3 от 23.10.2019.

Устройство бетонной подготовки (набетонка под балки)

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ на устройство бетонной подготовки под фундаменты. 3. Журнал бетонных работ;

4.Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. 5 .Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №2 от 30.09.2019. КС-2 №3 от 23.10.2019.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ Устройство песчаной подготовки под фундаменты 3. Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. 4.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №2 от 30.09.2019. КС-2 №3 от 23.10.2019.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 -2

1.Общий журнал работ

2.Протоколы испытания качества послойного уплотнения грунта при обратной засыпке; 3. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №3 от 23.10.2019.

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т

1.Общий журнал работ

2.Журнал по монтажу строительных конструкций

3.Журнал замоноличивания стыков

4.Акт освидетельствования ответственных конструкций

5.Монтаж железобетонных конструкций (колонн, балок, ригелей, диафрагм,);

6.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

7.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №3 от 23.10.2019. КС-2 №4 от 11.11.2019.

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу-изготовление - металлический каркас здания

1.Общий журнал работ

2.Журнал по монтажу строительных конструкций;

3.Журнал производства сварочных работ;

4.Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;5.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

6. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

КС-2 №3 от 23.10.2019. КС-2 №4 от 11.11.2019. КС-2 №5 от 11.12.2019.

КС-2 №6 от 27.12.2019.

"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)

1 .Общий журнал работ

2.Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 3 .Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

4. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

КС-2 №3 от 23.10.2019. КС-2 №4 от 11.11.2019.

Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 м

1.Общий журнал работ

2.Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений (форма ГОСТ Р 51872-2002): 2.1.Исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонны от проектных; 2.2.Исполнительная схема смещения осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении; 2.3.Исполнительная схема отклонений осей колонн от вертикали в верхнем сечении;

2.4.Исполнительная схема смещения ферм, балок ригелей с осей на оголовках колонн из плоскости рамы ; 2.5.Исполнительная схема сварных соединений (требуется в случае отсутствия клейма у сварщиков);

 

3. Акты освидетельствования скрытых работ на 3.1.Монтаж металлоконструкций (колонн, балок, ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и вертикальных связей)

3.2.Устройство подливки под базы колонн;

3.3.Антикоррозионная защита сварных соединений4.Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

4.1.Акт освидетельствования ответственных конструкций (каркас здания);

4.2.Акт визуального осмотра сварных швов-100% длины сварных швов

4.3.Акт контроля сварных швов неразрушающим способом (радиографическим, ультразвуковым и др.-не менее 0,5% длины сварных швов в случае отсутствия указаний в проекте). С документами лаборатории.

5.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

6.Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков, протоколы механических испытаний допускных стыков, удостоверение руководителя сварочных работ (не ниже II уровня), удостоверения монтажников по работе с высокопрочными болтами, паспорт и свидетельство о поверке на динамометрический ключ

7.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта

8.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций).

КС-2 №3 от 23.10.2019.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Устройство ж/б приямков лифтов (прим-но)

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ на устройство бетонной подготовки под фундаменты 3. Журнал бетонных работ; 4.Исполнительная схема лифтовой шахты 5.Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. 6.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. 7.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций).

КС-2 №5 от 11.12.2019. КС-2 №6 от 27.12.2019.

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300

мм

1.Общий журнал работ 2.Журнал бетонных работ;

3. Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

3.1.Акт освидетельствования ответственных конструкций (фундаментов);

3.2.Протоколы испытаний бетона (приложить копию аттестации лаборатории);

 

3.3. Температурные листы прогрева бетона;

4.Акты освидетельствования скрытых работ:

4.1.Армирование балок фундаментных монолитных (монолитных поясов);

4.2.Установка опалубки балок фундаментных монолитных (монолитных поясов);

4.3.Бетонирование фундаментных монолитных балок (монолитных поясов);

5.Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.

6.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

7.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(блок фундаментных болтов БФ3)

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ на армирование балок фундаментных монолитных (монолитных поясов) 3. Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. . 4.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Установка закладных деталей весом: до 20 кг

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ на армирование балок фундаментных монолитных (монолитных поясов) 

3. Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. . 

4.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т

1.Общий журнал работ

2.Журнал по монтажу строительных конструкций

3.Журнал замоноличивания стыков

4.Акт освидетельствования ответственных конструкций

5.Монтаж железобетонных конструкций (колонн, балок, ригелей, диафрагм,);

6.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

7.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №5 от 11.12.2019. КС-2 №7 от 28.02.2020.

Гидроизоляция боковая обмазочная праймером в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (CreteSafe B-250)

1.Общий журнал работ

2.Вертикальная обмазочная гидроизоляция фундаментов;

3.Горизонтальная гидроизоляция фундаментов; .

4.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

5.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей стен

.Общий журнал работ

3.Акты освидетельствования скрытых работ: 3.1.Утепление наружных ограждающих конструкций

4.Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами

5.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

6.Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Устройство гидроизоляции вертикальной из мембраны профилированной Плантер-стандарт

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ

3.Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами

4.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

5.Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ 

3. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами

 

4.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

5.Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (косоуры)

1.Общий журнал работ

2. Журнал по монтажу строительных конструкций 3.Журнал производства сварочных работ; 4.Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 5.Исполнительная схема монтажа лестничных маршей;.

6.Акт освидетельствования ответственных конструкций – на каждый этаж здания;

7.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж лестничных маршей;

8.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж лестничных площадок;

9.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

10.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

1.Общий журнал работ

2.Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений (форма ГОСТ Р 51872-2002): 

2.1.Исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонны от проектных; 

2.2.Исполнительная схема смещения осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении; 

2.3.Исполнительная схема отклонений осей колонн от вертикали в верхнем сечении;

2.4.Исполнительная схема смещения ферм, балок ригелей с осей на оголовках колонн из плоскости рамы ; 

2.5.Исполнительная схема сварных соединений (требуется в случае отсутствия клейма у сварщиков); 

3. Акты освидетельствования скрытых работ на 3.1.Монтаж металлоконструкций (колонн, балок, ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и вертикальных связей)

3.2.Устройство подливки под базы колонн;

3.3.Антикоррозионная защита сварных соединений4.Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

4.1.Акт освидетельствования ответственных конструкций (каркас здания);

4.2.Акт визуального осмотра сварных швов-100% длины сварных швов

4.3.Акт контроля сварных швов неразрушающим способом (радиографическим, ультразвуковым и др.-не менее 0,5% длины сварных швов в случае отсутствия указаний впроекте). С документами лаборатории.

 

5.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

6.Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков, протоколы механических испытаний допускных стыков, удостоверение руководителя сварочных работ (не ниже II уровня), удостоверения монтажников по работе с высокопрочными болтами, паспорт и свидетельство о поверке на динамометрический ключ

7.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №5 от 11.12.2019.

Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких

1.Общий журнал работ

2. Журнал по монтажу строительных конструкций 3.Журнал производства сварочных работ; 4.Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 5.Исполнительная схема монтажа лестничных маршей;.

6.Акт освидетельствования ответственных конструкций – на каждый этаж здания;

7.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж лестничных маршей;

8.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж лестничных площадок;

9.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности,строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

10.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №6 от 27.12.2019.

Укладка прогонов массой: до 2 т

1.Общий журнал работ

2. Журнал по монтажу строительных конструкций;

3.Журнал производства сварочных работ;

4.Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;

5.Исполнительная схема смещения ферм, балок ригелей сосей на оголовках колонн из плоскости рамы ;

6.Акты освидетельствования скрытых работ :

6.1.Монтаж металлоконструкций (колонн, балок, ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и вертикальных связей);

6.2.Устройство подливки под базы колонн;

6.3.Антикоррозионная защита сварных соединений;

7.Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

7.1.Акт освидетельствования ответственных конструкций(каркас здания);

7.2.Акт визуального осмотра сварных швов

7.3.Акт контроля сварных швов неразрушающим способом

8.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологическиезаключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

 

9.Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков, протоколы механических испытаний допускных стыков, удостоверение руководителя сварочных работ (не ниже II уровня),

10.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №6 от 27.12.2019. КС-2 №8 от 15.06.2020.

Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м

1.Общий журнал работ

2.Поэтажные исполнительные схемы планово-высотного положения монолитных плит перекрытия (с указанием положения термовкладышей, технологических отверстий при их наличии в проектной документации).

3.Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей перекрытий и покрытий здания.

4.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

5.Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков, протоколы механических испытаний допускных стыков, удостоверение руководителя сварочных работ (не ниже II уровня),

6.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №6 от 27.12.2019.

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой

1.Общий журнал работ

2.Акты освидетельствования скрытых работ на горизонтальная гидроизоляция фундаментов;

3.Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.

4.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №6 от 27.12.2019.

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм

1.Общий журнал работ

2.Журнал входного контроля качества;

3.Исполнительные чертежи систем ВК (ХГВС, канализации, водостоков);

4.Акты освидетельствования скрытых работ:

4.1.Устройство естественного основания под трубопроводы канализации ниже отм. 0.000;

4.2.Устройство искусственного основания под трубопроводы канализации ниже отм. 0.000;

4.3.Прокладка трубопроводов канализации ниже отм. 0.000

4.4.Монтаж трубопроводов систем ХГВС и крепление к конструкциям здания;

4.5.Устройство прохода трубопроводов ХГВС, канализации через стены и перекрытия;

 

5.Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков;

6.Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;

7.Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;

8.Сертификаты и паспорта качества на применяемыематериалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;

9.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №6 от 27.12.2019.

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм

1.Договор подряда № АТ-2472 от 08 ноября 2019г.

П4.1.15,4.1.22,4.1.23,4.1.34

1.Общий журнал работ

2.Журнал входного контроля качества;

3.Исполнительные чертежи систем ВК (ХГВС, канализации, водостоков);

4.Акты освидетельствования скрытых работ:

4.1.Устройство естественного основания под трубопроводы канализации ниже отм. 0.000;

4.2.Устройство искусственного основания под трубопроводы канализации ниже отм. 0.000;

4.3.Прокладка трубопроводов канализации ниже отм. 0.000

4.4.Монтаж трубопроводов систем ХГВС и крепление к конструкциям здания;

4.5.Устройство прохода трубопроводов ХГВС, канализации через стены и перекрытия;

5.Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков;

6.Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;

7.Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;

8.Сертификаты и паспорта качества на применяемыематериалы и оборудование, сертификаты пожарнойбезопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;

9.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №8 от 15.06.2020.

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м

1.Общий журнал работ

2.Журнал работ по монтажу строительных конструкций

3.Журнал входного контроля

4.Исполнительная схема кирпичной кладки стен 

5 . Акты освидетельствования скрытых работ:

5.1.Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок

5.2.Кирпичная кладка стен с армированием

6. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами

 

7.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

8.Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве

КС-2 №8 от 15.06.2020.

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (К3)

1.Общий журнал работ

2.Журнал по монтажу строительных конструкций;

3.Журнал производства сварочных работ;

4.Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;

5.Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений (форма ГОСТ Р 51872-2002):

5.1.Исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонны от проектных;

5.2.Исполнительная схема смещения осей колонни опор относительно разбивочных осей в опорном сечении;

5.3.Исполнительная схема отклонений осей колонн от вертикали в верхнем сечении;

6.Акты освидетельствования скрытых работ : 6.1Монтаж металлоконструкций (колонн, балок, ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и вертикальных связей);

6.2.Устройство подливки под базы колонн;

6.3.Антикоррозионная защита сварных соединений;

7.Акты приемки и испытаний строительных конструкций:7.1. Акт освидетельствования ответственных конструкций (каркас здания);

7.2Акт визуального осмотра сварных швов-100% длины сварных швов

7.3. Акт контроля сварных швов неразрушающим способом.-не менее 0,5% длины сварных швов в случае отсутствия указаний в проекте). С документами лаборатории.

8.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

9.Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков, протоколы механических испытаний допускных стыков, удостоверение руководителя сварочных работ (не ниже II уровня),

10 Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №8 от 15.06.2020.

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Б3)

1.Общий журнал работ

2. Журнал по монтажу строительных конструкций 3.Журнал производства сварочных работ; 4.Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 5.Исполнительная схема монтажа

6. Акт освидетельствования ответственных конструкций - на каждый этаж здания;

 

7.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж металлоконструкций (колонн, балок, ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и вертикальных связей);

8.Акты приемки и испытаний строительных конструкций:8.1.Акт освидетельствования ответственных конструкций (каркас здания);

8.2.Акт визуального осмотра сварных швов-100% длины сварных швов

8.3.Акт контроля сварных швов неразрушающим способом (радиографическим, ультразвуковым и др.-не менее 0,5% длины сварных швов в случае отсутствия указаний в проекте). С документами лаборатории.

9.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологическиезаключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций)

10.Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №8 от 15.06.2020.

Монтаж профлиста

1.Общий журнал работ

2.Высотные исполнительные схемы консолей колонн, площадок опирания перекрытий и покрытий, панелей. 

3 . Акты освидетельствования скрытых работ 

4. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций) 

5. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

КС-2 №8 от 15.06.2020.

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм

1.Общий журнал работ

2.Высотные исполнительные схемы консолей колонн, площадок опирания перекрытий и покрытий, панелей. 3 . Акты освидетельствования скрытых работ: 3.1.установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий;

3.2.армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий;

3.3.бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий;

4. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, строительные материалы, изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве металлоконструкций) 

5 . Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МиКва» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Курорт Доброград» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6000 рублей 00 копеек.

Выдача исполнительных листов осуществляется по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                   Ю.В. Бондарева-Битяй