28/2023-140546(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-5299/2023

г. Новосибирск

22 мая 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  

О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  

(ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания  

"Сибазстрой" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, об обязании устранить недостатки, при участии: 

от истца: ФИО2 (доверенность 12/1/13441 от 20.12.2022, паспорт,  

диплом); от ответчика: не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Департамента энергетики, жилищного и  

коммунального хозяйства города удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью строительная  

компания "Сибазстрой" (ОГРН 

<

***>) устранить дефекты работ по  

муниципальному контракту № 01513000349200000560001 от 04.08.2020, в  срок до 30.06.2023 года, а именно:  

- устранить выкрашивание асфальтобетонного покрытия (трещина  в асфальтобетонном покрытии проезда, парковки);  

- устранить просадку асфальтобетонного покрытия тротуара (трещина); 

- устранить трещину в асфальтобетонном покрытии проезда ( со стороны  магазинов), выкрашивание асфальтобетонного покрытия;  

- выполнить заделку швов между бортовыми камнями на территории  многоквартирного дома;  

- устранить отклонение бортовых камней; 

- выполнить восстановление растительного слоя вдоль линии бортового  камня проезда к подъезду № 1, на территории многоквартирного дома;  

- восстановить бетонную отмостку (бетонная отмостка подъезда № 1 не  долита до урны);  

- заасфальтировать колодец (с торца многоквартирного дома на углу  поворота проезда заасфальтирован люк канализации) по адресу: 

<

...>  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная  компания "Сибазстрой" (ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента  энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ОГРН  

<

***>) штраф в размере 5 000 рублей.  

В случае неисполнения решения суда об устранении недостатков  выполненных работ по настоящему делу в установленный в решении срок,  взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная  компания "Сибазстрой" (ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента  энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ОГРН  

<

***>) в качестве компенсации за неисполнение судебного акта 5000  рублей за каждый день неисполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная  компания "Сибазстрой" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 8 000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

 Дата 14.03.2023 5:05:00

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна