Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

11 декабря 2018 годаДело № А56-93812/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

:ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПБВЕРГАЗ" (адрес:  Россия 195197, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ПОЛЮСТРОВСКИЙ 50; Россия 197342, Санкт-Петербург, Белоостровская 17, к2, оф 409, ОГРН:  1027800514565; 1027800514565);

к :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАТОР" (адрес:  Россия 191014, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул МАЯКОВСКОГО 36-38/А/3-Н, ОГРН:  1157847003940);

о взыскании 42 672 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 15.08.2016 № РСПб-01-150816 за период с 13.09.2017 по 25.05.2018,

приняв во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 3 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", а также тот факт, что письмом от 05.10.2017 истец отказался от договора, потребовав возврата перечисленного аванса, с указанного момента основания для начисления неустойки за просрочку выполнения работ отсутствуют,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РЕНОВАТОР" в пользу закрытого акционерного общества "СПБВЕРГАЗ" 3586 руб. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 13.09.2017 по 02.10.2017, 181 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

В остальной части в иске отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Сурков А. А.