АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

05 февраля 2026 года

Дело № А33-26439/2025

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 29.01.2026.

В полном объёме решение изготовлено 05.02.2026.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Горбатовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (ИНН 2463102814, ОГРН 1162468093952)

к обществу с ограниченной ответственностью "Вудлайн" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании устранить нарушения лесного законодательства,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- краевого государственного бюджетного учреждения «Кодинское лесничество» (ИНН 

<

***>, адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский муниципальный округ, 

<

...>, а/я 209);

в отсутствие лиц, участвующих в деле (до и после перерыва),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновой А.Е.

установил:

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Вудлайн" (далее – ответчик) об обязании в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 №330-з следующие лесовосстановительные мероприятия за 2024 год:

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление – 14,9 га;

- агротехнический уход – 0,9 га;

- заготовка семян – 12 га.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 23.09.2025 возбуждено производство по делу, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено краевое государственное бюджетное учреждение «Кодинское лесничество».

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Информация о дате и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).

19.01.2026 посредством сервиса «Мой Арбитр» от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит обязать в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить лесовосстановительные мероприятия за 2024 год в рамках договора аренды лесного участка от 02.12.2009 №330-з:

- заготовка семя – 12 кг.

В соответствии со статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение исковых требований принято судом. Спор рассматривается с учетом принятых уточнений.

19.01.2026 посредством сервиса «Мой Арбитр» от истца поступили письменные пояснения по делу.

21.01.2026 посредством сервиса «Мой Арбитр» от ответчика поступило ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании.

Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд исследовал материалы дела, определил, удовлетворить ходатайство ответчика об объявлении перерыва в судебном заседании.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв.

После перерыва представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Информация о дате и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).

Суд исследовал материалы дела.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между агентством лесной отрасли Красноярского края (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «АЛПК плюс» (арендатор) подписан договор аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з (далее – договор аренды), в соответствии с пунктом 1 которого арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 н 74 Лесного кодекса Российской Федерации, обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, определенные пунктом 2 договора (далее - лесные участки).

В соответствии с пунктом 2 договора аренды лесные участки, общей площадью 13942,194 га, расположены: Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество, Ковинское участковое лесничество, кварталы №№ 156-159, 279, 280, 318, 345, 348-352, 357, 381, 416, 417.

Лесные участки переданы по акту приема-передачи.

Согласно подпункту «ж» пункта 13 договора арендатор обязан осуществлять мероприятия по лесовосстановлению на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 за счет собственных средств.

04.10.2010 между агентством лесной отрасли Красноярского края и обществом с ограниченной ответственностью «Лесное» подписано дополнительное соглашение № 1 к договору аренды лесного участка, в соответствии с пунктом 1 которого, в преамбуле и по тексту договора слова «ООО АЛПК плюс» заменить словами ООО «Лесное».

05.04.2013 между агентством лесной отрасли Красноярского края (арендодатель), обществом с ограниченной ответственностью «Лесное» (арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью «СевероЛес» (перенаниматель) подписано дополнительное соглашение № 2 к договору аренды лесного участка, в соответствии с пунктом 1 которого арендатор с согласия арендодателя уступает перенанимателю, а перенаниматель, соответственно, принимает на себя все права и обязанности по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з.

28.08.2015 между ООО «СевероЛес» и ответчиком подписан договор передачи прав и обязанностей к договору аренды лесного участка, согласно которому ООО «СевероЛес» передает ООО «ВудЛайн» в полном объеме все права и обязанности по договору.

К договору аренды лесного участка разработан проект освоения лесов, получивший положительное экспертное заключение № 926, утвержденное приказом министерства от 09.08.2019 № 2248-РЛР/Э. Разделами 4.8 - 4.9 проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка установлены виды лесовосстановительных мероприятий, среднегодовые объемы и сроки их осуществления. В соответствии с таблицей 22 проекта освоения лесов ответчик ежегодно обязан выполнять следующие мероприятия по лесовосстановлению на территории Кодинского лесничества Ковинского участкового лесничества: искусственное лесовосстановление – 21,1 га; естественное лесовосстановление - 157 га, установлены нормы агротехнического ухода. Согласно примечаниям к таблице 22 проект освоения лесов ежегодные объемы лесовосстановительных мероприятий могут корректироваться в зависимости от факта освоения расчетной лесосеки за предшествующий год, мест проведения рубок и наличия доступного фонда лесовосстановления.

Таблицей 4.9.1 (22) проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з, установлены виды лесовосстановительных мероприятий, среднегодовые объемы и сроки их осуществления.

Письмом министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края от 27.04.2024 года № 86-07170 «О корректировке плана» на 2024 год установлены (скорректированы) следующие объемы лесовосстановительных мероприятий, по договору аренды лесного участка:

- искусственное лесовосстановление на площади - 14,9 га;

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 14,9 га;

- в том числе будущего года - 0 га;

- естественное лесовосстановление - 0 га;

- агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки - 47,2 га;

- дополнение лесных культур - 0 га;

- заготовка лесных семян - 12 кг.

Согласно письму КГБУ «Кодинское лесничество» от 03.09.2025 № 05-03/816 ООО «ВудЛайн» в 2024 году не выполнило следующие лесовосстановительные мероприятия:

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 14,9 га;

- агротехнический уход - 0,3 га;

- заготовка семян - 12 га.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик пояснил, что с указанными доводами в исковом заявлении не согласен, лесовосстановительные мероприятия за 2024 год фактически выполнены в полном объеме, в подтверждение выполнения работ представил акты по воспроизводству лесов за 2024, акт заключительного осмотра лесосеки от 14.10.2024; акт по воспроизводству лесов за 2024; договор поставки семян №11-11/2024 от 11.11.2024; отчет о воспроизводстве лесов за 2024; письмо из Министерства от 27.04.2024.

Истец уточнил исковые требования, указал, что до настоящего времени сведений о заготовке семян в объеме 12 кг ответчиком в министерство не представлено, представил в материалы дела справку отдела организации лесовосстановления №86-86-169 от 16.01.2026.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе, гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, вследствие неосновательного обогащения.

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.

Согласно части 2 статьи 4 Лесного кодекса Российской Федерации, от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.

Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.07.2016 № 560-р образовано министерство лесного хозяйства Красноярского края (далее - министерство), действующее на основании положения, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2016 № 374-п.

Министерство является органом исполнительной власти Красноярского края (далее - край), который на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края осуществляет надзор (контроль) в области лесных отношений.

Соответственно, органом исполнительной власти Красноярского края, уполномоченным в области лесных отношений в настоящее время, является Министерство лесного хозяйства Красноярского края.

15.01.2024 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об изменении наименования истца: министерства лесного хозяйства Красноярского края на Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ) природный объект определяется как естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; естественная экологическая система - это объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией.

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью.

В силу статьи 4 Закона 7-ФЗ объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы.

В соответствии со статьей 11 Закона № 7-ФЗ каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

Согласно статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации, лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты основываются на следующих принципах: устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала; сохранение средообразующих, водоохранных,	защитных,	санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; обеспечение охраны и защиты лесов.

Статьей 5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

Согласно статье 6 Лесного кодекса Российской Федерации леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

В соответствии со статьей 12 Лесного кодекса Российской Федерации освоение лесов основывается на комплексном подходе с осуществлением проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду составляют проект освоения лесов (статья 88 Лесного кодекса РФ).

Согласно части 1 статьи 61 Лесного кодекса Российской Федерации, вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков (часть 2 статья 62 Лесного кодекса РФ, приказ МПР России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений» (далее - Правила лесовосстановления)).

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» утвержден состав проекта освоения лесов и порядок его разработки.

Согласно пункту 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках.

Согласно пункту 7 Правил лесовосстановления, лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, редин, прогалин, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления земель, при котором в зависимости от состояния на них подроста и молодняка определяются способы лесовосстановления в соответствии с названными Правилами. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению.

Таким образом, выполнение лесовосстановительных мероприятий является обязанностью лесопользователя и данные работы должны осуществляться в сроки и объемах, предусмотренных проектом освоения лесов, сводным актом по воспроизводству лесов.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Ссылаясь на нарушение ответчиком требований лесного законодательства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Письмом министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края от 27.04.2024 года № 86-07170 «О корректировке плана» на 2024 год установлены (скорректированы) следующие объемы лесовосстановительных мероприятий, по договору аренды лесного участка:

- искусственное лесовосстановление на площади - 14,9 га;

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 14,9 га;

- в том числе будущего года - 0 га;

- естественное лесовосстановление - 0 га;

- агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки - 47,2 га;

- дополнение лесных культур - 0 га;

- заготовка лесных семян - 12 кг.

Согласно письму КГБУ «Кодинское лесничество» от 03.09.2025 № 05-03/816 ООО «ВудЛайн» в 2024 году не выполнило следующие лесовосстановительные мероприятия:

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 14,9 га;

- агротехнический уход - 0,3 га;

- заготовка семян - 12 га.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик пояснил, что лесовосстановительные мероприятия за 2024 год фактически выполнены в полном объеме, в подтверждение выполнения работ представил акты по воспроизводству лесов за 2024, акт заключительного осмотра лесосеки от 14.10.2024; акт по воспроизводству лесов за 2024; договор поставки семян №11-11/2024 от 11.11.2024; отчет о воспроизводстве лесов за 2024; письмо из Министерства от 27.04.2024.

Истец уточнил исковые требования, указал, что до настоящего времени сведений о заготовке семян в объеме 12 кг ответчиком в министерство не представлено, представил в материалы дела справку отдела организации лесовосстановления №86-86-169 от 16.01.2026.

Доказательства выполнения лесовосстановительных работ в 2024 году в полном объеме согласно проекту освоения лесов в материалы дела не представлены. Факт невыполнения лесовосстановительных работ в уточненном истцом объеме подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. Ответчик на дату рассмотрения спора выполнение требований уточненного иска не подтвердил.

Учитывая, отсутствие в материал дела доказательств выполнения ответчиком лесовосстановительных работ в части заготовки семян в объеме 12 кг., исковые требования подлежат удовлетворению.

Положения Постановления Правительства от 02.10.2025 №1522 к настоящему спору неприменимы, поскольку в договоре отсутствует ответственность (неустойка) за нарушение сроков выполнения мероприятий.

В соответствии с частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Согласно разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Учитывая виды мероприятий, необходимых к выполнению, объемы необходимых мероприятий, срок рассмотрения спора, сроки, в течение которых подлежали выполнению мероприятия по условиям договора, суд полагает, что испрашиваемый истцом срок – 3 месяца с момента вступления решения суда в законную силу, является обоснованным и достаточным для выполнения лесовосстановлительных мероприятий.

С учетом вышеизложенного, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

В соответствии со статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрения дела по существу, или в определении.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку истец освобожден от оплаты государственной пошлины на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Вудлайн" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить лесовосстановительные мероприятия за 2024 год по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 №330-з:

- заготовка семя – 12 кг.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Вудлайн" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.А. Горбатова