1498/2023-129396(4) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

05 октября 2023 года Дело № А33-21492/2023  

Красноярск 

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 сентября 2023 года.  

Мотивированное решение составлено 5 октября 2023 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Смольниковой Е.Р., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки, без вызова лиц, участвующих в деле, 

установил:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском,  уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее –  ответчик) о взыскании 16314,05 руб. неустойки в связи с ненадлежащим исполнением  обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № 3245704989821000039 от  30.04.2021.  

Определением от 31.07.2023 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.  

Определением от 25 сентября 2023 года принято заявление об увеличении требований.  

25 сентября 2023 года судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему  делу.  

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по заявлению лица, участвующего в деле, или в  случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного  производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Мотивированное  решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от  лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.  

28.09.2023 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление истца о составлении мотивированного решения по настоящему делу. Резолютивная часть решения  размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26.09.2023. Истцом срок, предусмотренный частью 2 статьи 229 АПК РФ, на подачу заявления о составлении мотивированного решения не пропущен. При указанных  обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 АПК РФ.  

Код доступа к материалам дела - 

При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства и суд пришел к следующим выводам.  

Между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) 30.04.2021 заключен муниципальный контракт № 3245704989821000039, по условиям которого подрядчик обязуется  в установленный контрактом срок выполнить ремонтно-строительные (строительно- монтажные) работы на объекте: здание МБОУ «СШ № 2», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А (далее - объект) и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 контракта).  

Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью контракта, а также нормами и  правилами выполнения данных работ, установленными законодательством Российской  Федерации (пункт 1.2 контракта).  

В силу пункта пункт 1.3 контракта подрядчик обязуется завершить выполнение работ,  предусмотренных настоящим контрактом, в срок по 13.08.2021 в соответствии с графиком  выполнения работ (Приложение № 1).  

Цена настоящего контракта с учетом всех сборов и налогов, а также затрат, связанных  с её формированием не должна превышать сумму в размере: 911 141,55 коп. Подрядчик не  является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС) (пункт 2.1 контракта).  

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного  обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (пункт  12.3 контракта).  

В соответствии с п.7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически  исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если  законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени  (пункт 12.3.1).  

Контракт вступает в силу и считается заключённым с момента размещения в единой  информационной системе подписанного заказчиком контракта и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не более, чем до 13.01.2022. Настоящий контракт хранится на сайте оператора электронной площадки: www.etpets.ru (пункт 15.2 контракта).  

07.10.2021 сторонами составлен и подписан акт приёмки законченного ремонтом объекта, согласно пункту 3 которого выполнение ремонтно-строительных (строительно- монтажных) работ проводилось в период с 30.04.2021 по 07.10.2021.  

Согласно пункту 6 акта от 07.10.2021, на основании осмотра предъявленного к приёмке объекта в натуре и ознакомления с указанной в пункте 5 настоящего акта документацией комиссия приходит к выводу о том, что на момент приёмки предусмотренная контрактом работа выполнена подрядчиком в объёме, допустимом эксплуатации объекта, в неустановленный контрактом срок, не имеет недостатков, препятствующих приёмке.  

Фактическая стоимость ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ, согласно актам КС-2 составляет 741 547,74 руб. (пункт 7 акта).  

Также сторонами подписаны акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2) №№  

Согласно информации, размещенной в сети Интернет на сайте «закупки» 29.10.2021  сторонами заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от  30.04.2021 № 3245704989821000039, согласно пункту 1 которого подрядчик выполнил работы по указанному контракту на сумму 741 547,74 руб., а заказчик оплатил работы.  

Согласно пункту 1.1 соглашения, стороны признают отсутствие взаимных претензий  по качеству и объёмам работ по контракту, а также тот факт, что к моменту подписания  настоящего соглашения стоимость фактически выполненных подрядчиком работ в соответствии с актом приёмки законченного ремонтом объекта, подписанным учреждением  «УКРиС» и индивидуальным предпринимателем ФИО2 11.10.2022, составляет  741 547,74 руб.  

В связи с нарушением срока исполнения муниципального контракта (13.08.2021) истец начислил ответчику пеню за просрочку выполнения работ в размере 16 314,05 руб. за  период с 14.08.2021 по 07.10.2021, потребовал оплаты её сначала в претензионном порядке, а затем обратился с соответствующим иском в суд. Ответчик отзыв на исковое заявление не направил.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Заключенный контракт является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №  44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре  подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.  

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором  подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных  ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и  в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в  порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и  принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4  статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.).  

Во втором абзаце части 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  указано, что если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Факт выполнения работ по контракту на сумму 741 547,74 руб. и их приемка заказчиком подтверждается актом приемки оказанных услуг от 07.10.2021, а также актами КС-2  

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения работ, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 16 314,05 руб. пени за период с 14.08.2021 по  07.10.2021.  

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и  другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно  быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 В пункте 1.3 контракта указан срок выполнения работ - по 13.08.2021 в соответствии  с графиком работ. Пунктом 12.3.1 контракта установлено, что пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Поскольку подрядчиком срок выполнения работ нарушен, начисление пени произведено обоснованно.  

Из представленного расчета следует, что истец начислил ответчику 16 314,05 руб. пени за период с 14.08.2021 по 07.10.2021 по ключевой ставке Банка России в размере 12%  (действующей на дату вынесения решения). Вместе с тем, из представленных в материалы  дела актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 следует, что подрядчик окончил  выполнение работ и сдал их заказчику, а заказчик принял выполненные работы  07.10.2021. Таким образом, определенность в отношениях сторон по вопросу размера неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной подрядчиком просрочкой выполнения  работ, наступила в момент окончания фактического исполнения спорных обязательств. С  учетом указанных обстоятельств, при расчете неустойки подлежит применению размер  ключевой ставки Банка России, действующей на день прекращения обязательств –  07.10.2021 - в размере 6,75%. Данный вывод соответствует правовой позиции Верховного  Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 04.12.2018 N 302-ЭС18-10991.  С учётом изложенного, по расчёту суда размер неустойки за указанный период составляет  9170,54 (741 054,00 × 55 (с 14.08.2021 по 07.10.2021) × 1/300 × 6.75%).  

В пункте 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ указано, что начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в  связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах  обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней),  начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом (далее - Правила). В соответствии с пунктом 2 названных Правил списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме. В силу подпункта «а»  пункта 3 Правил, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пе- 

ней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). В пункте 11 Правил указано,  что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и  осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплачен- ной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.  

Как следует из материалов дела, обязательства по контракту на сумму 741 547,74 руб.  исполнены подрядчиком, обязательства по контракту на сумму 169 593,81 руб. прекращены на основании подписанного сторонами соглашения о расторжении контракта от  29.10.2021. При этом расторжение контракта по соглашению сторон является их правом и  не отнесено Правилами к исключительным случаям, при наличии которых списание неустойки не допускается. В силу подпункта «а» пункта 3 Правил, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней). В пункте 11 Правил указано, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого  решения.  

Принимая во внимание, что работы по контракту были выполнены подрядчиком в  полном объеме в 2021 году с учётом соглашения о расторжении контракта, общая сумма  пени за просрочку оказания услуг не превышает 5 % от цены контракта, суд приходит к  выводу о наличии оснований для списания неустойки. С учетом изложенного, суд отказывает истцу в удовлетворении исковых требований.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых  принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Государственная  пошлина за рассмотрение иска составляет 2000 руб. В соответствии с подпунктом 1.1  пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобождён от  уплаты государственной пошлины, в связи с чем вопрос об отнесении расходов на её  уплату в связи с отказом в удовлетворении иска судом не разрешается.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код  доступа - ). По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 16 314,05 руб. неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № 3245704989821000039 от  30.04.2021, отказать в связи с наличием оснований для списания неустойки, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О  списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».  

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в  течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного  решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, пу- тём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме  электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены  им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения  резолютивной части решения в установленном порядке в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.  

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в  суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.  

Судья Е.Р. Смольникова