18/2022-86366(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

24 марта 2022 года Дело № А55-19789/2021  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Шаруевой Н.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тяжевой К.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «УК ЖКХ г. Тольятти» 

к Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд  капитального ремонта»  

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  управление Вертекс»  

об обязании устранить недостатки работ и о взыскании 2 620 644 руб. 51 коп. при участии в заседании от истца – Фатхуллина Е.А. по доверенности от 09.01.2022; от ответчика – не явился, извещен; от третьего лица – не явился, извещен. 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать Некоммерческую организацию «Региональный оператор Самарской области  

«Фонд капитального ремонта» в срок до 30.06.2022 безвозмездно устранить недостатки  

работ, выполненных в рамках проведения капитального ремонта на многоквартирном  

доме № 19 по бульвару Кулибина, г. Тольятти, а именно: 1. Недостатки Тепловых пунктов 1 и 2: 

- отрегулировать давление в системе Горячего водоснабжения, теплового пункта № 1  

и № 2; - привести в рабочее состояние регулятора давления; 

- обеспечить указателем направления потока теплового пункта № 1 и № 2;  - установить схемы;  

2. Недостатки в работах по электроснабжению: 

- заменить вводно - распределительное устройство (ВРУ);  - установить крышки перфорирования лотков по подвалу;  

- установить бирки в щитке 7 на 1 этаже;  

- установить знаки электробезопасности; маркировку квартир на щитке 7; замки на  

щитках этажных в количестве 10 штук; 

- смонтировать освещение в проходных подъездах № 6, 20, 26;  - полностью закрепить гофру в мусорокамерах по подвалу;  - заменить Щ7 подъездах 7-10;  

 - установить контур заземления;  - заменить освещение в арке; 

3. Недостатки в работах по электроснабжению ВРУ:  - заделать отверстия в подвал под ВРУ  

- установить защитный экран (юбка) со всеми ВРУ; бирки в ВРУ; схему, знаки эл.  

безопасности, освещение в ВРУ; восстановить вводные кабельные линии в ВРУ; 

 - поставить на учет вводные приборы; обеспечить подключение ВРУ № 2 и № 5; 4. Выполнить: 

- Настройку и отладку системы освещения лестничных клеток, для отключения в  

светлое время суток, в подъездах 1-29 и подвальных помещениях; 

- Восстановить освещение тамбуров в подъездах 15,16,17; 

- Выполнить восстановление оградительных конструкций межэтажных эл. щитков в  

подъездах № 1-10; - восстановить запирание эл. щитков в кол-ве 40 шт; - Выполнить освещение арок. - Выполнить заземление с земляными работами. 5. Закончить работы по капитальному ремонту, а именно: 

- Смонтировать освещение в проходных подъездах № 6, 26, 20;  - Укрепить полностью гофру на освещение в мусорокамерах по подвалу;  

- Установить крышки перфорированных лотков по подвалу;  - Восстановить в подъездах с 1 по 29 проектную зашивку из ДСП потолков;  

- Запенить и заделать по контуру электрощитков отверстия с 1 по 10 подъезды.  В остальной части иска отказать.  

Взыскать с Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской  

области «Фонд капитального ремонта» расходы по государственной пошлине в сумме  

6000 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «УК ЖКХ г. Тольятти» в  

доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 20 865 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  

суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  

области. 

Судья / Н.В. Шаруева  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 10.12.2021 2:08:57

Кому выдана Шаруева Наталья Вячеславовна