Арбитражный суд Краснодарского края 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А32-51814/2024

г. Краснодар

10 декабря 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2025 года Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2025 года  

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Бондаренко И.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ГБУЗ «ККБ № 2» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Краснодар,  

к ООО «ВИТА СТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Краснодар, о взыскании, 

при участии в заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен, при ведении аудиозаписи,  

У С Т А Н О В И Л:

ГБУЗ «ККБ № 2» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «ВИТА СТРОЙ» штрафа в размере 4 505 631,69 руб., неустойки в размере 4 959 012,95 руб. (исходя из действующей на дату вынесения решения ключевой ставки ЦБ РФ), расходов по оплате государственной пошлины в размере 70 323 руб.  

Стороны явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом.  

В судебном заседании 31.07.2025 объявлен перерыв до 17 час. 20 мин. 14.08.2025. После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие сторон, аудиозапись не ведется.  

В судебном заседании 14.08.2025 объявлен перерыв до 17 час. 45 мин. 28.08.2025. После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие сторон, аудиозапись не ведется.  

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.  

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, установил следующее.  

Как следует из материалов дела, между государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» министерства здравоохранения  

Краснодарского края (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ВИТА CTPOЙ» (поставщик) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон о контрактной системе) по результатам аукциона в электронной форме был заключен контракт № 08185000008220101260001 на выполнение работ для государственных нужд «Капитальный ремонт объекта: «Здание перинатального центра литер «О». Отделение физиологии. 4, 3, 2 этажи, лестница» по адресу 

<

...>» (далее – контракт).  

В соответствии с условиями контракта ответчик принял на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту объекта: «Здание перинатального центра литер «О». Отделение физиологии. 4, 3, 2 этажи, лестница» по адресу 

<

...> (далее - работы) на сумму 156 232 885 (сто пятьдесят шесть миллионов двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 93 копейки.  

В соответствии с п. 3.1 контракта выполнение работ осуществляется с даты заключения контракта по 31.07.2024.  

Кроме того, контрактом предусмотрены следующие этапы исполнения: 

Срок выполнения работ по 1-му этапу: с даты заключения контракта по 15.03.2023. Стоимость 1-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 4 224 601,39 рублей.  

Срок выполнения работ по 2-му этапу: с 01.03.2023 по 15.04.2023. Стоимость 2-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 2 154 619,95 рублей.  

Срок выполнения работ по 3-му этапу: с 20.03.2023 по 30.04.2023. Стоимость 3-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 9 311 766,68 рублей.  

Срок выполнения работ по 4-му этапу: с 01.03.2023 по 15.05.2023. Стоимость 4-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 1 104 752,15 рублей.  

Срок выполнения работ по 5-му этапу: с 01.03.2023 по 31.05.2023. Стоимость 5-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 3 427 190,72 рублей.  

Срок выполнения работ по 6-му этапу: с 01.03.2023 по 15.06.2023. Стоимость 6-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 11 895 772,40 рублей.  

Срок выполнения работ по 7-му этапу: с 01.05.2023 по 23.06.2023. Стоимость 7-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 355 892,27 рублей.  

Срок выполнения работ по 8-му этапу: с 27.03.2023 по 30.06.2023. Стоимость 8-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 8 989 450,81 рублей.  

Срок выполнения работ по 9-му этапу: с 08.05.2023 по 09.07.2023. Стоимость 9-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 257 044,40 рублей.  

Срок выполнения работ по 10-му этапу: с 22.05.2023 по 15.07.2023. Стоимость 10-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 2 353 918,25 рублей.  

Срок выполнения работ по 11-му этапу: с 01.06.2023 по 23.07.2023. Стоимость 11- 

Срок выполнения работ по 12-му этапу: с 27.03.2023 по 31.07.2023. Стоимость 12-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 11 285 382,39 рублей.  

Срок выполнения работ по 13-му этапу: с 24.04.2023 по 30.09.2023. Стоимость 13-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 4 252 067,96 рублей.  

Срок выполнения работ по 14-му этапу: с 25.04.2023 по 15.10.2023. Стоимость 14-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 2 078 368,48 рублей.  

Срок выполнения работ по 15-му этапу: с 07.05.2023 по 30.01.2024. Стоимость 15-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 9 626 893,45 рублей.  

Срок выполнения работ по 16-му этапу: с 01.05.2023 по 31.10.2023. Стоимость 16-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 2 184 442,44 рублей.  

Срок выполнения работ по 17-му этапу: с 01.05.2023 по 15.11.2023. Стоимость 17-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 1 128 980,87 рублей.  

Срок выполнения работ по 18-му этапу: с 22.05.2023 по 20.11.2023. Стоимость 18-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 13 417 678,55 рублей.  

Срок выполнения работ по 19-му этапу: с 22.05.2023 по 15.01.2024. Стоимость 19-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 1 570 728,17 рублей.  

Срок выполнения работ по 20-му этапу: с 08.06.2023 по 25.01.2024. Стоимость 20-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 8 126 564,31 рублей.  

Срок выполнения работ по 21-му этапу: с 15.07.2023 по 31.01.2024. Стоимость 21-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 10 404 539,44 рублей.  

Срок выполнения работ по 22-му этапу: с 05.02.2024 по 31.03.2024. Стоимость 22-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 3 659 628,85 рублей.  

Срок выполнения работ по 23-му этапу: с 01.03.2024 по 21.04.2024. Стоимость 23-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 1 997 737,78 рублей.  

Срок выполнения работ по 24-му этапу: с 15.03.2024 по 30.04.2024. Стоимость 24-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 976235,74 рублей.  

Срок выполнения работ по 25-му этапу: с 01.03.2024 по 15.05.2024. Стоимость 25-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 1 466 428,91 рублей.  

Срок выполнения работ по 26-му этапу: с 01.03.2024 по 31.05.2024. Стоимость 26-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 2 707 521,03 рублей.  

Срок выполнения работ по 27-му этапу: с 01.03.2024 по 15.06.2024. Стоимость 27-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 11 104 476,63 рублей.  

Срок выполнения работ по 28-му этапу: с 01.03.2024 по 23.06.2024. Стоимость 28- 

Срок выполнения работ по 29-му этапу: с 01.04.2024 по 30.06.2024. Стоимость 29-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 3 571 806,45 рублей.  

Срок выполнения работ по 30-му этапу: с 01.03.2024 по 09.07.2024. Стоимость 30-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 4 620 162,73 рублей.  

Срок выполнения работ по 31-му этапу: с 01.03.2024 по 15.07.2024. Стоимость 31-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 2 439 715,04 рублей.  

Срок выполнения работ по 32-му этапу: с 01.05.2024 по 29.07.2024. Стоимость 32-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 9 561 299,77 рублей.  

Срок выполнения работ по 33-му этапу: с 01.05.2024 по 30.05.2024. Стоимость 33-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 261 555,14 рублей.  

Срок выполнения работ по 34-му этапу: с 01.06.2024 по 26.07.2024. Стоимость 34-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 130 983,12 рублей.  

Срок выполнения работ по 35-му этапу: с 01.06.2024 по 31.07.2024. Стоимость 35-го этапа исполнения контракта (в редакции дополнительного соглашения № 13) составляет 3 799 986,99 рублей.  

Вместе с тем, истец указывает, что работы по 1-му, 2-му, 4-му, 5-му, 6-му, 8-му, 10-му, 12-му, 14-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му этапам исполнения контракта в полном объеме в указанный срок не выполнены, что привело к нарушению срока выполнения работ по этапам, предусмотренного контрактом, работы по 5-му, 6-му, 8-му, 10-му, 12-му, 15-му, 17-му, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му этапу исполнения контракта выполнены не в полном объеме, что привело к нарушению условий контракта, работы по 3-му, 7-му, 9-му, 11-му, 22-му, 23-му, 24-му, 25-му этапам исполнения контракта не выполнены, что привело к нарушению условий контракта.  

Согласно п.п. 11.1, 11.2. контракта все споры и разногласия в связи с исполнением контракта, разрешаются путем переговоров. В отношении всех претензий и иных обращений, направляемых по настоящему контракту, сторона, в адрес которой направлена претензия, должна дать письменный ответ в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения обращения. Таким образом, рассмотрение и направление ответа на претензию в установленный контрактом срок является обязанностью стороны, в адрес которой она направлена.  

В соответствии с п. 11.3 контракта все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 28.04.2023 № 2425 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 1-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 28.04.2023.  

контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, а также о списании начисленной неустойки.  

Работы по 1-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком 12.05.2023 на сумму 3 556 812,93 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 15.05.2023 № 1.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastnyy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 18.05.2023 № 2815 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 2-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 18.05.2023.  

В ответ на претензию ООО «ВИТА СТРОЙ» направило уведомление от 19.05.2023 № 53 о невозможности выполнения работ по 2-му этапу в срок, установленный контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, а также о списании начисленной неустойки.  

Работы по 2-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 09.06.2023 на сумму 2035121,46 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 09.06.2023 № 8.  

Работы по 2-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 05.11.2023 на сумму 119 498,48 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 07.11.2023 № 21 (исправление № 1 от 07.11.2023). Работы по 2-му этапу контракта исполнены в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastnyy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 19.06.2023 № . 3498 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 4-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 19.06.2023.  

В ответ на претензию ООО «ВИТА СТРОЙ» направило уведомление от 19.06.2023 № 77 о невозможности выполнения работ по 4-му этапу в срок, установленный контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, а также о списании начисленной неустойки.  

Работы по 4-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 05.10.2023 на сумму 1 104 752,15 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 05.10.2023 № 18. Работы по 4-му этапу контракта исполнены в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Работы по 5-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 19.05.2023 на сумму 57 530,75 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 19.05.2023 № 3.  

Работы по 5-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 09.06.2023 на сумму 244 711,80 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 09.06.2023 № 7.  

Работы по 5-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.06.2023 на сумму 867 815,41 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.06.2023 № 11.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 03.07.2023 № 3927 с расчетом неустойки, начисленной за нарушение срока выполнения работ за период с 01.06.2023 по 09.06.2023 в размере 8 011,98 рублей и предложением принять необходимые меры для завершения работ по 5-му этапу контракта. Согласно п, 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 04.07.2023.  

контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, а также о списании начисленной неустойки.  

Работы по 5-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 17.11.2023 на сумму 265 966,88 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 17.11.2023 № 23.  

Работы по 5-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.12.2023 на сумму 1 149 827,72 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.12.2023 № 30.  

Работы по 5-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 17.04.2024 на сумму 80 688,26 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 17.04.2024 № 40. Общая сумма выполненных работ по 5-му этапу контракта составила 2 666 540,82 рублей. Работы по 5-му этапу контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 27.06.2023 № 3768 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 6-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 27.06.2023.  

В ответ на претензию ООО «ВИТА СТРОЙ» направило уведомление от 03.07.2023 № 88/2 о невозможности выполнения работ по 6-му этапу в срок, установленный контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, а также о списании начисленной неустойки.  

Работы по 6-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.06.2023 на сумму 229 165,20 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.06.2023 № 13 (исправление № 2 от 04.07.2023).  

Работы по 6-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 07.08.2023 на сумму 3 149 387,00 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 07.08.2023 № 15.  

Работы по 6-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 05.10.2023 на сумму 613 570,22 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 05.10.2023 № 19.  

Работы по 6-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 17.11.2023 на сумму 6 278 443,91 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 17.11.2023 № 24.  

Работы по 6-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.12.2023 на сумму 161 641,26 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.12.2023 № 31.  

Работы по 6-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 21.03.2024 на сумму 1286056,50 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 21.03.2024 № 34. Общая сумма выполненных работ по 6-му этапу контракта составила 11 718 264,09 рублей. Работы по 6-му этапу контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 10.07.2023 № 4109 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 7-му и 8-му этапам контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 11.07.2023.  

В ответ на претензию ООО «ВИТА СТРОЙ» направило уведомление от 12.07.2023 № 93/1 о невозможности выполнения работ по 7-му и 8-му этапам в срок, установленный контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, а также о списании начисленной неустойки.  

Работы по 8-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 17.11.2023 на сумму 1 652 649,80 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 17.11.2023 № 25.  

Работы по 8-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 21.03.2024 на сумму 458 652,14 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 21.03.2023 № 35. Общая сумма выполненных работ по 8-му этапу исполнения контракта составила 2 111 301,94 рублей. Работы по 8-му этапу исполнения контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (mfo@vitastrcry.pro, vvmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 28.07.2023 № 4500 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 9-му и 10-му этапам контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 28.07.2023.  

В ответ на претензию ООО «ВИТА СТРОЙ» направило уведомление от 31.07.2023 № 103 о невозможности выполнения работ по 9-му и 10-му этапам в срок, установленный контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией.  

Работы по 10-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.12.2023 на сумму 859 978,10 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.12.2023 № 32. Общая сумма выполненных работ по 10-му этапу контракта составила 859 978,10 рублей. Работы по 10-му этапу контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wrnaslov@mail.ru), была направлена претензия от 02.08.2023 № 4616 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 11-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 02.08.2023.  

В ответ на претензию ООО «ВИТА СТРОЙ» направило уведомление от 03.08.2023 № 106 о невозможности выполнения работ по 1-му этапу в срок, установленный контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией.  

Работы по 12-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком 06.09.2023 на сумму 3 196 793,27 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 06.09.2023 № 17 (исправление № 1 от 07.09.2023).  

Работы по 12-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 21.03.2024 на сумму 483 176,08 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 21.03.2024 № 36. Общая сумма выполненных работ по 12-му этапу контракта составила 3 679 969,35 рублей. Работы по 12-му этапу исполнения контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Работы по 13-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 19.05.2023 на сумму 3 788 773,34 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 19.05.2023 № 2.  

Работы по 13-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 1L08.2023 на сумму 463 294,62 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 11.08.2023 № 16. Работы по 13-му этапу исполнения контракта исполнены в полном объеме в срок, установленный контрактом.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 23.10.2023 № 6763 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 14-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 23.10.2023.  

В ответ на претензию ООО «ВИТА СТРОЙ» направило уведомление от 07.11.2023 № 184 о невозможности выполнения работ по 14-му этапу в срок, установленный контрактом, в связи с выявлением работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, о рассмотрении возможности списания начисленной неустойки.  

Работы по 14-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 07.08.2023 на сумму 1 965 952,67 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 07.08.2023 № 14.  

Работы по 14-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 05.11.2023 на сумму 112 415,81 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 05.11.2023 № 22. Работы по 14-му этапу исполнения контракта исполнены в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Работы по 16-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 14.06.2023 на сумму 147 450,49 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 14.06.2023 № 9.  

Работы по 16-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.06.2023 на сумму 995 763,15 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.06.2023 № 12 (исправление № 1 от 04.07.2023). Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 15.11.2023 № 7519 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 16-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена Ответчиком 16.11.2023.  

Претензия от 15.11.2023 № 7519 ООО «ВИТА СТРОЙ» не рассмотрена и оставлена без ответа.  

Работы по 16-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.12.2023 на сумму 1 041 228,80 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.12.2023 № 28. Работы по 16-му этапу исполнения контракта исполнены в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Работы по 17-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 19.05.2023 на сумму 57 530,60 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 19.05.2023 № 4 (исправление № 1 от 25.05.2023).  

Работы по 17-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 02.06.2023 на сумму 84 185,70 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 02.06.2023 № 5 (исправление № 1 от 06.06.2023).  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 21.11.2023 № 7633 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 17-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 22.11.2023.  

Претензия от 21.11.2023 № 7633 ООО «ВИТА СТРОЙ» не рассмотрена и оставлена без ответа.  

Работы по 17-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.12.2023 на сумму 239 914,80 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.12.2023 № 33. Общая сумма выполненных работ по 17-му этапу контракта составила 381 631,10 рублей. Работы по 17-му этапу контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Работы по 18-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 02.06.2023 на сумму 221 990,75 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 02.06.2023 № 6 (исправление № 1 от 06.06.2023).  

Работы по 18-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.12.2023 на сумму 8 108 215,56 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.12.2023 № 27.  

Работы по 18-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 21.03.2024 на сумму 583 344,97 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 21.03.2024 № 37. Общая сумма выполненных работ по 18-му этапу контракта составила 8 913 551,28 рублей. Работы по 18-му этапу контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Работы по 19-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.12.2023 на сумму 1 182 207,46 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.12.2023 № 29.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 05.02.2024 № 675 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 19-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 05.02.2024.  

Претензия от 05.02.2024 № 675 ООО «ВИТА СТРОЙ» не рассмотрена и оставлена без ответа.  

Работы по 19-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 17.04.2024 на сумму 77 311,03 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 17.04.2024 № 41. Общая сумма выполненных работ по 19-му этапу контракта составила 1 259 518,49 рублей. Работы по 19-му этапу контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Работы по 20-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 12.10.2023 на сумму 3 091 613,11 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 12.10.2023 № 20 (исправление № 1 от 16.10.2023).  

Работы по 20-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 27.12.2023 на сумму 3 494 264,46 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.12.2023 № 26.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 05.02.2024 № 676 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 20-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 05.02.2024.  

Претензия от 05.02.2024 № 676 ООО «ВИТА СТРОЙ» не рассмотрена и оставлена без ответа.  

Работы по 20-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 21.03.2024 на сумму 1 363 182,67 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 21.03.2024 № 38. Общая сумма выполненных работ по 20-му этапу контракта составила 7 949 060,24 рублей. Работы по 20-му этапу контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Истцом в адрес Ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 08.02.2024 № 756 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 21-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена Ответчиком 08.02.2024.  

Претензия от 08.02.2024 № 756 ООО «ВИТА СТРОЙ» не рассмотрена и оставлена без ответа.  

Работы по 21-му этапу исполнения контракта сданы подрядчиком и приняты заказчиком 21.03.2024 на сумму 445 852,86 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 21.03.2024 № 39. Работы по 21-му этапу контракта исполнены не в полном объеме с нарушением срока исполнения контракта.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 10.04.2024 № 2155 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 22-му этапу  

контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 11.04.2024.  

В ответ на претензию ООО «ВИТА СТРОИ» направило уведомление от 15.04.2024 № 106 о невозможности выполнения работ по 22-му этапу в срок, установленный контрактом, в связи с выявлением многочисленных несоответствий проектной документации в части работ по устройству системы вентиляции, о которых заказчик был уведомлен.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 22.05.2024 № 3066 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 23-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена Ответчиком 22.05.2024.  

Претензия от 22.05.2024 № 3066 ООО «ВИТА СТРОЙ» не рассмотрена и оставлена без ответа.  

Истцом в адрес ответчика посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте (info@vitastroy.pro, wmaslov@mail.ru), была направлена претензия от 22.05.2024 № 3067 с предложением принять необходимые меры для завершения работ по 25-му этапу контракта. Согласно п. 11.3. контракта претензия, направленная по электронной почте получена ответчиком 22.05.2024.  

Претензия от 22.05.2024 № 3067 ООО «ВИТА СТРОЙ» не рассмотрена и оставлена без ответа.  

В связи с неоднократным уведомлением ООО «ВИТА СТРОЙ» заказчика о выявлении работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией при исполнении контракта, заказчиком 07.05.2024 был заключен договор № 223/24/04- 116 с коммерческой экспертной организацией на проведение экспертизы технической документации, полученной от авторского надзора, по заключению которой 15.05.2024 № 011 подтверждено обнаружение несоответствия проектных решений по проектированию капитального ремонта объекта: «Здание перинатального центра литер «О». Отделение физиологии 4 этаж» по адресу 

<

...>» в разделе 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» с шифром 223-21-04-266-ОВ.  

28.05.2024 стороны заключили соглашение о расторжении контракта от 31.01.2023 № 08185000008220101260001 на выполнение работ для государственных нужд в связи с невозможностью его исполнения в полном объеме по причине обнаружения несоответствия проектных решений. Указанное соглашение вступило в силу с даты его подписания сторонами.  

В соответствии с п. 2 соглашения о расторжении контракта, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента вступления в силу настоящего соглашения, за исключением обязательств по ответственности, предусмотренных разделом 6 контракта, гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 контракта.  

В связи с нарушением ответчиком условий контракта истцом начислены штрафные санкции.  

В целях принятия мер к досудебному урегулированию спора истцом в адрес ответчика направлена претензия от 19.07.2024 № 4712 с требованием об оплате начисленных неустоек.  

Однако претензионные требования оставлены ответчиком без финансового удовлетворения.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.  

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

По смыслу положений статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации выбор способа защиты права должен осуществляться с учетом характера спорного правоотношения и регулирующих его норм материального права и не может осуществляться заявителем произвольно.  

Перечень способов защиты гражданских прав, предусмотренный данной статьей, не является исчерпывающим, поскольку допускается возможность использования и других способов при условии, что это предусмотрено законом.  

Эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена своевременным заявлением возражений или встречного иска.  

Арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск.  

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его 4 условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.  

Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами.  

Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»).  

Возникшие между сторонами правоотношения регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).  

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) должна выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязан принять результаты работ и оплатить их.  

Как указано в статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Правилами статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (их полномочными представителями).  

Согласно положениям статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В соответствии с пунктом 6.5 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе обязательства по предоставлению обеспечения, предусмотренного пунктом 4.1.11 настоящего контракта, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой  

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

В связи с нарушением ответчиком обязательств по контракту в части срока выполнения работ истцом начислена неустойка в виде пени на общую сумму 4 959 012,95 руб.  

При этом из представленного расчета пени следует, что истцом при определении размера неустойки по каждому этапу применялась ставка Центрального Банка Российской Федерации, действовавшая в момент составления искового заявления, – 18 %.  

Однако при расчете неустойки истцом не учтено, что из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 26 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), а также из определений Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2018 N 302-ЭС18-10991 по делу N А33-16241/2017 и от 18.09.2019 по делу N А15-1198/2018, следует, что при расчете неустойки суду следует применять ключевую ставку, действующую на дату исполнения обязательства. Определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной подрядчиком просрочкой выполнения работ по контракту, наступила в момент окончания исполнения таких обязательств, в связи с чем при расчете неустойки следует руководствоваться ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день исполнения обязательства.  

При таких обстоятельствах неустойка в отношении отдельных этапов работ подлежит перерасчету.  

По расчету суда ((цена этапа – сумма выполненных обязательств) х 1/300 х ставка ЦБ РФ х количество дней просрочки) размер неустойки будет составлять следующие значения:  

- по 1 этапу: за период с 16.03.2023 по 12.05.2023 в размере 61 256,72 руб. (ставка ЦБ РФ 7,5 %), за период с 13.05.2023 по 14.06.2023 в размере 5 509,25 руб. (ставка ЦБ РФ 7,5 %);  

- по 2 этапу: за период с 18.04.2023 по 09.06.2023 в размере 28 548,71 руб. (ставка ЦБ РФ 7,5 %), за период с 10.06.2023 по 05.11.2023 в размере 8 902,64 руб. (ставка ЦБ РФ 15 %);  

- по 4 этапу: за период с 16.05.2023 по 05.10.2023 в размере 68 457,80 руб. (ставка ЦБ РФ 13 %);  

- по 5 этапу: за период с 01.06.2023 по 09.06.2023 в размере 7 581,73 руб. (ставка ЦБ РФ 7,5 %), ,за период с 10.06.2023 по 27.06.2023 в размере 14 062,27 руб. (ставка ЦБ РФ 7,5 %), за период с 28.06.2023 по 17.11.2023 в размере 161 384,99 руб. (ставка ЦБ РФ 15 %), за период с 18.11.2023 по 27.12.2023 в размере 42 478,20 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 28.12.2023 по 17.04.2023 в размере 50 255,93 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 18.04.2023 по 27.05.2023 в размере 16 227,20 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %);  

- по 6 этапу: за период с 16.06.2023 по 27.06.2023 в размере 35 687,32 руб. (ставка ЦБ РФ 7,5 %), за период с 28.06.2023 по 07.08.2023 в размере 135 527, 09 руб. (ставка ЦБ РФ 8,5 %), за период с 08.08.2023 по 05.10.2023 в размере 217 756,93 руб. (ставка ЦБ РФ 13 %), за период с 06.10.2023 по 17.11.2023 в размере 169 928,47 руб. (ставка ЦБ РФ 15 %), за период с 18.11.2023 по 27.12.2023 в размере 34 671,06 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 28.12.2023 по 21.03.2023 в размере 66 348,27 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 22.03.2023 по 27.05.2024 в размере 7 135,83 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 8 этапу: за период с 01.07.2023 по 17.11.2023 в размере 222 628,85 руб. (ставка ЦБ РФ 15 %), за период с 18.11.2023 по 21.03.2024 в размере 101 850,82 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 22.03.2024 по 27.05.2024 в размере 42 978,23 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 9 этапу: за период с 11.07.2023 по 27.05.2024 в размере 49 660,98 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 10 этапу: за период с 18.07.2023 по 27.12.2023 в размере 203 748,27 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 28.12.2023 по 27.05.2024 в размере 135 318,19 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 11 этапу: за период с 25.07.2023 по 27.05.2024 в размере 90 396,23 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

по 12 этапу: за период с 01.08.2023 по 06.09.2023 в размере 98 636,96 руб. (ставка ЦБ РФ 12 %), за период с 07.09.2023 по 21.03.2024 в размере 364 357,11 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 22.03.2024 по 27.05.2024 в размере 119 984,53 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 14 этапу: за период с 17.10.2023 по 05.11.2023 в размере 1 124,16 руб. (ставка ЦБ РФ 15 %);  

- по 15 этапу: за период с 31.01.2024 по 27.05.2024 в размере 613 129,14 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 16 этапу: за период с 01.11.2023 по 27.12.2023 в размере 31 653,36 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %);  

- по 17 этапу: за период с 01.11.2023 по 27.12.2023 в размере 22 114,72 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 28.12.2023 по 27.05.2024 в размере 68 158,30 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %),  

- по 18 этапу: за период с 21.11.2023 по 27.12.2023 в размере 192 824,19 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 28.12.2023 по 21.03.2024 в размере 75 402,05 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 22.03.2024 по 27.05.2024 в размере 43 413,41 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 19 этапу: за период с 16.01.2024 по 17.04.2024 в размере 19 270,63 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 18.04.2024 по 27.05.2024 в размере 7 469,03 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 20 этапу: за период с 26.01.2024 по 21.03.2024 в размере 46 015,18 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 22.03.2024 по 27.05.2024 в размере 7 135,66 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 21 этапу: за период с 01.02.2024 по 21.03.2024 в размере 120 304,51 руб. (ставка ЦБ РФ 16 %), за период с 22.03.2024 по 27.05.2024 в размере 163 435,76 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 22 этапу: за период с 02.04.2024 по 27.05.2024 в размере 122 963,53 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 23 этапу: за период с 23.04.2024 по 27.05.2024 в размере 41 952,49 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %);  

- по 25 этапу: за период с 16.05.2024 по 27.05.2024 в размере 10 558,29 руб. (ставка ЦБ РФ 18 %).  

На основании изложенного, суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению требование по пени на сумму 4 148 201,99 руб.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 6.3 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 782 050,00 рублей, 0,5% от цены контракта (этапа), определенном согласно Постановлению № 1042:  

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн., рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации  

установлен иной порядок начисления штрафов. 

В связи с нарушением ответчиком обязательств по контракту на основании данного  

пункта истцом начислен штраф в следующем размере: - по 5 этапу в размере 171 359,54 руб.; - по 6 этапу в размере 594 788,62 руб.; - по 8 этапу в размере 159 020,61 руб.; - по 10 этапу в размере 234 373,02 руб.; - по 11 этапу в размере 48 915,71 руб.; - по 12 этапу в размере 333 232,96 руб.; - по 15 этапу в размере 432 998,69 руб.; - по 17 этапу в размере 112 898,09 руб.; - по 18 этапу в размере 499 674,35 руб.; - по 19 этапу в размере 157 072,82 руб.; - по 20 этапу в размере 406 328,22 руб.; - по 21 этапу в размере 225 570, 95 руб.; - по 22 этапу в размере 182 981,44 руб.; - по 23 этапу в размере 199 773,78 руб.; - по 25 этапу в размере 146 642,89 руб. 

Представленный истцом расчет штрафа по пункту 6.3. контракта судом проверен и  

признан арифметически верным, в связи с чем данное требование подлежит  

удовлетворению. 

Кроме этого, пунктом 6.4 контракта предусмотрено, что за каждый факт  

неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства,  

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик  

выплачивает заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. 

Пунктами 11.1, 11.2 контракта предусмотрено, что все споры или разногласия,  

возникающие между сторонами по контракту, разрешаются путем переговоров и обмена  

письмами. Претензия стороны, направленная в досудебном порядке, подлежит  

рассмотрению в течение 7 дней с момента поступления. 

На основании п. 6.4 контракта за нарушение условий контракта, предусмотренных  

п.п. 11.1, 11.2 контракта, выразившееся в не ответе на претензию от 15.11.2023 № 7519,  

ООО «ВИТА СТРОЙ» начислен штраф в размере 100 000,00 рублей.  

На основании п. 6.4 контракта за нарушение условий контракта, предусмотренных  

п.п. 11.1, 11.2 контракта, выразившееся в не ответе на претензию от 21.1L2023 № 7633,  

ООО «ВИТА СТРОЙ» начислен штраф в размере 100 000,00 рублей.  

На основании п. 6.4 контракта за нарушение условий контракта, предусмотренных  

п. 11.2 контракта, выразившееся в не ответе на претензию от 05.02.2024 № 675, ООО  

«ВИТА СТРОЙ» начислен штраф в размере 100 000,00 рублей. 

На основании п. 6.4 контракта за нарушение условий контракта, предусмотренных  

п.п. 11.1, 11.2 контракта, выразившееся в не ответе на претензию от 05.02.2024 № 676,  

ООО «ВИТА СТРОЙ» начислен штраф в размере 100 000,00 рублей.  

На основании п. 6.4 контракта за нарушение условий контракта, предусмотренных  

п.п. 11.1, 11.2 контракта, выразившееся в не ответе на претензию от 08.02.2024 № 756,  

ООО «ВИТА СТРОЙ» начислен штраф в размере 100 000,00 рублей.  

На основании п. 6.4 контракта за нарушение условий контракта, предусмотренных  

п.п. 11.1, 11.2 контракта, выразившееся в не ответе на претензию от 22.05.2024 № 3066,  

ООО «ВИТА СТРОЙ» начислен штраф в размере 100 000,00 рублей.  

Представленный истцом расчет штрафа по пункту 6.4. контракта судом проверен и признан арифметически верным, в связи с чем данное требование также подлежит удовлетворению.  

При этом суд отмечает, что заявленные ответчиком доводы об отсутствии вины последнего в нарушении сроков исполнения обязательств отклоняются, поскольку при расчете штрафных санкций данные обстоятельства истцом приняты во внимание, в связи с чем соответствующие периоды исключены из расчета неустойки.  

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

При подаче искового заявления истцом была уплачена государственная пошлина в размере 70 323 руб. (платежное поручение № 470876 от 02.09.2024).  

В связи с тем, что исковые требования удовлетворены частично, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 64 299 руб.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 41, 64-71, 110, 156, 163, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ВИТА СТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ГБУЗ «ККБ № 2» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) штраф в размере 4 505 631,69 руб., неустойку в размере 4 148 201,99 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 64 299 руб.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья И.Н. Бондаренко