187_923098 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67-3990/2017  14.11.2017  

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Токарева Е. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  Советского района Города Томска ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Стройсоюз" ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>  

об обязании устранить недостатки выполненных работ 

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО2  (предъявлено служебное удостоверение), по доверенности от 04 сентября 2017 г.,  

от ответчика – представителя ФИО3 (предъявлен паспорт), по доверенности от  14.11.2017 г.,  

руководствуясь ст. 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  "Стройсоюз" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня  вступления в законную силу решения суда по настоящему делу устранить дефекты,  выявленные по результатам проведения выборочного капитального ремонта жилого дома по  адресу: 

<

...>, а именно:  

- заделать отверстия в перекрытиях первого и второго этажей после монтажа системы  вентиляции;  

- устранить «скрип» полов в коридорах, местах общего пользования, жилых  помещениях;  

- удалить грязь из межоконного пространства, образовавшуюся при установке  внутренних оконных блоков;  

-устранить и зашпаклевать излишки монтажной пены, образовавшейся при монтаже  внутренних оконных блоков и межкомнатных дверных блоков;  

- установить заглушку с фильтром на трубы системы канализации квартиры № 4;  - смонтировать отопительные приборы в квартире № 1  

- смонтировать на южном фасаде здания на прежнее место два резных  

наличника окон первого этажа; 

- смонтировать металлические отливы со стороны ул. Дзержинского;  - выполнить работы по вывозу кирпичей с чердака жилого дома;  

- выполнить работы по выведению фановых труб за пределы кровли;  

- установить (заменить) выключатель в местах общего пользования второго этажа  

жилого дома. 

Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти дней 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Токарев Е. А.