Арбитражный суд Липецкой области

пл.Петра Великого, д.7, г.Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-9645/2020

г.Липецк

17 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2022 года.  

Решение в полном объеме изготовлено 17 марта 2022 года.     

 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Канаевой А.В.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леликовой О.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройРемонт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: г.Липецк, ул.4-я Пятилетка, д.5, пом.5)

 

к обществу с ограниченной ответственностью «Электростиль Краснодар» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: Краснодарский край, г.Краснодар, 

<

...>, литер Б)

 

о взыскании 252 580 руб. 20 коп.,

 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, директора, протокол № 1 от 05.11.2020, приказ № 2 от 05.11.2020,

от ответчика – представитель не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройРемонт» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Электростиль Краснодар» о взыскании основного долга в размере 252 580 руб. 20 коп. 

Определением от 16.12.2020 иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства на основании пункта 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 17.02.2021 арбитражный суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Ответчик в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещался о начавшемся по делу судебном процессе.

Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания в соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации размещена арбитражным судом в сети «Интернет».

От ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

При таких обстоятельствах, на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие неявившегося лица.

В настоящем судебном заседании истец поддержал требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении и дополнительных пояснениях.

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв сроком на пять дней.

Информация об объявлении перерыва размещена на официальном сайте суда в сети «Интернет», что является публичным извещением.

После перерыва в судебное заседание не явился ответчик, суд считает возможным продолжить рассмотрение дела в его отсутствие.

Арбитражный суд, выслушав истца, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, установил следующее. 

Как видно из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройРемонт» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Электростиль Краснодар» (подрядчик) подписан договор субподряда № 23/06-2020 от 23.06.2020 (далее – договор), согласно которому субподрядчик обязуется выполнить по заданию и под контролем подрядчика электромонтажные работы на объекте «Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней (мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5 млн голов в год по убою и переработке свиней, вблизи н.п.Черницыно, Октябрьского района, Курской области», подробный перечень работ указан в приложении № 1 к договору, а подрядчик обязуется создать субподрядчику условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных договором цену.

Работы считаются выполненными субподрядчиком надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2, КС-3) (пункт 1.4 договора).

В соответствии с пунктом 5.1 договора субподрядчик за два рабочих дня до начала сдачи отдельных этапов работ информирует об этом подрядчика по электронной почте. Указанная информация вносится в журнал производства работ.

В пункте 5.2 договора предусмотрено, что по окончании работ субподрядчик направляет подрядчику справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), которые подписываются подрядчиком в течение 5 рабочих дней с даты их получения. В случае, если подрядчик не подписывает акт и справку и не направляет субподрядчику мотивированный отказ в подписании акта и справки, то считается, что работы приняты в полном объеме и без замечаний.

Субподрядчик письменно информирует подрядчика за 3 рабочих дня до начала приемки работ по мере их готовности. Субподрядчик приступает к выполнению последующих этапов работ только после подписания сторонами акта приемки этих работ (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.1 договора стоимость работ по договор определяется приложением № 1 к договору и является неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 5.2 договора подрядчик до начала работ оплачивает аванс из расчета 10 000 руб., в том числе НДС 20%, на каждого сотрудника судподрядчика (электромонтажника) занятого непосредственно в исполнении производства работ и присутствующего на строительной площадке (объекте) по данному договору.

Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика по реквизитам, указанным в договоре (пункт 6.4 договора).

В силу пункта 6.5 договора подрядчик производит оплату работ в течение 5 дней после подписания актов выполненных работ по форме КС-2.

Условием платежей является представление субподрядчиком подрядчику следующих документов:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного сторонами;

- счета на оплату;

- счета-фактуры, соответствующего требованиям статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

Датой исполнения обязательств подрядчика по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета подрядчика.

В пункте 6.6 договора стороны определили, что подписание договора означает, что:

6.7.1. Субподрядчик получил всю необходимую информацию о рисках, непредвиденных обстоятельствах и прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на работы или нанести им ущерб;

6.7.2. Субподрядчик принимает на себя всю ответственность и предвидит все сложности и расходы, связанные с успешным завершением работ;

6.7.3. Субподрядчик не вправе требовать увеличения фактической цены работ на сумму затрат, понесенных в связи с устранением недостатков, выявленных подрядчиком в процессе исполнения договора и в период гарантийного срока;

6.7.4. Субподрядчик проявил должную осмотрительность, тщательно изучил условия на стройплощадке и полностью ознакомился со всеми иными условиями, имеющими отношение к работам и окружающей среде, и субподрядчик принимает на себя риск затрат и последствий на момент формирования таких условий. Субподрядчик не имеет права на дополнительную оплату или иные средства защиты по причине существования того или иного условия на стройплощадке, если существование того или иного условия на стройплощадке не является форс-мажорными обстоятельствами. Во избежание сомнений, стороны согласны с тем, что если в ходе выполнения работ субподрядчик сталкивается с обстоятельствами, препятствующими субподрядчику выполнять свои обязанности, субподрядчик обязуется незамедлительно сообщить подрядчику таких обстоятельствах, предлагая необходимые изменения. В этом случае стороны в установленном порядке согласуют дополнительные действия и любую дополнительную компенсацию и/или дополнительный срок, если применимо в соответствии с договором;

6.7.6. Выполнение субподрядчиком работ, не предусмотренных рабочей документацией, без предварительного согласования с подрядчиком и не оформленных дополнительным соглашением к договору, оплате подрядчиком не подлежат.

В приложении № 1 к договору стороны определили объем и стоимость работ.

Согласно данному приложению стоимость работ по договору составляет 2 604 028 руб. 28 коп.

Ответчик перечислил истцу аванс по договору в размере 100 500 руб. следующими платежными поручениями:

- № 578 от 02.07.2020 на сумму 21 000 руб.;

- № 579 от 02.07.2020 на сумму 48 000 руб.;

- № 629 от 20.07.2020 на сумму 31 500 руб.

Как следует из пояснений истца, 28.07.2020 он направил ответчику по электронной почте акт по форме КС-2 для согласования, ответчик его не подписал и предложил внести исправления (т.1, л.д.54, 56).

06.08.2020 ответчик направил истцу посредством электронной почты сообщение с просьбой прислать акты по форме КС-2 с измененными показателями (т.1, л.д.113).

19.09.2020 истец письмом № 48 от 14.09.2020 направил ответчику окончательные исправленные акты по форме КС-2 и КС-3 на сумму 353 080 руб.  20 коп., счета на оплату №№ 40, 41 от 14.09.2020, письмо № 43 от 27.08.2020 и претензию № 47 от 07.09.2020 с требованием подписать акты выполненных работ и оплатить стоимость выполненных работ по договору (т.1, л.д.23-27, 54, 57-59).

В ответ на указанное письмо ответчик направил истцу письмо № 1009/3 от 09.10.2020, содержащее отказ от приемки работ, уведомление № 1009/4 от 09.10.2020 о расторжении договора и претензию № 1009/5 от 09.10.2020 с требованием с требованием о возврате денежных средств, перечисленных по договору в качестве аванса (т.1, л.д.117-123).

Неоплата ответчиком стоимости выполненных работ в полном объеме послужила основанием для обращения истца в суд.

Проанализировав условия подписанного между сторонами договора, суд приходит к выводу, что по своей правовой природе он является договором строительного подряда, и взаимоотношения сторон должны регулироваться нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Довод ответчика о том, что договор субподряда № 23/06-2020 от 23.06.2020 является незаключенным ввиду отсутствия в нем условия о сроках выполнения работ, не может быть принят судом во внимание по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации  договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что в договоре подряда должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы, которые являются существенными условиями данного договора.

По смыслу указанных правовых норм требования гражданского законодательства об определении периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора установлены с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон. Однако, если подрядчик выполнил работы, а заказчик их принял, то неопределенность в отношении сроков выполнения работ отсутствует. Следовательно, в этом случае соответствующие сроки должны считаться согласованными, а договор - заключенным.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 1404/10 от 18.05.2010 и № 13970/10 от 08.02.2011.

При наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования договора, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Из материалов дела видно, что ответчик перечислил истцу аванс по договору в размере 100 500 руб. и не оспаривал то обстоятельство, что истец приступил к выполнению работ по договору.

Кроме того, в последующем ответчик направил истцу уведомление о расторжении договора, позиционируя тем самым, что договор является заключенным.

Поскольку совокупностью представленных в материалы дела доказательств подтверждается, что стороны приступили к исполнению обязательств по договору (ответчик перечислил аванс, а истец приступил к выполнению работ), оснований для вывода о незаключенности договора не имеется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Таким образом, подрядчик, требующий оплаты выполненных работ, обязан подтвердить факт их выполнения.

Пунктом 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000             № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», если подрядчик не известил заказчика о завершении работ по договору и не вызвал его для участия в приемке результата работ, подрядчик не может ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ.

Таким образом, бремя доказывания факта выполнения работ и их сдачи заказчику возлагается на подрядчика (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 5.2 договора по окончании работ субподрядчик направляет подрядчику справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), которые подписываются подрядчиком в течение 5 рабочих дней с даты их получения. В случае, если подрядчик не подписывает акт и справку и не направляет субподрядчику мотивированный отказ в подписании акта и справки, то считается, что работы приняты в полном объеме и без замечаний.

Субподрядчик письменно информирует подрядчика за 3 рабочих дня до начала приемки работ по мере их готовности. Субподрядчик приступает к выполнению последующих этапов работ только после подписания сторонами акта приемки этих работ (пункт 5.5 договора).

В подтверждение факта выполнения работ по договору субподрядчик представил в материалы дела акт о приемке выполненных работ № 16 от 31.07.2020 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 16 от 31.07.2020 на сумму 353 080 руб.  20 коп., подписанные истцом в одностороннем порядке.                                           

Из пояснений самого истца следует, что указанные акт и справка направлены ответчику по почте 19.09.2020 письмом № 48 от 14.09.2020, получены им 09.10.2020 (т.1, л.д.54-59).

Таким образом, ответчик должен был направить истцу мотивированный отказ в подписании акта и справки в срок не позднее 16.10.2020.

Как следует из материалов дела, в установленный договором срок (09.10.2020) ответчик направил истцу письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ, оспаривая стоимость выполненных работ, ссылаясь на невозможность определения наименования выполненных работ в отсутствие журнала производства работ, а также на то, что указанные в акте расценки отсутствуют в приложении № 1 к договору, строка 35 акта дублируется со строками 22 и 27 акта (т.1, л.д.117-123). Кроме того, этой же датой (09.10.2020) ответчик направил истцу уведомление о расторжении договора и претензию с требованием о возврате авансового платежа.

Проанализировав основания для отказа от приемки работ, изложенные ответчиком в письме № 1009/3 от 09.10.2020, сопоставив акт о приемке выполненных работ № 16 от 31.07.2020 с приложением № 1 к договору, суд соглашается с доводом ответчика о несоответствии видов, объемов и стоимости работ, указанных истцом в акте, с расценками на выполнение работ, являющимися неотъемлемым приложением к договору.

В пункте 6.7.6 договора стороны согласовали, что выполнение субподрядчиком работ, не предусмотренных рабочей документацией, без предварительного согласования с подрядчиком и не оформленных дополнительным соглашением к договору, оплате подрядчиком не подлежат.

Истцом не представлено в материалы дела доказательств согласования с ответчиком видов и стоимости работ, указанных в акте № 16 от 31.07.2020.

При таких обстоятельствах, суд признает отказ ответчика от приемки выполненных работ обоснованным. 

Довод истца о том, что ранее указанные акты направлялись ответчику по электронной почте 10.08.2020, в связи с чем, работы считаются принятыми, не может быть принят судом во внимание, поскольку истцом документально не подтверждена принадлежность адреса электронной почты «aleks_779@mail.ru», на который направлялись документы, ответчику.

В ходе рассмотрения дела суд неоднократно предлагал истцу рассмотреть вопрос о назначении по делу судебной экспертизы с целью определения объема и стоимости работ, выполненных по договору.

Однако, истцом указанное ходатайство заявлено не было.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, оценив по своему внутреннему убеждению каждое доказательство в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании задолженности в сумме 252 580 руб. 20 коп. является необоснованным и удовлетворению не подлежит.

Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.   

При обращении в суд истец уплатил государственную пошлину в размере 8 052 руб. (платежное поручение № 71 от 01.12.2020).

Учитывая, что в удовлетворении исковых требований отказано, судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца и распределению не подлежат.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок со дня принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия судебного акта на бумажном носителе может быть направлена им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена им под расписку.

 

Судья                                                                                                             А.В.Канаева