Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-116465/2017

21 мая 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  10 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  21 мая 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

Истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "АТОМПРОЕКТ" (адрес:  Россия 197183, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул САВУШКИНА 82/А, ОГРН:  1089847342001);

Ответчик: Акционерное общество "Концерн Титан-2" (адрес:  Россия 123112, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ПОМЕЩЕНИЕ III, ОГРН:  1027812403035);

третье лицо:  

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 30.03.17

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 28.02.18

установил:

АО "АТОМПРОЕКТ" предъявило иск о взыскании с АО "Концерн Титан-2" 89 856 571 руб. 89 коп., составляющих 79 158 934 руб. 78 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 10 697 617 руб. 11 коп. пеней за просрочку платежа на основании договора  №4540/LN2 от 30.11.15.

Ответчик по основному долгу возражений не представил и заявил ходатайство об уменьшении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №4540/LN2 от 30.11.15 на выполнение работ по разработке рабочей документации, сопровождению ее на всех этапах при строительстве  Энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2.

Общая цена работ составляет 1 695 142 470 руб. 00 коп.  

Сроки этапов и окончание работ определяется графиком (приложение №9 к договору).

Истец – генеральный проектировщик выполнил работы на общую сумму 570 792 649 руб. 49 коп., что подтверждается подписанными сторонами актами сдачи-приемки работ №1047/РД, 1048/РД от 29.12.16,  1051/РД, 1052/РД от 29.12.16.

С учетом п.3.2 договора о поэтапной оплате работ ответчик – заказчик должен был оплатить 542 253 017 руб. 01 коп.

Оплата ответчиком произведена частично. Кроме того, сторонами подписано два соглашения о зачете  встречных однородных требований.

С учетом изложенного задолженность ответчика по оплате работ составляет 79 158 954 руб. 78 коп.

В соответствии с п.6.2 договора в случае нарушения заказчиком срока оплаты работ, заказчик выплачивает генеральному проектировщику пени в размере 0.035% от цены неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от цены неисполненного обязательства. 

Согласно расчету истца неустойка составляет 10 784 754 руб. 42 коп. Расчет проверен судом и признан правильным.

Основания для применения ст. 333 ГК РФ не усматриваются.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества "Концерн Титан-2" в пользу акционерного общества "АТОМПРОЕКТ" 89 856 571 руб. 89 коп., из них: 79 158 954 руб. 78 коп. основного долга и 10 697 617 руб. 11 коп. пеней, а также 200 000 руб. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.