АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

15 декабря 2017 года

Дело №

А55-23868/2017

Резолютивная часть решения оглашена 08 декабря 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 15 декабря 2017 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе

Судьи Бибиковой Н.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании  08 декабря 2017 года  08 декабря 2017 года дело по иску, заявлению

Общества с ограниченной ответственностью СТК "Меркурий"

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Межрегионэнергострой"

 

О взыскании 118 984 169 руб.67коп.

 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Строительная Компания-Самара»

2. Территориальное управление Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства МО Российской Федерации»,

3. Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное Военно-строительное Управление №14",

4. Федеральное Государственное унитарное предприятие "Главное Военно-строительное Управление № 2",

5. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская энергетическая компания»

 

по встречному иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Межрегионэнергострой"  об обязании Общества с ограниченной ответственностью СТК "Меркурий" принять оборудование, материалы и комплектующие в рамках исполнения договора №1203/15 от 12.03.2015.

 

при участии в заседании

от истца - представитель ФИО2, доверенность от 06.02.2017 №1, паспорт

от ответчика – представитель ФИО3, доверенность от 06.02.2017, паспорт

от третьих лиц:

1 – представитель ФИО2, доверенность от 06.12.2016, паспорт

2,3,4 – не явились

5 – ФИО4, доверенность о  11.01.2017 

 

Установил:

Общество с ограниченной ответственностью СТК "Меркурий" (далее – истец), с учетом уменьшения размера исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Межрегионэнергострой" (далее – ответчик) о взыскании 118 984 169 руб. 67 коп., в том числе 94 488 360 руб. – аванс по договору №1203/15 от 12.03.2015, 24 495 809 руб. 67 коп.  – неустойки.

Определением суда от 08.09.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Строительная Компания-Самара».

Определением от 11.10.2017 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Территориальное управление Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства МО Российской Федерации», Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное Военно-строительное Управление №14", Федеральное Государственное унитарное предприятие "Главное Военно-строительное Управление № 2", Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская энергетическая компания».

Общество с ограниченной ответственностью "Межрегионэнергострой" 07.11.2017 обратилось в Арбитражный суд Самарской области с встречным исковым заявлением к  Обществу с ограниченной ответственностью СТК "Меркурий" об обязании принять оборудование, материалы и комплектующие в рамках исполнения договора №1203/15 от 12.03.2015.

Определением от 14.11.2017 встречное исковое заявление принято к производству суда для его рассмотрения совместно с первоначальным иском.

В обоснование первоначального иска, Общество с ограниченной ответственностью СТК "Меркурий" ссылается на то, что в рамках исполнения договора от 12.03.2015 №1203/15 перечислил ответчику аванс в размере 126 283 093 руб. 30 коп. Однако, ответчик работы на сумму 94 488 360руб. не выполнил, указанные денежные средства не возвратил.

Возражая против удовлетворения первоначального иска, ответчик указывает на то, что истец, в нарушение условий договора, не подготовил посадочные места для установки и крепления инженерного оборудования и не подведены линии электроснабжения. Таким образом, истец своим неисполнением договора сделал все возможное, чтобы исполнитель (ответчик) не смог выполнить свою часть обязательств.

Обращаясь со встречным иском, ответчик просит обязать истца принять оборудование, материалы и комплектующие закупленные в рамках исполнения договора от 12.03.2015 №1203/15, поскольку на момент получения письма, содержащего отказа от исполнения договора, ответчиком уже были закуплены оборудование, материалы и комплектующие для монтажа очистный сооружений.

Истец в отзыве на встречное исковое заявление указывает на не предоставление ответчиком доказательств нахождения у него в собственности спорного оборудования, а расходы, понесенные на приобретение оборудования, в связи с чем основания зачета стоимости оборудования в счет аванса по договору отсутствуют.

Исследовав материалы дела, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд считает первоначальные исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению, в удовлетворении встречного иска следует отказать,  по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 12.03.2015 между ООО «Межрегиональная Строительная Компания-Самара» и ответчиком заключен договор №1203/15, согласно которому заказчик (ООО «Межрегиональная Строительная Компания-Самара») поручает, а исполнитель (ответчик) принимает на себя исполнение следующих обязательств: изготовить и поставить очистные сооружения соответствующие рабочей документации    БГЗ-Бригада-У-182/12-ОТ-1.20-1-ЛОС,   ДГЗ-Бригада-У-182/12-OT-l 2002-кос, Станцию 1 глубокой биологической очистки блочно-модульного типа хозяйственно-бытовых с точных вод КОС-АКВА-200 производительностью 200 мЗ/сут.  в количестве I (одной) штуки и в комплектности согласно спецификации (приложение№1); Очистные сооружения ливневых нефтезагрязненных поверхностных стоков блочно-модульного типа ПЛ-АКВА-100 производительностью 100 мЗ/час в количестве I (одной) штуки и в комплектности согласно Спецификации, выполнение работ по монтажу очистных сооружений на объекте заказчика; выполнение пуско-наладочных работ поставленного оборудования, а заказчик обязуется принять исполнение обязательств по настоящему договору и своевременно произвести расчеты с исполнителем согласно условиям настоящего договора.

В соответствии с п.1 ст.702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст.711 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (п.4 ст.753 Гражданского кодекса РФ).

Общая стоимость работ, согласно п. 2.1 договора составляет 185 341 985 руб. 20 коп. (п. 2.1).

Оплата выполненных исполнителем строительно-монтажных работ производится подрядчиком ежемесячно в течение 25 банковских дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления исполнителем оригиналов счета и счета-фактуры (п. 2.4).

Во исполнение условий указанного договора, заказчик перечислил ответчику аванс о обей сумме 126 283 093 руб. 30 коп., что подтверждается платежными поручениями №265 от 20.03.2015г. на сумму 40 000 000 руб.; №280 от 26.03.2015г. на сумму 80 000 000 руб.; №875 от 24.06.2015г. на сумму 2 000 000 руб.; №892 от 29.06.2015г. на сумму 2 000 000 руб.;       №900 от 01.07.2015г. на сумму 2 283 093,30 руб.

Срок выполнения обязательств по договору определен календарным планом (Приложение №3) и составляет: по изготовлению, доставке, монтажу и пуско-наладке станции глубокой биологической очистки блочно-модульного типа хозяйственно-бытовых сточных вод КОС-АКВА-200 - 122 дня с даты заключения договора, т.е. до 11.07.2015 года; по изготовлению очистных сооружений ливневых нефтезагрязнённых поверхностных стоков блочно-модульного типа ПЛ-АКВА-100 -185 дней, то есть до 20.09.2015 года.

01 июня 2016 года между заказчиком, ответчиком и ООО СТК «Меркурий» (истец) заключено трёхстороннее соглашение о перемене лиц в обязательстве, согласно которому ООО «Межрегиональная Строительная Компания - Самара» передало все прав и обязанности по договору истцу. Ответчиком указанное соглашение о перемене лиц в обязательстве подписано, в связи с чем, с 01.06.2016г. заказчиком по договору является ООО СТК «Меркурий».

Истец ссылается на то, что ответчик отчитался о выполнении работ по договору на сумму 25 511 640,00 руб., что подтверждается актом выполненных работ формы КС-2 №1 от 08.12.2015г. и справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3 №1 от 08.12.2015г. Кроме того, ранее ответчик платежными поручениями №430 от 23.06.2015г., №466 от 25.06.2015г. и №470 от 29.06.2015г. возвратил истцу денежную сумму в размере 6 283 093,30 руб.

С учетом изложенного, общий размер неотработанного аванса по договору составляет 94 488 360 руб., что подтверждается подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов по состоянию на июль 2016-декабрь 2016г.

Принимая во внимание, что срок выполнения работ по договору ответчиком нарушен на 600 дней, истец письмом исх. №24 от  11.05.2017 отказался от исполнения договора  в одностороннем порядке и потребовал возвратить неотработанный аванс.

Между тем,  ответчик требования истца о возврате неотработанного аванса не исполнил. Документы, подтверждающих выполнение на момент расторжения договора работ в счет перечисленного аванса не предоставил, что послужило основанием для обращения с первоначальным иском.

Пунктом 4 ст. 453 ГК РФ предусмотрено, что в том случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 данного кодекса лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 названного кодекса.

Из приведенных правовых норм следует, что в случае нарушения равноценности встречных предоставлений сторон на момент расторжения договора сторона, передавшая деньги либо иное имущество во исполнение договора, вправе требовать от другой стороны возврата исполненного в той мере, в какой встречное предоставление является неравноценным.

Принимая во внимание вышеизложенное и на основании ст.1102 ГК РФ требования истца о взыскании с ответчика суммы неосвоенного аванса обоснованы и подлежат удовлетворению.

Кроме того истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки 24 495 809 руб. 67 коп. за период с 21.03.2015 по 08.11.2017.

Согласно п. 2.15 договора в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, в срок до даты подписания итогового акта приемки выполненных работ, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

На основании п. 2.16  проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения исполнителем суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансировании Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Согласно ст. 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является взыскание неустойки.

В соответствие с ч. 1 ст. 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.        По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Возражая против заявленных требований, ответчик указывает на то, что  в соответствии с п. 3.2.5, 5.3.1. договора монтажные и пуско-наладочные работы производятся на предварительно подготовленных заказчиком фундаментах в соответствии с требованиями рабочей документации и п.3.2.4. заказчик обязан подготовить площадку для монтажа оборудования в соответствии с требованиями. Готовность строительной площадки для производства работ подтверждается двухсторонним актом.

Согласно п. 3.2.2. договора исполнитель обязан направить специалистов для монтажа инженерного оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления заказчиком о готовности площадки к началу проведения монтажных работ согласно п. 3.2.4. и ее соответствия требованиям рабочей документации БГЗ-Бригада-У-182/12-ОТ-1.20-1-ЛОС, ДГЗ-Бригада-У-182-/12-ОТ-1.2002-КОС."

Ответчик ссылается на то, что заказчик о готовности площадки к началу проведения монтажных работ исполнителя не уведомлял, фундаменты для проведения монтажных и пуско-наладочных работ до сих пор не подготовлены, а двухсторонние акты о готовности строительной площадки не подписаны.

В соответствии с п. 3.2.3. и п. 3.3.2. договора заказчик обязуется: подготовить посадочные места (фундаменты, закладные приспособления, опорно-базовые конструкции и т.п.) для установки и крепления инженерного оборудования в соответствии с проектом и конструктивными особенностями монтируемого оборудования; подвести линии электроснабжения по временной или постоянной схеме к площадке. Заказчик обязуется обеспечить подачу электроэнергии по категории электроснабжения, предусмотренной рабочей документацией.

Между тем, в нарушение требований договора по сегодняшний день заказчиком не подготовлены посадочные места для установки и крепления инженерного оборудования и не подведены линии электроснабжения.

Кроме того, ответчик указывает, что неоднократно просил заказчика о выполнении действий для надлежащего выполнения исполнителем работ:

Письмом исх. № 01/362 от 21.04.2015 исполнитель просил для поставки оборудования подготовить охраняемую площадку с искусственным основанием, ограждением и навесом площадью не менее 1000 м2, а также для производства работ подготовить посадочные места, подвести линии электроснабжения по временной или постоянной схеме к площадке.

Письмом исх. № 01/470 от 03.07.2015 г. исполнитель просил сообщить сроки выполнения бетонных работ для осуществления монтажных работ оборудования, а также предоставить раздел 11ПР и ПОС.

Письмом исх. № 01/516 от 21.08.2015 г. исполнитель просил сообщить сроки готовности фундаментов для проведения строительно-монтажных работ по установке КНС-1иКНС-2.

Ответчик также указывает на то, что рамках исполнения договора, заказчиком не были переданы исполнителю рабочая документация со штампом в производство работ и разрешение на строительство, необходимые для надлежащего выполнения работ исполнителем.

Письмом исх. № 01/1 от 10.01.2017 исполнитель уведомил заказчика о невозможности выполнения работ по договору без устранения существенных нарушений со стороны заказчика. Однако, заказчик нарушения так и не устранил, фундаменты и площадку для выполнения работ не подготовил, а разрешение на строительство и рабочую документацию не передал.

Таким образом, ссылаясь на отсутствие своей вины, ответчик просит отказать в удовлетворении требований о взыскании неустойки.

Между тем, в силу норм ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Принцип свободы договора предусматривает предоставление участникам гражданских правоотношений в качестве общего правила возможности по своему усмотрению решать вопрос о вступлении в договорные отношения с другими участниками и определять условия этих отношений, а также заключать договоры, и предусмотренные, и не предусмотренные законом.

В силу пункту 1 статьи 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, лицо должно проявлять должную осторожность, осмотрительность и разумность при заключении сделок, в противном случае риски последствий неосмотрительного и неразумного поведения возлагаются на субъект такого поведения.

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (пункт 1 статьи 9 ГК РФ).

Вместе с тем, проверив представленный истцом расчет неустойки, суд пришел к выводу о неверном определении истцом начала периода просрочки, поскольку обязательства ответчика о возврате неосвоенного аванса в силу ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации возникают с момента расторжения спорного договора.

Из материалов дела следует, что письмо истца с уведомлением об отказе от исполнения договора, получено ответчиком 13.06.2017, с учетом изложенного период начисления неустойки следует исчислять с указанной даты.

При таких обстоятельствах, требовании истца о взыскании неустойки следует удовлетворить в размере 3 401 580руб.96коп. В остальной части искового заявления о взыскании неустойки следует отказать.

В обоснование встречного иска, ответчик ссылается на то, что в рамках исполнения спорного договора закупил следующее оборудование: Кассета габаритными размерами 970х870х500мм 28 шт; Емкость габаритными размерами 1300х1300х1300 1 шт.; Корпус КНС диаметром 2000мм длиной 5000мм. включая лестницу и площадку обслуживания 2 шт.; Труба ПЭ100 SDR 17-0090x5,4 питьевая 156 м.; Труба ПЭ100 SDR 17-0110x6,6 питьевая  60м.; Труба ПЭ100 SDR 17-0160x9,5 питьевая            156 м.; Труба ПЭ100 SDR 17-0225x13,4 питьевая 120 м.; Труба ПЭ100 SDR 17-0500x29,7 питьевая 39 м.; Труба ПЭ100 SDR 17-0560х33,2 питьевая 12 м.; Труба ПЭ100 SDR 17-0630х37,4 питьевая 65 м.; Втулка п/фланец 0040 ПЭ100 SDR11 2шт.; Втулка п/фланец 0500 ПЭ100 SDR17 кор. 12 шт.; Втулка п/фланец 0630 ПЭ100 SDR17 кор. 4 шт.; Переход 0500х0315мм ПЭ100 SDR11 св. короткий           3 шт.; Переход 0630х0500 ПЭ100 SDR17 короткий 1 шт.; Тройник 630х315х630 ПЭ100 SDR17 1 шт.; Втулка п/фланец 032 ПЭ100 SDR11 6шт.; Втулка п/фланец 063 ПЭ100 SDR17 24шт.; Втулка п/Фланец 0075 ПЭ100 SDR17 2 шт.; Втулка п/фланец 0090 ПЭ100 SDR17 36шт.; Втулка п/фланец 0110 ПЭ100 SDR17 10 шт.; Втулка п/фланец 0160 ПЭ100 SDR17 13 шт.; Втулка п/фланец 0225 ПЭ100 SDR17 удл. 28 шт.; Втулка п/фланец 0315 ПЭ100 SDR17 3шт.; Муфта 0032мм ПЭ100 SDR11 эл/св 10 шт.; Муфта 0063мм ПЭ100 SDR11 эл/св 12шт.; Отвод 0032х90гр ПЭ100 SDR11 удлинена 15шт.; Отвод 0063х90гр ПЭ100 SDR17 удлинен 9 шт.; Отвод 0090х90гр ПЭ100 SDR17 удлинен 27 шт.; Отвод 0110х90гр ПЭ100 SDR17 удлинен 7 шт.; Отвод 0160х90гр ПЭ100 SDR17 удлинен 23 шт.; Отвод 110х45гр ПЭ100 SDR17 св 2 шт.; Отвод 160х45гр ПЭ100 SDR17 св 2 шт.; Отвод 225х45гр ПЭ100 SDR17 св 4 шт.; Отвод 225х90гр ПЭ100 SDR17 св 18 шт.; Отвод 500х90гр ПЭ100 SDR17 cварной 1 шт.; Отвод 560х90гр ПЭ100 SDR17 cв 1 шт.; Отвод 630х15гр ПЭ100 SDR17 свварно 1 шт.; Отвод 630х90гр ПЭ100 SDR17св  4 шт.; Отвод 90гр 0020мм ПЭ100 SDR11 эл/св 3            шт.; Отвод 90гр 0025мм ПЭ100 SDR11 эл/св 2 шт.; Отвод 90гр 0032мм ПЭ100 SDR11 эл/св 25 шт.; Отвод 90гр 0040мм ПЭ100 SDR11 эл/св 4 шт.; Отвод 90гр 0040мм ПЭ100 SDR11 эл/св 2            шт.; Отвод 90гр 0063мм ПЭ100 SDR11 эл/св 23 шт.; Отвод 90гр 0090мм ПЭ100 SDR11 эл/св 4 шт.; Отвод 90гр 0110мм ПЭ100 SDR11 эл/св 2 шт.; Отвод 90гр 0225мм ПЭ100 SDR11 эл/св           11шт.; Переход 0032х0020мм ПЭ100 SDR11 эл/св 2 шт.; Переход 0032х0025мм ПЭ100 SDR11 удлин 2шт.; Переход 0040х0032мм ПЭ100 SDR11 эл/св 1шт.; Переход 0063х0032мм ПЭ100 SDR11 удлин 9 шт.; Переход 0063х0032мм ПЭ100 SDR11 эл/св 10 шт.; Переход 0063х0040мм ПЭ100 SDR11 удлин 2 шт.; Переход 0063х0040мм ПЭ100 SDR11 эл/св 1 шт.; Переход 0090х0063мм ПЭ100 SDR11 удлин 3 шт.; Переход 0090х0063мм ПЭ100 SDR11 эл/св 10 шт.; Переход 0110х0063мм ПЭ100 SDR17 удлин 3шт.; Переход 0110х0075мм ПЭ100 SDR11 удлин 2 шт.; Переход 0110х0090мм ПЭ100 SDR11 удлин           2 шт.; Переход 0160х0090мм ПЭ100 SDR17 удлин 4 шт.; Переход 0160х0110мм ПЭ100 SDR17 удлин 8 шт.; Переход 0225х0160мм ПЭ100 SDR17удлин 4 шт.; Переход 0225х0160мм ПЭ100 SDR11 эл/св 2 шт.; Переход 0315х0225мм ПЭ100 SDR17 коротк 1 шт.; Переход пэ/медь 0020х1/2"мм ПЭ100 SDR11 c HP 7 шт.; Переход пэ/медь 0025х3/4"мм ПЭ100 SDR11 c ВР 2 шт.; Переход пэ/медь 0032х1"мм ПЭ100 SDR11 c внутр. Резьбой 13шт.; Переход пэ/медь 0032х1"мм ПЭ100 SDR11 c наружн. Резьбой 9шт.; Переход пэ/медь 0040х1,1/4"мм ПЭ100 SDR11 c В.Р 2 шт.; Переход пэ/медь 0040х1,1/4"мм ПЭ100 SDR11 c Н.Р 8 шт.; Переход пэ/медь 0063х2"мм ПЭ100 SDR11 c Н.Р 15 шт.; Переход пэ/сталь 110х108 ПЭ100 SDR11 8 шт.; Седелка с/о НЧ пов 360гр ПЭ100 SDR11 эл/св GF 153  шт.; Головная часть сед063х020мм с ус-ом фрезы ПЭ100 SDR11 эл/св GF 3шт.; Седелка с/о НЧ пов 360гр ПЭ100 SDR11 эл/св GF 288 шт.; Седелочный отвод 225х090мм ПЭ100 SDR11 эл/с 2 шт.; Седелочный отвод 500-630х110мм б/о части ПЭ100 SDR11 эл/с 3     шт.; Тройник 0032мм ПЭ100 SDR11 эл/св  3шт.; Тройник 0040мм ПЭ100 SDR11 эл/св  1 шт.; Тройник 0063мм ПЭ100 SDR11 эл/св  11шт.; Тройник 0063х90гр ПЭ100 SDR11 удлин  2 шт.; Тройник 0090мм ПЭ100 SDR11 эл/св  3шт.; Тройник 0090х90гр ПЭ100 SDR17 удлин  4      шт.; Тройник 0110х90гр ПЭ100 SDR17 удлин  4       шт.; Тройник 0160х90гр ПЭ100 SDR17 удлин   6 шт.; Тройник 0225мм ПЭ100 SDR11 эл/св 2шт.; Тройник 225х90гр ПЭ100 SDR17 св  6 шт.; Тройник 630х90гр ПЭ100 SDR17 сварной 3шт.; Фланец 1-025-10(Ду 25 Ру10) стальной плоский прив  4 шт.; Фланец 1-032-10(Ду 32 Ру10) стальной плоский прив  2 шт.; Фланец 1-080-10(Ду 80 Ру10) стальной плоский прив 2 шт.; Фланец с покрытием ПП 0032мм       6 шт.; Фланец с покрытием ПП 0040мм  2шт.; Фланец с покрытием ПП 0063мм       22шт.; Фланец с покрытием ПП 0075мм  2шт.; Фланец с покрытием ПП 0090мм  29 шт.; Фланец с покрытием ПП 0110мм  10           шт.; Фланец с покрытием ПП 0160мм  14 шт.;  Фланец с покрытием ПП 0225мм  28 шт.; Фланец с покрытием ПП 0315мм  3шт.; Фланец с покрытием ПП 0500мм 12шт.; Фланец с покрытием ПП 0630мм  4шт.; Муфта 0110мм ПЭ SDR11 эл/св  1 шт.; Муфта 040мм ПЭ SDR11 эл/св  4шт.; Шаровый кран 063мм П/Э100 SDR11  6шт.; Шаровый кран 040мм П/Э100 SDR11  1шт.; Шаровый кран 032мм П/Э100 SDR11    4шт.; Седелка с/о НЧ 225х063 пов 360гр ПЭ100 SDR11 эл/св GF  2шт.; Головная часть сед063х020мм с ус-ом фрезы ПЭ100 SDR11 эл/св GF  2шт.; Труба ПЭ100 SDR11-0032x3,0 питьевая 100шт.; Труба ПЭ100 SDR17-0040х2,4 питьевая 4шт.; Труба ПЭ100 SDR17-0063х3,8 питьевая 200шт.; Сендвич панели-МВП-К/6650х1000х100(7004/9002)   246,05 м2; Сендвич панели-МВП-С/6090х1190х100(9002/9002) 7,247м2.; Сендвич панели-МВП-К/3350х1190х100(9002/9002)  3,986м2; Сендвич панели-МВП-С/5980х1190х100(9002/9002)  362,926м2; Сендвич панели-МВП-С/5990х1190х100(9002/9002)  285,124м2; Сендвич панели-МВП-С/3750х1190х100(9002/9002)  4,462м2; Сендвич панели-МВП-С/3390х1190х100(9002/9002) 4,034м2; Сендвич панели-МВП-С/2760х1190х80(9002/9002)  16,422 м2; Сендвич панели-МВП-С/2660х1190х80(9002/9002)              15,827м2; Сендвич панели-МВП-С/2920х1190х80(9002/9002)  38,222м2; Сендвич панели-МВП-С/2820х1190х80(9002/9002)   26,846м2; Сендвич панели-МВП С/2200х1190х80(9002/9002) 7,854 м2;СНТ 5G 19 5,5/6,3х135 самосверлящий самонарезающий винт с шайбой (EPDM) 850 шт.; СНТ 5G 19 5,5/6,3х120 самосверлящий самонарезающий винт с шайбой (EPDM) 250 шт.;  СНТ 5G 19 5,5/6,3х185 самосверлящий самонарезающий винт с шайбой (EPDM) 1050 шт.; Балка ростверка БР1 L=6008mm   1 шт.; Балка ростверка БР1-1 L=6008mm 1шт.; Балка ростверка БР2 L=5996mm  4шт.; Балка ростверка БР3 L=5996mm  2шт.; Балка ростверка БР3-1 L=5996mm  2шт.; Балка ростверка БР4 L=6008mm  1шт.;  Балка ростверка БР4-1 L=6008mm  1шт.; Балка ростверка БР5 L=5396mm   7шт.; Связь Сф1  1/1 к-т/уп; Связь Сф2  1/1к-т/уп.; Связь Сф3  1/1к-т/уп.; Связь Св1   4/4к-т/уп; Связь Св2   2/2       к-т/уп; Связь Св3 2/2           к-т/уп; Связь Св4  2/2к-т/уп; Связь Св5  2/2к-т/уп; Связь Св6  2/1к-т/уп; Связь Св7  1/1к-т/уп; Связь Св8, Св9, Св10, Св11, Св12, Св13           6/1к-т/уп; Швелер 120х50х3мм L=12m Пр1  21шт.; Ригель Р1 L=2790мм           4шт.; Ригель Р2  L=2860мм   20шт.; Ригель Р3  L=2780мм  6шт.;  Ригель Р4  L=2860мм   1шт.; Ригель Р5  L=2780мм   1    шт.; Ригель Р6  L=2810мм   2шт.; Ригель Р7  L=1000мм   1шт.; Ферма Ф-1      2шт.; Ферма Ф-1-1  3шт.; Ферма Ф-2   9 шт.; Стойка Су1 Н=5604мм              1шт.; Стойка Су1-1 Н=5604мм  1            шт.; Стойка Ср1 Н=5604мм 12шт.; Стойка Ср1.1 Н=2774мм 4шт.; Стойка Су2.1 Н=2690мм   1шт.; Стойка Су2.1-1 Н=2690мм  1шт.; Стойка Су2.2 Н=2690мм   1шт.; Стойка Су2.2-1 Н=2690мм   1 шт.; Стойка Су1.2  Н=8504мм   1шт.; Стойка Су1.2-1 Н=8504мм 1 шт.; Стойка Ср1.1  Н=8504мм    1шт.; Стойка Ср1.1-1  Н=8504мм  1шт.; Стойка Ср1.2  Н=8504мм 4шт.; Стойка Су1.3 Н=8504мм 1шт.; Стойка Су1.3-1 Н=8504мм 1шт.; Стойка С1 Н=2530мм  2шт.; Стойка С1-1 Н=2530мм   3шт.; Стойка С2 Н=2764мм 2           шт.; Труба кв. 100х5мм С3 Н=2650мм  1шт.; Стойка С4 Н=8530мм   1      шт.; Пластина Д1 320х400 s=10мм          2шт.; Болт М20-6gx45.58.019   1/139к-т/уп;  Болт М20-6gx60.58.019            1/108   к-т/уп; Болт М24-6gx60.58.019  1/56к-т/уп;  Болт М24-6gx60.58.019    1/102            к-т/уп; Шайба 24.019  1/168 к-т/уп;  Шайба 24.019 увелич. Шайба  1/92к-т/уп; Гайка М20-7Н.58.019    1/242к-т/уп; Анкер 24х150  1/139         к-т/уп; Лента самоклеещаяся диффгустбанд   180 п/м;  Герлен (для кровельных панелей)  260м.; Площадка Пл1 3070х4225       1шт.; Площадка Пл1.1 2930х4225  1шт.;  Площадка Пл2 3060х5720   1шт.; Площадка Пл2.1 750х930   1   шт.; Площадка Пл3 770х4560   3    шт.; Площадка Пл3.1 2200х4560   2шт.; Площадка Пл3.2 870х1350  1        шт.; Площадка Пл3.3 900х1800          1шт.;   Площадка ПП1 3070х6000х220   1шт.; Ограждения ОГ1   2компл.;  Ограждения ОГ2      1компл.; Ограждения ОГ3  1компл.; Ограждения ОГ4 1компл.;  Ограждения ОГ5        1компл.; Ограждения ОГ6               1компл.;  Ограждения ОГ7  2компл.;  Ограждения ОГ8   1 компл.; Ограждения ОГ9  1компл.; Ограждения ОГ10  1компл.; Ограждения ОГ11              1  компл.; Ограждения ОГ12   1 компл.; Ограждения ОГ13   1 компл.; Ограждения ОГ14   1  компл.;  Ограждения ОГ15   1           компл.; Ограждения ОГ16  1 компл.; Ограждения ОГ16-1   1  компл.;  Ограждения ОГ17  1            компл.; Ограждения ОГ17-1 1  компл.; Ограждения ОГ18   1  компл.;  Ограждения ОГ18-1             1 компл.; Ограждения ОГ191 компл.; Стойка Сп1   4  шт.; Стойка Сп1.1   2шт.; Стойка Сп2   2  шт.;  Стойка Сп2.1 4 шт.; Стойка Сп2.2               2 шт.;  Стойка Сп3              10  шт.; Стойка Сп3.1  3шт.; Стойка Сп3.2        2 шт.; Стойка Сп3.3 4 шт.; Связь Свп1   2компл.; Связь Свп2   1компл.;  Связь Свп3 1 компл.; Связь Свп4  2компл.; Связь Свп5   2компл.;  Связь Свп6   1     компл.; Связь Свп7 3компл.; Связь Свп8    3компл.; Связь Свп9  1компл.; Связь Свп10 Труба 100х5мм L=176мм  12         компл.; Связь Свп11              8 компл.; Лестничный марш Лм1               1 компл.; Лестничный марш Лм2  1            компл.; Лестничный марш Лм3  1 компл.; Профлист НС44-0,7 для потолка (2эт)  36лист; Труба кв. 50х2 L=6000 24 шт.; БПК 2000 ШУ №3; №4.  2шт.; Шкаф 9А   4 шт.; Шланг FESTO - 0,25            50м.; Самопромывающийся фильтр тонкой очистки промывной ORG-020 производительность 20 м3/час  1компл.; Труба пластиковая 110 х 1060   1           шт.; Труба пластиковая 110 х 1100  1шт.;  Труба пластиковая 110 х 750  1шт.; Труба пластиковая 110 х 300  1шт.;  Труба пластиковая 50 х 1050  2шт.; Труба пластиковая 50 х 300   1шт.; Труба пластиковая 50 х 540   1шт.; Шланг d 32 х 1000              2шт.; Сетка фильтровальная 1504 х 13550   2шт.; Патрубок ПП 110   1шт.; Отвод пластиковый 110   9 шт.; Отвод пластиковый 50               6шт.; Комбинированный фильтр Honeywell FK06 -1AA  2     шт.; Расходомер для рабочего раствора флокулянта РСМ05-05 Ду32     1шт.; Расходомер для осадка РСМ05-03 Ду80  1шт.; Расходомер для  раствора флокулянта РСМ05-05 Ду25  2шт.; Блок индикации БИ 05  4  шт.; Шкаф управления к ленточному фильтр-прессу  1шт.;  Насос промывной воды LOVARA 15НМ05 производительность до 15 м3/час   1         шт.;  Шкаф управления ШУ 101206.00.000ПС  1            шт.; Клапан BANFOSS 1шт.; Коплект мешалок и труб  к Установке приготовления раствора флокулянта АУПФ-5  37 штук  1 компл.; Комплект мешалок и труб к Автоматическая установка приготовления раствора флокулянта АУПФ-2  35 штук 1 компл.; Насос-дозатор AEB 1F 50 производительность 0.4-1.9 м3/час  4 шт.; Насос-дозатор AEB 1F 403 производительность 4.2-25 м3/час  1 шт.; Электропривод ЭП-3-630-48-В-0-А-У1  2 шт.; Электропривод ЭП-3-630-24-В-0-А-У1 2шт.; Установка приготовления раствора флокулянта АУПФ-5 производительность до 5м3/час  1   компл.; Автоматическая установка приготовления раствора флокулянта АУПФ-2 в к-т с шкафом управления   1 компл.; Резевная емкость для приготовления раствора флокулянта с электромешалкой и диспергатором V=4.5 v3  1 шт.; Бункер песковой  с ворошителем БПК 2000В  2шт.; Ленточный фильтр-пресс ЛФ-1500П производительность 10-15 м3/час            1шт.; Комплектующие к бункеру БПК 2000В 6 изделий 1 комплект; Комплектующие к бункеру БПК 2000В 5 изделий 1 комплект; Комлектующие к Автоматической установке приготовления раствора флокулянта АУПФ-2 в к-т с 5 изделий (электродвигатель Asynchronous AT 71 B-6 4шт. Колба 1шт.)  1комплект; Саморез 6.3/5.5х135   1250 шт.; Задвишка 1/2 PN 16   3шт.; Хомут 57х64  10шт.; Хомут 82х90  8шт.; Хомут 87х93  10шт.; Хомут 54х60  8шт.; Хомут 108х112  19 шт.; Хомут 72х77  3          шт.; Хомут 47х53  5 шт.; Хомут 29х32  3 шт.; КРШ 25 1 шт.; Задвишка PN 10/16-150 1 шт.; Резьба приварочная d89  4 шт.; Фляниц d80   1 шт.; Резьба приварочная d59  3 шт.; Переход 76х50  3 шт.; Отвод 56   5шт.;  Тройник пластик 89х89х89  1шт.; Заглушка пластик d100   1шт.; Угол ППР 63х90  10 шт.; Тройник ППР 63х25х63 2шт.; Муфта ППР d63  2шт.;  ШР ППР d25  2шт.; Угол ППР d50  3шт.;  Угол ППР d25  2шт.; Угол ППР комбенированный d25х3/4   2шт.; Переход ППР 63х50   1шт.;  Муфта ППР d50  1шт.;  КШР d25          1 шт.; Баченок латунный d50  2шт.;  Штуцр d25  1шт.;  Переход латуный 32х20   1шт.; Обратный клапан d 50  1 шт.;  Скоба металлическая  2шт.; Приворной штуцр d32   2 шт.; Фляниц PVC PN10-16 d65   2 шт.; Серьга М24  3шт.; Цапа 5шт.; Пружина 1шт.; Фиксирующие кольцо d180  22 шт.; Муфта гибкая  29            шт.; Муфта d16  84шт.; Муфта d20  20шт.;  Малярная лента 1шт.; Трубка d20   45 шт.; Коробка 100х100х50  1шт.; Коробка 80х80х40   1шт.;  Флянец 220х30     1шт.;  Флянец пластик PVC d40   1   шт.;  Флянец пластик PVC d50   4 шт.; Угол пластик d50 8шт.; Угол пластик d65  4шт.; Муфта пластик d75  5            шт.; Муфта пластик d63  2  шт.; Муфта пластик d90  4          шт.; Тройник пластик 65х65х65      1шт.; Тройник пластик 63х63х63              1шт.; Американка металлическая 63х50   1шт.; Американка 63х50  3шт.;  Американка 63  1шт.;  Муфта 90х63  1  шт.;  Установка очистки ливневых нефтезагр. Поверхностных стоков БМТ Л.ЭСТ-10  2компл.;  Кассеты в комплекте с ЛОС  80 шт.; Решетка. Покрытие Ферротан по грунту Феротан ПРО   1шт.; Центробежный насос Amarex KRTF 50-210/032UH-S   4шт.; Поплавковый датчик уровня с кабелем 10м, id 11037744  8шт.; Центробежный насос Amarex KRTK 80-251/122UG-S          2шт.; Установочное колено Ду80/Ру16, id19555771 2шт.;  Поплавковый датчик уровня с кабелем 10м, id 11037744    4шт.; Центробежный насос Amarex KRTK 80-251/252UG-S   2шт.;  Установочное колено Ду80/Ру16, id19555771 2шт.; Поплавковый датчик уровня с кабелем 10м, id 11037744   4шт.; Центробежный насос Amarex KRTK 300-400/506UG-S   3шт.; Поплавковый датчик уровня с кабелем 10м, id 11037744  6шт.

Ответчик ссылается на то, что на момент получения письма содержащего отказ от исполнения договора, в рамках выполнения работ по договору, ответчиком уже были закуплены оборудование, материалы и комплектующие для монтажа очистных сооружений ПЛ-АКВА-100, о чем истцу неоднократно сообщалось ранее письмами (исх. № 99 от 13.04.2016 г., исх. № 295 от 07.12.2016 г., исх. № 111 от 11.08.2017 г.).

В связи с получением истцом от ответчика письма содержащего отказ от исполнения Договора, письмом исх. № 136 от 12.09.2017 г. истец предложил ответчику принять оборудование в счет перечисленного ранее аванса, в соответствии с прилагаемым перечнем. В ответ на данное письмо ответчик отказался принимать у Истца закупленные материалы и оборудование поскольку они не представляют для него ценности.

Согласно п. 7.4. договора в случае отказа от исполнения обязанностей, предусмотренных договором, сторона, заявившая отказ, обязана возместить убытки, причиненные таким отказом, другой стороне в полном объеме.

Ответчик указывает на то, что 02 октября 2017 г. заказным письмом ответчику была направлена претензия (исх. №146 от 28.09.2017 г.) с требованием принять у истца закупленные для выполнения работ по договору оборудование, материалы и комплектующие в счет перечисленного ранее аванса, в срок до 18 октября 2017 г. до настоящего времени ответчик никак не отреагировал на данную претензию, закупленные истцом материалы и оборудование, в рамках исполнения обязательств по договору не принял.

Ответчик указывает на то, что поскольку истец отказался от исполнения договора, а оборудование, материалы и комплектующие для выполнения работ в рамках договора уже закуплены, ответчик несет убытки вследствие произведенных затрат.

Согласно статьям 486, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель согласно пунктам 1, 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан оплатить поставляемый товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453 Кодекса).

Условий относительно того, что заказчик несет обязанность о принятии оборудования, приобретенного подрядчиком, вне зависимости от исполнения договора, спорный договор не содержит.

Кроме того, ответчик в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств того, что указанное оборудование приобретено в рамках исполнения договора №1203/15 от 12.03.2015, не представлено документов, устанавливающих его стоимость.

На основании вышеизложенного, в удовлетворении встречного иска следует отказать.

Согласно ст. 110 судебные расходы относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст.  ст.110,168-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Межрегионэнергострой", Санкт-Петербург,  г. Пушкин   в пользу Общества с ограниченной ответственностью СТК "Меркурий",  г. Самара 97 889 940руб.96коп., в том числе: 94 488 360руб.- сумма неосвоенного аванса, в связи с расторжением договора  подряда от 12.03.2015 №1203/15, 3 401 580руб.96коп.-неустойка, начисленная за просрочку возврата  вышеуказанного аванса в период с 13.06.2017 по 08.11.2017г, а также 164 543руб. –расходы по госпошлине.

В остальной части иска отказать.

По встречному иску:

В иске отказать.

Судебные расходы отнести на Общества с ограниченной ответственностью "Межрегионэнергострой", Санкт-Петербург,  г. Пушкин.

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья

 

/

Н.Д. Бибикова